АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело  № А19-10860/2022

г. Иркутск

16 сентября 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2022 года. Полный текст решения изготовлен 16 сентября 2022 года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи С.Н. Швидко, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.Д. Ширяевой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Муниципального казенного учреждения «Дирекция капитального строительства и ремонта» муниципального образования города Братска (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: Иркутская область, г. Братск) к Муниципальному предприятию «Дирекция капитального строительства и ремонта» муниципального образования города Братска (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место нахождения: Иркутская область, г. Братск) об устранении строительных дефектов и недостатков,

при участии:

от истца: не явились;

от ответчика: не явились;

установил:

МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» об устранении строительных дефектов и недостатков по муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в городе Братске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Братска.

Впоследствии истец, в порядке ст. 49 АПК РФ неоднократно уточнял исковые требования, окончательно определив их в следующем виде: обязать ответчика в трехмесячный срок  с момента вынесения решения суда  в рамках выполнения гарантийных обязательств по контрактам, безвозмездно устранить выявленные недостатки выполненных работ (результата работ) в многоквартирных домах. 

Уточненные требования приняты судом к рассмотрению. 

Истец в судебное заседание не явился, о дате и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Ответчик в судебное заседание не явился, о дате и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, отзыв на исковое заявление не представил. 

Дело рассматривается в порядке ст. 156 АПК РФ, без участия сторон, по имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд, проверив материалы дела, установил следующее. 

02.12.2016, 19.12.2016, 16.01.2017 между истцом (участник долевого строительства) и ответчиком (застройщик) заключены муниципальные  контракты № Ф.2016.358986, № Ф.2016.398488, № Ф.2016.482741, № Ф.2016.359584, № Ф.2016.407094, № Ф.2016.407037, № Ф.2016.407118, № Ф.2016.359232; № Ф.2016.407103, № Ф.2016.482741, № Ф.2016.398464, № Ф.2016.406781, № Ф.2016.398350, № Ф.2016.482741   на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в городе Братске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Братска.

По условиям данных контрактов ответчик принял на себя обязательство в предусмотренный срок своими силами или с привлечением других лиц построить (создать) группу многоквартирных жилых домов с подводящими сетями и благоустройством прилегающей территории,  по адресу: г. Братск, ж.р. Падун, ул. Набережная, 

<

...>, 30Б, 32, 34, 36А, в том числе в соответствии с техническим заданием (описание объектов долевого строительства) и после получения разрешения на ввод многоквартирных жилых домов, в котором находятся объекты долевого строительства, в эксплуатацию  передать участнику долевого строительства объекты долевого строительства, указанные в пункте 1.2 контракта, а участник долевого строительства обязался уплатить обусловленную договором цену и принять указанные объекты долевого строительства  при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов (пункт 1.1 контрактов). Согласно пунктам 2.1 контрактов, застройщик обязался передать участнику долевого строительства квартиры не позднее 15.08.2017, после получения разрешения на ввод многоквартирных жилых домов в эксплуатацию. Датой передачи является дата подписания передаточного акта объектов долевого строительства (квартир). Цена договора, то есть сумма денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства застройщику для создания объектов долевого строительства (общий объем финансирования) установлена в размере: 26 610 013 руб. 50 коп. – по контракту № Ф.2016.358986  от 02.12.2016; 49 502 985 руб. 00 коп – по контракту № Ф.2016.398488 от 19.12.2016; 8 418 616 руб. 50 коп. – по контракту № Ф.2016.482741 от 16.01.2017; 22  544 067 руб. 50 коп. – по контракту № Ф.2016.359584 от 02.12.2016, 27 839 815 руб. 50 коп. – по контракту № Ф.2016.407094 от 19.12.2016,  42 376 351 руб. 50 коп. – по контракту № Ф.2016.407037 от 19.12.2016,  12 159 840 руб. – по контракту № Ф.2016.407118 от 19.12.2016,  48 217 911 руб.– по контракту № Ф.2016.359232 от 02.12.2016,    28 520 352  руб. – по контракту № Ф.2016.407103 от 19.12.2016,    29 397 795 руб.  – по контракту № Ф.2016.398464 от 19.12.2016,     42 376 351 руб. 50 коп. – по контракту № Ф.2016.407037 от 19.12.2016,    30 140 512 руб. 50 коп.  – по контракту № Ф.2016.406781 от 19.12.2016,  41 485 090 руб. 50 коп. – по контракту № Ф.2016.398350 от 19.12.2016,      (пункты 3.1 контрактов). Гарантийный срок на объекты долевого строительства, за исключением технологического и инженерного  оборудования, входящего в состав объектов долевого строительства, составляет 5 лет со дня передачи объектов долевого строительства участнику долевого строительства по передаточным актам. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участнику долевого строительства объектов долевого строительства, составляет 3 года со дня передачи объектов долевого строительства участнику  долевого строительства по передаточным актам. Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в  связи с ненадлежащим качеством объектов долевого строительства  при условии, если  такое качество выявлено в  течение гарантийного срока  (пункт 6.1 контрактов). Застройщик не несет ответственности  за недостатки (дефекты) объектов долевого строительства, обнаруженные в пределах гарантийного срока, в случае, если они произошли вследствие износа таких объектов  долевого строительства или их частей, нарушения требований технических регламентов, градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу их эксплуатации либо вследствие ненадлежащего их ремонта, проведенного силами  участников долевого строительства или привлеченными им третьими лицами (пункт 6.2 контрактов). 

Согласно пункту 1.4 контрактов, по окончании строительства многоквартирного жилого дома объект долевого строительства должен соответствовать требованиям установленным «СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003». Качество квартир должно соответствовать условиям  договора, описанию объектов долевого строительства, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлению Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», требованиям технических и градостроительных регламентов. А также иным обязательным нормам, правилам и требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, квартиры должны быть благоустроены, иметь чистовую отделку, подключены к тепло-, водо-, электроснабжению, быть пригодными и безопасными для проживания граждан. 

Во исполнение обязательств, принятых по контрактам № Ф.2016.358986, № Ф.2016.398488, № Ф.2016.482741, № Ф.2016.359584, № Ф.2016.407094, № Ф.2016.407037, № Ф.2016.407118, № Ф.2016.359232; № Ф.2016.407103, № Ф.2016.482741, № Ф.2016.398464, № Ф.2016.406781, № Ф.2016.398350, № Ф.2016.482741 ответчик выполнил и передал истцу по передаточным актам  от 09.10.2017, 02.11.2017, 01.11.2017 объекты долевого строительства (квартиры). 

 В период гарантийного срока на основании обращений жильцов 28.01.2022 и 15.02.2022 сотрудниками истца организован комиссионный осмотр  жилых помещений и благоустройства территории по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 36А, с привлечением представителей ООО УК «Эверест» и МП «ДКСР», по итогам проверки выявлены многочисленные дефекты, составлен акт комиссионного осмотра жилых домов, содержащий заключения о выявленных дефектах.

Претензией за исх. № 733 от 08.04.2022 истец потребовал устранения выявленных недостатков в течение 30 дневного срока с момента получения претензии.

Устранение выявленных дефектов ответчиком не выполнено. 

Из доводов истца, не оспоренных ответчиком, следует, что в период действия гарантийного срока в объектах строительства выявлены недостатки.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с иском в суд с иском о безвозмездном устранении недостатков и дефектов работ по  указанным договорам.

Исследовав представленные в дело доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, и оценив их в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Проанализировав условия представленных контрактов, суд считает, что по своей правовой природе указанные контракты, являются договорами строительного подряда, правовое регулирование которых осуществляется главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. 

Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

В силу требований статей 708, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации к числу существенных условий договора строительного подряда относится согласование сторонами объема, содержания работ и других предъявляемых к ним требований, определяемых технической документацией, а также сроков выполнения подрядных работ. 

Следовательно, в силу названных правовых норм существенными для спорного договора строительного подряда являются: 

- условия о содержании и объеме работ (предмете); 

- срок выполнения работ. 

Оценив условия контрактов,  суд пришел к выводу о согласовании сторонами всех его существенных условий: 

- предметы контрактов (объем и содержание подрядных работ), стоимость работ указаны в пунктах 1.1, 3.1 контрактов;

- срок выполнения работ указан в пунктах 2.1 контрактов. 

 С учетом проведенного анализа суд приходит к выводу, что вышеуказанные контракты является заключенным – порождающим взаимные права и обязательства сторон.

Факт выполнения ответчиком работ и принятие их заказчиком сторонами не оспаривается.

 После сдачи-приемки выполненных работ, истцом обнаружены дефекты и недостатки в выполненных работах. 

В пункте 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

В силу пункта 2 статьи 722 Гражданского кодекса Российской Федерации Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Следовательно, ответчик, взяв на себя гарантийные обязательства по качеству выполненной работы несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 

Пунктами 6.1 контрактов предусмотрено, что гарантийный срок на объекты долевого строительства, за исключением технологического и инженерного  оборудования, входящего в состав объектов долевого строительства, составляет 5 лет со дня передачи объектов долевого строительства участнику долевого строительства по передаточным актам. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав передаваемого участнику долевого строительства объектов долевого строительства, составляет 3 года со дня передачи объектов долевого строительства участнику  долевого строительства по передаточным актам. Участник долевого строительства вправе предъявить застройщику требования в  связи с ненадлежащим качеством объектов долевого строительства  при условии, если  такое качество выявлено в  течение гарантийного срока. 

Согласно пункту 5.5 контрактов, застройщик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в акте обнаружения недостатков, обеспечив при этом сохранность объектов долевого строительства  или их части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение, или недостачу.

В силу статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.  (пункт 2). 

При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

 (пункт 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы. 

Пунктом 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» предусмотрено, что в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, а также может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.

В случае, если такое ходатайство не поступило или согласие не было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания исходя из принципа состязательности, согласно которому риск наступления последствий не совершения соответствующих процессуальных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.03.2012 № 12505/11 указал, что нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.

Ответчик ходатайство о назначении судебной экспертизы не заявил, отзыв в нарушение статьи 131 АПК РФ не представил.

 При таких обстоятельствах оценка требований истца осуществляется судом с учетом положений статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о бремени доказывания, исходя из принципа состязательности и статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации которой предусмотрено, что в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ. 

Факт наличия недостатков выполненных работ подтвержден материалами дела и не оспаривается ответчиком.

В соответствии с пунктом 3 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Доказательства того, что недостатки работ истец мог увидеть при приемке работ, в материалах дела отсутствуют. 

Ответчик доказательств отсутствия своей вины в возникших недостатках посредством представления доказательств того, что причиной недостатков явился нормальный износ объекта или его частей, неправильная его эксплуатация, не представил.

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы предусмотрена пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: - безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; - соразмерного уменьшения установленной за работу цены; - возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397). 

Согласно пункту 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, если недостатки результата работы существенны или неустранимы, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков (пункт 2 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Следовательно, указанные нормы регулируют обязательства сторон по качеству исполнения подрядных работ и гарантируют заказчику соответствие результата его обоснованным ожиданиям как одну из целей договора подряда. 

В то же время заказчик после принятия результата работ вправе рассчитывать на бесперебойное использование этого результата как минимум на протяжении гарантийного срока при надлежащем пользовании вещью. 

Подрядчик гарантирует заказчику возможность такого использования. 

Недостаток качества подлежит устранению по правилам статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, но неиспользование заказчиком результата работ в период, когда он правомерно рассчитывал на такую возможность, по статье 723 Гражданского кодекса Российской Федерации не компенсируется. 

Истец просит обязать ответчика безвозмездно устранить дефекты и недостатки по 

контрактам, выявленные в течение гарантийного срока. 

Данное условие предусмотрено условиями заключенных между сторонами контрактов (раздел 6 контрактов). 

Следовательно, заказчик вправе требовать от подрядчика своевременного устранения выявленных в выполненных работах недостатков. В соответствии с пунктом 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. 

Поскольку многоквартирные жилые дома переданы истцу по передаточным актам 09.10.2017, 02.11.2017, 01.11.2017 с учетом пункта 10.2 договоров, гарантийный срок на объекты долевого строительства составляет 5 лет.

Следовательно, с учетом положений пункта 6.1 контрактов, статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать от ответчика устранить недостатки и дефекты в выполненных работах. 

При таких обстоятельствах, оценив представленные в материалы дела документы, суд признает доказанным факт наличия недостатков в выполненных ответчиком по контрактам работах и требования истца об устранении недостатков заявлены обосновано и подлежат удовлетворению. 

Всем существенным доводам, пояснениям и возражениям сторон судом дана соответствующая оценка, что нашло отражение в данном решении; иные доводы и пояснения несущественны и на выводы суда не влияют.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Требования истца судом признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению. Исковое заявление принято к производству суда с отсрочкой уплаты государственной пошлины.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина за рассмотрение настоящего дела, составляет 6 000 руб. 

Следовательно, с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации следует взыскать государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

            Обязать Муниципальное предприятие «Дирекция капитального строительства и ремонта» муниципального образования города Братска (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место нахождения: Иркутская область, г. Братск)  в трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в рамках выполнения гарантийных обязательств по муниципальным контрактам № Ф.2016.358986, № Ф.2016.398488, № Ф.2016.482741, № Ф.2016.359584, № Ф.2016.407094, № Ф.2016.407037, № Ф.2016.407118, № Ф.2016.359232; № Ф.2016.407103, № Ф.2016.482741, № Ф.2016.398464, № Ф.2016.406781, № Ф.2016.398350, № Ф.2016.482741  устранить недостатки и дефекты по благоустройству жилых домов, расположенных по адресу: 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, 36А, а именно:

№ кв. (помещение, территория)

Виды работ:

Квартира № 1

(

<

...>)

закрепить решетку вентиляции в большой комнате

Квартира № 4

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен в большой комнате,  восстановить теплоизоляционный контур, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всех помещениях, устранить продувание из-под плинтусов в зале путем пропенивания  щелей, произвести ревизию утеплителя наружных стен после вскрытия облицовки, закрепить сайдинг на фасаде дома в месте расположения маленькой комнаты, закрепить гипсоволокнистый лист к кирпичной стене в зале, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен в большой комнате, восстановить теплоизоляционный контур.

Квартира № 5

(

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке в комнате, осуществить отделку стен керамической плиткой в ванне и санузле

Квартира № 7

(

<

...>)

Провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке в комнате, ванной комнате, кухне, прихожей, Произвести вскрытие пола путем демонтажа напольного покрытия, установить дополнительные лаги, произвести монтаж напольного покрытия на прежнее место.

Квартира № 8

(

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке в кухне между стеной и перегородкой, произвести регулировку окон в кухне и зале, произвести регулировку балконной двери

Квартира № 9

(

<

...>)

Произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в  комнате, восстановить теплоизоляционный контур, произвести закрепление оконных сливов, произвести замену радиатора, укрепить согласно ГОСТУ

Квартира № 10

(

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке в 3-х комнатах, обязать произвести зачистку, окраску на стенах в ванной комнате, закрепить розетки во всей квартире

Квартира № 12

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в  кухне,  восстановить теплоизоляционный контур, устранить продувание путем пропенивания щелей, произвести монтаж унитаза

Квартира № 15

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в  комнате,  восстановить теплоизоляционный контур

Квартира № 18

(

<

...>)

произвести регулировку окон, заменить уплотнительные резинки

Квартира № 19

(

<

...>)

выполнить ремонт резьбового соединения

Квартира № 22

(

<

...>)

устранить продувание из-под плинтусов в кухне и комнатах, восстановить теплоизоляционный контур, восстановить отслоившуюся плитку в санузле, закрепить листы железа на кровле, произвести замену теплосчетчика

Квартира № 23

(

<

...>)

закрепить оконные откосы, устранить причину протечки воды за обшивку, произвести демонтаж обшивки дома над подъездом, выполнить ревизию утепления угла стены,  восстановить теплоизоляционный контур, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены,   восстановить теплоизоляционный контур, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен во всей квартире, восстановить теплоизоляционный контур, произвести регулировку окон во всех помещениях, закрепить листы железа на кровле, восстановить герметичность кровельного покрытия, выполнить механическую расчистку поверхности,  произвести оштукатуривание потолка, произвести закрепление дверных коробок межкомнатных дверей.

Квартира № 24

(

<

...>)

произвести закрепление откосов на окнах  во всех помещениях, выполнить ремонт кровли, произвести просушивание поверхности, выполнить механическую расчистку поверхности,  обработать средством от патогенной микрофлоры, побелить потолок, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке во всех комнатах

Квартира № 25

(

<

...>)

выполнить подклейку обоев в зале, закрепить обналичку, закрепить плинтуса, закрепить ванну, выполнить переукладку линолеума во всех помещениях, устранить вмятину на входной двери, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещины на потолке в комнате, произвести регулировку окон во всех помещениях, привести в соответствие с нормами температуру в квартире,  устранив продувание и промерзание ограждающих конструкций, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен во всех помещениях,  восстановить теплоизоляционный контур

Квартира № 26

(

<

...>)

Произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире,  выполнить переукладку линолеума во всех помещениях

Квартира № 27

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления простенка в большой комнате,  восстановить теплоизоляционный контур, осуществить отделку стен керамической плиткой в ванной комнате и санузле, закрепить плинтуса во всей квартире, установить и закрепить розетки во всех помещениях, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в  комнате,  восстановить теплоизоляционный контур, Произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире,  выполнить переукладку линолеума во всех помещениях, закрепить лаги, установить дополнительные лаги.

Квартира № 28

(

<

...>)

произвести вскрытие пола путем демонтажа напольного покрытия, установить  дополнительные лаги, произвести монтаж напольного покрытия на прежнее место во всех помещениях, произвести закрепление откосов на всех окнах, произвести регулировку балконной двери, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке во всех помещениях, произвести регулировку балконной двери, заменить уплотнительную резинку в большой комнате

Квартира № 29

(

<

...>)

произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире, выполнить переукладку линолеума во всех помещениях, закрепить лаги и установить дополнительные лаги, закрепить плинтуса во всех помещениях.

Квартира № 30

(

<

...>)

произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире, установить дополнительные лаги, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин между плитами перекрытия на потолке во всех помещениях, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола на кухне

Квартира № 32

(

<

...>)

произвести регулировку окон, заменить уплотнительные резинки

Квартира № 33

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен во всех комнатах, восстановить теплоизоляционный контур, произвести регулировку окон во всех помещениях, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всех помещениях, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещины на потолке в зале, произвести регулировку окон, заменить уплотнительные резинки, произвести демонтаж подоконника, выполнить (при наличие) запенивание пустот под подоконником, произвести монтаж на прежнее место, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен в зале и спальне, восстановить теплоизоляционный контур

Квартира № 34

(

<

...>)

произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола в большой комнате, установить дополнительные лаги

Квартира № 35

(

<

...>)

произвести закрепление ножек у ванны, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в зале с правой стороны,  восстановить теплоизоляционный контур, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в кухне, восстановить теплоизоляционный контур, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке в зале по стыкам плит перекрытия, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в спальне, восстановить теплоизоляционный контур, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола в зале и спальне, выполнить переукладку линолеума во всех помещениях, закрепить плинтуса во всех помещениях, произвести утепление балконного порога в комнате, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен в комнатах, восстановить теплоизоляционный контур.

Квартира № 37 

(

<

...>)

произвести замену теплосчетчика

Квартира № 38

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления наружных стен во всех помещениях,  восстановить теплоизоляционный контур, произвести замену откосов на окнах во всех помещениях, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления наружных стен во всех помещениях,  восстановить теплоизоляционный контур, выполнить перемонтаж водосточной системы, произвести замену оконного блока,  осуществить отделку стен керамической плиткой в ванной комнате и санузле

Квартира № 43

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утеплителя наружных стен в маленькой и большой комнате,  восстановить теплоизоляционный контур, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире, произвести закрепление карниза с наружной стороны

Квартира № 44

(

<

...>)

выполнить ревизию кровли и устранить протечки в маленькой комнате, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления наружной стены в маленькой комнате,   восстановить теплоизоляционный контур, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления наружной стены в большой комнате,  восстановить  теплоизоляционный контур, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления наружных стен в комнатах,   восстановить теплоизоляционный контур

Квартира № 45

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления наружной стены в зале, восстановить теплоизоляционный контур, выполнить утепление фасада, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления наружной стены в маленькой комнате,  восстановить теплоизоляционный контур, произвести дополнительное утепление окон, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола в комнате, кухне, коридоре, установить дополнительные лаги, устранить щели на полу,  выполнить перемонтаж плинтуса

Квартира № 46

(

<

...>)

восстановить отслоившуюся плитку в ванной комнате, треснувшую плитку заменить

Квартира № 47 

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления наружной стены слева от балконной двери, восстановить теплоизоляционный контур, выполнить ревизию кровли и провести ремонтно-восстановительные работы по устранению пятен от промерзания в углу на кухне и в комнате, устранить щель между подоконником и сайдингом, выполнить перемонтаж водосточной системы, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всех помещениях, установить дополнительные лаги,  выполнить переустановку стенного вентиляционного клапана  под окном в комнате

Квартира № 48

(

<

...>)

произвести выравнивание стен, произвести закрепление конструкции пола, выполнить ревизию кровли и устранить протечки в санузле, потолок зачистить, восстановить окрасочный слой, произвести заделку отверстия ремонтной смесью в санузле, произвести заделку отверстия на потолке ремонтным составом, выполнить переукладку линолеума во всех помещениях, закрепить дверную обналичку в комнате, произвести замену счетчика ГВС

Благоустройство территории (

<

...>)

восстановить разрушенный тротуар напротив дома № 35 по ул. Набережная, устранить провал асфальтобетонного покрытия напротив 2 подъезда с торца дома по ул. Набережная, 30А

Подъезд (

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на стенах и плитах перекрытия

Окна (

<

...>)

закрепить наружные оконные откосы, произвести повторный монтаж  отливов окон

Подвал (

<

...>)

предоставить резервные насосы ГВС, восстановить разрушенный отделочный слой  на стенах приямков при входе в подвал

Фасад (

<

...>)

организовать отвод вод с ливнестоков

Отделка кухонных помещений по всем квартирам данного дома (

<

...>)

произвести демонтаж обоев и облицевать стены керамической плиткой в соответствии с проектной документацией

Кровля (

<

...>)

выполнить перемонтаж водосточного желоба, закрепить металлическое покрытие крыши

Квартира № 2

(

<

...>)

произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола в коридоре, произвести замену теплосчетчика

Квартира № 3 

(

<

...>)

устранить течь в санузле

Квартира № 5 (

<

...>)

привести в соответствие с нормами температуру в квартире

Квартира № 10

(

<

...>)

обязать произвести зачистку, окраску на стенах в ванной комнате и кухне в районе раковины-мойки, восстановить отслоившуюся кафельную плитку в ванной комнате, заменить потрескавшуюся плитку, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке на стыках плит перекрытия

Квартира № 20

(

<

...>)

Провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке на кухне и в зале

Квартира № 24

(

<

...>)

произвести замену балконного порога, произвести укрепление и заполнить монтажной пеной порог балконной двери в комнате, заделать щели между откосами и отливами окон, произвести закрепление откосов окна снаружи, демонтировать наружный отлив, выровнять поверхность при помощи ремонтного состава, выполнить монтаж отлива на прежнее место, произвести отделку откоса балконного окна снаружи

Квартира № 28 (

<

...>)

заменить и закрепить порог балконной двери в комнате

Квартира № 33 (

<

...>)

произвести просушку поверхности в санузле, выполнить механическую расчистку поверхности, обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску потолка в санузле

Фасад (

<

...>)

произвести закрепление металлических листов обшивки фасада

Отделка кухонных помещений по всем квартирам данного дома (

<

...>)

Осуществить отделку керамической плиткой стен в соответствии с проектной документацией

Подъезд (

<

...>)

выполнить механическую расчистку поверхности, обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску поверхности на 1 и 2 этажах подъезда

Подвал (

<

...>)

предоставить резервные насосы ГВС

Крыльцо (

<

...>)

произвести работы по восстановлению облицовки крыльца

Придомовая территория (

<

...>)

произвести демонтаж дефектного асфальтового покрытия со стороны главного фасада,  осуществить устройство нового дорожного покрытия со стороны главного фасада

 

Квартира № 1

(

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен,  восстановить теплоизоляционный контур, произвести заделку отверстий ремонтным составом

Квартира № 25

(

<

...>)

произвести закрепление металлических листов обшивки фасада по периметру квартиры

Квартира № 34 (

<

...>)

Произвести замену теплосчетчика

Отделка кухонных помещений по всем квартирам данного дома (

<

...>)

осуществить отделку стен керамической плиткой, предусмотренных проектной документацией

Придомовая территория (

<

...>)

произвести демонтаж дефектного асфальтового покрытия со стороны главного фасада, осуществить устройство нового дорожного покрытия со стороны главного фасада

Фасад (

<

...>)

произвести закрепление металлических листов обшивки, наружную облицовку  фасада

Подъезд (

<

...>)

предоставить резервные насосы ГВС, выполнить герметизацию стыка козырька со стеной. Устранить следы протечек в местах соединения стенных панелей и козырька над входом в подъезд, произвести  оштукатуривание в местах затекания

Квартира № 1 (

<

...>)

устранить трещины на потолке

Квартира № 14

(

<

...>)

устранить трещины на потолке в зале, кухне, устранить эффект потока холодного воздуха из розетки в зале, выполнив ревизию утеплителя наружных стен, оштукатурить стену, закрепить гипсоволокнистый лист к кирпичной стене в зале, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке в зале, кухне, произвести замену ванны

Квартира № 15 (

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке в комнате, устранить скрип полов во всех помещениях, закрепить обналичку, устранить продувание из-под плинтусов в зале, закрепить плинтус

Квартира № 19 (

<

...>)

произвести закрепление конструкции пола

Квартира № 23 (

<

...>)

устранить продувание по полу в зале и в спальне, вскрыть облицовку и произвести ревизию утеплителя

Квартира № 25

(

<

...>)

устранить продувание из под плинтусов в большой комнате, спальне, коридоре, кухне, вскрыть облицовку и произвести ревизию утеплителя, произвести замену теплосчетчика

Квартира № 26 (

<

...>)

произвести зачистку, окраску на стенах в ванной комнате и кухне, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке

Квартира № 27 (

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен в комнатах, восстановить теплоизоляционный контур

Квартира № 28 (

<

...>)

произвести вскрытие пола путем демонтажа напольного покрытия, установить дополнительные лаги, произвести монтаж напольного покрытия на прежнее место

Квартира № 30

(

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке, закрепить ванну, закрепить унитаз, выровнять полы, устранить эффект потока холодного воздуха из розетки в зале, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в зале, восстановить теплоизоляционный контур, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире, закрепить плинтуса во всей квартире, отрегулировать межкомнатные двери, выровнять стены  в ванной комнате и кухне, выровнять потолки

Квартира № 31 (

<

...>)

восстановить отслоившуюся плитку в ванной комнате, треснувшие плитки заменить

Квартира № 33

(

<

...>)

произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире, установить дополнительные лаги, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке во всех помещениях, восстановить отслоившуюся плитку в ванной комнате, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещины на потолке в большой комнате, закрепить плинтуса и подклеить обои, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в кухне, восстановить теплоизоляционный контур, выполнить укладку линолеума заново во всех помещениях, произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стены в маленькой комнате, восстановить теплоизоляционный контур, выполнить ревизию наружной обшивки фасада,  установить оконный отлив с уклоном, исключающим застой воды, привести в соответствие с нормами температуру в квартире, закрепить унитаз, произвести замену смесителя, 

Квартира № 34

(

<

...>)

произвести замену стекол в стеклопакете балконной группы в большой комнате

Квартира № 37

(

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на стенах произвести окраску поверхности стен в ванне и кухне

Квартира № 38

(

<

...>)

произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире, установить дополнительные лаги, выполнить укладку линолеума заново во всех помещениях

Квартира № 40

(

<

...>)

произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире

Квартира № 41

(

<

...>)

произвести  демонтаж балконного порога. Устранить пустоты под порогом. Закрепить балконный порог на прежнее место в комнате

Квартира № 43 (

<

...>)

произвести замену теплосчетчика

Квартира № 46

(

<

...>)

закрепить плинтуса во всей квартире, в кухне заменить дверной наличник, закрепить розетку на кухне, выполнить укладку линолеума заново во всех помещениях, произвести повторный монтаж дверного проема, восстановить его геометрию, устранить дыру в стене ремонтным составом

Квартира № 48

(

<

...>)

выполнить ревизию облицовки фасада и устранить протечки

Подъезд 1 (

<

...>)

восстановить отслоившуюся плитку на полу около квартир 32 и 33

Подвал (

<

...>)

предоставить резервные насосы ГВС, восстановить разрушенный отделочный слой  на стенах приямков со стороны главного фасада

Фасад (

<

...>)

установить две водосточные трубы, закрепить профлист на фасаде

Придомовая территория (

<

...>)

произвести засыпку провала с последующим уплотнением, устранить трещины на отмостке, устранить отслаивание бетонного слоя на крыльце, устранить трещины на асфальтобетонном покрытии (со стороны главного фасада),  устранить трещины и просадку отмостки со стороны пандуса 1-го подъезда, устранить провал асфальтобетонного покрытия на внутридомовом проезде, на повороте в сторону жилого дома № 32 по улице Набережной

Отделка кухонных помещений по всем квартирам данного дома (

<

...>)

осуществить отделку стен керамической плиткой в соответствии  проектной документацией

Квартира № 2 (

<

...>)

произвести замену счетчика ГВС

Квартира № 11

(

<

...>)

закрепить ванну, произвести замену стекла в оконной группе в маленькой комнате, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на стенах и потолке, подклеить обои в коридоре и зале

Квартира № 29

(

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке во всех помещениях, выполнить ревизию на кровле фановой трубы произвести утепление, устранить причину протечки, выполнить механическую расчистку поверхности, обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску поверхности, восстановить отслоившуюся кафельную плитку в санузле

Квартира № 30

(

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещины в стене, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещины на стене, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке, выполнить ревизию кровельного покрытия — устранить течь, произвести просушивание поверхности потолка в коридоре, выполнить механическую расчистку поверхности,  обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску потолка в коридоре

Квартира № 33

(

<

...>)

выполнить механическую расчистку поверхности потолка, оштукатурить потолок во всех помещениях, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире, установить дополнительные лаги, произвести регулировку окон, заменить уплотнительные резинки, выполнить ремонт кровли, произвести просушивание поверхностей, выполнить механическую расчистку поверхностей, обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску поверхности

Квартира № 34

(

<

...>)

произвести ревизию кровельного покрытия — устранить течь. выполнить механическую расчистку поверхности потолка и стен, обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску потолка, переклеить обои в зале, произвести ревизию кровельного покрытия — устранить течь, выполнить механическую расчистку поверхности, обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску потолка в комнате, произвести ревизию кровельного покрытия, примыкания к шахте вентиляции — устранить течь,  выполнить механическую расчистку поверхности,  обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску потолка и стены в санузле, произвести ревизию вентиляции на кухне и санузле — устранить дефект

Квартира № 35

(

<

...>)

произвести ревизию кровельного покрытия — устранить течь, выполнить механическую расчистку поверхности, обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску потолка на кухне, произвести ревизию кровельного покрытия — устранить течь, выполнить механическую расчистку поверхности,  обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску потолка и стены в санузле, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире, установить дополнительные лаги, произвести ревизию вентиляции на кухне и санузле — устранить дефект

Кровля (

<

...>)

выполнить ревизию на кровле вентканалов и фановых труб произвести утепление, выполнить механическую расчистку поверхности, обработать средством от патогенной микрофлоры, произвести окраску поверхности, произвести замену деформированного водосточного желоба на юго-восточном краю кровли

отделка кухонных помещений по всем квартирам данного дома (

<

...>)

Осуществить отделку стен керамической плиткой, предусмотренных проектной документацией

Прилегающая территория (

<

...>)

выполнить планировку территории с обеспечением водоотвода от МКД, устранить провалы грунта в районе колодцев  со стороны западного фасада, произвести демонтаж дефектного покрытия со стороны северного западного фасада, осуществить устройство нового асфальтового покрытия со стороны северо-западного фасада, устранить провалы отмостки со стороны западного фасада, произвести демонтаж дефектного покрытия тротуара со стороны северного фасада в районе входа в подвал, осуществить устройство нового асфальтового покрытия со стороны северного фасада в районе входа в подвал

Подвал (

<

...>)

произвести подсыпку грунта в подвальном помещении, выполнить заделку трещин ремонтным составом, выполнить заделку трещин ремонтным составом, произвести обратную засыпку грунта

Подъезд (

<

...>)

восстановить отслоившуюся кафельную плитку на 1-ом и 3-м этажах подъезда

Фасад (

<

...>)

произвести закрепление металлических листов обшивки фасада  

Квартира № 3

(

<

...>)

вскрыть наружную облицовку с целью определения и устранения причин протечек на балконе, обеспечить отвод воды от балкона

Квартира № 9

(

<

...>)

устранить продувание из-под плинтусов, произвести замену батарей отопления, произвести регулировку окон, заменить уплотнительные резинки, произвести демонтаж напольного покрытия, выполнить утепление согласно требований проекта, произвести монтаж  напольного покрытия, произвести демонтаж и перемонтаж системы отопления на подачу и в обратном трубопроводе теплоносителя

Квартира № 11 (

<

...>)

произвести демонтаж обшивки дома, выполнить ревизию утепления стен,  восстановить теплоизоляционный контур, вскрыть наружную облицовку с целью определения и устранения причин протечек на балконе, устранить протечки

Квартира № 16

(

<

...>)

заменить линолеум, произвести шпатлевку, окраску около розеток, устранить течь полотенцесушителя, закрепить розетки и выключатели во всех помещениях, закрепить входную дверь

Квартира № 18

(

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин на потолке

Квартира № 19

(

<

...>)

произвести закрепление фанерных конструкций, устранить щели между дверными коробками и стенами, закрепить обналичку, устранить щели в обналичке, произвести регулировку межкомнатных дверей, провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещины на потолке возле окна на кухне, закрепить плинтуса, закрепить ванну, устранить течь радиатора в комнате, заменить линолеум в комнате, отрегулировать входную дверь, устранить щели

Квартира № 29 (

<

...>)

провести ремонтно-восстановительные работы по устранению трещин в стыках плит, выполнить укладку линолеума заново во всех помещениях

Квартира № 32 (

<

...>)

выполнить укладку линолеума заново во всех помещениях, закрепить обналичку межкомнатных дверей, закрепить перегородку между комнатой и кладовой, привести в соответствие с нормами температуру в квартире, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире

Квартира № 33 (

<

...>)

выполнить ремонт кровли, произвести просушивание поверхностей, выполнить механическую расчистку поверхностей, обработать средством от патогенной микрофлоры,  произвести окраску поверхности, заменить полотенцесушитель, заменить радиаторы, произвести утепление пола, отрегулировать межкомнатные двери, отрегулировать смеситель, выполнить укладку линолеума заново во всех помещениях, произвести демонтаж напольного покрытия, произвести перетяжку полов с последующим монтажом покрытия пола во всей квартире

Квартира № 36

(

<

...>)

выполнить ремонт кровли, произвести просушивание поверхностей, выполнить механическую расчистку поверхностей,  обработать средством от патогенной микрофлоры,  произвести окраску поверхности

Квартира № 38

(

<

...>)

выполнить ремонт кровли, произвести просушивание поверхностей, выполнить механическую расчистку поверхностей, обработать средством от патогенной микрофлоры,  произвести окраску поверхности

Кровля 

<

...>)

произвести замену деформированного наружного водостока над квартирой № 30

Отделка кухонных помещений по всем квартирам данного дома (

<

...>)

Осуществить отделку стен керамической плиткой, предусмотренных проектной документацией

 

Взыскать с Муниципального предприятия «Дирекция капитального строительства и ремонта» муниципального образования города Братска (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, место нахождения: Иркутская область, г. Братск) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 6 000 руб. 

             Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья                            С. Н. Швидко