АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-20570/23

28 марта 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управление  транспорта и дорожного строительства г. Таганрога (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Дорожно-ремонтное  строительное управление" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

третьи лица: МКУ «Благоустройство», ООО «Стройпроектконтроль»  об обязании (уточненные требования),  

Руководствуясь статьями 82, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства ответчика о назначении судебной экспертизы  отказать.  

Обязать ООО «ДРСУ» своими силами и за свой счет в течение 3 месяцев с даты  вступления в законную силу решения суда по настоящему делу выполнить работы,  необходимые для устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств по  муниципальному контракту № 39 от 07.07.2020, а именно:  

- устранить поперечные трещины с раскрытием более 20 мм, расположенные на  дорожном покрытии и тротуаре на расстоянии 33 м, 52 м, 99 м, 118 м, 145 м, 173 м, 193 м,  200 м, 213 м, 220 м, 232 м, 264 м, 282 м, 294 м, 319 м, 340 м, 345 м, 366 м, 371 м, 389 м,  406 м, 441 м, 461 м, 478 м, 481 м, 510 м от пешеходного перехода, находящегося примерно  в 5 м от пересечения дорог по ул. Галицкого и ул. Чуева, общей длиной 490 м.п.  

- устранить продольные трещины с раскрытием более 20 мм, расположенные  дорожном покрытии и на расстоянии 450-595 м, 607-611 м, 655-662 м, 635-695 м от  пешеходного перехода, находящегося примерно в 5 м от пересечения дороги по ул.  Галицкого и ул. Чуева, общей длиной 195 м.п.  

- заменить разрушенные бордюрные камни, расположенные на расстоянии 28 м, 86  м, 133 м, 171 м, 224 м, 687 м, 672 м, 731 м, 1202 м от пешеходного перехода,  находящегося примерно в 5 м от пересечения дороги по ул. Галицкого и ул. Чучева, в  количестве 11 шт.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорожно-ремонтное  строительное управление" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход  федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Д.Г. Танова