Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Москва 

26.12.2018г.                                                                        Дело №  А40-184562/18-110-1386

Резолютивная часть решения объявлена 21.12.2018 года 

Полный текст решения изготовлен 26.12.2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Зайченко О.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН 

<

***>, 115114, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМПЛЕКС-3" (ОГРН 

<

***>, 125363, 

<

...>)  о взыскании 32 319 163,53 руб.,

при участии:

от истца –ФИО1 по дов..  от 06.09.2017

от ответчика-не явился,

УСТАНОВИЛ:

публичное акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМПЛЕКС-3" о взыскании 32 319 163,53 руб. неустойки возникшей вследствие нарушения обязательств по договорам подряда. 

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ». 

Заслушав представителя истца, исследовав представленные доказательства, оценив их, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) и ООО "СМК "Стройкомплекс-3" (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда от 20.02.2015 № 23-С-2015 на выполнение и сдачу Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Строительство нов.ТП с тр-ми 2x630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП 13262 А до ТП 13245 А с зах. в нов.ТП, 2РКЛ-10 кВ от нов.ТП до КЛ напр. ТП 13262 Б -ТП 13245 Б, 6КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР: 

<

...>» (далее - Договор).

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 12 509 222,30 рублей. Согласно п. 3.1 Договора сроком выполнения работ является 30.11.2015. По состоянию на  12.07.2018 работы своевременно и в полном объеме не исполнены.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.04.2016 сумма выполненных работ составляет 143 609,54 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.03.2017 сумма выполненных работ составляет 5 939 724,97 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.05.2017 сумма выполненных работ составляет 569 388,63 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.05.2017 сумма выполненных работ составляет 519 803,76 руб.

В соответствии с п. 9.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Таким образом, размер пени по договору за период с 01.12.2015 по 12.07.2018 составляет: 1 838 855,68 руб. + 4 130 114,66 руб. + 391 979,16 руб. + 2 204 055,20 руб. = 8 565 004,70 руб.

Между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) и ООО "СМК "Стройкомплекс-3" (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда от 11.08.2014 № ЗЗ-С-2014 на выполнение и сдачу Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Строительство ТП объекта по проекту «2БКТП» с тр-ом 2x630 кВА, РКЛ-10 кВ от ТП-11371 до ТП-16238, от ТП-11371Б до ТП-10535 с заходом в ТП объекта, в т.ч. ПИР: 

<

...>, с.1» (далее - Договор).

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 11 278 957,08 рублей.

Согласно п. 3.1 Договора сроком выполнения работ является 30.09.2014.

По состоянию на 12.07.2018 работы по Договору своевременно и в полном объеме не исполнены .

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 25.11.2014 объем выполненных работ составил 31 843,48 руб.

В соответствии с п. 9.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работЗаказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% отстоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполненияобязательства.

Таким образом, общий размер пени по Договору за период с 13.07.2015 по 12.07.2018 составляет 12 326 836,51 руб.

Между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) и ООО "СМК "Стройкомплекс-3" (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда от 22.04.2015 № 57-С-2015 на выполнение и сдачу Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Строительство 4КЛ-0,4 кВ от ТП 25461 до ВРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т.ч. ПИР: 

<

...>» (далее - Договор).

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 3 726 736,86 рублей.

Согласно п. 3.1 Договора сроком выполнения работ является 29.02.2016.

По состоянию на 12.07.2018 работы по Договору своевременно и в полном объеме не исполнены.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 15.11.2015 сумма выполненных работ составила 185 552,64 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.12.2016 сумма выполненных работ составила 95 414,61 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.01.2017 сумма выполненных работ составила  1 081 577,68 руб.

В соответствии с п. 9.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Таким образом, общий размер пени по Договору за период с 01.03.2016 по 12.07.2018 составляет 1 062 355,27 руб. + 106 818,86 руб. + 1 260 114,30 руб. =2 429 288,42 руб.

Между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) и ООО "СМК "Стройкомплекс-3" (Подрядчик) заключен Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 25.05.2016 № 90К4-П-2016 на выполнение изыскательских работ, разработку и согласование со всеми заинтересованными организациями   проектно-сметной   документации   на   стадии   ПИР    по титулу: «Реконструкция ТП-15265 с установкой тр-ов 2х1000кВА и перезаводом сущ. КЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ, в т.ч. ИПР: 

<

...>, стр.2» (далее - Договор).

Согласно п. 3.1 Договора стоимость работ составляет 1 384 464,15 рублей.

Согласно п. 4.1 Договора сроком выполнения работ является 31.12.2017.

По состоянию на 12.07.2018 работы по Договору своевременно и в полном объеме не исполнены .

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.07.2017 сумма выполненных работ составила 608 652,92 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.01.2018 сумма выполненных работ составила 39 952,09 руб.

В соответствии с п. 5.4 Договора при нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены работ за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательства.

Таким образом, общий размер неустойки по Договору за период с 01.01.2018 по 12.07.2018 составляет 19 395,28 руб. + 123 624,34 руб. = 143 019,62 руб.

Между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) и ООО "СМК "Стройкомплекс-3" (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда от 07.08.2015 № 202К4-С-2015 на выполнение и сдачу Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 21686 луч А до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: г.Москва, 

<

...> корп.1641» (далее - Договор).

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 647 185,15 рублей.

Согласно п. 3.1 Договора сроком выполнения работ является 30.09.2015.

По состоянию на 12.07.2018 работы по Договору своевременно и в полном объеме не исполнены.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.09.2015 сумма выполненных работ составила 253 030,66 руб.

В соответствии с п. 8.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Таким образом, размер неустойки по Договору за период с 01.10.2015 по 12.07.2018 составляет 400 066,81 руб.

Между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) и ООО "СМК "Стройкомплекс-3" (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда от 07.08.2015 №204К-С-2015 на выполнение и сдачу Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 6514 до границ участка заявителя, в т.ч. ПИР: Москва, ул. Верейская, дом 14» (далее - Договор).

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 645 302,57 рублей.

Согласно п. 3.1 Договора сроком выполнения работ является 31.01.2017.

По состоянию на 12.07.2018 работы по Договору не исполнены.

В соответствии с п. 8.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Таким образом, общий размер неустойки по Договору за период с 01.02.2017 по 12.07.2018 составляет 340 074,45 руб.

Между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) и ООО "СМК "Стройкомплекс-3" (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда от 03.08.2015 № 222К4-С-2015 на выполнение и сдачу Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 22229 луч А до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: 

<

...> (напротив)» (далее - Договор).

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 502 552,18 рублей.

Согласно п. 3.1 Договора сроком выполнения работ является 31.05.2016.

По состоянию на 12.07.2018 работы по Договору своевременно и в полном объеме не исполнены.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.02.2016 сумма выполненных работ составила 50 548,84 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.03.2017 сумма выполненных работ составила 284 723,53 руб.

В соответствии с п. 8.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Таким образом, общий размер неустойки по Договору за период с 01.06.2016 по 12.07.2018 составляет 134 697,00 руб. + 79 290,63 руб. =213 987,63 руб.

Между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) и ООО "СМК "Стройкомплекс-3" (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда от 14.10.2015 № ЗЗЗК6-С-2015 на выполнение и сдачу Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 19920 луч А до границ участка Заявителя, не далее фасада здания, в т.ч. ПИР: 

<

...>» (далее - Договор).

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 822 956,64 рублей.

Согласно п. 3.1 Договора сроком выполнения работ является 31.12.2015.

По состоянию на 12.07.2018 работы по Договору своевременно и в полном объеме не исполнены.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.02.2016 сумма выполненных работ составила 322 140,98 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.06.2016 сумма выполненных работ составила 75 155,44 руб.

В соответствии с п. 8.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Таким образом, общий размер неустойки по Договору за период с 01.01.2016 по 12.07.2018 составляет 37 856,01 руб. + 65 606,85 руб. + 317 968, 18 руб. = 421 431,04 руб.

Между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (Заказчик) и ООО "СМК "Стройкомплекс-3" (Подрядчик) заключен Договор строительного подряда от 28.08.2015 № 266К7-С-2015 на выполнение и сдачу Заказчику комплекса работ по ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: «Строительство: ТП с установкой трансформаторов 2x630 кВА; РКЛ-10 кВ от ТП 17299 до ТП 17298; 6КЛ-0,4 кВ от ТП Нов. до ВРЩ-0,4 кВ заявителя, в т.ч. ПИР: Москв, 1-й пр. Марьиной Рощи, влад.2» (далее - Договор).

Согласно п. 2.1 Договора стоимость работ составляет 15 922 018,24 рублей.

Согласно п. 3.1 Договора сроком выполнения работ является 31.01.2016.

По состоянию на 12.07.2018 работы по Договору своевременно и в полном объеме не исполнены.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.12.2016 сумма выполненных работ составила 284 843,74 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 25.03.2017 сумма выполненных работ составила 9 489 592, 12 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 25.05.2017 сумма выполненных работ составила 1 164 704, 19 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 25.06.2017 сумма выполненных работ составила 4 077 323,12 руб.

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 25.03.2018 сумма выполненных работ составила 381 918,61 руб.

В соответствии с п. 9.2 Договора за несоблюдение сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

Таким образом, общий размер неустойки по Договору за период с 31.01.2016 по 12.07.2018 составляет 5 238 344,00 руб. + 1 407 345,71 руб. + 375 002,53 руб. + 154 469,22 + 247 216,53 руб. + 57 076,37 руб.) = 7 479 454,36 руб.

Таким образом, сумма неустойки по Договорам составляет 32 319 163,53 руб.

Ответчик  отзыв не представил,  иск не оспорил.

При указанных обстоятельствах иск подлежит удовлетворению.

Госпошлина распределяется на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 156, 169-171 АПК РФ,

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМПЛЕКС-3"  в пользу публичного акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  32 319 163 руб. 53 коп. неустойки(пени) , 184 596 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко