АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-29674/2017

г. Владивосток

12 марта 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 марта 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен 12 марта 2018 года.

            Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Бурова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Департамента дорожного хозяйства Приморского края  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к  АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПРИМОРСКОЕ АВТОДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 25 538 050 руб.

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 (удостоверение, доверенность),

от ответчика – ФИО3 (паспорт, доверенность)

установил:

Департамент дорожного хозяйства Приморского края обратилось с заявлением к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "ПРИМОРСКОЕ АВТОДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" о взыскании 23 008 189,79 руб. неотработанного аванса и 2 529 860,21 руб. пени.

12.02.2018 истец уточнил требования, просил взыскать 2 978 204,74 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, которые приняты судом в порядке ст.49 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее - Департамент) и акционерным обществом «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» (далее - АО «Примавтодор», Подрядчик) заключен государственный контракт № 2014.271410 (215/14) от 16.09.2014 г. на выполнение работ по восстановлению дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна и восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Приморского края (далее - Контракт).

По соглашению сторон государственный контракт расторгнут 26.12.2016 соглашение о расторжении № 623/16. Контракт расторгнут по фактически выполненным работам с обязательным условием возврата неотработанного аванса в сумме 48 008 189,79 рублей в течение 10 дней с момента подписания дополнительного соглашения (п.3 соглашения о расторжении).

Поскольку сумма неотработанного аванса была возвращена с нарушением срока, истец начислил проценты за пользование чужими денежными средствами.

На основании п. 5.11 Контракта Заказчик производит ежемесячную оплату выполненных работ в размере 90% от стоимости выполненных и принятых работ. 10% от стоимости выполненных и принятых работ в текущем месяце удерживается в счет погашения аванса, выплаченного Подрядчику в соответствии с условиями Контракта.

В период действия государственного контракта Заказчиком Подрядчику перечислена сумма в размере 864 085 498 рублей 51 копейку, в том числе сумма аванса в размере 178 223 306 рублей 57 копеек.

По соглашению сторон государственный контракт расторгнут 26.12.2016 соглашение о расторжении № 623/16. Контракт расторгнут по фактически выполненным работам с обязательным условием возврата неотработанного аванса в сумме 48 008 189,79 рублей в течение 10 дней с момента подписания дополнительного соглашения (п.3 соглашения о расторжении).

Платежным поручением №17835 от 28.12.2017, ответчик произвел возврат неотработанного аванса в размере 23 008 189,79 руб.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

В соответствии с частью 2 статьи 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, допустившее неправомерное удержание денежных средств, уклонившееся от их возврата, допустившее иную просрочку в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица несет ответственности за неисполнение денежного обязательства в виде уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.

Вместе с тем, согласно общему правилу, предусмотренному Гражданским кодексом РФ, течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГКРФ).

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока.

Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции (ч. 1 ст. 194 ГК РФ).

Таким образом, принимая во внимание, что соглашение о расторжении государственного контракта подписано сторонами 26.12.2016 г., десять дней для исполнения обязательства истекают 05.01.2017 г., то началом периода просрочки следует считать 10.01.2017 г., поскольку последний день срока выпадает на нерабочий праздничный день.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193 ГК РФ).

Суд принимает контррасчет процентов за пользование чужими денежными средствами, предоставленный АО «Примавтодор». Следовательно, размер процентов за пользование чужими денежными средствами должен быть рассчитан за период с 10.01.2017 по 27.12.2017 по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 2 912 111,28 руб.

В силу статьи 110 АПК РФ, по результатам рассмотрения спора судебные расходы по оплате государственной пошлины по иску подлежат взысканию с ответчика пропорционально удовлетворенным требованиям в сумме 152 602 руб. (с учетом оплаты после подачи иска) в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИМОРСКОЕ АВТОДОРОЖНОЕ РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" в пользу Департамент дорожного хозяйства Приморского края 2912111,28 рублей процентов и в доход федерального бюджета 152 602 рубля государственной пошлины.

Во взыскании остальной суммы процентов отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

 

            Судья                                                                                                  Буров А.В.