ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-42674/2020

Дело № А40-311567/2019

г. Москва

05 октября 2020 года

Резолютивная часть постановления объявлена 29 сентября 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 05 октября 2020 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бодровой Е.В.,

судей Тетюка В.И., Порывкина П.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ООО "ТЕТРАЭДРОН" 

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.07.2020г. по делу № А40-311567/19 

по иску ООО "ТЕТРАЭДРОН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

<

...>" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о признании односторонних отказов от исполнения обязательств по Договору № 080/18-ГЗ (31806956372) от 21.11.2018 (уведомление № 07-05-2322/19 от 09.09.2019), по Договору № 014/19- ГЗ (31907559697) от 29.03.2019 (уведомление № 07-05-2321/19 от 09.09.2019) недействительными и продлении срока выполнения работ,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 28.09.2020,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 03.02.2020,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «Тетраэдрон» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Государственному автономному учреждению культуры 

<

...> культуры и отдыха имени М. Горького» (далее – ответчик) о признании односторонних отказов от исполнения обязательств по Договору № 080/18-ГЗ (31806956372) от 21.11.2018 (уведомление № 07-05-2322/19 от 09.09.2019), по Договору № 014/19-ГЗ (31907559697) от 29.03.2019 (уведомление № 07-05-2321/19 от 09.09.2019) недействительными и продлении срока выполнения работ. 

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.07.2020 в иске отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы и направить дело на новое рассмотрение.  

В обоснование доводов апелляционной жалобы, заявитель указал, что заказчик не передал подрядчику проектную документацию в полном объеме и надлежащего качества, в установленный договором срок.

Ссылается на то обстоятельство, что односторонний отказ от договора со стороны заказчика является незаконным.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение суда отменить.

Представитель ответчика возражал по доводам апелляционной жалобы, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, представил письменный отзыв на жалобу.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной  жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как следует из материалов дела, между Государственным автономным учреждением культуры 

<

...> культуры и отдыха имени М. Горького» (Заказчик, Ответчик) и ООО «ТЕТРАЭДРОН» (Подрядчик, Истец) заключен договор от 21.11.2018 №080/18-ГЗ (31806956372), согласно условиям которого Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту здания ресторана «Кавказ», расположенного по адресу: 

<

...>, в границах земельного участка Заказчика общей площадью 1 045 635 кв.м., находящегося по адресу: 

<

...> (кадастровый номер 77:01:0006002:4), в соответствии с Техническим заданием (приложение №1), в сроки, объеме и по наименованиям работ, установленным сметной документацией (Приложение №2), и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы. 

Срок выполнения работ установлен до 01 мая 2019 года, демонтажных работ до 20.12.2018 (п. 3.1 договора). 

Цена работ составляет 59 999 999руб. 99 коп.

Договор № 080/18-ГЗ вступает в силу с даты его подписаниями обеими сторонами и действует до 30.12.2019 г., а в части гарантийных обязательств - до полного исполнения сторонами принятых обязательств (п. 11.1 Договора №080/18-ГЗ). 

В соответствии с п. 1.6 Договора № 080/18-ГЗ ЦПКиО им. М. Горького передал Подрядчику проектную документацию и строительную площадку 21.11.2018. 

В соответствии с п. 2.2 Договора № 080/18-ГЗ ЦПКиО им. М. Горького оплачивает Подрядчику аванс в размере 20% (Двадцати процентов) от цены работ в сумме 12 000.000,00 (Двенадцать миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС -18%, 1 830 508 руб. 47 коп., в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа. 

Подрядчик предоставил счет от 26.11.2018 № 21 на оплату авансового платежа, который ЦПКиО им. М. Горького оплатил в установленные Договором № 080/18-ГЗ сроки. 

Также, между ЦПКиО им. М. Горького и ООО "Московская Проектная Компания" (далее - ООО "МПК") заключен договор от 13.12.2018 № 12-18/7 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ по капитальному ремонту здания ресторана "Кавказ", расположенного по адресу: 

<

...>, далее - Объект, Обществом с ограниченной ответственностью "ТЕТРАЭДРОН" по Договору № 080/18- ГЗ. 

В ходе исполнения Договора № 080/18-ГЗ увеличился объем демонтажных работ, в связи с чем, между Подрядчиком и ЦПКиО им. М. Горького, заключено дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2019 г. (далее -Дополнительное соглашение № 1). 

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 цена работ увеличена и составила 64 618 267 руб. 52 коп., в том числе НДС -20%, 10 759 564 руб. 13 коп.

Дополнительным соглашением № 3 от 29.05.2019 г. к Договору № 080/18-ГЗ установлены новые сроки окончания выполнения работ (31.12.2019 г.) и действия Договора № 080/18-ГЗ (до 01.04.2020 г.). В соответствии с п. 2.7 Договора № 080/18-ГЗ расчет по оплате фактически выполненных работ до 85% от цены Договора производится ежемесячно, на основании Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанных сторонами, при отсутствии у ЦПКиО им. М. Горького претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ с уменьшением перечисляемой на счет суммы на 20% - удержание ранее полученного аванса. 

Подрядчиком предоставлены документы, указанные в п. 2.7 Договора № 080/18-ГЗ, на часть демонтажных работ, фактически выполненных Подрядчиком. 

Указанные документы были рассмотрены ЦПКиО им. М. Горького, работы приняты и оплачены (Приложения №№ 7-8). 

Письмом от 23.04.2019 № 2304 ООО "ТЕТРАЭДРОН" направил в адрес ЦПКиО им. М. Горького подготовленную в связи с увеличением объема строительно-монтажных работ сметную документацию, и уведомил о приостановке работ до момента согласования и утверждения направленной сметной документации. 

В соответствии с п. 4.3.4 Договора № 080/18-ГЗ Подрядчик вправе приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от него обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный срок, и сообщить об этом заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после приостановления выполнения работ. 

Однако по состоянию на 23.04.2019 г. ООО "ТЕТРАЭДРОН" не выполнил в полном объеме демонтажные работы. 

Следовательно, приостановка выполнения работ в связи с предоставлением на согласование сметной документации на увеличение объема строительно-монтажных работ является необоснованной. 

В ЦПКиО им. М. Горького рассмотрены представленные исполнительные сметы и направлены замечания для их устранения. 

Указав, что в состав основных смет к Договору № 080/18-ГЗ включены работы, производство которых на данный момент не ведется, а препятствующие к выполнению работ обстоятельства отсутствуют. 

ООО "ТЕТРАЭДРОН" 14.06.2019 г. проинформировал ЦПКиО им. М. Горького о выявлении дополнительных объемов работ, отсутствующих в проектно-сметной документации, при проведении демонтажа кровли, и приостановке в связи с этим работ до момента согласования проектно-сметной документации. 

Однако, в соответствии со ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации, подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику. 

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. 

К тому же ЦПКиО им. М. Горького указано, что объем материала для устройства конструкции кровли заложен в сметную документацию к Договору № 080/18-ГЗ и основания для приостановки работ по устройству кровли отсутствуют (Приложение № 13). 

Фактически ООО "ТЕТРАЭДРОН" незаконно приостановил выполнение работ до момента согласования сметной документации и не исполнял обязательства, взятые на себя по Договору № 080/18-ГЗ. ЦПКиО им. М. Горького обратилось к ООО "МПК" с просьбой обследовать Объект авторского надзора, проанализировать представленные ООО "ТЕТРАЭДРОН" 05.07.2019 г. и 08.07.2019 г. локальные сметы и представить заключение на соответствие выполняемых работ проектным решениям. 

ООО «МПК» обнаружило отступления от решений и указаний проектно-сметной документации при обследовании Объекта: не смонтирован временный навес для защиты от атмосферных осадков конструкций объекта после демонтажа кровельного покрытия, в том числе деревянных конструкций потолка обеденного зала с исторической отделкой; 

- демонтаж конструкций парапета в осях А-Д/1-10 выполнен в значительно завышенном объеме и не был согласован авторским надзором;

- обрушение капитальной стены по оси Ж вследствие привлечения к данной работе низкоквалифицированных работников; 

- применение пустотелого кирпича пир монтаже несущих конструкций здания вместо полнотелого, о чем была сделана соответствующая запись в журнале авторского надзора; 

- работы по цементации грунтов в холодное время года проводились с нарушением технологии (без устройства "тепляков") о чем сделана запись в журнале авторского надзора; 

- часть металлических сборных перемычек над проемами не соответствует проектным решениям; 

- обоймы усиления кирпичных конструкций выполнены с частичным соблюдением технологии (без разогрева металлических пластин и сварки их "на горячую"); 

- на объекте отсутствовал "Проект производства работ" о чем сделана запись в журнале авторского надзора.

Таким образом, учитывая, что ООО "ТЕТРАЭДРОН" выполняет работу так, что ее окончание к сроку, предусмотренному Договором № 080/18-ГЗ, явно невозможно, а также допущены существенные и неустранимые отступления от условий Договора № 080/18-ГЗ и приложений к нему, ЦПКиО им. М. Горького в адрес ООО "ТЕТРАЭДРОН" направлено уведомление о расторжении договора. 

Кроме того, между ООО "ТЕТРАЭДРОН" и ЦПКиО им. М. Горького заключен договор от 29.03.2019 г. № 014/19-ГЗ (31907559697) на выполнение работ по модернизации веранды здания ресторана "Кавказ", расположенного по адресу: 

<

...> (кадастровый номер 77:01:0006002:4) (далее -Договор № 014/19-ГЗ). 

Срок выполнения работ по Договору № 014/19-ГЗ в соответствии с п. 3.1 установлен с даты передачи ЦПКиО им. М. Горького Подрядчику площадки для выполнения работ, но не позднее 01.04.2019 г., до 01.07.2019 г. 

Цена работ составляет 16 930 972 руб. 99 коп., в том числе НДС - 20%, 2 821 828 руб. 71 коп. (п. 2.1 Договора № 014/19-ГЗ). 

Договор № 014/19-ГЗ вступает в силу с даты его подписаниями обеими сторонами и действует до 30.12.2019г., а в части гарантийных обязательств- до полного исполнения сторонами принятых обязательств (п. 11.1 Договора №014/19-ГЗ). ООО "ТЕТРАЭДРОН" письмом от 30.04.2019 г. № 3004 уведомил ЦПКиО им. М. Горького о приостановке выполнении работ по Договору № 014/19-ГЗ. 

В соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик может в любое время отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. 

На основании п. 7.1.1.1 Договора № 014/19-ГЗ ЦПКиО им. М. Горького в адрес ООО "ТЕТРАЭДРОН" направлено уведомление о расторжении договора. 

Таким образом, отказ ответчика от договора осуществлен на основании п. 1 т. 450.1, ст. 717 ГК РФ и п. 7.1.1.1 договора в связи с нарушением условий другой стороной, связанных с невыполнением обязательств в сроки, установленные договором. 

В соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и уведомлениями о расторжении договоров Договор № 080/18-ГЗ и Договор № 014/19-ГЗ расторгнуты с момента получения уведомления. 

Дата получения ООО "ТЕТРАЭДРОН" уведомлений о расторжении договоров 17.10.2019 г. 

Одним из заявленных требований ООО "ТЕТРАЭДРОН" является продление сроков выполнения работ по Договору № 080/18-ГЗ и Договору № 014/19-ГЗ. 

В соответствии со ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации указанный в договоре подряда начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. 

Согласно ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

На основании ст. 452 Гражданского кодекса Российской Федерации требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо не получения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок. 

В материалах дела отсутствуют доказательства факта невозможности выполнения работ по договорам по объективным причинам и иным не зависящим от истца обстоятельствам, которые создают невозможность завершения работы в срок в порядке, предусмотренном условиями договоров, в связи с чем, в удовлетворении иска было правомерно отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения суда.

Довод апелляционной жалобы о том, что заказчик не передал подрядчику проектную документацию в полном объеме и надлежащего качества, в установленный договором срок, рассмотрен судом апелляционной инстанции и подлежит отклонению, в силу следующего.

В соответствии с п. 1.6 Договора № 080/18-ГЗ ЦПКиО им. М. Горького передал Подрядчику проектную документацию и строительную площадку 21.11.2018 по актам. Замечаний к объему и качеству проектной документации Подрядчиком предъявлены не были.

Как указывает Подрядчик он неоднократно обращался к Заказчику о необходимости направления откорректированной проектной документации и в обосновании своей позиции ссылается на письма ООО "ТЕТРАЭДРОН", которые направлялись в адрес Заказчика, начиная с января 2019 года, когда согласно п. 3.1 Договора 080/18-ГЗ срок окончания демонтажных работ 20 декабря 2018 года. Т.е. Подрядчик уже нарушил срок выполнения демонтажных работ.

В соответствии с п. 2.2 Договора № 080/18-ГЗ ЦПКиО им. М. Горького оплачивает Подрядчику аванс в размере 20% (Двадцати процентов) от цены работ в сумме 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) руб. 00 коп., в том числе НДС - 18%, 1 830 508,47 (Один миллион восемьсот тридцать тысяч пятьсот восемь) руб. 47 коп., в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком счета на перечисление авансового платежа.

Подрядчик предоставил счет от 26.11.2018 № 21 на оплату авансового платежа, который ЦПКиО им. М. Горького оплатил в установленные Договором № 080/18-ГЗ сроки.

Между ЦПКиО им. М. Горького и ООО "Московская Проектная Компания" заключен договор от 13.12.2018 № 12-18/7 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении работ по капитальному ремонту здания ресторана "Кавказ", расположенного по адресу: 

<

...>, далее - Объект, Обществом с ограниченной ответственностью "ТЕТРАЭДРОН" по Договору № 080/18-ГЗ.

В ходе исполнения Договора № 080/18-ГЗ увеличился объем демонтажных работ, в связи с чем, между Подрядчиком и ЦПКиО им. М. Горького, было заключено дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2019.

В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 цена работ была увеличена и составила 64 618 267 руб. 52 коп., в том числе НДС -20%о, 10 759 564 руб. 13 коп.

Дополнительным соглашением № 3 от 29.05.2019 к Договору № 080/18-ГЗ установлены новые сроки окончания выполнения работ (31.12.2019) и действия Договора № 080/18-ГЗ (до 01.04.2020).

В соответствии с п. 2.7 Договора № 080/18-ГЗ расчет по оплате фактически выполненных работ до 85% от цены Договора производится ежемесячно, на основании Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), подписанных сторонами, при отсутствии у ЦПКиО им. М. Горького претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ с уменьшением перечисляемой на счет суммы на 20% - удержание ранее полученного аванса.

Подрядчиком были предоставлены документы, указанные в п. 2.7 Договора № 080/18-ГЗ, на часть демонтажных работ, фактически выполненных Подрядчиком. Указанные документы были рассмотрены ЦПКиО им. М. Горького, работы приняты и оплачены.

Письмом от 23.04.2019 № 2304 ООО "ТЕТРАЭДРОН" направил в адрес ЦПКиО им. М. Горького подготовленную в связи с увеличением объема строительно-монтажных работ сметную документацию, и уведомил о приостановке работ до момента согласования и утверждения направленной сметной документации.

В соответствии с п. 4.3.4 Договора № 080/18-ГЗ Подрядчик вправе приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от него обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполненных работ или создать невозможность их завершения в установленный срок, и сообщить об этом заказчику в течение 3 (трех) календарных дней после приостановления выполнения работ.

Однако по состоянию на 23.04.2019 ООО "ТЕТРАЭДРОН" не выполнил в полном объеме демонтажные работы. Следовательно, приостановка выполнения работ в связи с предоставлением на согласование сметной документации на увеличение объема строительно-монтажных работ является необоснованной.

Ссылка истца на то обстоятельство, что односторонний отказ от договора со стороны заказчика является незаконным, отклоняется судом апелляционной инстанции, в силу следующего.

П. 4.1.5 Договора № 080/18-ГЗ установлено право, а не обязанность ЦПКиО им. М. Горького требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков, а пп. 3.4.3 и 3.4.4 Договора № 080/18-ГЗ регулируют отношения сторон, возникающие в процессе сдачи Подрядчиком фактически выполненных работ.

Таким образом, учитывая, что ООО "ТЕТРАЭДРОН" выполняет работу так, что ее окончание к сроку, предусмотренному Договором № 080/18-ГЗ, явно невозможно, а также допущены существенные и неустранимые отступления от условий Договора № 080/18-ГЗ и приложений к нему, ЦПКиО им. М. Горького в адрес  ООО   "ТЕТРАЭДРОН"   было   направлено  уведомление  о   расторжении договора (письмо от 09.09.2019 № 07-05-2322/19).

Кроме того, между ООО "ТЕТРАЭДРОН" и ЦПКиО им. М. Горького заключен договор от 29.03.2019 № 014/19-ГЗ (31907559697) на выполнение работ по модернизации веранды здания ресторана "Кавказ", расположенного по адресу: 

<

...> (кадастровый номер 77:01:0006002:4) (далее -Договор № 014/19-ГЗ).

Срок выполнения работ по Договору № 014/19-ГЗ в соответствии с п. 3.1 установлен с даты передачи ЦПКиО им. М. Горького Подрядчику площадки для выполнения работ, но не позднее 01.04.2019, до 01.07.2019.

Цена работ составляет 16 930 972,26 (Шестнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч девятьсот семьдесят два) руб. 99 коп., в том числе НДС - 20%, 2 821 828,71 (Два миллиона восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот двадцать восемь) руб. 71 коп. (п. 2.1 Договора № 014/19-ГЗ).

Договор № 014/19-ГЗ вступает в силу с даты его подписаниями обеими сторонами и действует до 30.12.2019, а в части гарантийных обязательств -до полного исполнения сторонами принятых обязательств (п. 11.1 Договора № 014/19-ГЗ).

ООО "ТЕТРАЭДРОН" уведомил ЦПКиО им. М. Горького о приостановке выполнении работ по Договору № 014/19-ГЗ (письмо от 30.04.2019 № 3004).

В соответствии со ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик может в любое время отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

На основании п. 7.1.1.1 Договора № 014/19-ГЗ ЦПКиО им. М. Горького в адрес ООО "ТЕТРАЭДРОН" было направлено уведомление о расторжении договора (письмо от 09.09.2019 № 07-05-2321/19).

В соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и уведомлениями о расторжении договоров Договор № 080/18-ГЗ и Договор № 014/19-ГЗ расторгнуты с момента получения уведомления. Дата получения ООО "ТЕТРАЭДРОН" уведомлений о расторжении договоров 17.10.2019.

При таких обстоятельствах, приведенные в апелляционной жалобе доводы не нашли правового и документального обоснования, не могут являться основанием для отмены судебного акта.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03.07.2020 по делу №А40-311567/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. 

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа. 

Председательствующий судья:  Е.В. Бодрова 

Судьи:  В.И. Тетюк 

 П.А. Порывкин 

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.