АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Седова, д. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. (3952) 262-102; факс (3952) 262-001

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                              Дело  № А19-21009/24 

13.02.2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 30.01.2025г.

Решение в полном объеме изготовлено 13.02.2025г.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Зарубиной Т.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ергоновой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦСТРОЙ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 109428, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ, ПР-КТ РЯЗАНСКИЙ, Д. 6А, КВ. 368)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУВИНСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, адрес: 667901, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, М.Р-Н КЫЗЫЛСКИЙ, ТЕР. ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА ТГРК,З Д. 1)

о взыскании 27 884 659 руб. 61 коп.,

при участии в судебном заседании:

от истца: представитель по доверенности ФИО1, удостоверение адвоката; 

от ответчика: представитель по доверенности ФИО2, паспорт, диплом;

установил:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕЦСТРОЙ"  (далее – истец, ООО «Автоспецстрой») обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУВИНСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ответчик, ООО «Тувинская горнорудная компания») с требованием о взыскании доплаты стоимости оказанных услуг за период с 10.10.2023 по 31.01.2024 по договору на оказание услуг № ТГРК/ДВОУ/2022-146 от 22.03.2022  в размере 27 884 659 руб. 61 коп. с учетом НДС.

В обоснование заявленных требований истец указал, что рамках заключенного между сторонами договора, истцом исправно оказывались услуги по экскавации, погрузке, перевозке, разгрузке на внутренние отвалы (в границах, определенных программой развития горных работ) горной массы на территории угольного разреза «Каа-Хемский». Факт надлежащего оказания услуг истцом и их принятия ответчиком подтверждается Актами приема-сдачи оказания услуг. Вместе с тем, с учетом положений пункта 5.1 договора, истец полагает, что на 15.04.2024г. с учетом перерасчета стоимости оказанных услуг в период с 10.10.2023 по 31.01.2024 по спорному договору ответчик имеет перед истцом задолженность в отыскиваемой сумме, ввиду рост стоимости ГСМ по отношению к стоимости ГСМ зафиксированного в п. 5.1. действующего договора, неоплата которой ответчиком добровольно послужила основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Основание исковых требований, с учетом уточнения, истец указывает статьи 1,6, 15, 709,746, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Ответчик с требованиями истца не согласился, указал, что спорный договор по своей структуре является рамочным, определяющим общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. Объём оказания услуг по экскавации и транспортировке горной массы указывается в заявках, направляемых заказчиком. Стоимость услуг определяется из расчёта стоимости услуг по перевозке 1 кубического метра вскрышной породы в плотном теле и составляет 148,0 рублей без НДС. Стоимость увеличивается на сумму НДС в соответствии с действующей редакцией Налогового кодекса РФ. 

Стоимость услуг увеличивается или снижается пропорционально увеличению/снижению стоимости ГСМ. Индикатором стоимости топлива является СПбМТСБ (Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа), регион Красноярск. (стоимость ДТ зима 57 403 руб. с НДС за 1 тонну на 4 марта 2022 года).

Фактически оказанные услуги оплачиваются Заказчиком Исполнителю без предоплаты, 2 раза в месяц в сумме, указанной в подписанном сторонами Акте приёмки оказанных услуг с отсрочкой платежа 15 календарных дней с момента подписания соответствующего Акта. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами. 

Требования ООО «АвтоСпецСтрой» формально имеют под собой правовые основания (пункт 5.1. Договора), поскольку договор предусматривает возможность изменения тарифа в зависимости от изменения рыночной цены на дизельное топливо, но не могут подлежать удовлетворению, поскольку не учитывают правовое регулирование данного правоотношения.

Договор не предусматривает особого механизма изменения тарифа в одностороннем порядке, поэтому такое изменение возможно либо по соглашению сторон, либо в процессе исполнения договора на основании решения суда по требованию одной из сторон в случае существенного изменения обстоятельств  из которых стороны исходили при заключении договора.

В исковом заявлении указан обрывочный расчёт, который не учитывает изменение тарифа по дополнительным соглашениям № 1 и № 2.  ООО «АвтоСпецСтрой», заявляя исковые требования, фактически просит  суд пересмотреть размер тарифа за перевозку вскрышных пород, установленного дополнительным соглашением № 2 от 04.12.2023 и изменить существенное условие договора, минуя волеизъявление другой стороны договора.

В судебном заседании истец заявленные им требования поддержал, представил для приобщения к материалам дела дополнительные документы, подтверждающие большую стоимость ГСМ, чем ему было компенсировано истцом в спорный период времени и предусмотрено в дополнительным соглашении № 2; сообщил, что Акты приложены им к иску и ответчиком к отзыву оплачены ответчиком полностью.

Ответчик исковые требования не признал по доводам, изложенным в отзыве.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

22.03.2022 между ООО «Автоспецстрой» (исполнитель) и ООО «Тувинская горнорудная компания» (заказчик) заключен договор на оказание услуг № ТГРК/ДВОУ/2022-146, в соответствии с условиями которого (пункт 1.1) исполнитель оказывает услуги по экскавации, погрузке, перевозке, разгрузке на внутренние отвалы вскрышных пород, объемом 3 740 000  куб.м., из них: 2022г. – 1 615 000 куб.м.; 2023 г. – 2 125 000 куб.м., а также бульдозерному отвалобразованию и содержанию автомобильной дороги для перевозки вскрышных пород от места погрузки до места разгрузки, согласно графику оказания услуг (приложение № 3) в соответствии с ПРГР, расположенном по адресу: 667901, Ркспублика Тыва, 

<

...>. Заказчик берет на себя обязательства принять и оплатить услуги в соответствии с условиями.

Сроки оказания услуг: апрель 2022 – декабрь 2022 года (пункт 1.2).

Объем оказания услуг по экскавации и транспортировке горной массы указывается в заявках, направляемых заказчиком (пункт 1.4).

Ориентировочный объем работ по экскавации и перевозке представлен в приложении № 3 (пункт 1.5).

Порядок организации работ согласован сторонами в разделе 2 договора. Так, в соответствии с пунктом 2.2 заказчик предоставляет исполнителю заявку (приложение № 6) на электронный адрес на выполнение услуг по экскавации и погрузке, перевозке, разгрузке не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг. В заявке указывается объем перевозимого грунта на планируемый месяц, местоположение отвалов и длина откатки от вскрышного забоя до места разгрузки. Исполнитель за три дня до начала месяца оказания услуг обязан поставить подпись об ознакомлении с заявкой и вернуть скан копию заявки Заказчику. Невыполнение своей обязанности Исполнителем в части ознакомления с заявкой является основанием для привлечения Исполнителя к ответственности. При этом и в отсутствии подписи Исполнителя об ознакомлении, заявка является обязательной для исполнения.

Цена и порядок расчетов по договору согласованы в разделе 5 договора. Так, в соответствии с пунктом 5.1 стоимость услуг по настоящему договору определяется из расчета стоимости услуг по перевозке 1 м3 вскрышной породы в плотном теле и составляет 148,0 руб. без НДС. Стоимость увеличивается на сумму НДС в соответствии с действующей редакцией НК РФ.

Стоимость услуг увеличивается или снижается пропорционально увеличению/снижению стоимости ГСМ, согласно формуле.

В случае повышения стоимости дизельного топлива на 10% или более от зафиксированной стоимости (в дальнейшем от стоимости ДТ которая привела к индексации на дату изменения действующего тарифа), тариф на оказание услуг подлежит изменению, в соответствии со следующим расчётом:

Новая стоимость = Базовая стоимость + (Базовая стоимость*0,4*Индекс)

Базовая стоимость - тариф, т.е. стоимость на момент очередного пересмотра стоимости услуг, за единицу измерения;

0,4 - удельный размер затрат на ГСМ в стоимости тарифа;

Индекс - процент изменения цены ДТ в месяце, предшествующем месяцу пересмотра по отношению к базовой цене ДТ (может иметь положительное значение (увеличение стоимости ГСМ) и отрицательное значение (снижение стоимости ГСМ).

Индикатором стоимости топлива является СПбМТСБ, регион Красноярск, (стоимость ДТ зима 57 403 руб. с НДС за тонну на 4 марта 2022г.

Принимать в расчет стоимость сезонное ДТ, зима с 1 ноября по 31 марта, лето с 1 апреля по 31 октября.

Общая стоимость услуг по договору на заявленные объемы с учетом перебазировки техники ориентировочно составит на 2022 г. – 2023г. – 553 520 000 руб. без НДС.

В соответствии с пунктом 5.8 договора фактически оказанные услуги оплачиваются Заказчиком Исполнителю без предоплаты, 2 раза в месяц в сумме, указанной в подписанном сторонами Акте приемки оказанных услуг с отсрочкой платежа 15 календарных дней с момента подписания соответствующего Акта. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами.

Обязанность Заказчика по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика по каждому платежу соответственно.

14.06.2023 сторонами подписано дополнительное соглашение № 1 к договору в соответствии, с которым пункт 5.1 договора изложен в следующей редакции: «Стоимость услуг по настоящему договору определяется из расчета стоимости услуг по перевозке 1 м3 вскрышной породы в плотном теле и составляет 137,00 руб. без НДС. Стоимость увеличивается на сумму НДС в соответствии с действующей редакцией НК РФ.

Стоимость услуг увеличивается или снижается пропорционально увеличению/снижению стоимости ГСМ, согласно формуле.

В случае повышения стоимости дизельного топлива на 10% или более от зафиксированной стоимости (в дальнейшем от стоимости ДТ которая привела к индексации на дату изменения действующего тарифа), тариф на оказание услуг подлежит изменению, в соответствии со следующим расчётом:

Новая стоимость = Базовая стоимость + (Базовая стоимость*0,4*Индекс)

Базовая стоимость - тариф, т.е. стоимость на момент очередного пересмотра стоимости услуг, за единицу измерения;

0,4 - удельный размер затрат на ГСМ в стоимости тарифа;

Индекс - процент изменения цены ДТ в месяце, предшествующем месяцу пересмотра по отношению к базовой цене ДТ (может иметь положительное значение (увеличение стоимости ГСМ) и отрицательное значение (снижение стоимости ГСМ).

Индикатором стоимости топлива является СПбМТСБ, регион Красноярск, (стоимость ДТ зима 57 403 руб. с НДС за тонну на 4 марта 2022г.

Принимать в расчет стоимость сезонное ДТ, зима с 1 ноября по 31 декабря, лето с 1 июля по 31 октября.

Общая стоимость услуг по договор на заявленные объемы с учетом перебазировки техники ориентировочно составит в 2022г. - 2023г. - 531 827 780.00 руб. 00 коп. без НДС.».

Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора на оказание услуг № ТГРК/ДВОУ/2022-146 от 22.03.2022г. свое действие данное дополнительное соглашение распространяет с 01.07.2023.

04.12.2023 сторонами подписано дополнительное соглашение № 2, в соответствии с которым Пункт 5.1. договора на оказание услуг № ТГРК/ДВОУ/2022-146 от 22.03,2022г. изменен и изложен в следующей редакции: «Стоимость услуг по настоящему договору определяется из расчета стоимости услуг но перевозке 1 м3 вскрышной породы в плотном теле и составляет 150,32 руб. без НДС. Стоимость увеличивается на сумму НДС в соответствии с действующей редакцией НК РФ.

Стоимость услуг увеличивается или снижается пропорционально увеличению/снижению стоимости ГСМ, согласно формуле.

В случае повышения стоимости дизельного топлива на 10% или более от зафиксированной стоимости (в дальнейшем от стоимости ДТ которая привела к индексации на дату изменения действующего тарифа), тариф на оказание услуг подлежит изменению, в соответствии со следующим расчетом:

Новая стоимость = Базовая стоимость + (Базовая стоимость*0,4*Индеке)

Базовая стоимость - тариф, т.е. стоимость на момент очередного пересмотра стоимости услуг, за единицу измерения;

0,4 - удельный размер затрат на ГСМ в стоимости тарифа;

Индекс - процент изменения цены ДТ в месяце, предшествующем месяцу пересмотра по отношению к базовой цене ДТ (может иметь положительное значение (увеличение стоимости ГСМ) и отрицательное значение (снижение стоимости ГСМ).

Индикатором стоимости топлива является СПбМТСБ, регион Красноярск, (стоимость ДТ зима 57 403 руб. с НДС за тонну на 4 марта 2022г.

Общая стоимость услуг по договор на заявленные объемы с учетом перебазировки техники ориентировочно составит в 2022г. - 2023г. - 542 404 200 (пятьсот сорок два миллиона четыреста четыре тысячи двести рублен 00 копеек) руб. без НДС.»

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2023г. и действует до 31.12.2023г.

В подтверждение факта оказания услуг по спорному договору в материалы дела истцом представлены акты оказанных услуг за период с октября 2023 года по январь 2024 года, подписанные сторонами и оплаченные в полном объеме.

Вместе с тем, с учетом положений пункта 5.1 договора, истец полагает, что на 15.04.2024г. с учетом перерасчета стоимости оказанных услуг в период с 10.10.2023 по 31.01.2024 по спорному договору ответчик перед истцом имеет задолженность в отыскиваемой сумме, ввиду роста стоимости ГСМ по отношению к стоимости ГСМ зафиксированного в п. 5.1 действующего договора, неоплата которой ответчиком добровольно послужила основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Оценив представленные доказательства каждое в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

В силу части 1 статьи 133 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению  законодательства является прерогативой суда.

По своей правовой природе, заключенный между истцом и ответчиком договор является договором возмездного оказания услуг, регулируется Главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В рассматриваемом случае в подтверждение факта оказания услуг по спорному договору в материалы дела истцом представлены акты оказанных услуг за период с октября 2023 года по январь 2024 года, которые оплачены в полном объеме.

Истцом отыскивается стоимость недоплаченных услуг, в связи с ростом стоимости ГСМ.

По своей структуре Договор является рамочным (статья 429.1. Гражданского кодекса Российской Федерации), определяющим общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора. 

Объём оказания услуг по экскавации и транспортировке горной массы указывается в заявках, направляемых Заказчиком.  

Согласно пункту 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Из положений пункта 1 статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Как установлено судом и следует из материалов дела, цены и порядок расчетов стороны согласовали в разделе 5 договора – пункт 5.1, при этом договор предусматривает возможность изменения тарифа в зависимости от изменения рыночной цены на дизельное топливо.

Дополнительными соглашениями № 1 и № 2 стороны дважды изменяли условия договора в части пункта 5.1.

Так, понижение тарифа на 7,4 % произошло в результате заключения между ООО «АвтоСпецСтрой» и ООО «Тувинская горнорудная компания» дополнительного соглашения № 1 от 14.06.2023, которым внесено изменение в пункт 5.1. Договора – тариф понижен до 137,00 рублей без НДС.

Повышение тарифа на 8,86 % произошло в результате заключения между ООО «АвтоСпецСтрой» и ООО «Тувинская горнорудная компания» дополнительного соглашения № 2 от 04.12.2023, которым внесено изменение в пункт 5.1. Договора – тариф повышен до 150,32 рублей без НДС.

Дополнительным соглашением № 2 от 04.12.2023 предусмотрена ретроспективная оговорка о распространении его действия на период с 01.09.2023 до 31.12.2023 года.

Между сторонами подписаны закрывающие документы (акты выполненных работ) по согласованной стоимости; услуги по актам оплачены в полном объёме.

В соответствии с пунктом 5.8 договора фактически оказанные услуги оплачиваются Заказчиком Исполнителю без предоплаты, 2 раза в месяц в сумме, указанной в подписанном сторонами Акте приемки оказанных услуг с отсрочкой платежа 15 календарных дней с момента подписания соответствующего Акта. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, либо иным способом по согласованию между Сторонами.

Обязанность Заказчика по оплате путем перечисления денежных средств считается исполненной с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика по каждому платежу соответственно.

По общему правилу пересмотр цены после выполнения договора недопустим, поскольку противоречит принципу правовой определенности, частным случаем которого является недопустимость изменения или расторжения обязательства, прекращенного надлежащим исполнением (пункт 1 статьи 408 Гражданского кодекса Российской Федерации), при этом ни условия договора, ни положения закона не предусматривают механизма перерасчёта тарифа после приёмки и оплаты работ. 

Учитывая изложенные обстоятельства, сложившиеся на протяжении действия договора на оказание услуг № ТГРК/ДВОУ/2022-146 отношения сторон (внесение в договор изменений в части стоимости оказанных услуг путем заключения доп. соглашений), буквальное толкование условий договора (пункты 5.1, 5.8), оснований для взыскания доплаты стоимости оказанных услуг за период с 10.10.2023 по 31.10.2023 в отыскиваемой истцом сумме не имеется. Исковые требования удовлетворению не подлежат.

Расходы по необоснованному иску, в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия, и по истечении  этого  срока  вступает  в  законную силу.

Судья                                                                                                                          Зарубина Т.Б.