АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-40169/23-89-228

07 июня 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 мая 2023 года Полный текст решения изготовлен 07 июня 2023 года 

Арбитражный суд в составе:  

Председательствующего судьи О.А. Акименко при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  (КОМПЛЕКСА)" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  (125167, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ,  ПЛАНЕТНАЯ УЛ., Д. 3, К. 2, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. 3, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 06.05.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001) к ответчику  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ"  (109147, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ,  МАРКСИСТСКАЯ УЛ., Д. 5, ЭТАЖ ПОДВАЛ, ПОМЕЩ./КОМ V/1, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.12.2020, ИНН: 

<

***>, КПП:  770901001) о взыскании 1 880 178,56 руб.  

при участии: от истца: ФИО2 по дов. от 01.01.2023; от ответчика: не явился, извещен; 

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании неосновательного обогащения в размере 248 584 руб.,  неустойки в размере 1 616 594, 56 руб., штрафа в размере 15 000 руб.  

Истец поддержал исковые требования в полном объеме. 

Ответчик в судебное заседание не явились. Суд располагает доказательствами  их уведомления о времени и месте проведения судебного заседания в установленном  порядке, в связи с чем, считает возможным провести судебное заседание в отсутствие  ответчика на основании ч. 1ст. 156 АПК РФ.  

Изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь  доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд  установил, что требования истца подлежат удовлетворению в части по следующим  основаниям.  

Судом установлено, что между ФГАУ «Росжилкомплекс» и ООО «Приоритет- строй» (далее - Ответчик, Подрядчик) заключен договор от 28.06.2022 г. № 2000.100952  (далее - Договор).  

В соответствии с п. 1.1. Договора, Подрядчик обязуется выполнить работы по  ремонту здания общежития, расположенного по адресу: г, Москва, ул. Рублевское  

<

...> (далее - Работы).  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действуют до  полного исполнения сторонами своих обязательств (пункт 9.1 Договора).  

Сроки выполнения работ согласованы в пункте 1.3 Договора, и исчисляются с  28.06.2022 г. по 09.08.2022 г.  

В пункте 2.1. Договора, закреплена цена договора, которая является твердой,  определенной на весь срок исполнения Договора, включает в себя прибыль подрядчика,  уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика,  связанных с выполнением обязательств и составляет 900 000, 00 (девятьсот тысяч)  рублей 00 копеек и подтверждается локальным сметным расчетом, приведенным в  Приложении № 2 к Договору.  

В соответствии с п. 2.5 Договора оплата работ производится в следующем  порядке:  

- 30% (тридцать процентов) Заказчик перечисляет Подрядчику в форме  авансового платежа в течении 5-ти (пяти) рабочих дней с момента подписания  Договора.  

- 70% (семьдесят процентов) Заказчик оплачивает по фактически выполненным  работам в течение 7 (семи) рабочих дней согласно подписанным Сторонами актам о  выполненных работах.  

В соответствии с вышеуказанными условиями договора, Подрядчиком был  выставлен счет на оплату № 2 от 29.06.2022 г., в размере 270 000 (двести семьдесят  тысяч) рублей, оплаченный Заказчиком, что подтверждается платежным поручением №  24345 от 03.08.2022 г. с отметкой банка об исполнении.  

15.08.2022 г. стороны составили акт передачи объекта в работу. 

Таким образом, обязательства по Договору стороной Заказчика перед  Подрядчиком по оплате авансового платежа выполнены в полном объеме, что  подтверждается платежным поручением от 03.08.2022 № 24345.  

18.10.2022 г. представителями Заказчика был составлен акт о невыполнении  работ по Договору от 28.06.2022 г. № 2022.100952, согласно которому в соответствии с  локальным сметным расчетом Договора не в полном объеме выполнено: п. 9 Раздела 1  ЛСР (из 1420 м выполнен ремонт 45 м), не выполнено: пп.1-8, 10-15 Раздела 1 ЛРС  

В дальнейшем Подрядчик так и не приступил к выполнению работ. 

В силу п.2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к  исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что  окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от  исполнения договора и потребовать возмещения убытков.  

В связи с невыполнением договорных обязательств Истец направил ООО  «Приоритет-Строй» уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке  (исх. от 20.10.2022 г. № 194/175/ФМ/2844) и требованием возврата денежных средств в  размере 248 584 (двести сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля в срок  до 25.10.2022г.  

В связи с тем, что Ответчик проигнорировал вышеназванное уведомление,  Истцом была направлена досудебная претензия (исх. от 07.12.2022 г. №  194/175/ФМ/3301).  

В соответствии с положением п. 1 ст. 450.1 ГК РФ, предоставленное законом  или договором право на односторонний отказ от договора может быть осуществлено  управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора.  договор прекращается с момента получения данного уведомления.  

Таким образом, договор был прекращен ввиду одностороннего отказа истца от  его исполнения.  

В соответствии с нормой п. 4 ст. 453 ГК РФ, в случае, когда до расторжения или  изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение  обязательства по договору, не исполнила свое обязательство, к отношениям сторон  применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения.  

В связи с тем, что Договор является расторгнутым, сумма неосновательного  обогащения составляет размере 248 584 руб.  

Статьей 307 ГК РФ установлено, что в силу обязательства одно лицо (должник)  обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то  передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от  определенного действия, кредитор имеет право требовать от должника исполнения его  обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из  иных оснований, указанных в Гражданском кодексе.  

В соответствии со статьёй 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или  договором, лицо, исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее  обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет  ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным  вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при  данных условиях обстоятельств.  

Как следует из пункта 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом,  иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему  неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего  Кодекса.  

Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного  обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого  лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения,  отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст. 1109 ГК РФ.  

При этом случаи возникновения неосновательного обогащения могут быть  

различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора,  требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате  предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно  перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между  сторонами и т.п.  

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и с требованиями  закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями  делового оборота или иным обычно предъявляемым требованиям. Односторонний  отказ от обязательств не допускается.  

Ответчик отзыв не представил, при этом суд отмечает, что предоставление  отзыва на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст. 131 АПК РФ, является  процессуальной обязанностью ответчика.  

В определении суда, суд обязывал ответчика представить письменный  мотивированный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ.  

Между тем, в нарушение ст. 131 АПК РФ, ответчик указанное требование не  исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих  своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах,  которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с  чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения им  процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).  

Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в  соответствии со ст. 41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.  

С учетом отсутствия доказательств возврата суммы неосновательного  обогащения, суд считает, что требование о взыскании денежных средств в размере  248 584 руб. заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.  

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки в размере 1 616 594, 56 руб.  за период с 16.08.2022 по 15.02.2023 на основании п. 6.4 Договора.  

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Представленный истцом расчет штрафных санкций судом проверен, признан  арифметически и методологически выполненным верно.  

Вместе с тем, суд считает возможным применить положения ст. 333 ГК РФ, и  снизить размер начисленной неустойки.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае  могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы  неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательств,  длительность неисполнения обязательств и др. (Информационное письмо президиума  ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17).  

В постановлении Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 "О некоторых вопросах  применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено  следующее.  

При обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен  доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником,  которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности  должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве  неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ). Соразмерность неустойки последствиям  нарушения обязательства предполагается.  

По смыслу ст. 333 ГК РФ, судам следует исходить из того, что неисполнение  или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему  неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не  вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого  пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования  денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по  кредитным договорам).  

Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 21.12.2000 N  263-О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в  случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств  является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены  против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть,  по существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской  Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не  должно нарушать права и свободы других лиц.  

В Определении от 21.12.2000 N 263-О Конституционный Суд Российской  Федерации указал, что взыскание неустойки не должно быть средством  неосновательного обогащения истца за счет ответчика.  

Учитывая вышеизложенное, а также факт установления чрезмерно высокой  процентной ставки, превышение суммы начисленной неустойки над суммой  возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, суд считает законным и  обоснованным снизить размер начисленной истцом неустойки до 24 517, 88 руб.  

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа в размере 15 000 руб. на  основании п.6.5 Договора.  

Вместе с тем, ненадлежащее исполнение договорных обязательств выразилось в  нарушении сроков выполнения работ. В рассматриваемом случае имеет место  применение двойной меры ответственности за одно правонарушение, что противоречит  смыслу и нормам гражданского законодательства, в связи с чем суд не усматривает  основания для взыскания штрафа в размере 15 000 руб.  

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

В силу положений ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном  и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое  доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими  доказательствами и никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее  установленной силы.  

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на  представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств  обоснованности и законности своих требований или возражений.  

На основании изложенного, исковые требования подлежат удовлетворению в  части.  

Государственная пошлина подлежит распределению в порядке ст. 110 АПК РФ. 

На основании ст.ст. 307-310, 330, 333, 401, 450.1, 453, 702, 715, 1102 ГК РФ,  руководствуясь ст.ст. 65, 69, 71, 110, 167, 170, 176 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ПРИОРИТЕТ-СТРОЙ" (ИНН: 

<

***>) в пользу ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ  

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КОМПЛЕКСА)"  МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ИНН: 

<

***>)  аванс в размере 248 584 руб., пени в размере 24 517,88 руб., госпошлину в размере  31 502 руб.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.А. Акименко