АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А84-329/2022

29 марта 2022 г.

г. Севастополь

 

  Резолютивная часть решения оглашена 22 марта 2022 года.

        Решение изготовлено в полном объеме 29 марта 2022 года.

Арбитражный суд города Севастополя в составе председательствующего судьи Смолякова А.Ю., при составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

Государственного казённого учреждения города Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>

к Обществу с ограниченной ответственностью «Дорсим», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

о взыскании 8 776 руб. 77 коп. неустойки по контракту от 23.08.2021 № 75/21,

при участии в судебном заседании представителя от истца – ФИО2 по доверенности от 14.05.2021, в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, установил следующее.

Государственное казённое учреждение города Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» обратилось в Арбитражный суд города Севастополя с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Дорсим» о взыскании 8 776 руб. 77 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту от 23.08.2021 № 75/21.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства,  отзыв на иск не представил, явку представителей в судебное заседание не обеспечил, ходатайств не заявлял.

Суд, изучив материалы дела, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле,  и оценив представленные доказательства, по существу заявленных требований приходит к следующему.   

Как видно из материалов дела,  23 августа 2021 года между ГКУ города Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», с одной стороны, как «Заказчиком», и Обществом с ограниченной ответственностью «Дорсим», как «Подрядчиком», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, заключили Контракт №75/21 для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения города Севастополя: обновление и нанесение горизонтальной дорожной разметки в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к контракту).

Согласно п. 1.1 Контракта установлены сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения контракта.

Сроки выполнения работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Контракта, то есть до 12 сентября 2021 года.

Согласно п. 2.1 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта составляет: 595 035,00 рублей (пятьсот девяносто пять тысяч тридцать пять рублей 00 копеек), в том числе НДС по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов (Приложение №2 к настоящему контракту).

Согласно п..1.1 Контракта, объем и состав работ определяются сметной документацией, все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности.

Согласно п.4.1 Контракта, приёмка работ производится ежемесячно, c оформлением документов по приёмке-сдаче выполненных работ в соответствии с утверждёнными постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. №100 унифицированными формами:

-акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 (далее также - акт КС-2);

-справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 (далее также - справка КС-3).

Подрядчик ежемесячно до 25 (двадцать пятого) представляет Заказчику в 4-х экземплярах акт КС-2 и в 4-х экземплярах справку КС - 3, подписанные Подрядчиком.

При оформлении акта КС-2 заполнение графы «Количество» (выполненных объёмов работ) в процентах не допускается.

Одновременно с актом КС-2 и справкой КС-3 Подрядчик представляет Заказчику, следующие документы, заверенные Подрядчиком:

•исполнительную документацию на объём работ (при необходимости), выполненный в соответствии с представленным актом КС-2;

•счёт на оплату;

•счёт-фактуру на соответствующий объём работ;

•акты на скрытые работы, подписанные представителем Заказчика;

•исполнительные схемы на выполненные работы;

•техническую документацию (руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования);

•декларацию о соответствии, сертификаты, в случаях, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982;

•технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и инвентаря.

Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Заказчик в течение 5 (пяти) дней рассматривает представленные документы, проверяет выполненные работы в части их соответствия условиям контракта, подписывает акт КС-2 и справку КС-3 или составляет обоснованный отказ от приёмки работ.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Подрядчику следующие подписанные Заказчиком документы: в 2-х экземплярах акт КС-2 и в 2-х экземплярах справку КС-3 или обоснованный отказ от приёмки работ.

Отсутствие исполнительной документации на объём представленных к приёмке работ является основанием для отказа в приёмке выполненных работ.

Заказчик вправе принять выполненные работы в объёме, не превышающем объёмы, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

Работы считаются принятыми с момента подписания представителями сторон акта КС-2 и справки КС-3.

По состоянию на 10 ноября 2021 года ООО «Дорсим» не предоставил какую- либо исполнительную документацию в подтверждение выполнения работ по Контракту.

Таким образом, Заказчик лишился возможности получить результат работ в установленные Контрактом сроки.

Согласно п. 10.3.4 Контракта Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно п.7.1 Контракта, в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Согласно п.7.6 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п.7.7. Контракта, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно акту приемки работ горизонтальной дорожной разметки №1 от 09.11.2021 года были приняты работы по нанесению линий дорожной разметки в рамках исполнения контракта 75/21 от 23.08.2021 г.

Согласно платежному поручению №66948 от 15.11.2021 года на сумму 578801, 80 рублей работы подрядчика ООО «Дорсим» оплачены полностью.

Ответчику направлено требование от 11.11.2021 исх. №2803 об уплате неустойки за просрочку исполнения работ по контракту, которое он проигнорировал и оставил без ответа.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 718 ГК РФ заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Ответственность за неисполнение встречных обязательств возлагается на сторону, не исполнившую свои обязательства по договору (статья 328 ГК РФ).

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 ГК РФ).

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В силу со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. В силу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

С учетом сдачи результатов работ по акту от 09.11.2021 суд корректирует расчет взыскиваемой неустойки на 1 день.

При таких обстоятельствах суд считает, что заявленные исковые требования надлежит удовлетворить в части.

На основании изложенного суд, руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить в части. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дорсим», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу Государственного казённого учреждения города Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 8 628 рублей неустойки.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Дорсим», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, в доход федерального бюджета 1966 рублей расходов на уплату государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.      

 

Судья 

А.Ю. Смоляков