РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-167147/22-110-1254

г. Москва

08 февраля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 19 января 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 08 февраля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной  К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (123317, ГОРОД МОСКВА, ПРЕСНЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН: 1047796323123) к  акционерному обществу "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ" (141313, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВ ПОСАД ГОРОД, АКАДЕМИКА СИЛИНА УЛИЦА, 3, ОГРН: 1115042005638) о взыскании 2 257 833,34 руб.,

при участии:

от истца – Юхновец Е.Е. по дов.  от  21.12.2022,

от ответчика- Ямсков  А.В. по дов.  от  01.02.2022,

УСТАНОВИЛ:

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обратилось с иском к акционерному обществу "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ" о взыскании 2 257 833,34 руб. пени за невыполнение в срок 3 этапа работы по государственному контракту №1922020101062000000000000/19208.4470019.16.02 от 11.12.2019.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве. 

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Минпромторгом России (далее - заказчик) и АО «ФНПЦ» НИИ прикладной химии» (далее - исполнитель) был заключён государственный контракт № 1922020101062000000000000/19208.4470019.16.02 на выполнение опытно-конструкторской работы Шифр «Малахит» от 11.12.2019 (далее - контракт, государственный контракт).

В соответствии с п. 1.1. контракта, исполнитель по заданию заказчика обязуется выполнить опытно-конструкторскую работу Шифр «Малахит» (далее - работа) и передать полученные при выполнении работы результаты в порядке и на условиях, предусмотренных государственным контрактом.

Как следует из п. 1.3. контракта, количество этапов и годы их выполнения указаны в техническом задании (приложение № 1 к контракту) и в ведомости исполнения (приложение № 2 к контракту).

В соответствии с техническим заданием, работы выполняются в следующем графике:

Номер этапа

Срок исполнения

1

11.12.2019-31.05.2020

2

01.06.2020-10.12.2020

3

11.12.2020-10.12.2021

Исполнителем была допущена просрочка по третьему этапу работы - 130 дней.

Пунктом 4.2. контракта предусмотрено, что за 20 календарных дней до окончания срока выполнения работы (этапа работы) исполнитель обязан в письменной форме уведомить заказчика о готовности выполняемой работы (этапа работы).

Следовательно, срок, в который уведомление исполнителя о готовности 3 этапа работы должно было поступить заказчику - 22.11.2021.

В Минпромторг России уведомление о готовности 3 этапа работы поступило 16.02.2022 (Вх. № МП-29532).

Акт № 3 сдачи-приёмки 3 этапа подписан 19.04.2022.

Датой окончания выполнения работы по государственному контракту (отдельного этапа работы) является дата подписания сторонами акта сдачи-приёмки работы по государственному контракту, либо акта сдачи-приёмки работы по отдельному этапу. Дата окончания выполнения работы или отдельного этапа работы по государственному контракту не может быть позднее даты, указанной в техническом задании и календарном плане (п. 2.1.7. контракта).

Как указано в п. 10.3. государственного контракта, в случае просрочки исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель уплачивает заказчику   пени.   Пени   начисляются   за  каждый   день   просрочки   исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

На указанном основании истцом в отношении ответчика были начислены пени в размере 4 734 166 (четырёх миллионов семисот тридцати четырёх тысяч ста шестидесяти шести) руб. 67 коп. за невыполнение в срок 3 этапа работы.

АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» оплатило часть задолженности в размере 2 476 333 (двух миллионов четырёхсот семидесяти шести тысяч трёхсот тридцати трёх) руб. 33 коп., что подтверждается платёжным поручением № 3621 от 14.06.2022.

Таким образом, оставшаяся задолженность АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» перед Минпромторгом России составляет 2 257 833 (два миллиона двести пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать три) руб. 34 коп.

Согласно ст. 773 ГК РФ, исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ обязан выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок.

Исполнитель несёт ответственность перед заказчиком за нарушение договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя, как указывает ст. 777 ГК РФ.

Вместе с тем, в претензии, направленной Исполнителю, значилось 84 дня просрочки. В приложении к претензии были четко указаны сроки периода просрочки, а именно: начало периода просрочки (следующий день после истечения срока исполнения работ по этапу 3) - 11.12.2021, конец периода просрочки (фактическое принятие работ Заказчиком) - 04.03.2022.

Вместе с тем количество дней просрочки увеличено до 130 дней. Увеличение количества дней просрочки представляется неправомерным, некорректным и безосновательным, поскольку сроки начала периода просрочки выполнения работ и фактического принятия работ Заказчиком не поменялись (84 дня с 11 декабря 2021 по 04 марта 2022).

Кроме того, при расчете Заказчиком неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся Заказчику для приемки выполненной работы (ее результатов) и оформления итогов такой приемки.

20.12.2021 АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» направило первоначальное уведомление о готовности сдать работу по 3 этапу ОКР шифр «Малахит».

22.12.2021 Минпромторг России письмом № 113903/16 от 22.12.2021 дал замечания и не принял работу.

16.02.2022 АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» повторно направило уведомление о готовности сдать работу по 3 этапу ОКР шифр «Малахит».

04.03.2022 Минпромторг России фактически принял работы у АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии (был подписан акт сдачи-приемки № 3).

Поэтому периоды 21.12.2021-22.12.2021 (1 день первоначальной проверки) и 17.02.2022-03.03.2022 (15 дней повторной проверки) не должны считаться днями просрочки исполнения обязательств.

84 (дни в претензии) - 16 (дни проверки) = 68

В соответствии с п. 10.3 Контракта, в случае просрочки Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Сумма в размере 2 476 333,33 рубля была добровольно оплачена АО «ФНПЦ «НИИ прикладной химии» по претензии истца 14.06.2022 платежным поручением № 3621.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

В удовлетворении  иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:

А.В. Мищенко