Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А72-15170/2024

г. Ульяновск

13 марта 2025г.

Резолютивная часть решения оглашена 05 марта 2025г.

Полный текст решения изготовлен 13 марта 2025г.

Арбитражный суд в составе председательствующего  Слепенковой О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сорокиной М.Е.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

к Открытому акционерному обществу «Хотьковский автомост» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 3 793 100 руб. 26 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца – до и после перерыва - ФИО2, паспорт, доверенность, диплом;

от ответчика – до перерыва – ФИО3, паспорт, доверенность, диплом (веб-конференция), после перерыва - не явился, уведомлен;

установил:

Индивидуальный предприниматель ФИО1 обратился в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к Открытому акционерному обществу «Хотьковский автомост» о взыскании 

-основного долга по договору №1208-ХА от 21.10.2022 в размере 544 000 руб. 00 коп.

-процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №1208-ХА от 21.10.2022 в размере 70 303 руб. 82 коп.

-основного долга по договору №6/2023 от 21.02.2023 в размере 415 000 руб. 00 коп.

-процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №6/2023 от 21.02.2023 в размере 53 632 руб. 51 коп.

-основного долга по договору №5/2023 от 14.04.2023 в размере 2 400 000 руб. 00 коп.

-процентов за пользование чужими денежными средствами по договору №5/2023 от 14.04.2023 в размере 310 163 руб. 94 коп.

Определением суда от 04.12.2024 исковое заявление оставлено без движения.  

Определением суда от 17.12.2024 исковое заявление принято к производству.

От ответчика поступил отзыв, в котором содержится ходатайство об уменьшении размера процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 333 ГК РФ.

В судебном заседании 25.02.2025 истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, просит взыскать:

-проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №1208-ХА от 21.10.2022г.  с 05.03.2024 по день фактического погашения задолженности.

-проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №6/2023 от 21.02.2023 с 05.03.2024 по день фактического погашения задолженности.

-проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №5/2023 от 14.04.2023 с 05.03.2024 по день фактического погашения задолженности.

В остальной части исковые требования остаются неизменными.

Ответчик исковые требования не признал, заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с заключением мирового соглашения. Истец возражал.

Судом ходатайство ответчика об отложении судебного заседания оставлено без удовлетворения. 

В судебном заседании объявлен перерыв до 05.03.2025 до 14 час. 00 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено.

В судебном заседании истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, просит взыскать:

-проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №1208-ХА от 21.10.2022г.  с 14.03.2024 по день фактического погашения задолженности.

-проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №6/2023 от 21.02.2023 с 14.03.2024 по день фактического погашения задолженности.

-проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №5/2023 от 14.04.2023 с 14.03.2024 по день фактического погашения задолженности.

Представитель истца пояснил, что просит взыскать проценты не в твердой денежной сумме, а путем указания периода взыскания.

В части основного долга исковые требования остаются неизменными.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился. 

Дело в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса РФ рассматривается в его отсутствие.

Изучив материалы дела, исследовав и оценив представленные доказательства,   суд приходит к следующему. 

Как усматривается из материалов дела, 21.10.2022 между истцом (Исполнитель) и ответчиком (Заказчик) заключен договор № 1208-ХА на выполнение работ, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с заявкой Заказчика выполнить следующие виды работ: Инженерно-геодезические изыскания для разработки документации по планировке территории по объекту «Строительство путепровода в створе улицы Промышленной и переулка Хрустального с подходами» (согласно Приложения №1 технического задания, являющегося неотъемлемой, мастью настоящего договора). Общий объём съёмки ориентировочно составляет 80 (восемьдесят) гектар.

Договор заключен в рамках муниципального контракта № 0368300000122001160 от 17.102022 г. по разработке документации по планировке территории и обоснованию инвестиций по объекту: «Строительство путепровода в створе улицы Промышленной и переулка Хрустального с подходами» (далее.-1 Контракт), заключенного между Заказчиком и МАУ «Агентство городских инициатив» (г. Ульяновск). ИПС223732501077373270100100090017111414.

Место выполнения работ: г. Ульяновск, ул.. Промышленная от Московского шоссе до ул. Локомотивная, ул. Шолмова от ул. Фруктовая до ул. Терешковой.

Согласно раздела 2 договора, предварительная стоимость работ по настоящему договору составляет: 2 720 000 рублей 00 копеек,  НДС не предусмотрен.

Окончательная сумма договора устанавливается после выполнения, полного объёма работ, указанного в п.1.1. настоящего договора, исходя из стоимости 34 000 руб. за один гектар, НДС не предусмотрен и не отражается в акте выполненных работ.

Заказчик обязуется оплатить сумму по договору в следующем порядке:

• 80% от стоимости работ в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения акта выполненных работ от Исполнителя. В случае, если акт выполненных работ не возвращён Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения, и Исполнителю не представлен мотивированный отказ от подписания акта, работа считается выполненной, акт принятым.

• 20% от окончательной стоимости работ, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента прохождения государственной экспертизы проекта.

Указанная в п. 2.1. настоящего договора стоимость, является договорной и подлежит уточнению в связи с изменением объёма работ путём составления дополнительного соглашения, а также  в случае изменения цен, тарифов, прейскурантов, в случае изменения действующего законодательства.

Платежи по настоящему договору вносятся путем перечисления на расчётный счет Исполнителя с обязательным указанием в назначении платежа номера договора.

При этом, Заказчик для устранения неверной информации имеет право в одностороннем порядке изменить назначение исполненного платежа в платёжном поручении путем направления соответствующего письма об этом Исполнителю, а указанное в письме назначение платежа будет иметь обязательную силу для  Исполнителя с даты получения письма по электронной почте.

Результат выполненных работ выдается Заказчику или его представителю по доверенности, на основании подписанного акта выполненных работ и после поступления от Заказчика суммы, подлежащей оплате.

Согласно раздела 3 договора, началом выполнения работ по договору считается дата выхода Исполнителя, или его представителя: на объект, указанный в п. 1.2 настоящего договора. Исполнитель обязан обеспечить выход на объект в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

Срок выполнения работ - 60 рабочих дней, со дня подписания настоящего договора.

В случае увеличения объёма работ по инициативе Заказчика, либо выявления в ходе выполнения работ по настоящему договору увеличения объёмов работ по сравнению с первично заявленными Заказчиком, Исполнитель вправе изменить сроки либо приостановить выполнение работ, оформив данные изменения по правилам, предусмотренным п. 6.1 настоящего договора.

Истец указывает, что проект прошёл государственную экспертизу в ОАУ «Ульяновскгосэкспертиза» 25.01.2024г., однако задолженность по договору в размере 544 000 руб. 00 коп. не погашена.

05.03.2024 между сторонами был подписан акт выполненных работ на сумму 544 000 руб. 00 коп. 

Результат выполненных истцом работ передан ответчику, но окончательный расчет по договору не производился.

Кроме того, 21.02.2023 между истцом (Исполнитель) и ответчиком (Заказчик) заключен договор № 6/2023 на выполнение работ, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с заданием Заказчика выполнитьследующие виды работ: Транспортно-экономические изыскания и Отчет о проведении транспортного моделирования по объекту «Строительство путепровода в створе улицы Промышленной и переулка Хрустального с подходами».

Объект расположен по адресам: 

<

...> от Московского шоссе до ул. Локомотивная, ул. Шолмова от ул. Фруктовая до ул. Терешковой.

Согласно раздела 2 договора, стоимость работ по настоящему договору составляет: 415 000 рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Сумма договора является окончательной и отражается в акте выполненных работ. Изменение стоимости возможно только в случае изменения цен, тарифов, прейскурантов, в случае изменения действующего законодательства, путем составления дополнительного соглашения.

Заказчик обязуется оплатить сумму по договору в следующем порядке:

• 80% от окончательной суммы в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ. В случае, если акт выполненных работ не возвращён Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения, и Исполнителю не представлен мотивированный отказ от подписания акта, работа считается выполненной, акт принятым.

• 20% от окончательной суммы в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента прохождения государственной экспертизы проекта

Указанная в п. 2.1. настоящего договора стоимость, является договорной и подлежит уточнению в связи с изменением объёма работ путём составления дополнительного соглашения, а также  в случае изменения цен, тарифов, прейскурантов, в случае изменения действующего законодательства.

Платежи по настоящему договору вносятся путем перечисления на расчётный счет Исполнителя с обязательным указанием в назначении платежа номера договора.

При этом Заказчик для устранения неверной информации имеет право в одностороннем порядке изменить назначение исполненного платежа в платёжном поручении путем направления соответствующего письма об этом Исполнителю, а указанное в письме назначение платежа будет иметь обязательную силу для  Исполнителя с даты получения письма по электронной почте.

Результат выполненных работ выдается Заказчику или его представителю по доверенности, на основании подписанного акта выполненных работ и после поступления от Заказчика суммы, подлежащей оплате.

Согласно раздела 3 договора, началом выполнения работ по договору считается дата подписания настоящего договора.

Исполнитель обязан обеспечить выход индивидуального предпринимателя или его представителя на объект в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

Срок выполнения работ - 30 рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

В случае увеличения объёма работ по инициативе Заказчика, либо выявления в ходе выполнения работ по настоящему договору увеличения объёмов работ по сравнению с первично заявленными Заказчиком, Исполнитель вправе изменить сроки либо приостановить выполнение работ, оформив данные изменения по правилам, предусмотренным п. 6.1. настоящего договора.

Истец указывает, что 05.03.2024 между сторонами был подписан акт выполненных работ на сумму 415 000 руб. 00 коп. 

Результат выполненных истцом работ передан ответчику, но окончательный расчет по договору не производился.

Кроме того, 14.04.2023 между истцом (Исполнитель) и ответчиком (Заказчик) заключен договор № 5/2023 на выполнение работ, в соответствии с которым Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с заданием Заказчика выполнить следующие виды работ: подготовка проекта планировки территории по объекту «Строительство путепровода в створе улицы Промышленной и переулка Хрустального с подходами» (согласно Приложения №1 - технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора).

Место выполнения работ: 

<

...> от  Московского шоссе до ул. Локомотивная, ул. Шолмова от ул. Фруктовая до ул. Терешковой.

Согласно раздела 2 договора, стоимость работ по настоящему договору составляет 2 400 000 рублей ноль копеек, НДС не предусмотрен.

Сумма договора является окончательной и отражается в акте выполненных работ. Изменение стоимости возможно только в случае изменения цен, тарифов, прейскурантов, в случае изменения действующего законодательства, путем составления дополнительного соглашения.

Заказчик обязуется оплатить сумму по договору в следующем порядке:

• 80% от суммы в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения акта выполненных работ от Исполнителя. В случае, если акт выполненных работ не возвращён Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения, и исполнителю не представлен мотивированный отказ от подписания акта, работа считается выполненной, акт принятым.

• 20% от окончательной суммы в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента прохождения государственной экспертизы проекта.

Указанная в п.2.1 настоящего договора стоимость является договорной и подлежит уточнению только в связи с изменением объёма работ путём составления дополнительного соглашения, а также, в случае изменения-цен, тарифов, прейскурантов, в случае изменения действующего законодательства.

Платежи по настоящему договору вносятся путем перечисления на расчётный счёт Исполнителя с обязательным указанием номера договора.

При этом, Заказчик для устранения неверной информации имеет право в одностороннем порядке изменить назначение исполненного платежа в платёжном поручении путем направления соответствующего письма об этом Исполнителю, а указанное в письме назначение платежа будет иметь обязательную силу для Исполнителя с даты получения письма по электронной почте.

Результат выполненных, работ выдается Заказчику или его представителю по доверенности, на основании подписанного акта выполненных работ и после поступления от Заказчика суммы, подлежащей оплате.

Согласно раздела 3 договора, началом выполнения работ по договору считается дата подписания настоящего договора.

Исполнитель обязан обеспечить выход индивидуального предпринимателя или его представителя на объект в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

Срок выполнения работ - 30 рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

В случае увеличения объёма работ по инициативе Заказчика, либо выявления в ходе выполнения работ по настоящему договору увеличения объёмов работ по сравнению с первично заявленными Заказчиком, Исполнитель вправе изменить сроки либо приостановить выполнение работ, оформив данные изменения по правилам, предусмотренным п. 6.1. настоящего договора.

05.03.2024 между сторонами был подписан акт выполненных работ на сумму 544 000 руб. 00 коп. 

Результат выполненных истцом работ передан ответчику, но окончательный расчет по договору не производился.

Истец считает, что исполнил свои обязательства по вышеуказанным договорам в полном объеме. Каких-либо замечаний по выполненным работам со стороны ответчика заявлено не было, в связи с чем истец полагает, что ответчик необоснованно уклоняется от оплаты выполненной работы.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить выполненные работы.

Данное требование ответчиком оставлено без исполнения. 

Указанные обстоятельства послужили истцу основанием для обращения с настоящим исковым заявлением о взыскании задолженности в судебном порядке.

Согласно расчета, истец просит взыскать с ответчика сумму основного долга в размере 3 359 000 руб. 00 коп., из которых:

-основной долг по договору №1208-ХА от 21.10.2022 в размере 544 000 руб. 00 коп.

-основной долг по договору №6/2023 от 21.02.2023 в размере 415 000 руб. 00 коп.

-основной долг по договору №5/2023 от 14.04.2023 в размере 2 400 000 руб. 00 коп.

Ответчик с исковыми требованиями не согласен. Заявил ходатайство об уменьшении размера процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 333 ГК РФ.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В силу пункта 1 статьи 711 Гражданского кодекса  РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата Заказчику (статьи 711 и 746 ГК РФ). Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Согласно ч.1 ст. 708 Гражданского Кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Частью 1 статьи 65 АПК РФ предусмотрена обязанность каждого лица, участвующего в деле, доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Согласно п.3.1 ст.70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчик факт выполнения работ не оспорил, контррасчет не представил.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об удовлетворении взыскания суммы основного долга в размере 3 359 000 руб. 00 коп.

Истец также просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами, а именно:

-проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №1208-ХА от 21.10.2022г.  с 14.03.2024 по день фактического погашения задолженности.

-проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №6/2023 от 21.02.2023 с 14.03.2024 по день фактического погашения задолженности.

-проценты за пользование чужими денежными средствами по договору №5/2023 от 14.04.2023 с 14.03.2024 по день фактического погашения задолженности.

Согласно п.5.3 договоров стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Ответчик заявил ходатайство об уменьшении размера процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 333 ГК РФ.

Судом данное ходатайство оставлено без удовлетворения, поскольку положения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации в части процентов, взыскиваемых на основании ст.395 ГК РФ, не применимы.

Учитывая изложенное, исковые требования в части взыскания процентов подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате госпошлины в соответствии со ст. 110 АПК РФ следует возложить  на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176-177, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Открытого акционерного общества «Хотьковский автомост» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 3 359 000 руб.- основной долг, с 14.03.2024 проценты по день фактического погашения задолженности, 125 770 руб.- госпошлину.

Возвратить Индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета госпошлину в размере 13 023 руб.

 Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения путем подачи апелляционной жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Судья                                                                                                       О.А. Слепенкова