АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 1, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Именем Российской Федерации

20 апреля 2024 года

Дело № А33-5136/2024

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении ходатайства истца о рассмотрении дела по общим правилам искового производства отказать, ввиду отсутствия соответствующего заявления ответчика, а также отсутствия оснований для перехода к рассмотрению спора по общим правилам искового производства, отсутствия возражений ответчика и достаточности представленных в материалы дела доказательств для разрешения спора по существу.

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в течении календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 07.06.2022 № 20.2400.6245.22, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя объекта «Опора двойного назначения», расположенного (который будет располагаться) по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, городское благоустройство по ул. Западная, 3-14 (сквер 30 лет Победы), кадастровый номер земельного участка 24:50:0000000:190729, в точке присоединения:

I точка присоединения: максимальная мощность 15 кВт.

Опора (0,4)           Проектируемая

Линия (0,4)           ВЛ 0,4 кВ Л-6 ТП 199

Ячейка ТП           6Л-ВЛ ул. Шелковая, 4

ТП                        ТП199 0У

Ячейка ПС           яч. 12 в ст. РПЧ44

ПС                        ПС № 15 «Злобинская» 110/6 кВ

Основной источник питания: ПС № 15 «Злобинская» 110/6 кВ

Резервный источник питания: отсутствует. в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт;

- категория надежности третья;

- класс  напряжения  электрических  сетей,  к которым осуществляется технологическое

присоединение 0,4 кВ;

- максимальная   мощность   ранее   присоединенных    энергопринимающих   устройств

отсутствует;

включая мероприятия согласно Техническим условиям № 8000503497:

- выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласование со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством;

- реконструкция ТП 199 ОУ с заменой силового трансформатора на силовой трансформатор большего номинала. Объем необходимых мероприятий, параметры и характеристики оборудования определить проектом;

- строительство ЛЭП 0,4 кВ от точки, указанной в пункте № 7 настоящих ТУ, до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Способ прокладки, марку и сечение провода определить проектом;

- определить проектом необходимость установки укоса на отпаечной опоре ЛЭП 0,4 кВ;

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) 24 571,25 руб. договорной неустойки за период с 09.12.2022 по 20.02.2024, а также пени с 21.02.2024 по день фактического исполнения обязательства из расчета 55,97 рублей (0,25 % от размера платы 22 388,38 руб.) за каждый день просрочки и 8 000 руб. судебных расходов по уплате госпошлины.

Требование о взыскании судебной неустойки удовлетворить частично.

В случае неисполнения решения суда в полном объёме в течение календарного месяца со дня вступления в законную силу судебного акта по настоящему делу взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные решения» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, г. Красноярск) судебную неустойку в размере 559,70 руб. за каждый день неисполнения решения суда по настоящему делу до фактического исполнения решения суда.

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной неустойки отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдаётся только по заявлению взыскателя.

Судья

И.В. Степаненко