АРБИТРАЖНЫЙ СУД СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ОКРУГА 

Именем Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда кассационной инстанции

Дело № А63-1794/2024

г. Краснодар

08 апреля 2025 года

Резолютивная часть постановления объявлена 08 апреля 2025 года Постановление в полном объеме изготовлено 08 апреля 2025 года  

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Садовникова А.В., судей Аваряскина В.В. и Зотовой И.И., при участии в судебном заседании от ответчика по первоначальному иску (истца по встречному иску) – акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) – ФИО1 (доверенность от 01.01.2025), в отсутствие истца по первоначальному иску (ответчика по встречному иску) – общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтройКомплект-КМВ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационную жалобу акционерного общества «ЧиркейГЭСстрой» на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.09.2024 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2025 по делу № А63-1794/2024, установил следующее.  

ООО «ЮгСтройКомплект-КМВ» (далее – общество) обратилось в арбитражный суд с иском к АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – компания) о взыскании 144 480 рублей долга и 7224 рублей неустойки по договору от 01.03.2023 № 080/ПТО/ДП-2023 (КГ); 3 700 568 рублей 82 копеек долга и 185 028 рублей 40 копеек неустойки по договору от 11.02.2022 № 042/ПТО/СП-2022; 331 200 рублей долга и 16 560 рублей неустойки по договору от 07.04.2023 № 191/ПТО/ДП-2023 (КГ); 12 310 593 рублей 02 копеек долга и 615 529 рублей 65 копеек неустойки по договору от 17.12.2021 № 607/ПТО/СП-2021 (КГ); 1 841 400 рублей долга и 92 070 рублей неустойки по договору от 07.09.2022 № 529/СТ/Усл-2022 (КГ); 150 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя.  

Компания обратилась в арбитражный суд со встречным иском к обществу о взыскании 2 141 687 рублей 09 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 11.02.2022 № 042/ПТО/СП-2022 (КГ).  

Решением суда от 30.09.2024, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 30.01.2025, исковые требования общества удовлетворены. С компании в пользу общества взыскано 18 328 241 рубль 84 копейки долга, 916 412 рублей 05 копеек неустойки, 75 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя, 119 223 рубля расходов на уплату государственной пошлины. Встречные исковые требования удовлетворены частично. С общества в пользу компании взыскано 440 072 рубля 69 копеек неустойки с 01.01.2023 по 29.06.2023, 33 708 рублей расходов на уплату государственной пошлины. В удовлетворении остальной части встречного иска отказано. В результате зачета взаимных требований с компании в пользу общества взыскано 18 328 241 рубль 84 копейки долга, 476 339 рублей 36 копеек неустойки, 75 тыс. рублей расходов на оплату услуг представителя, 85 515 рублей расходов на уплату государственной пошлины.  

В кассационной жалобе компания просит отменить обжалуемые судебные акты и удовлетворить в полном объеме встречные исковые требования. По мнению заявителя, судами необоснованно уменьшен размер неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 11.02.2022; общество добровольно приняло все условия договора; в материалах дела отсутствуют доказательства несоразмерности неустойки, а также доказательства получения компанией необоснованной выгоды в связи с взысканием в ее пользу данной неустойки.  

В судебном заседании представитель компании поддержал доводы жалобы. 

Законность судебных актов проверяется кассационным судом в обжалуемой части в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе (части 1 и 3 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее – Кодекс).  

Изучив материалы дела и доводы кассационной жалобы, выслушав представителя компании, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа пришел к следующим выводам.  

Из материалов дела видно и судами установлено, что 17.12.2021 компания (подрядчик) и общество (субподрядчик) заключили договор субподряда № 607/ПТО/СП-2021 (КГ), по условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору) выполнить работы по устройству систем остекления оконных проемов зданий ГЭС и административного здания Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 и сдать результат работ  

подрядчику, а подрядчик обязался создать субподрядчику указанные в договоре условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить цену договора.  

Согласно пунктам 1.5.1 – 1.5.6 договора субподряда от 17.12.2021 (в редакции дополнительного соглашения от 31.01.2022 № 1) работы выполняются субподрядчиком в следующие сроки: начало выполнения работ – с даты подписания акта сдачи-приемки места производства работ (приложение № 8 к договору); окончание выполнения работ – не более 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки места производства работ (приложение № 8 к договору).  

В соответствии с пунктом 1.6 договора субподряда от 17.12.2021 выполнение работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным графиком выполнения работ (приложение № 3 к договору) в рамках общих сроков.  

Пунктом 3.1 договора субподряда от 17.12.2021 (в редакции дополнительного соглашения № 2) стороны предусмотрели, что цена договора в соответствии со сводным сметным расчетом (приложение № 2 к договору) является твердой и составляет 28 879 731 рубль без НДС, который исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс), в том числе:  

– по Красногорской МГЭС-2 в соответствии со сводным сметным расчетом, локальным сметным расчетом (приложение № 2 к договору) стоимость составляет 15 617 180 рублей без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса;  

– по Красногорской МГЭС-1 в соответствии со сводным сметным расчетом, локальным сметным расчетом (приложение № 2 к договору) стоимость составляет 13 262 551 рубль без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса.  

Из календарного графика выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью дополнительного соглашения № 2 к договору субподряда от 17.12.2021, следует, что сроки выполнения работ по устройству систем остекления оконных проемов по зданию МГЭС-2 и административного здания – с даты подписания акта сдачи-приемки места производства работ и до 30.11.2022, сроки выполнения работ по устройству систем остекления оконных проемов по зданию МГЭС-1 – с даты подписания акта сдачи-приемки места производства работ и до 31.12.2022.  

Оплата по договору осуществляется подрядчиком в следующем порядке: 

1) авансовые платежи в счет стоимости каждого этапа работ в размере 30% от стоимости соответствующего этапа работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты получения подрядчиком счета, выставленного субподрядчиком, при условии согласования сторонами сметной документации на соответствующий этап работ в соответствии с пунктом 3.1 договора, но не ранее, чем за 30 календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение № 3 к договору), и с учетом пунктов 3.4.4, 3.4.5 договора;  

2) последующие платежи в размере 70% от стоимости выполненных работ, указанной в акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса на дату платежа, выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.1 договора, на основании счета, выставленного подрядчиком, и с учетом пунктов 3.4.4, 3.4.5 договора.  

Окончательный расчет по этапу работ производится в следующем порядке: 

1) если стоимость этапа работ, определенная с учетом НДС по установленной статьей 164 Налогового кодекса ставке на дату подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных подрядчиком в соответствии с пунктами 3.4.1, 3.4.2 договора, соответствующая разница выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, на основании счета, выставленного подрядчиком, и с учетом пунктов 3.4.4, 3.4.5 договора (пункты 3.4.1 – 3.4.2, 3.4.3.1 договора субподряда от 17.12.2021 в редакции дополнительного соглашения от 31.01.2022 № 1);  

В силу пункта 3.4.3.2 договора субподряда от 17.12.2021 если стоимость этапа работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса на дату подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, будет менее суммы авансовых платежей, ранее уплаченных подрядчиком в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2 договора, соответствующая разница, определенная, в том числе с учетом пункта 3.5.5 договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося субподрядчику по договору, либо возврату субподрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением сторон.  

В случае выставления субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае  

выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате подрядчиком не принимается и подлежит замене субподрядчиком независимо от его фактического вручения подрядчику. В случае выставления субподрядчиком счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета подрядчиком (пункт 3.4.4 договора субподряда от 17.12.2021).  

Пунктом 3.9 договора субподряда от 17.12.2021 стороны предусмотрели, что подрядчик в ходе исполнения договора оказывает субподрядчику генподрядные услуги, по факту оказания которых подписывается акт оказанных генподрядных услуг (приложение № 9 к договору). За услуги, оказываемые подрядчиком вне зависимости от фактического объема услуг, субподрядчик ежемесячно производит отчисления в размере 10% от стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1 договора. Оплата услуг, указанных в акте оказанных генподрядных услуг, осуществляется субподрядчиком банковским переводом на расчетный счет подрядчика на основании выставленного подрядчиком счета в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта оказанных генподрядных услуг.  

Согласно пункту 4.1 договора субподряда от 17.12.2021 приемка работ осуществляется подрядчиком ежемесячно по окончании календарного месяца. Субподрядчик в течение трех рабочих дней представляет подрядчику подписанный со своей стороны в трех экземплярах акт освидетельствования выполненных работ (приложение № 5 к договору) с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (в формате pdf), журнала учета выполненных работ формы № КС-6а в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате pdf).  

В силу пункта 4.4 договора субподряда от 17.12.2021 в течение 15 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.3 договора, подрядчик подписывает и передает субподрядчику один экземпляр каждого акта либо направляет субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ), в котором отражает недостатки, несоответствия и (или) дефекты работ (этапа работ), а также срок на их устранение.  

За нарушение подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), субподрядчик вправе требовать в соответствии с пунктом 7.3 договора субподряда от 17.12.2021 уплаты подрядчиком  

исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.  

По факту выполнения работ уполномоченными представителями обеих сторон без каких-либо замечаний и возражений подписаны акты о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 30.06.2023 № 1 и № 2 на общую сумму 34 655 677 рублей 20 копеек, а также акты приемки законченного строительством объекта от 30.06.2023 № 1.  

Компания произвела оплату выполненных работ на общую сумму 22 345 084 рубля 18 копеек платежными поручениями от 24.02.2022 № 458, от 18.11.2022 № 5336, от 30.11.2022 № 313, от 29.1 2.2022 № 6079, от 20.06.2023 № 1946, от 30.06.2023 № 62.  

11 февраля 2022 года компания (подрядчик) и общество (субподрядчик) заключили договор субподряда № 042/ПТО/СП-2022 (КГ), по условиям которого субподрядчик обязался по заданию подрядчика в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору) изготовить и выполнить работы по монтажу дверных блоков зданий ГЭС и административного здания Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2 и сдать результат работ подрядчику, а подрядчик обязался создать субподрядчику указанные в договоре условия для выполнения работ, принять результат работ и уплатить цену договора.  

Работы выполняются субподрядчиком в следующие сроки:  

– начало выполнения работ по зданию МГЭС-2 – с даты заключения договора (пункт 1.5.1 договора субподряда от 11.02.2022);  

– окончание выполнения работ по зданию МГЭС-2 – 30.12.2022 (пункт 1.5.2 договора субподряда от 11.02.2022 в редакции дополнительного соглашения № 2);  

– начало выполнения работ по зданию МГЭС-1 – 01.06.2022 (пункт 1.5.3 договора субподряда от 11.02.2022);  

– окончание выполнения работ по зданию МГЭС-1 – 30.12.2022 (пункт 1.5.4 договора субподряда от 11.02.2022 в редакции дополнительного соглашения № 2).  

В соответствии с пунктом 1.6 договора субподряда от 11.02.2022 выполнение работ осуществляется поэтапно. Сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным графиком выполнения работ (приложение № 3 к договору) в рамках общих сроков.  

Пунктом 3.1 договора субподряда от 11.02.2022 стороны предусмотрели, что цена договора в соответствии со сводным сметным расчетом (приложение № 2 к договору) является предельной и составляет 9 783 333 рубля 33 копейки без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса, в том числе:  

– по Красногорской МГЭС-1 в соответствии с расчетом стоимости (приложение № 3 к договору) является предельной и составляет 4 891 666 рублей 66 копеек без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса;  

– по Красногорской МГЭС-2 в соответствии с расчетом стоимости (приложение № 3 к договору) является предельной и составляет 4 891 666 рублей 67 копеек без НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса.  

Оплата по договору осуществляется подрядчиком в следующем порядке: 

1) авансовые платежи в счет стоимости каждого этапа работ в размере 30% от стоимости соответствующего этапа работ без НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса на дату выплаты авансового платежа, выплачиваются в течение 30 календарных дней с даты получения подрядчиком счета, выставленного субподрядчиком, но не ранее, чем за 30 календарных дней до даты его начала, определенной в соответствии с календарным графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору), и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 договора (пункт 3.5.1 договора субподряда от 11.02.2022);  

2) последующие платежи в размере 70% от стоимости выполненных работ, указанной в акте освидетельствования выполненных работ, без учета НДС, кроме того НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса на дату платежа, выплачиваются в течение 15 календарных дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.1 договора, на основании счета, выставленного подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 договора (пункт 3.5.2 договора субподряда от 11.02.2022).  

Окончательный расчет по этапу работ производится в следующем порядке: 

1) если стоимость этапа работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса на дату подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, будет превышать сумму авансовых платежей, ранее уплаченных подрядчиком в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2 договора, соответствующая разница выплачивается в течение 15 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, на основании счета, выставленного подрядчиком, и с учетом пунктов 3.5.4, 3.5.5 договора (пункт 3.5.3.1 договора субподряда от 11.02.2022);  

2) если стоимость этапа работ, определенная с учетом НДС по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса на дату подписания сторонами документов, указанных в пункте 4.2 договора, будет менее суммы авансовых платежей,  

ранее уплаченных подрядчиком в соответствии с пунктами 3.5.1, 3.5.2 договора, соответствующая разница, определенная, в том числе с учетом пункта 3.5.5 договора, подлежит зачету в счет следующего платежа, причитающегося субподрядчику по договору, либо возврату субподрядчиком или зачету на иных условиях, определяемых отдельным соглашением сторон (пункт 3.5.3.2 договора субподряда от 11.02.2022).  

В случае выставления субподрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате подрядчиком не принимается и подлежит замене субподрядчиком независимо от его фактического вручения подрядчику. В случае выставления субподрядчиком счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета подрядчиком (пункт 3.5.4 договора субподряда от 11.02.2022).  

Пунктом 3.9 договора субподряда от 11.02.2022 стороны предусмотрели, что подрядчик в ходе исполнения договора оказывает субподрядчику генподрядные услуги, по факту оказания которых подписывается акт оказанных генподрядных услуг (приложение № 9 к договору). За услуги, оказываемые подрядчиком вне зависимости от фактического объема услуг, субподрядчик ежемесячно производит отчисления в размере 10% от стоимости выполненных работ в соответствии с пунктом 4.1 договора. Оплата услуг, указанных в акте оказанных генподрядных услуг, осуществляется субподрядчиком банковским переводом на расчетный счет подрядчика на основании выставленного подрядчиком счета в течение 5 банковских дней с момента подписания сторонами акта оказанных генподрядных услуг.  

Согласно пункту 4.1 договора субподряда от 11.02.2022 приемка работ осуществляется подрядчиком ежемесячно по окончании календарного месяца. Субподрядчик в течение трех рабочих дней представляет подрядчику подписанный со своей стороны в трех экземплярах акт освидетельствования выполненных работ (приложение № 5 к договору) с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации в трех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде (в формате pdf), журнала учета выполненных работ формы № КС-6а в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (в формате pdf).  

В силу пункта 4.4 договора субподряда от 11.02.2022 в течение 15 рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пунктах 4.1 – 4.3 договора, подрядчик подписывает и передает субподрядчику один экземпляр каждого акта либо  

направляет субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки работ (этапа работ), в котором отражает недостатки, несоответствия и (или) дефекты работ (этапа работ), а также срок на их устранение.  

За нарушение подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), субподрядчик вправе требовать в соответствии с пунктом 7.3 договора субподряда от 11.02.2022 уплаты подрядчиком исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.  

За нарушение субподрядчиком обязательств по выполнению работ, в том числе сроков выполнения работ, установленных календарным графиком выполнения работ (приложение № 3 к договору), сроков предоставления приемо-сдаточной и исполнительной документации, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результата работ, если такое нарушение привело или неизбежно приведет к изменению срока выполнения работ в целом по договору или сроков окончания выполнения любого из последующих этапов работ, подрядчик в соответствии с пунктом 7.4.1 договора субподряда от 11.02.2022 вправе требовать уплаты субподрядчиком штрафной неустойки в размере 0,2% от цены этапа работ за каждый день просрочки.  

Общество выполнило работы, что подтверждается подписанными уполномоченными представителями обеих сторон без каких-либо замечаний и возражений актами о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 30.11.2022 № 01ПР и № 01, от 30.06.2023 № 1 и № 2 на общую сумму 11 612 296 рублей 80 копеек, а также актом приемки законченного строительством объекта от 30.06.2023 № 1.  

Ответчик произвел оплату выполненных работ на общую сумму 7 911 727 рублей 98 копеек платежными поручениями от 19.04.2022 № 1398, от 22.08.2022 № 3651, от 14.11.2022 № 5129, от 30.11.2022 № 313, от 29.12.2022 № 6080, от 30.06.2023 № 62.  

7 сентября 2022 года компания (заказчик) и общество (исполнитель) заключили договор возмездного оказания услуг № 529/СТ/Усл-2022 (КГ), по условиям которого исполнитель обязуется по заданию и согласно указаниям заказчика в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к договору) оказать услуги с применением специальной техники – телескопической автовышки, а заказчик обязуется создать исполнителю указанные в договоре условия для оказания услуг и оплатить услуги в соответствии с условиями договора.  

В силу пункта 1.5 договора от 07.09.2022 общий срок оказания услуг: начало – с даты заключения договора, по заявкам заказчика; окончание – в течение 6 месяцев с даты заключения договора или до исчерпания суммы договора.  

На основании пункта 3.6 договора от 07.09.2022 услуги считаются оказанными исполнителем и принятыми заказчиком с момента подписания сторонами акта об оказании услуг.  

Согласно пунктам 4.1, 4.4, 4.5.1 договора от 07.09.2022 стоимость услуг по договору в соответствии с расчетом стоимости услуг (приложение № 3 к договору) является предельной и составляет 4 637 500 рублей без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса, в том числе:  

– 1 391 250 рублей без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по установленной статьей 164 Налогового кодекса ставке – на объект строительства Красногорская МГЭС-1;  

– 3 246 250 рублей без учета НДС, НДС исчисляется дополнительно по установленной статьей 164 Налогового кодекса ставке – на объект строительства Красногорская МГЭС-2.  

Оплата за оказанные услуги в размере 100% от стоимости оказанных услуг за соответствующий месяц выплачивается в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 3.2 договора, на основании счета, выставленного исполнителем, и с учетом пункта 4.5.1 договора.  

В случае выставления исполнителем счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате не принимается и подлежит замене исполнителем независимо от его фактического вручения заказчику. В случае выставления исполнителем счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета заказчиком.  

За нарушение заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 4 договора, исполнитель в соответствии с пунктом 5.2 договора от 07.09.2022 вправе требовать уплаты заказчиком исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.  

На основании направленной заявки на оказание услуг № 4 (количество маш/час 297; срок оказания услуг – с 05.01.2023 по 31.01.2023; место оказания услуг – Красногорские МГЭС-2, КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, около станицы Красногорская, на расстоянии 3,4 км ниже по течению реки от Зеленчукской ГЭС-ГАЭС-2 и в 40 км южнее города Черкесска) общество оказало компании услуги на общую сумму 801 900 рублей, в том числе НДС 20% – 133 650 рублей.  

Услуги приняты заказчиком без каких-либо замечаний и возражений, что подтверждается актом об оказании услуг от 31.01.2023 № 1 и справкой для расчетов за выполненные работы (услуги) от 31.01.2023 № 4.  

На основании направленной заявки на оказание услуг № 5 (количество маш/час 308; срок оказания услуг – с 01.02.2023 по 28.02.2023; место оказания услуг – Красногорские МГЭС-2, КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, около станицы Красногорская, на расстоянии 3,4 км ниже по течению реки от Зеленчукской ГЭС-ГАЭС-2 и в 40 км южнее города Черкесска) общество оказало компании услуги на общую сумму 831 600 рублей, в том числе НДС 20% – 138 600 рублей.  

Услуги приняты заказчиком без каких-либо замечаний и возражений, что подтверждается актом об оказании услуг от 28.02.2023 № 3 и справкой для расчетов за выполненные работы (услуги) от 28.02.2023 № 5.  

На основании направленной заявки на оказание услуг № 6 (количество маш/час 77; срок оказания услуг – с 01.03.2023 по 07.03.2023; место оказания услуг – Красногорские МГЭС-2, КЧР, Усть-Джегутинский муниципальный район, около станицы Красногорская, на расстоянии 3,4 км ниже по течению реки от Зеленчукской ГЭС-ГАЭС-2 и в 40 км южнее города Черкесска) общество оказало компании услуги на общую сумму 207 900 рублей, в том числе НДС 20% – 34 650 рублей.  

Услуги приняты заказчиком без каких-либо замечаний и возражений, что подтверждается актом об оказании услуг от 07.03.2023 № 4 и справкой для расчетов за выполненные работы (услуги) от 07.03.2023 № 6.  

Оказанные по заявкам № 4 – 6 услуги компания не оплатила. 

1 марта 2023 года компания (покупатель) и общество (поставщик) заключили договор № 080/ПТО/ДП-2023 (КГ), по условиям которого поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные договором, передать в собственность покупателя взрывобезопасную бесцветную пленку в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору) и оказать услуги по проклейке взрывобезопасной бесцветной пленки контура безопасности на оконных проемах здания Красногорской МГЭС-1 в соответствии  

с расчетом стоимости услуг (приложение № 3 к договору), а покупатель обязуется принять товар и услуги и уплатить цену договора.  

Согласно пункту 1.5 договора от 01.03.2023 общий срок поставки услуг: начало – с даты подписания договора; окончание – не более 30 календарных дней с даты заключения договора.  

Сроки поставки товара (партий товара) и оказания услуг указаны в календарном графике поставки товара и оказания услуг (приложение № 2 к договору) в рамках общих сроков, указанных в пункте 1.5 договора (пункт 1.6 договора от 01.03.2023).  

Из календарного графика поставки товара и оказания услуг следует, что срок поставки товара – 5 календарных дней с даты заключения договора, срок оказания услуг – 10 календарных дней с даты поставки товара.  

Согласно пунктам 2.1, 2.1.1, 2.1.2 договора от 01.03.2023 цена договора в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору) и расчетом стоимости услуг (приложение № 3 к договору) является предельной и составляет 160 000 рублей без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса, в том числе:  

– стоимость товара в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору) является предельной и составляет 100 000 рублей без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса;  

– стоимость услуг в соответствии с расчетом стоимости услуг (приложение № 3 к договору) является предельной и составляет 60 000 рублей без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса.  

Оплата по договору осуществляется покупателем в следующем порядке: 

1) авансовые платежи за каждую партию товара в размере 30% от стоимости соответствующей партии товара выплачиваются поставщику в течение 30 календарных дней с даты получения покупателем счета, выставленного поставщиком, но не ранее чем за 30 календарных дней до плановой даты поставки партии товара, и с учетом пункта 2.4.5 договора (пункт 2.4.1 договора от 01.03.2023);  

2) авансовые платежи в счет стоимости услуг в размере 30% от стоимости услуг выплачиваются поставщику в течение 30 календарных дней с даты получения покупателем счета, выставленного поставщиком, но не ранее чем за 30 календарных дней до даты начала оказания услуг, определенной в соответствии с календарным графиком поставки товара и оказания услуг (приложение № 2 к договору), и с учетом пункта 2.4.5 договора (пункт 2.4.2 договора от 01.03.2023);  

3) последующие платежи в размере 70% от стоимости партии товара выплачиваются поставщику в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12 на основании счета, выставленного поставщиком, и с учетом пункта 2.4.5 договора (пункт 2.4.3 договора от 01.03.2023);  

4) последующий платеж в размере 70% от стоимости услуг выплачивается поставщику в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документов, указанных в пункте 6.1 договора, на основании счета, выставленного поставщиком, и с учетом пункта 2.4.5 договора (пункт 2.4.4 договора от 01.03.2023).  

В случае выставления поставщиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате покупателем не принимается и подлежит замене поставщиком независимо от его фактического вручения покупателю. В случае выставления поставщиком счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета покупателем (пункт 2.4.5 договора от 01.03.2023).  

В соответствии с пунктами 3.1, 3.9 и 3.10 договора от 01.03.2023 поставка товара осуществляется партиями в место поставки: Красногорская МГЭС-1, расположенная на реке Кубань (806 км от устья), на территории Карачаево-Черкесской Республики, в Усть-Джегутинском муниципальном районе, около станицы Красногорская, на расстоянии 3,4 км ниже по течению реки от Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и в 40 км южнее города Черкесска.  

Датой поставки партии товара является дата подписания сторонами накладной ТОРГ-12.  

Приемка партии товара по количеству тар и упаковок, в которых производилась отгрузка товара, осуществляется покупателем в день поставки в присутствии представителя поставщика согласно представленным транспортным и сопроводительным документам, указанным в пункте 3.4 договора. По результатам проверки количества упаковочных мест покупатель подписывает представленные транспортные документы.  

В соответствии с пунктами 6.1, 6.2 и 6.5 договора от 01.03.2023 по окончании оказания услуг поставщик представляет покупателю подписанный со своей стороны в двух экземплярах акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 4 к договору).  

В течение 5 рабочих дней с даты получения от поставщика акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с пунктом 6.1 договора покупатель подписывает  

и передает поставщику один экземпляр акта сдачи-приемки оказанных услуг либо направляет поставщику письменный мотивированный отказ от приемки услуг, в котором отражает выявленные недостатки, несоответствия и (или) дефекты услуг, а также срок на их устранение.  

Услуги считаются оказанными поставщиком и принятыми покупателем с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

Пунктом 7.3 договора от 01.03.2023 стороны предусмотрели, что в случае нарушения покупателем сроков оплаты, установленных разделом 2 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), поставщик вправе требовать уплаты покупателем исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы.  

Компания произвела авансирование по договору от 01.03.2023 в сумме 36 000 рублей платежным поручением от 29.03.2023 № 892.  

10 апреля 2023 года общество поставило компании товар (взрывобезопасную бесцветную пленку, класс пленки К4, толщина 112 мкм) на сумму 112 800 рублей (в том числе НДС 20% – 18 800 рублей), что подтверждается подписанной уполномоченными представителями обеих сторон товарной накладной от 10.04.2023 № 17.  

14 апреля 2023 года сторонами подписан акт сдачи-приемки оказанных услуг № 15 по проклейке взрывобезопасной бесцветной пленки контура безопасности на оконных проемах здания Красногорской МГЭС-1 на сумму 67 680 рублей (в том числе НДС 20% – 11 280 рублей).  

7 апреля 2023 года компания (покупатель) и общество (поставщик) заключили договор поставки № 191/ПТО/ДП-2023 (КГ), по условиям которого поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные договором, передать в собственность покупателя автоматические приводы на створки окон в здании Красногорской МГЭС-1 в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору), а покупатель обязуется принять товар и услуги и уплатить цену договора.  

В силу пункта 1.4 договора от 07.04.2023 общий срок поставки товара: начало – с даты заключения договора; окончание – не более 30 календарных дней с даты заключения договора.  

Согласно пунктам 2.1, 2.5, 2.5.1 – 2.5.3 договора от 07.04.2023 цена договора является предельной и составляет 276 000 рублей без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса.  

Оплата по договору осуществляется покупателем в следующем порядке: 

1) авансовые платежи в счет стоимости договора в размере 30% от цены договора без учета НДС, а также НДС по установленной статьей 164 Налогового кодекса ставке на дату авансового платежа, выплачиваются поставщику в течение 30 календарных дней с даты получения покупателем счета, выставленного поставщиком, и с учетом пункта 2.5.3 договора;  

2) последующие платежи в размере разницы между стоимостью партии товара без учета НДС, а также НДС по установленной статьей 164 Налогового кодекса ставке на дату подписания сторонами накладной ТОРГ-12/УПД, и суммой ранее уплаченного авансового платежа выплачиваются поставщику в течение 7 рабочих дней с даты подписания сторонами накладной ТОРГ-12/УПД на основании счета, выставленного поставщиком, и с учетом пункта 2.5.3 договора.  

В случае выставления поставщиком счета на сумму менее размера предусмотренного договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного договором платежа, такой счет к оплате покупателем не принимается и подлежит замене поставщиком независимо от его фактического вручения покупателю. В случае выставления поставщиком счета позднее, чем за 10 календарных дней до предусмотренной договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 календарных дней с даты фактического получения счета покупателем.  

В соответствии с пунктами 3.10 и 3.11 договора от 07.04.2023 датой поставки товара является дата подписания сторонами накладной ТОРГ-12. Приемка товара осуществляется покупателем в дату поставки товара в присутствии представителя поставщика.  

За нарушение покупателем сроков оплаты, установленных разделом 2 договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), поставщик вправе требовать уплаты покупателем исключительной неустойки в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от несвоевременно оплаченной суммы (пункт 5.3 договора от 07.04.2023).  

10 апреля 2023 года общество поставило компании товар (автоматический привод на створки окон) на сумму 331 200 рублей, что подтверждается подписанной уполномоченными представителями обеих сторон товарной накладной от 10.04.2023 № 16.  

Ответчик оплату поставленного товара не произвел. Сторонами подписан акт сверки взаимных расчетов за 2 квартал 2023 года. 

Ссылаясь на то, что по указанным договорам на стороне компании образовалась задолженность перед обществом в общей сумме 18 328 241 рубль 84 копейки, общество направило в адрес компании претензию с требованием погасить задолженность и уплатить неустойку за нарушение сроков оплаты по договорам.  

Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд.  

Обращаясь со встречным иском, компания указала, что обществом нарушен срок выполнения работ по договору субподряда от 11.02.2022.  

Кассационная жалоба не содержит доводов о несогласии с судебными актами в части удовлетворения первоначального иска.  

Проверив доводы кассационной жалобы о необоснованном уменьшении судами неустойки по встречному иску, суд кассационной инстанции отмечает следующее.  

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс) исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении (пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса).  

Уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 Гражданского кодекса).  

Из разъяснений, изложенных в пунктах 70 и 71 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности  

за нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума № 7), следует, что по смыслу статей 332 и 333 Гражданского кодекса, установление в договоре максимального или минимального размера (верхнего или нижнего предела) неустойки не являются препятствием для снижения ее судом; если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 Гражданского кодекса).  

Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки (пункт 73 постановления Пленума № 7).  

На основании пункта 75 постановления Пленума № 7 при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть более выгодным для должника, чем условия правомерного пользования (пункты 3 и 4 статьи 1 Гражданского кодекса).  

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2000 № 263-О, суд обязан установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного правонарушения. Таким образом, признание несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства является правом суда, принимающего решение. При этом в каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения санкций с учетом конкретных обстоятельств дела и взаимоотношений сторон.  

Критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и другое (пункт 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»).  

В абзаце третьем пункта 72 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что основаниями для отмены в кассационном порядке судебного акта в части, касающейся уменьшения неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса, являются нарушение или неправильное применение норм материального права.  

При этом приведенный в этом абзаце перечень случаев нарушения норм права не является исчерпывающим (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 21.07.2022 № 305-ЭС19-16942(40).  

Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон (часть 3 статьи 8 Кодекса).  

Рассмотрев заявление компании о снижении неустойки, суд первой инстанции, поддержанный апелляционным судом, принимая во внимание фактические обстоятельства рассматриваемого спора, в том числе размер предусмотренной ответственности сторон, правомерно исходил из необходимости обеспечения разумного баланса прав и законных интересов сторон и адекватности мер ответственности допущенным нарушениям и их последствиям. Суды исходили из того, что согласованный сторонами размер неустойки (0,1%) является обычным в деловом обороте, соответствует сложившейся практике договорных отношений хозяйствующих субъектов, отвечает принципам разумности и соразмерности ответственности за нарушение обязательства, не считается чрезмерно высоким.  

Вместе с тем, уменьшая размер заявленной компанией неустойки по пункту 7.4.1 договора субподряда от 11.02.2022 (0,2%) до двукратной ключевой ставки Банка России, суды усмотрели из положений договора субподряда от 11.02.2022 неравные условия ответственности сторон за нарушение обязательств (пункты 7.3 и 7.4.1 договора субподряда от 11.02.2022). При этом, суды надлежащим образом не аргументировали размер снижения присужденной в пользу компании неустойки до двукратной ключевой ставки Банка России (судами не рассмотрены доводы заявителя о возможности получения обществом необоснованной выгоды в результате снижения неустойки до двукратной ключевой ставки Банка России); не указали мотивы, по которым снизили размер взыскиваемой компанией неустойки ниже размера неустойки присужденной в пользу общества; неверно распределили бремя доказывания (бремя доказывания  

несоразмерности неустойки возлагается на ответчика; по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков).  

В соответствии с частью 4 статьи 15 Кодекса принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными. Данная норма во взаимосвязи с положениями статей 65 и 71 указанного Кодекса означает, что судом должно быть исследовано, поименовано в судебном акте и мотивированно принято или отклонено каждое доказательство, после чего по результатам оценки их совокупности во взаимной связи сделан обобщающий вывод об их достаточности для подтверждения или опровержения указываемых стороной обстоятельств полностью или в части.  

Согласно пункту 2 части 4 статьи 170 Кодекса в мотивировочной части решения должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.  

Ограничение предмета доказывания при рассмотрении дела в судах первой и апелляционной инстанций, повлекшее принятие ошибочных судебных актов, может являться основанием для направления дела на новое рассмотрение (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.05.2010 № 16112/09, от 16.11.2010 № 8467/2010).  

В силу части 2 статьи 287 Кодекса арбитражный суд, рассматривающий дело в кассационной инстанции, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в суде первой инстанции либо были отвергнуты судом первой инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть применена и какое решение, постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.  

В соответствии с частью 1 статьи 288 Кодекса основаниями для изменения или отмены решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций являются несоответствие выводов суда, содержащихся в решении, постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, и имеющимся в деле доказательствам, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.  

На основании пункта 3 части 1 статьи 287 Кодекса суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения кассационной жалобы вправе отменить или изменить  

решение суда первой инстанции и (или) постановление суда апелляционной инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд, решение, постановление которого отменено или изменено, если выводы, содержащиеся в обжалуемых решении, постановлении, не соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.  

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда подлежат частичной отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное, установить и исследовать все обстоятельства, входящие в предмет доказывания и имеющие значение для правильного разрешения спора, оценить доводы участвующих в деле лиц, после чего разрешить спор в соответствии с требованиями норм материального и процессуального права.  

ФИО2 одствуясь статьями 274, 286 − 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ставропольского края от 30.09.2024 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.01.2025 по делу № А63-1794/2024 в части удовлетворения первоначального иска оставить без изменения.  

В остальной части указанные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Председательствующий А.В. Садовников Судьи В.В. Аваряскин  

 И.И. Зотова