10582_10834835  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-5972/23

25 июля 2023 года.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчука И.С.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческой организации  "Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "Промышленная группа Южный регион"  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки работ, 

 Руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Промышленная группа  

Южный регион" в течение 14 дней со дня вступления решения в силу безвозмездно  

устранить недостатки работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома,  

расположенного по адресу: 

<

...>, выполненных им по  

договору подряда № 75-2020 от 24.04.2020, а именно выполнив следующие работы: - Разборка покрытий кровель: из хризотилцементных плит и черепицы - 349 м2, - Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой/ДЕМОНТАЖ - 349 м2, 

- Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с  

прозорами - 349 м2, 

- Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой  

стали -349 м2, 

- Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из  

брусьев - 167 м2, 

- Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой  

оцинкованной стали - 32 м2, - Устройство кровель различных типов из металлочерепицы - 349 м2, 

- Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составами из сухих смесей для  

обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 -588 м2,  

- Изоляция покрытый и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых  

материалов насухо - 39,15 м3, - Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами - 0,5 м3, 

- Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных  профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м - 0,067 т.,  

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 - 5 м2, 

- Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте  здания до 30 м (демонтаж) - 5,8 м2,  

- Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте  здания до 30 м - 5,8 м2,  

- Устройство желобов: подвесных (демонтаж) - 48 м., - Устройство желобов: подвесных - 48 м., 

- Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора  строительного с погрузкой вручную - 13,1123 т.,  

- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т.,  работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км. - 13,1123 т.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промышленная группа  Южный регион" в пользу некоммерческой организации "Ростовский областной  общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту" 6 000 руб. судебных  расходов по оплате госпошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Меленчук И. С.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 01.03.2023 9:06:00

Кому выдана Меленчук Илья Сергеевич