АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

Дело № А66-16734/2023

г.Тверь

21 июля 2025 года

 

(резолютивная часть) 

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Тверская Мостостроительная Компания", г. Тверь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) после вступления решения в законную силу в течение одного месяца, выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом № 78 на выполнение работ на объекте «Благоустройство городского парка в г. Бежецк - «Бежецкий верх» от 20 апреля 2021 года, а именно:  

- устранить повреждение покрытия экотротуара, объем 821 кв.м. (демонтаж поврежденного и замена покрытия (без сохранения материала));  

- устранить дефекты асфальтобетонного покрытия, объём 1 кв.м. (перекладка, заделка);  

- переделать стык асфальта около маленького моста, объём 17, 3 п.м.;  

- устранить выпирание доски у стены на детской площадке, объем 683 кв.м. (демонтаж покрытия и укладка нового);  

- устранить отхождение бордюрных камней от асфальта и брусчатки, объем 0,3 кв.м. (выравнивание и заделка).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тверская Мостостроительная Компания", г. Тверь, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу администрации Бежецкого муниципального округа Тверской области, (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 753 910-16 рублей штрафа;  

- в доход федерального бюджета 11 912 рублей государственной пошлины в установленном порядке.  

Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.  

 Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд город Вологда в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Н.А. Борцова