6/2017-6033(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-18147/2016

г. Владивосток

17 января 2017 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Гарбуз М.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

Администрации Арсеньевского городского округа (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «КАНЬОН» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 24.05.2006)  

об устранении недостатков выполненных работ при участии в заседании: 

от истца – ФИО1, паспорт, доверенность от 31.03.2016;  от ответчика – не явился, извещен;  

 Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «КАНЬОН» в  течение тридцати дней с момента вступления решения в законную силу  безвозмездно устранить недостатки выполненных работ по  муниципальному контракту № 30 на выполнение работ по строительству  трехэтажного 36-квартирного жилого дома от 09.07.2012, выполнив  следующие работы: завершить работы по устройству полов в техподполье  в соответствии с проектом, сметами и подписанными актами о приемке  

выполненных работ; выполнить гидроизоляцию и утепление стен  техподполья в соответствии с проектом, сметами и подписанными актами  о приемке выполненных работ; в полах каждого отсека техподполья  прорубить по 1-4 скважины диаметром 200-300 мм в зависимости от  размера помещения (глубина скважин будет зависеть от толщины слоя  суглинка пластичного (1,0 м - 2,0 м), который необходимо пройти до  галечника); скважины заполнить гравием разной фракции; выполнить  отмостку согласно норм, с уклоном от здания; открыть проходы для воды в  местах замкнутого контура бордюр; выполнить навесы над входами в  техподполье.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КАНЬОН»  в доход федерального бюджета 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек  госпошлины.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд  Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый  арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения  в законную силу.  

 Судья М.Н.Гарбуз