Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-28762/2018

11 октября 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  03 октября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  11 октября 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем П.Е. Голушко

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ГСТ" (адрес:  Россия 190013, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул РУЗОВСКАЯ 8/ЛИТЕР "Б", ОГРН:  1057811959193);

ответчик: благотворительный фонд "ФОНД ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА" (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) (адрес:  Россия 121069, г МОСКВА, г МОСКВА, ул МОЛЧАНОВКА Б. 23/2, ОГРН:  1037709007038);

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ"

о взыскании 17983013.07

при участии

-от истца: ФИО1 по доверенности от 26.03.18,

-от ответчика: ФИО2 по доверенности от 01.07.17,

установил:

ООО "ГСТ" обратилось с иском о взыскании с НО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ФОНД ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА" 17 983 013 руб. 00 коп. задолженности по оплате выполненных работ на основании договора строительного подряда №С 10-16 от 23.03.16.

Ответчик иск отклонил.

Определением от 03.07.19 к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО "СК "ДАЛЬПИТЕРСТРОЙ".

Третье лицо отзыв не представило.

По ходатайству сторон рассмотрение дела неоднократно откладывалось для заключения мирового соглашения, однако стороны к согласию не пришли.

Ходатайство истца о назначении строительно-технической экспертизы поступило через год после подачи искового заявления. Ходатайство отклонено судом как направленное на нарушение сроков рассмотрения дела.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор строительного подряда №С 10-16 от 23.03.16 и дополнительное соглашение №1 от 01.06.16 .

Ориентировочная стоимость работ 65 000 000руб. 00 коп. 

Истец – подрядчик в соответствии с п. 1.1 договора разработал проектно-техническую и сметную документацию и выполнил работы на объекте по адресу: Санкт-Петербург, 

<

...>, литер К («Малоэтажный жилой дом»).

Согласно актам формы КС-2, КС-3 общая стоимость выполненных истцом работ составляет 78 256 821 руб. 95 коп. 

Ответчик оплатил работы в общей сумме 60 273 808 руб. 88 коп. Задолженность ответчика по оплате работ составляет 17 983 013 руб. 07 коп. 

Представленные ответчиком заключения специалиста ООО «Стройэкспертиза» №0807/2018 от 07.08.18 и дополнение к нему не могут быть приняты судом во внимание, так как составлены без участия представителей истца.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с некоммерческой организации благотворительному фонду "ФОНД ВАЛЕРИЯ ГЕРГИЕВА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ГСТ" 17 983 013 руб. 00 коп. задолженности и 112 915 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.