1010/2020-192(2) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТОЯННОЕ СУДЕБНОЕ ПРИСУТСТВИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ В Г. КУДЫМКАРЕ  ул. Лихачева, дом 45, г. Кудымкар, Пермский край, 619000, www.perm.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РЕШЕНИЕ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А50П-529/2019

21 января 2020 года

город Кудымкар

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Данилова Андрея  Анатольевича,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Истоминым Е.Ф.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  Администрации Гайнского муниципального района (ул. Кашина, 41, п.  Гайны, Гайнский район, Пермский край, 619650, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Прикамье-Ресурс» (ул.  Героев Хасана, д. 19 копр. 1, г. Пермь, Пермский край, 614064, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об устранении недостатков по контракту 

третье лицо: муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и  спорта «Физкультурно-оздоровительный центр «ОЛИМП» (619650, улица  Дзержинского, дом 40А, поселок Гайны, Гайнский район, Пермский край,  ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

при участии: от истца: ФИО1 – доверенность о 06.06.2019 года в деле; от ответчика: не явился; от третьего лица: ФИО2 – доверенность от 09.10.2019 года в деле. 

Руководствуясь статьями 110, 168-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Требования Администрации Гайнского муниципального района  удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Прикамье- Ресурс» исполнитель гарантийные обязательства по муниципальному  контракту от 27.08.2013 № 0156300008813000032-0079355-01 и произвести в  течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу  следующие работы:  

1. Выполнить демонтаж конструкции пола спортивного зала до  основания из ПГС;  

2. Выполнить демонтаж конструкции существующей отмостки по  периметру здания;  

3. Выполнить устройство дренажной системы по периметру здания  с последующим восстановлением конструкции отмостки;  

4. Выполнить выравнивание и уплотнение существующего  основания из ПГС с последующим устройством подстилающего песчаного  основания, которое будет выполнять роль дренажной системы;  

5. Поднять отметку уровня чистого пола на высоту > 380 мм от  уровня основания из ПГС, для выведения уровня отметки чистого пола  согласно проекту № 37-08-01 АР.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Прикамье- Ресурс» (ул. Героев Хасана, д. 19 копр. 1, г. Пермь, Пермский край, 614064,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 6000 руб. государственной  пошлины в доход федерального бюджета.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через  арбитражный суд, принявший решение.  

Судья А.А. Данилов 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.04.2019 3:49:54

Кому выдана Данилов Андрей Анатольевич