АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Воронеж                   Дело № А14-8383/2020

«14» сентября 2020 г.        

Резолютивная часть решения вынесена 11 августа 2020 г.

Решение изготовлено в полном объеме 14 сентября 2020 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску 

Общества с ограниченной ответственностью «СпецГидроСтрой-Черноземье», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект-Черноземье», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения в размере 347 430 руб. (в связи с неисполнением обязательств по договору на разработку рабочей документации № П-30-09-19 от 30.09.2019), процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.05.2020 по 17.06.2020 в размере 1 253 руб. 03 коп.

без вызова сторон

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СпецГидроСтрой-Черноземье» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СтройПроект-Черноземье» (далее – ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 347 430 руб. (в связи с неисполнением обязательств по договору на разработку рабочей документации № П-30-09-19 от 30.09.2019), процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 25.05.2020 по 17.06.2020 в размере 1 253 руб. 03 коп.

Определением суда от 26.06.2020 исковое заявление принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Стороны в порядке ч. 2 ст. 228 АПК РФ извещены надлежащим образом о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Определением суда от 26.06.2020 ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования и сторонам представить доказательства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений в срок до 20.07.2020. Судом установлен срок до 10.08.2020 для представления дополнительных документов, содержащих объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции.

В установленные судом сроки ответчик отзыв на иск не представил, требования не оспорил.

Исковое заявление рассматривалось в порядке ч. 5 ст. 228 АПК РФ.

11.08.2020 вынесена резолютивная часть решения суда в порядке ч. 1 ст. 229 АПК РФ.

В адрес суда по системе «Мой Арбитр» 26.08.2020 от ответчика поступили заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда, а также апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Воронежской области от 11.08.2020 по делу № А14-8383/2020.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2 статьи 229 АПК РФ мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

Из материалов дела следует, что 30.09.2019 между ООО «СГС-Черноземье» (заказчик) и ООО ««СтройПроект-Черноземье» (исполнитель) заключен договор № П-30-09-19 на разработку рабочей документации, в соответствии с условиями которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению проектных работ по разработке рабочей документации (одна стадии: «Рабочая документация») согласно Техническому заданию (Приложение №1) по объекту «Строительство двух зданий: производственно-складское здание (1498 м2) и складское здание со встроенным АБК (864 м2)» по адресу: 

<

...> у.50а (пункт 1.1. договора).

В силу пункта 1.2. договора подготовленное исполнителем задание на выполнение проектных работ (Приложение №1) становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании на выполнение проектных работ (Приложение №1), и вправе отступить от них только по письменному согласованию с заказчиком (пункт 1.3. договора).

Согласно пункту 1.4. договора рабочая документация, являющаяся предметом настоящего договора, должна соответствовать требованиям СНиП, технологическим нормам, регламентам, техническим условиям и другим действующим нормативным актам Российской Федерации в части состава, содержания и оформления рабочей документации для строительства, а также, выданному заказчиком заданию на выполнение проектных работ (Приложение №1).

Пунктом 1.5. договора предусмотрено, что рабочая документация разработанная, согласованная, укомплектованная и оформленная в соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, иных действующих нормативных актов РФ, передается заказчику в порядке, установленном п.4.1.1 настоящим договором.

В соответствии с пунктом 2.1. договора договорная цена определяется согласно Сметы на разработку проектных работ (Приложение №2) составляет 1 350 000 руб., без НДС. Исполнитель освобожден от уплаты НДС, основание - глава 26.2 (упрошенная система налогообложения) Налогового кодекса РФ.

Согласно пункту 2.2. договора оплата производится в следующем порядке:

- заказчик в течение 5-ти банковских дней, с момента подписания договора производит авансовый платеж в размере 20% от договорной цены, что составляет 270 000 руб., без НДС – пункт 2.2.1,

- заказчик по календарному графику работ по договору производит второй авансовый платеж в размере 30% от договорной цены, что составляет 405 000 руб., без НДС - пункт 2.2.2,

- сумму в размере 40% от договорной цены, что составляет 540 000 руб., без НДС, заказчик производит после оформления приемо-сдаточного акта рабочей документации и представления счета на оплату в течение 5-ти банковских дней - пункт 2.2.3,

- окончательный расчет за выполненные работы по разработке документации в размере 10% от договорной цены, что составляет рублей 135 000 руб., без НДС, заказчик производит после ввода объекта в эксплантацию – пункт 2.2.4.

В соответствии с пунктом 3.1. договора до начала работ заказчик передает исполнителю по акту приема-передачи (Приложение №3) материалы инженерных изысканий, исходно-разрешительную документацию в объеме достаточном для выполнения проектных работ по заданию от заказчика.

Момент оплаты работ, выполненных по настоящему договору, является момент поступления денежных средств на расчетный счет исполнителя (пункт 3.2. договора).

В силу пунктов 3.3., 3.4. договора сроки выполнения работ и отдельных этапов определены календарным графиком работ (Приложение №4). Датой начала работ является дата получения полного комплекта утвержденных документов: задание на выполнение проектных работ, материалы инженерных изысканий, исходно-разрешительная документация. Но, в любом случае, дата начала работ не может наступить ранее даты поступления аванса исполнителю от заказчика.

Срок выполнения работ по разработке рабочей документации и сдачи результатов работ заказчику составляет 75 календарных дней с даты исполнения заказчиком требований, изложенных в пункте 3.3. настоящего договора – пункт 3.5. договора

Пунктом 3.6. договора предусмотрено, что в случае несоблюдения заказчиком сроков выдачи материалов инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, выплаты аванса (20% от договорной цены), передачи исходно-разрешительной документации в объеме, достаточном для выполнения проектных работ по техническому заданию заказчика, передачи технического задания заказчика, сроки начала и окончания работ по договору переносятся исполнителем в одностороннем порядке на период просрочки исполнения заказчиком обязательств по договору.

Согласно пункту 3.7. договора если в процессе выполнения работ выяснится неполнота или некачественность исходных данных для выполнения проектных работ, предоставленных заказчиком, исполнитель обязан поставить об этом в известность последнего путем направления извещения. После получения извещения об этом заказчик обязан в течение 10-ти дней рассмотреть вопрос о предоставлении уточненных исходных данных или о прекращении работ с оплатой исполнителю всех фактически понесенных расходов, при этом выплаченный исполнителю аванс по договору не возвращается. Срок выполнения работ по договору автоматически, без дополнительного согласования сторонами, продляется на срок ожидания исполнителем ответа от заказчика по дальнейшему выполнению работ, и продолжает идти с даты получения исполнителем мотивированного ответа (обоснованного предложения).

В соответствии с пунктом 4.1. договора готовность рабочей документации, т.е. выполнение исполнителем своих обязательств по договору, подтверждается подписанием заказчиком приемо-сдаточного акта, который оформляется в следующем порядке:

Согласно календарного плана выполнения работ (приложение № 4) исполнитель передает уполномоченному представителю заказчика по накладной 3 экземпляра рабочей документации в бумажном виде и один экземпляр в электронном виде, записанный в формате "pdf', приемка работы осуществляется заказчиком в течение 3 рабочих дней с даты получения рабочей документации. В указанный срок заказчик обязан подписать приемо-сдаточный акт или направить исполнителю мотивированный отказ от приемки работ с точным определением причин. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа, работы считаются принятыми заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

В случае отказа заказчика от приемки работ, сторонами в течение 3 рабочих дней с момента получения исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с исчерпывающим перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки производятся исполнителем за свой счет при условии, что они не выходят за рамки данного договора и технического задания на проектирование. Повторное предъявление и повторная приемка работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.

В силу пункта 4.2. договора если в процессе разработки рабочей документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, исполнитель обязан приостановить их выполнение и немедленно уведомить об этом заказчика. Вопрос о целесообразности продолжения работы по договору решается сторонами в течение 3 рабочих дней с момента получения заказчиком от исполнителя уведомления о приостановлении работ и оформляется путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору.

Срок действия договора устанавливается с даты его подписания и до полного исполнения сторонами обязательств по договору – пункт 8.1. договора.

Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по взаимному соглашению сторон – пункт 8.2. договора.

Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в случае, если выясниться невозможность дальнейшего выполнения работ, и не будет достигнуто соглашение с заказчиком в установленном настоящем договором порядке. При этом договор считается расторгнутым с момента получения заказчиком уведомления исполнителя об одностороннем отказе в выполнении обязательств по настоящему договору. Взаиморасчеты сторон в таком случае осуществляются в порядке, установленном настоящим договором – пункт 8.3. договора.

При расторжении договора по инициативе заказчика, он оплачивает затраты исполнителя, связанные с фактически выполненными подготовительными и проектными работами на момент расторжения договора – пункт 8.4. договора.

Во исполнение условий договора истец перечислил на счет ответчика авансовые платежи по договору в общем размере 475 000 руб., что подтверждается платежными поручениями № 1557 от 01.10.2019, № 1594 от 04.10.2019, № 1607 от 04.10.2019, № 1863 от 06.11.2019.

Как следует из искового заявления, до декабря 2019 года ответчик не приступил к исполнению своих обязательств по договору, в связи с чем стороны в устной форме пришли к соглашению о расторжении договора.

27.12.2019 ответчик произвел частичный возврат денежных средств в размере 127 570 руб., что подтверждается платежным поручением № 37 от 27.12.2019.

Поскольку денежные средства были возвращены не в полном объеме, истец направил в адрес ответчика уведомление о расторжении договора и претензию с требованием вернуть оплаченные авансовые платежи в полном объеме, что подтверждается почтовой квитанцией от 24.04.2020, описью вложений в почтовое отправление.

Уведомление и претензия получены ответчиком 25.05.2020, что подтверждается отчетом об отслеживании отправления, сформированного на официальном сайте Почты России.

Неисполнение содержащихся в претензии требований послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Исследовав материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд находит заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Исходя из положений статей 309, 314 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона в течение предусмотренного законом или обязательством периода времени.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат (статья 758 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 760 ГК РФ установлено, что подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ обязан выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления; передать заказчику готовую техническую документацию и результаты изыскательских работ.

В статье 711 ГК РФ установлено, что основанием для возникновения у заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов работ в установленном законом и договором порядке.

Ссылаясь на то, что ответчик не выполнил работы, истец направил ему 24.04.2020 уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

Согласно разъяснений, изложенных в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Доказательств осуществления, предусмотренного п. 4.1. договора порядка сдачи-приемки работ в срок, установленный в договоре, либо до момента получения уведомления о расторжении (25.05.2020), в иной разумный срок после получения уведомления о расторжении, в материалы дела не представлено.

Согласно статье 1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Поэтому, в случае расторжения договора сторона, исполнившая свои обязательства по передаче денежных средств, но не получившая встречного предоставления, вправе требовать возврата переданных должнику денежных средств на основании статьи 1102 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего) обязано возместить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество, за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

В связи с расторжением договора № П-30-09-19 от 30.09.2019, отсутствием доказательств передачи результата работ заказчику, у ответчика отсутствуют правовые основания для удержания перечисленных истцом денежных средств. Поскольку право сохранить за собой авансовые платежи с этого момента прекратилось, на основании пункта 1 статьи 1102 ГК РФ у ответчика возникло обязательство по их возврату истцу (аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.12.2011 № 10406/11).

При изложенных обстоятельствах требование истца о взыскании неосновательного обогащения в размере 347 430 руб. подлежит удовлетворению.

На сумму неосновательного обогащения истцом начислены за пользование чужими денежными средствами за период с 25.05.2020 по 17.06.2020 в размере 1 253 руб. 03 коп.

В силу пункта 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В силу п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Из правовой позиции, изложенной в пункте 58 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что в соответствии с п. 2 ст. 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты, установленные п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, с момента, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

Согласно тексту претензии истец предоставил ответчику срок в 15 рабочих дней с даты направления претензии для возврата денежных средств. Договор считается расторгнутым с момента получения ответчиком претензии.

Поскольку п. 2 ст. 1107 ГК РФ связывает возможность начисления процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения с моментом когда должник узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств, то, с учетом предоставленного истцом срока, проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению с 02.06.2020.

Учитывая изложенное, с ответчика в пользу истца следует взыскать 835 руб. 35 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.06.2020 по 17.06.2020.

В остальной части требований отказать.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в ст. 9 названного Кодекса, а также положений ст. 65 Кодекса, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, в том числе и на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворенных требований и составляют с истца 12 руб., с ответчика 9 962 руб.

Поскольку при подаче иска по платежному поручению № 1149 от 17.06.2020 истцом в доход федерального бюджета уплачена госпошлина в размере 9 974 руб., с ответчика подлежит взысканию в пользу истца 9 962 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-169, 229 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройПроект-Черноземье», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СпецГидроСтрой-Черноземье», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 347 430 руб. неосновательного обогащения, 835 руб. 35 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 02.06.2020 по 17.06.2020, а также 9 962 руб. расходов по госпошлине.

В остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня принятия решения в полном объеме, в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области в порядке части 2 статьи 257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья                                                                                                                 И.В. Кострюкова