АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-27342/2017

г. Владивосток

09 февраля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 февраля 2018 года. 

Полный текст решения изготовлен 09 февраля 2018 года.

Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Бурова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску   Открытого акционерного общества "Владивостокское монтажное управление "Дальэлектромонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛТА-ВОСТОК-1" (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>)

о взыскании 751 339,06 руб.

при участии в заседании:

от истца – ФИО2 (паспорт, доверенность),

установил:

Открытое акционерное общество "Владивостокское монтажное управление "Дальэлектромонтаж" обратилось с заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью " ДАЛТА-ВОСТОК-1" о взыскании 751 339,06 руб.

Ответчик не явился, надлежащим образом извещен о дате и месте судебного заседания. В порядке ст.156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие ответчика.

Истец поддержал требования.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

29 апреля 2014 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Далта-Восток-1», «Заказчик» (далее - ООО «Далта-Восток-1») и Открытым акционерным обществом «Владивостокское монтажное управление «Дальэлектромонтаж», «Подрядчик» (далее - ОАО ВМУ «ДЭМ») был заключен Договор подряда №37 (далее - Договор), предметом которого является выполнение земляных и электромонтажных работ на объекте: «Электроснабжение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по проспекту Острякова, 6 в г. Владивостоке. Кабельная линия - 6 кв.».

Отсутствие со стороны ответчика оплаты за выполненные работы, послужило основанием для обращения в суд с настоящим заявлением.

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил исковое заявление в полном объеме, по следующим основаниям.

Согласно пункту 2.1. вышеуказанного Договора стоимость работ определена локальными сметными расчетами и составляет 3 948 825,16 рублей с учетом НДС 18%.

Согласно части 2 пункта 2.2. Договора, окончательная стоимость определяется по фактически выполненным работам, на основании исполнительной документации, принятой Заказчиком и рассчитывается по расценкам указанным в сметной документации.

Согласно пунктам 3.1. и 3.2. Договора: начало работ - 10 июня 2014 года, окончание работ - 31 августа 2014 года.

Согласно пункту 2.3. Договора, если в ходе производства работ выявится необходимость в выполнении дополнительных работ, не предусмотренных проектно-сметной документацией, то стороны обязуются принять меры к уточнению необходимого объема и оформить письменное соглашение к настоящему Договору, в котором будут содержаться условия об изменении первоначальной стоимости, сроков строительства, либо одного из этих параметров.

На основании данного пункта Договора, между ООО «Далта-Восток-1» и ОАО ВМУ «ДЭМ» были заключены следующие дополнительные соглашения: Дополнительное соглашение №1 от 01 сентября 2014 года (дополнительный комплекс строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ на сумму 340 873,68 рублей с учетом НДС 18% со сроками выполнения: начало работ - 01 сентября 2014 года, окончание работ - 30 сентября 2014 года); Дополнительное соглашение №2 от 01 октября 2014 года (дополнительный комплекс электромонтажных и пусконаладочных работ на сумму 217 440,96 рублей с учетом НДС 18% со сроками выполнения: начало работ - 01 октября 2014 года, окончание работ - 15 ноября 2014 года); Дополнительное соглашение №3 от 24 октября 2014 года (дополнительный комплекс пусконаладочных работ на сумму 32 831,14 рублей с учетом НДС 18% со сроками выполнения: начало работ - 24 октября 2014 года, окончание работ - 31 октября 2014 года); Дополнительное соглашение №4 от 26 ноября 2014 года (дополнительный комплекс пусконаладочных работ на сумму 11 368,12 рублей с учетом НДС 18% со сроками выполнения: начало работ - 26 ноября 2014 года, окончание работ - 28 ноября 2014 года).

Таким образом, в соответствии с условиями Договора подряда №37 от 29 апреля 2014 года и дополнительных соглашений №1; №2; №3; №4, являющихся его неотъемлемой частью, ОАО ВМУ «ДЭМ» выполнило комплекс строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ на объекте: ««Электроснабжение многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями по проспекту Острякова, 6 в г. Владивостоке. Кабельная линия - 6 кв.».

Данный комплекс работ на вышеуказанном объекте был принят Заказчиком в августе 2014 года, в сентябре 2014 года, в октябре 2014 года, в ноябре 2014 года, что подтверждают подписанные, уполномоченными представителями сторон Договора, Акты о приемке выполненных работ формы №КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3, и на их основании выставленные Подрядчиком Заказчику Счета-фактуры.

Общая стоимость выполненных ОАО ВМУ «ДЭМ» строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ за указанные периоды составила 4 551 339,06 рублей (с учетом НДС 18%).

Вышеуказанные работы по Договору ОАО ВМУ «ДЭМ» выполнены своевременно и в полном объёме согласно вышеуказанным Актам о приемке выполненных работ формы №КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы №КС-3.

ООО «Далта-Восток-1» претензий к ОАО ВМУ «ДЭМ» по качеству работ, срокам выполнения, объемам работ и их стоимости не предъявляло.

Согласно пункту 2.7. Договора, расчет производится Заказчиком после предъявления Подрядчиком фактически выполненных работ, после подписания акта выполненных работ по форме №КС-2 и справки №КС-3 в течение 20 банковских дней после выставления счета и счета-фактуры. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Платежными поручениями (далее - п/п) за ООО «Далта-Восток-1» произвели оплату по Договору: ООО «Первая игровая компания Востока» - п/п № 287 от 15.07.2014г. (назначение платежа: оплата за ТМЦ по Договору №37 от 29.04.2014г. в счет взаиморасчетов с ООО «Далта-Восток-1» по Договору уступки права на технологическое подключение от 30.03.2012г.) - сумма 3 000 000,00 руб.; ООО «АСП» - п/п № 1 от 11.09.2014г. (назначение платежа: оплата по Договору №37 от 29.04.2014г. за ООО «Далта-Восток-1» в счет взаиморасчетов по Договору о совместной деятельности №2 от 15.02.2014г.) - сумма 450 000,00 руб.; Дальневосточный филиал ЗАО «Технострой-М» - п/п № 406 от 18.09.2014г. (назначение платежа: оплата по Договору №37 от 29.04.2014г. за ООО «Далта-Восток-1> ИНН 

<

***> по письму от 18.09.2014г. исх.№634) - сумма 350 000,00 руб.

Таким образом, ООО «Далта-Восток-1» частично произвело оплату за выполненные ОАО ВМУ «ДЭМ» вышеуказанные работы по Договору в общей сумме 3 800 000,00 рублей (3000000,00 руб.+450 000,00 руб.+350 000,00 руб.).

Согласно пункту 1 статьи 740 Гражданского кодекса РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьёй 746 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 ГК РФ. Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объёме после приёмки объекта заказчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

На основании вышеизложенного. Подрядчиком выполнены условия Договоров в полном объеме, Ответчик не оплатил выполненные работы на оставшуюся сумму 751 339,06 рублей, в установленный в договоре срок.

Исходя из разъяснений, данных в п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве", текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом.

По настоящему спору срок исполнения обязательств ответчика по оплате выполненных работ наступил после возбуждения Арбитражным судом Приморского края производства по делу № А51-18337/2017 о банкротстве ответчика, т.е. после 29.07.2014.

Поскольку материалами дела подтверждается факт выполнения подрядчиком работ и принятие выполненных работ заказчиком, а также переход права требования к истцу, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных требований истца о взыскании основного долга в размере 751 339,06 рублей.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат взысканию с ответчика. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛТА-ВОСТОК-1" в пользу Открытое акционерное общество "Владивостокское монтажное управление "Дальэлектромонтаж" 769366,06 рублей составляющих 751339,06 рублей основного долга и 18027,00 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья    Буров А.В.