Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-7090/2020

13 июля 2020 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "МАПГАЗСТРОЙ" (188340, Ленинградская область, район Гатчинский, городской 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: садоводческое некоммерческое товарищество "ВЕТЕРАН" (188508, область Ленинградская, район Ломоносовский, территория СНТ Можайское, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 13.01.2020 

- от ответчика: не явился (извещен)

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "МАПГАЗСТРОЙ" (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к садоводческому некоммерческому товариществу "ВЕТЕРАН" (далее – Товарищество) о взыскании 1 233 592,60 руб. задолженности по договору подряда от 10.09.2015 № 10/09/15-С (далее – Договор).

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своего представителя не направил, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в отсутствие представителя ответчика.

Представитель истца уточнил исковые требования, просил принять отказ от иска в части взыскании задолженности в размере 960 000 руб. и взыскать задолженность в размере 273 592,60 руб. Суд в соответствии со ст. 49 АПК РФ принял уточнения исковых требований.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Обществом (подрядчиком) и Товариществом (заказчиком) заключен Договор, по условиям которого заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению:

- полного комплекса работ по проекту «Газораспределительные сети для газоснабжения СНТ «Ветеран» вблизи пос. Пикколово Ломоносовского района Ленинградской области» (шифр проекта 14000-ГСН);

- устройств газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам в количестве 245 домовладений, расположенных на территории заказчика, в соответствии с проектом, который будет предоставлен заказчиком подрядчику в срок до 15.09.2015.  

По п. 2.1. Договора начало работ: не позднее 20 календарных дней после подписания сторонами настоящего договора и с представления заказчиком подрядчику проектной документации и строительной готовности трассы под размещение газопровода и газопроводов-вводов.

Согласно п. 2.2. Договора сроки выполнения этапов работ указаны в календарном плане (приложение № 2).

В соответствии с п. 2.3. Договора окончание работ: 30.07.2016. подрядчик вправе сдать результат работ досрочно.

В силу п. 3.1. Договора стоимость работ по Договору составляет 32 341 000 руб. 

По п. 3.3. Договора оплата выполненных работ производится поэтапно в течение 5 дней после оформления акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по представленному подрядчиком заказчику счету, счету-фактуре.

В соответствии с п. 5.2. Договора по окончании работ подрядчик передает заказчику 1 экземпляр исполнительной документации, акты приемки выполненных работ (форма № КС_2) – 2 экземпляра, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) – 2 экземпляра, и счет на оплату, оформленные в надлежащем порядке.

Сторонами заключены дополнительное соглашение от 21.09.2015 № 1 к Договору о выполнении работ стоимостью 2 300 000 руб. и дополнительное соглашение от 04.02.2019 № 2 о выполнении работ стоимостью 758 500 руб.

Подрядчик выполнил работы по Договору на сумму 34 690 792,60 руб. согласно актам о приемке выполненных работ от 30.10.2015 № 1 на сумму 4 900 000 руб., от 30.11.2015 № 2 на сумму 4 200 000 руб., от 29.02.2016 № на сумму 1 925 000 руб., от 31.03.2016 № 4 на сумму 1 700 000 руб., от 29.04.2016 № 5 на сумму 750 000 руб., от 27.05.2016 № 6 на сумму 2 450 000 руб., от 30.06.2016 № 7 на сумму 2 450 000 руб., от 10.08.2016 № 8 на суму 2 976 950 руб., от 31.08.2016 № 9 на сумму 2 976 950 руб., от 21.04.2017 № 10 на сумму 2 976 950 руб., от 09.10.2018 № 11 на сумму 2 126 950 руб., от 26.02.2019 № 12 на сумму 700 000 руб., от 06.06.2019 № 13 на сумму 2 257 492,60 руб., акту № 1 за октябрь 2105 на сумму 2 300 000 руб., атакже справкам о стоимости выполненных работ и затрат.

Подрядчик, ссылаясь на оплату заказчиком работ на сумму 33 457 200 руб., направил претензию от 08.11.2019 с требованием оплаты задолженности в полном объеме.

Товарищество не исполнило данное требование, что послужило основанием для обращения Общества в суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Выполнение работ на сумму 34 690 292,60 руб. подтверждается представленными в материалы дела актами, справками, подписанными заказчиком без возражений по объему и качеству.

Ответчик в суд отзыв на исковое заявление и доказательства оплаты долга не представил.

Требование о взыскании 273 592,60 руб. задолженности подлежит удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с садоводческого некоммерческого товарищества «ВЕТЕРАН» в пользу общества с ограниченной ответственностью «МАПГАЗСТРОЙ» 273592,60 руб. задолженности и 25336 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «МАПГАЗСТРОЙ» из федерального бюджета 3000 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 24.01.2020 № 80.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Косенко Т.А.