АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №  А76-29857/2016

г. Челябинск

15 сентября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 12 сентября 2017 года.

Решение в полном объеме изготовлено 15 сентября 2017 года.

Судья Арбитражного суда Челябинской области Т.Д. Пашкульская,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Магнитогорский экспертный центр», г. Магнитогорск Челябинской области, 

к акционерному обществу «Уралэнергочермет», г. Екатеринбург,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», г Магнитогорск Челябинской области, 

о взыскании 1 814 727 руб. 26 коп.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский экспертный центр», г. Магнитогорск Челябинской области (далее – истец, ООО «Магнитогорский экспертный центр») обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Челябинской области к акционерному обществу «Уралэнергочермет», г. Екатеринбург Челябинской области (далее – ответчик, АО «Уралэнергочермет») о взыскании с ответчика задолженности по договору субподряда №1/ДОЗ-410 от 25.01.2012 в размере 1 497 661 руб. 04 коп., процентов на сумму задолженности по договору в размере 171 153 руб. 72 коп.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат», г Магнитогорск Челябинской области.

20.07.2017 в суд поступило ходатайство об увеличении исковых требований в части взыскания основного долга до 1 598 261 руб. 40 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами до 216 465 руб. 86 коп. (т.2 л.д.6-8). Увеличение исковых требований принято судом в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В обоснование своих требований, истец, указал, что выполнил свои обязательства по договору № 1/ДОЗ-410 от 25.01.2012, ответчик же со своей стороны указанные работы не оплатил, что привело к образованию задолженности. 

Ответчик исковые требования не признал, представил письменный отзыв (т.1 л.д.137-138), указав, что договор является незаключенным, работы истцом не выполнены

Стороны в судебное заседание не явились, извещены о дате, времени и месте его проведения в соответствии со ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации надлежащим образом (т.1 л.д.32-35).

Неявка в судебное заседание сторон, извещенных надлежащим образом, не препятствует рассмотрению дела по существу в их отсутствие (ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 24.04.2017 произведена замена судьи Сафронова М.И. судьей Пашкульской Т.Д. и передано дело № А76-29857/2016 на рассмотрение судье Пашкульской Т.Д.

Согласно п. 6.4 договора субподряда № 1/ДОЗ-410 от 25.01.2012 все споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, не разрешенные в досудебном (претензионном) порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде Челябинской области.

В соответствии со статью 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку пункт 6.4 договора субподряда, представленного в материалы дела дело подлежит рассмотрению Арбитражному суду Челябинской области.

Изучив материалы дела, арбитражный суд считает иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорский экспертный центр», г. Магнитогорск Челябинской области, зарегистрировано в качестве юридического лица 26.06.2006 под основным государственным регистрационным номером 10674444027420 (т.1 л.д. 114-115). 

Акционерное общество «Уралэнергочермет», г. Екатеринбург, зарегистрировано в качестве юридического лица 05.07.2016 под основным государственным регистрационным номером  1036603492694 (т.1 л.д. 107-111). 

Как видно из материалов дела, 25.01.2012 между ООО «Магнитогорский экспертный центр» (субподрядчик по договору) и ОАО «Уралэнергочермет» (генеральный подрядчик по договору) подписан договор субподряда № 1/ДОЗ-410 (далее – договор) (т.1 л.д.18-19).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц произошло изменение в наименовании ответчика - с открытого акционерного общества «Уралэнергочермет» на акционерное общество «Уралэнергочермет»

В соответствии с условиями договора субподрядчик выполняет ремонтную документацию согласно утвержденному исполнительным директором ОАО «ММК» заданию на выполнение ремонтной документации и сдает выполненную работу генподрядчиком (п. 2.1 договора).

Согласно п. 3.2 договора фактически выполненные работы ежемесячно фиксируются в актах выполненных работ и в справках № КС-2 и КС-3, подписываемых сторонами.

Оплата за фактически выполненные работы производится на основании счета-фактуры, выставляемого субподрядчиком справки КС-3, в течение 90 дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика, но не ранее чем поступит оплата от ОАО «ММК» (п. 3.3 договора).

В соответствии с п.1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Судом установлено, что между сторонами возникли правоотношения по договору подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Важным моментом в договоре подряда является приемка выполненных работ, цель которой - проверить качество работ.

Приемка выполненных работ оформляется актом, подписанным обеими сторонами, то есть надлежащим доказательством выполнения работ является названный документ. Исходя из назначения указанного документа, акт выполненных работ должен отражать сведения о содержании выполненных работ, их объеме.

Истец выполнил свои обязательства по данному договору, что подтверждается представленным в материалы дела актами выполненных работ № 1 от 15.09.2014 на сумму 105 315 руб. 00 коп., № 1 от 19.12.2014 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 1 от 13.11.2014 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 1 от 20.10.2014 на сумму 48 690 руб. 00 коп., № 2 от 19.12.2014 на сумму 57 803 руб. 00 коп., № 1 от 20.06.2014 на сумму 147 000 руб. 00 коп., № 1 от 15.01.2015 на сумму 44 558 руб. 00 коп., № 2 от 16.01.2015 на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 1 от 25.02.2015 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 1 от 16.03.2015 на сумму 32 970 руб. 00 коп., № 2 от 16.03.2015 на сумму 44 000 руб. 00 коп., № 1 от 24.04.2015 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 1 от 25.05.2015 на сумму 363 462 руб. 00 коп., № 2 от 25.05.2015 на сумму 15 000 руб. 00 коп., № 4 от 25.05.2015 на сумму 194 000 руб. 00 коп., № 1 от 25.06.2015 на сумму 118 500 руб. 00 коп., № 1 от 22.07.2015 на сумму 102 460 руб. 00 коп., № 2 от 22.07.2015 на сумму 41 710 руб. 00 коп., № 1 от 28.08.2015 на сумму 62 738 руб., № 3 от 28.08.2015 на сумму 59 000 руб. 00 коп., № 4 от 28.08.2015 на сумму 29 288 руб. 00 коп., № 1 от 30.10.2015 на сумму 85 400 руб., № 1 от 28.01.2016 на сумму 50 288 руб. 00 коп., № 2 от 28.01.2016 на сумму 9 300 руб. 00 коп., № 3 от 28.01.2016 на сумму 64 200 руб. 00 коп., № 1 от 28.04.2016 на сумму 146 000 руб. 00 коп., № 1 от 27.06.2016 на сумму 192 300 руб. 00 коп., № 1 от 27.09.2016 на сумму 100 600 руб. 00 коп. (т.1 л.д.20, 23, 26, 29, 32, 35, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 73, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90,92, 93, 95, 97, 99, 101, 102), подписанным ответчиком без замечаний. 

Акты приемки выполненных работ подписаны заказчиком без замечаний, что свидетельствует о том, что работы истцом выполнены и приняты заказчиком. Претензий по качеству работы ответчик не предъявил.

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений (ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в частности по представлению доказательств (ч. 2 ст. 9, ч. 1 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Сдача результатов работы подрядчиком и приемка их заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (абзац 1 пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Анализируя предмет исковых требований в соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд исходит из того, что бремя доказывания факта выполнения работ несет истец, в то время как доказывание факта оплаты работ возлагается на ответчика. 

Представленные акты № 1 от 23.07.2014 на сумму 72 458 руб. 00 коп., № 1 от 24.08.2014 на сумму 150 000 руб. 00 коп., № 3 от 25.05.2015 на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 2 от 25.06.2015 на сумму 240 000 руб. 00 коп., № 2 от 28.08.2015 на сумму 21 500 руб. 00 коп., № 1 от 28.12.2015 на сумму 20 000 руб. 00 коп. (т.1 л.д.37, 38, 71, 77, 84, 92), сторонами не подписаны.

Не подписанные со стороны истца и ответчика акты выполненных работ, судом не принимаются как доказательства, подтверждающие надлежащее исполнение истцом своих обязательств по договору в силу следующего.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (абзац 2 пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Согласно пункту 8 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающая возможность составления одностороннего акта, защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку. 

В отсутствие доказательства направления актов выполненных работ, а также отсутствия отметки в указанных актах об отказе заказчика от его подписания, истец не доказал соблюдение им положений ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации о сдаче выполненных работ заказчику.

Возражая против подписания спорных документов, ответчик сослался на невыполнение работ, указанных в указанных актах.

 Таким образом, суд приходит к выводу о наличии между сторонами спора по поводу вида, фактического объема и стоимости выполненных работ, что применительно к требованиям пункта 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для назначения судебной экспертизы. 

Своим правом о назначении судебной экспертизы истец в порядке ст.82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не воспользовался.

Доказательств, свидетельствующих об основании для оплаты работ по актам № 1 от 23.07.2014 на сумму 72 458 руб. 00 коп., № 1 от 24.08.2014 на сумму 150 000 руб. 00 коп., № 3 от 25.05.2015 на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 2 от 25.06.2015 на сумму 240 000 руб. 00 коп., № 2 от 28.08.2015 на сумму 21 500 руб. 00 коп., № 1 от 28.12.2015 на сумму 20 000 руб. 00 коп. (т.1 л.д.37, 38, 71, 77, 84, 92) истцом  не представлено, в то время как в соответствии с требованиями ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Каких-либо иных доказательств выполнения работ по указанным актам истцом в нарушение требований ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Ссылка истца на письма (т.2 л.д.4244) судом отклоняются, поскольку указанными письмами ответчик предлагает график погашения задолженности, не указывая за какой период образовалась задолженность и по каким конкретно актам.

Также судом отклоняются доводы истца о подтверждении задолженности актом сверки за период с 01.06.2014 по 07.11.2016 (т.2 л.д.45-46), поскольку указанный документ не подписан сторонами.

Таким образом, работы по актам № 1 от 23.07.2014 на сумму 72 458 руб. 00 коп., № 1 от 24.08.2014 на сумму 150 000 руб. 00 коп., № 3 от 25.05.2015 на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 2 от 25.06.2015 на сумму 240 000 руб. 00 коп., № 2 от 28.08.2015 на сумму 21 500 руб. 00 коп., № 1 от 28.12.2015 на сумму 20 000 руб. 00 коп. (т.1 л.д.37, 38, 71, 77, 84, 92) оплате не подлежат.

В соответствии с п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Для оплаты выполненных работ истцом выставлены соответствующие счета-фактуры (т.1 л.д. 21, 24, 27, 30, 33, 36, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 94, 96, 98, 100, 103).

Ответчик частично оплатил выполненные работы, что подтверждается платежными поручениями № 21 от 14.01.2015 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 784 от 23.04.2015 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 478 от 12.03.2015 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 467 от 26.12.2014 на сумму 30 000 руб. 00 коп., № 967 от 15.05.2015 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 909 от 07.10.2014 на сумму 68 182 руб. 98 коп., № 85 от 29.05.2015 на сумму 47 890 руб. 00 коп., № 317 от 01.07.2015 на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 600 от 03.08.2015 на сумму 70 000 руб. 00 коп., № 626 от 05.08.2015 на сумму 30 000 руб. 00 коп., № 719 от 17.08.2015 на сумму 100 000 руб., № 916 от 15.09.2015 на сумму 200 000 руб. 00 коп., № 955 от 23.09.2015 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 2036 от 01.10.2015 на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 2328 от 20.11.2015 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 2590 от 28.12.2015 на сумму 100 000 руб. 00 коп., № 251 от 25.02.2016 на сумму 23 600 руб. 00 коп., № 541 от 08.04.2016 на сумму 30 000 руб. 00 коп., № 586 от 14.04.2016 на сумму 70 000 руб. 00 коп., № 739 от 13.05.2016 на сумму 50 000 руб. 00 коп., № 1108 от 05.08.2016 на сумму 50 000 руб. 00 коп. (т.1 л.д.22, 25, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52,53, 54). На общую сумму 1 279 673 руб. 58 коп.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия (т.1 л.д.16) с требованием о погашении возникшей задолженности, которая оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Судом установлено, что истец фактически работы выполнил. Подписание ответчиком акта приемки выполненных работ свидетельствует о потребительской ценности для него этих работ и желании ими воспользоваться, а понесенные истцом затраты подлежат компенсации. 

Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны  исполняться  надлежащим образом, а односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не  допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ответчик не представил суду доказательств надлежащего исполнения обязательств с той степенью заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по характеру обязательства и условиям оборота.

Денежное обязательство не исполнено должником на дату вынесения решения. Требования истца основаны на законе и подтверждены материалами дела. Таким образом, задолженность за выполненные работы в сумме 944 908 руб. 42 коп. (2 224 582 руб. 00 коп. – 1 279 673 руб. 58 коп.) подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Истцом заявлены требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 216 465 руб. 86 коп.(т.2 л.д.14-21).

Лицо, нарушившее обязательство, несет ответственность установленную законом или договором (ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

Поскольку ответчик допустил просрочку исполнения обязательства по оплате выполненных работ, то истец правомерно предъявил требование о взыскании процентов по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до 01.06.2015, размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

С 01.06.2015 пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации действует в новой редакции, согласно которой размер процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

С 01.08.2016 пункт статьи пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации действует в новой редакции, согласно которой размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Однако, поверив расчет процентов, суд полагает, что расчет истцом произведен неверно, поскольку истцом неправильно определен период просрочки, поэтому расчет процентов производится судом самостоятельно:

147 000 руб. х 19 (с 19.09.2014 по 07.10.2014) х 8,25 %/365 = 631 руб. 29 коп.

78 817 руб. 02 коп. х 80 (08.10.2014 по 26.12.2014) х 8,25 %/365 = 1 425 руб. 18 коп.

48 817 руб. 02 коп. х  20 (26.12.2014 по 14.01.2015) х 8,25%/365 = 220 руб. 68 коп.

105 315 руб. 00 коп. х 30 (с 16.12.2014 по 14.01.2015) х 8,25%/365 = 714 руб. 12 коп. 

(105 315 руб. 00 коп. – 1 182 руб. 98 коп.) х 57 (с 15.01.2015 по 12.03.2015) х 8,25 % /365 = 1 341 руб. 59 коп.

54 132 руб. 02 коп. х 42 (период с 13.03.2015 по 23.04.2015) х 8,25%/365 = 513 руб. 88 коп. 

4 132 руб. 02 коп. х 22 (24.04.2015 по 15.05.2015) х 8,25%/365 = 20 руб. 55 коп.

48 690 руб. 00 коп. х 116 (с 20.01.2015 по 15.05.2015) х 8,25%/365 = 1 276 руб. 61 коп. 

2 822 руб. 02 коп. х (16.05.2015 по 29.05.2015) х 8,25%/365 = 8 руб. 93 коп.

50 000 руб. 00 коп. х 107 (с 12.02.2015 по 29.05.2015) х 8,25%/365 = 1 209 руб. 25 коп. 

4 931 руб. 42 коп. х 2 (с 30.05.2015 по 31.05.2015) х 8,25 %/365 = 2 руб. 23 коп.

4 931 руб. 42 коп. х 14 (с 01.06.2015 по 14.06.2015) х 11,27%/365 = 21 руб. 32 коп.

4 931 руб. 42 коп. х 17 (с 15.06.2015 по 01.07.2015) х 11,14%/365 = 25 руб. 59 коп.

50 000 руб. 00 коп. х 73 (с 20.03.2015 по 31.05.2015) х 8,25%/365 = 825 руб. 00 коп. 

50 000 руб. 00 коп. х 14 (с 01.06.2015 по 14.06.2015) х 11,27%/365 = 216 руб. 14 коп.

50 000 руб. 00 коп. х 17 (с 15.06.2015 по 01.07.2015) х 11,14%/365 = 259 руб. 42 коп.

57 803 руб. 00 коп. х 73 (с 20.03.2015 по 31.05.2015) х 8,25 %/365 = 953 руб. 75 коп. 

50 000 руб. 00 коп. х 14 (с 01.06.2015 по 14.06.2015) х 11,27%/365 = 249 руб. 87 коп.

50 000 руб. 00 коп. х 17 (с 15.06.2015 по 01.07.2015) х 11,14%/365 = 299 руб. 91 коп.

12 734 руб. 42 коп. х 13 (с 02.07.2015 по 14.07.2015) х 11,14%/365 = 50 руб. 53 коп. 

12 734 руб. 42 коп. х 20 (с 15.07.2015 по 03.08.2015) х 10,12%/365 = 70 руб. 61 коп. 

44 558 руб. 00 коп. х 46 (с 16.04.2015 по 31.05.2015) х 8,25%/365 = 463 руб. 28 коп. 

44 558 руб. 00 коп. х 14 (с 01.06.2015 по 14.06.2015) х 11,27%/365 = 192 руб. 61 коп.

44 558 руб. 00 коп. х 30 (с 15.06.2015 по 14.07.2015) х 11,14%/365 = 407 руб. 98 коп.

44 558 руб. 00 коп. х 20 (с 15.07.2015 по 03.08.2015) х 10,12%/365 = 247 руб. 08 коп. 

100 000 руб. 00 коп. х 45 (с 17.04.2015 по 31.05.2015) х 8,25%/365 = 1 017 руб. 12 коп. 

100 000 руб. 00 коп. х 14 (с 01.06.2015 по 14.06.2015) х 11,27%/365 = 432 руб. 27 коп.

100 000 руб. 00 коп. х 30 (с 15.06.2015 по 14.07.2015) х 11,14%/365 = 915 руб. 62 коп.

100 000 руб. 00 коп. х 20 (с 15.07.2015 по 03.08.2015) х 10,12%/365 = 554 руб. 52 коп. 

87 292 руб. 42 коп. х 2 (с 04.08.2015 по 05.08.2015) х 10,12%/365 = 48 руб. 41 коп. 

57 292 руб. 42 коп. х 11 (с 06.08.2015 по 16.08.2015) х 10,12%/365= 174 руб. 73 коп. 

57 292 руб. 42 коп. х 1 (17.08.2015) х 9,96%/365 = 15 руб. 63 коп. 

50 000 руб. 00 коп. х 5 (с 27.05.2015 по 31.05.2015) х 8,25%/365 = 56 руб. 51 коп.

50 000 руб. 00 коп. х 14 (с 01.06.2015 по 14.06.2015) х 11,27%/365 = 216 руб. 14 коп.

50 000 руб. 00 коп. х 30 (с 15.06.2015 по 14.07.2015) х 11,14%/365 = 457 руб. 81 коп.

50 000 руб. 00 коп. х 33 (с 15.07.2015 по 16.08.2015) х 10,12%/365= 457 руб. 48 коп. 

50 000 руб. 00 коп. х 1 (17.08.2015) х 9,96 %/365 = 13 руб. 64 коп. 

7 292 руб. 42 коп. х 28 (с 18.08.2015 по 14.09.2015) х 9,96%/365 = 55 руб. 72 коп.

7 292 руб. 42 коп. х 1 (15.09.2015) х 9,50%/365 = 1 руб. 90 коп.

32 970 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2015 по 14.07.2015) х 11,14%/365 = 291 руб. 82 коп.

32 970 руб. 00 коп. х 33 (с 15.07.2015 по 16.08.2015) х 10,12%/365= 301 руб. 66 коп. 

32 970 руб. 00 коп. х 29 (17.08.2015 по 14.09.2015) х 9,96%/365 = 260 руб. 91 коп.

32 970 руб. 00 коп. х 1 (15.09.2015) х 9,50%/365 = 8 руб. 58 коп.

44 000 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2015 по 14.07.2015) х 11,14%/365 = 389 руб. 44 коп.

44 000 руб. 00 коп. х 33 (с 15.07.2015 по 16.08.2015) х 10,12%/365= 402 руб. 58 коп. 

44 000 руб. 00 коп. х 29 (17.08.2015 по 14.09.2015) х 9,96%/365 = 348 руб. 19 коп.

44 000 руб. 00 коп. х 1 (15.09.2015) х 9,50%/365 = 11 руб. 45 коп.

50 000 руб. 00 коп. х 24 (с 24.07.2015 по 16.08.2015) х 10,12%/365= 332 руб. 71 коп. 

50 000 руб. 00 коп. х 29 (17.08.2015 по 14.09.2015) х 9,96%/365 = 395 руб. 67 коп.

50 000 руб. 00 коп. х 1 (15.09.2015) х 9,50%/365 = 13 руб. 01 коп.

363 462 руб. 00 коп. х 21 (с 25.08.2015 по 14.09.2015) х 9,96%/365 = 2 082 руб. 79 коп.

363 462 руб. 00 коп. х 1 (15.09.2015) х 9,50%/365 = 94 руб. 60 коп.

297 724 руб. 42 коп. х 8 (16.09.2015 по 23.09.2015) х 9,50 % /365 = 619 руб. 92 коп.

247 724 руб. 42 коп. х 8 (с 24.09.2015 по 01.10.2015) х 9,50%/365 = 515 руб. 81 коп. 

147 724 руб. 42 коп. х 13 (с 02.10.2015 по 14.10.2015) х 9,50%/365 = 499 руб. 83 коп. 

147 724 руб. 42 коп. х 33 (с 15.10.2015 по 16.11.2015) х 9,09%/365 = 1 214 руб. 05 коп. 

147 724 руб. 42 коп. х 33 (с 17.11.2015 по 20.11.2015) х 9,20%/365 = 148 руб. 94 коп. 

97 724 руб. 42 коп. х 24 (с 21.11.2015 по 14.12.2015) х 9,20%/365 = 591 руб. 17 коп. 

97 724 руб. 42 коп. х 14 (с 15.12.2015 по 28.12.2015) х 7,44%/365 = 278 руб. 88 коп. 

15 000 руб. 00 коп. х 21 (с 25.08.2015 по 14.09.2015) х 9,96%/365 = 85 руб. 96 коп.

15 000 руб. 00 коп. х 30 (с 15.09.2015 по 14.10.2015) х 9,50%/365 = 117 руб. 12 коп.

15 000 руб. 00 коп. х 33 (с 15.10.2015 по 16.11.2015) х 9,09%/365 = 123 руб. 28 коп.

15 000 руб. 00 коп. х 28 (с 17.11.2015 по 14.12.2015) х 9,20%/365 = 105 руб. 86 коп.

15 000 руб. 00 коп. х 14 (с 15.12.2015 по 28.12.2015) х 7,44%/365 = 42 руб. 81 коп.

12 724 руб. 42 коп. х 3(с 29.12.2015 по 31.12.2015) х 7,44%/365= 7 руб. 78 коп.

12 724 руб. 42 коп. х 24 (с 01.01.2016 по 24.01.2016) х 7,44%/365 = 62 руб. 08 коп. 

12 724 руб. 42 коп. х 25 (с 25.01.2016 по 18.02.2016) х 7,89%/365 = 68 руб. 58 коп. 

12 724 руб. 42 коп. х7 (с 18.02.2016 по 25.02.2016) х 8,57%/365 = 20 руб. 86 коп. 

194 000 руб. 00 коп. х 21 (с 25.08.2015 по 14.09.2015) х 9,96%/365 = 1 111 руб. 70 коп. 

194 000 руб. 00 коп. х 30 (с 15.09.2015 по 14.10.2015) х 9,50%/365 = 1 514 руб. 79 коп. 

194 000 руб. 00 коп. х 33 (с 15.10.2015 по 16.11.2015) х 9,09%/365 = 1 594 руб. 36 коп. 

194 000 руб. 00 коп. х 28 (с 17.11.2015 по 14.12.2015) х 9,20%/365 = 1 369 руб. 16 коп. 

194 000 руб. 00 коп. х 17 (с 15.12.2015 по 31.12.2015) х 7,44%/365 = 672 руб. 25 коп. 

194 000 руб. 00 коп. х 24 (с 01.01.2016 по 24.01.2016) х 7,44%/366 = 946 руб. 47 коп. 

194 000 руб. 00 коп. х 25 (с 25.01.2016 по 18.02.2016) х 7,89%/366 = 1 045 руб. 53 коп. 

194 000 руб. 00 коп. х 7 (с 19.02.2016 по 25.02.2016) х 7,57%/366 = 317 руб. 98 коп. 

183 124 руб. 42 коп. х 20 (с 26.02.2016 по 16.03.2016) х 8,57%/366 = 857 руб. 58 коп. 

183 124 руб. 42 коп. х 23 (с 17.03.2016 по 08.04.2016) х 8,44%/366 = 971 руб. 26 коп. 

153 124 руб. 42 коп. х 66 (с 09.04.2016 по 14.04.2016) х 8,44%/366 = 211 руб. 86 коп.

83 124 руб. 42 коп. х 29 (с 15.04.2016 по 13.05.2016) х 7,92%/366 = 21 руб. 64 коп.

33 124 руб. 42 коп. х 5 (с 14.05.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 35 руб. 84 коп. 

33 124 руб. 42 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 196 руб. 14 коп. 

33 124 руб. 42 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 207 руб. 08 коп. 

33 124 руб. 42 коп. х 17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366 = 110 руб. 01 коп. 

33 124 руб. 42 коп. х 5 (с 01.08.2016 по 05.08.2016) х 10,50%/366 = 47 руб. 51 коп. 

118 500 руб. 00 коп. х 21 (с 24.09.2015 по 14.10.2015) х 9,50%/365 = 647 руб. 69 коп.

118 500 руб. 00 коп. х 33 (с 15.10.2015 по 16.11.2015) х 9,09%/365 = 973 руб. 88 коп.

118 500 руб. 00 коп. х 28 (с 17.11.2015 по 14.12.2015) х 9,20%/365 = 836 руб. 32 коп.

118 500 руб. 00 коп. х17 (с 15.12.2015 по 31.12.2015) х 7,44% /365 = 410 руб. 63 коп.

118 500 руб. 00 коп. х 24 (с 01.01.2016 по 24.01.2016) х 7,44 %/366 = 578 руб. 12 коп.

118 500 руб. 00 коп. х 25 (с 25.01.2016 по 18.02.2016) х 7,89%/366= 638 руб. 64 коп.

118 500 руб. 00 коп. х 27 (с 19.02.2016 по 16.03.2016) х 8,57% /365= 749 руб. 17 коп.

118 500 руб. 00 коп. х 29 (с 17.03.2016 по 14.04.2016) х 8,44% /366= 792 руб. 46 коп.

118 500 руб. 00 коп. х34 (с 15.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366= 871 руб. 85 коп.

118 500 руб. 00 коп. х28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 701 руб. 68 коп.

118 500 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 740 руб. 82 коп.

118 500 руб. 00 коп. х 17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/365 = 393 руб. 54 коп.

118 500 руб. 00 коп. х 5 (с 01.08.2016 по 05.08.2016) х 10,50%/366 = 169 руб. 98 коп.

101 624 руб. 42 коп. х 44 (с 06.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 1 282 руб. 80

101 624 руб. 42 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 = 2 887 руб. 69 коп.

101 624 руб. 42 коп. х 85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10 %/365 = 2 366 руб. 60 коп.

101 624 руб. 42 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 977 руб. 26 коп.

101 624 руб. 42 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 1 236 руб. 20 коп.

101 624 руб. 42 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 977 руб. 26 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 27 (с 21.10.2015 по 16.11.2015) х 9,09%/365=688 руб. 95 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 28 (с 17.11.2015 по 14.12.2015) х 9,20%/365 = 723 руб. 11 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 17 (с 15.12.2015 по 31.12.2015) х 7,44%/365 = 355 руб. 04 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 24 (с 01.01.2016 по 24.01.2016) х 7,44%/366 = 499 руб. 87 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 25 (с 25.01.2016 по 18.02.2016) х 7,89%/366 = 552 руб. 19 коп. 

102 460 руб. 00 коп. х 27 (с 19.02.2016 по 16.03.2016) х 8,57%/366 = 647 руб. 77 коп. 

102 460 руб. 00 коп. х 29 (с 17.03.2016 по 14.04.2016) х 8,44%/366 = 685 руб. 19 коп.  

102 460 руб. 00 коп. х 34 (с 15.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 753 руб. 84 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 606 руб. 70 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 640 руб. 54 коп.

102 460 руб. 00 коп. х17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366 = 340 руб. 27 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 1 440 руб. 32 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 =2 911 руб. 43 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 2 386 руб. 05 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 985 руб. 30 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 1 246 руб. 36 коп.

102 460 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 985 руб. 30 коп.

62 738 руб. 00 коп. х 18 (с 27.11.2015 по 14.12.2015) х 9,20%/365 = 284 руб. 64 коп.

62 738 руб. 00 коп. х 17 (с 15.12.2015 по 31.12.2015) х 7,44%/365 = 217 руб. 40 коп.

62 738 руб. 00 коп. х 24 (с 01.01.2016 по 24.01.2016) х 7,44%/366 = 306 руб. 08 коп.

62 738 руб. 00 коп. х 25 (с 25.01.2016 по 18.02.2016) х 7,89%/366 = 338 руб. 12 коп. 

62 738 руб. 00 коп. х 27 (с 19.02.2016 по 16.03.2016) х 8,57%/366 = 396 руб. 64 коп. 

62 738 руб. 00 коп. х 29 (с 17.03.2016 по 14.04.2016) х 8,44%/366 = 419 руб. 56 коп.  

62 738 руб. 00 коп. х 34 (с 15.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 461 руб. 59 коп.

62 738 руб. 00 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 371 руб. 49 коп.

62 738 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366= 392 руб. 22 коп.

62 738 руб. 00 коп. х17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366 = 208 руб. 36 коп.

62 738 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 881 руб. 93 коп.

62 738 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366=1 782 руб. 72 коп.

62 738 руб. 00 коп. х 85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 1 461 руб. 02 коп. 

62 738 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,7%/365 = 985 руб. 30 коп.

62 738руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 603 руб. 32 коп.

62 738руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 763 руб. 17 коп.

62 738руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 603 руб. 32 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 18 (с 27.11.2015 по 14.12.2015) х 9,20%/365 = 189 руб. 24 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 17 (с 15.12.2015 по 31.12.2015) х 7,44%/365 = 144 руб. 53 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 24 (с 01.01.2016 по 24.01.2016) х 7,44%/366 = 203 руб. 49 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 25 (с 25.01.2016 по 18.02.2016) х 7,89%/366 = 224 руб. 79 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 27 (с 19.02.2016 по 16.03.2016) х 8,57%/366 = 263 руб. 70 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 29 (с 17.03.2016 по 14.04.2016) х 8,44%/366 = 278 руб. 93 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 34 (с 15.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 306 руб. 88 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 246 руб. 98 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 260 руб. 76 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366 = 138 руб. 52 коп. 

41 710 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 586 руб. 33 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 = 1 185 руб. 20 коп. 

41 710 руб. 00 коп. х85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 971 руб. 33 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 401 руб. 10 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 507 руб. 38 коп.

41 710 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 401 руб. 10 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 18 (с 27.11.2015 по 14.12.2015) х 9,20%/365 = 267 руб. 68 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 17 (с 15.12.2015 по 31.12.2015) х 7,44%/365 = 204 руб. 45 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 24 (с 01.01.2016 по 24.01.2016) х 7,44%/366 = 287 руб. 84 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 25 (с 25.01.2016 по 18.02.2016) х 7,89%/366 = 317 руб. 97 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 27 (с 19.02.2016 по 16.03.2016) х 8,57%/366 = 373 руб. 01 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 29 (с 17.03.2016 по 14.04.2016) х 8,44%/366 = 394 руб. 56 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 34 (с 15.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 434 руб. 09 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 349 руб. 36 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 368 руб. 85 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366 = 195 руб. 94 коп. 

59 000 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 829 руб. 39 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 = 1 676 руб. 50 коп.

59 000 руб. 00 коп. х85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 1 373 руб. 97 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 567 руб. 37 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 717 руб. 70 коп.

59 000 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 567 руб. 37 коп.

29 288 руб. 00 коп. х 18 (с 27.11.2015 по 14.12.2015) х 9,20%/365 = 132 руб. 88 коп. 

29 288 руб. 00 коп. х 17 (с 15.12.2015 по 31.12.2015) х 7,44%/365 = 101 руб. 49 коп. 

29 288 руб. 00 коп. х 24 (с 01.01.2016 по 24.01.2016) х 7,44%/366 = 142 руб. 89 коп. 

29 288 руб. 00 коп. х 25 (с 25.01.2016 по 18.02.2016) х 7,89%/366 = 157 руб. 84 коп. 

29 288 руб. 00 коп. х 27 (с 19.02.2016 по 16.03.2016) х 8,57%/366 = 185 руб. 16коп.

29 288 руб. 00 коп. х 29 (с 17.03.2016 по 14.04.2016) х 8,44%/366 = 195  руб. 86 коп.

29 288 руб. 00 коп. х 34 (с 15.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 215 руб. 48 коп.

29 288 руб. 00 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 173 руб. 42коп.

29 288 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 183 руб. 10 коп.

29 288 руб. 00 коп. х 17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366 = 97 руб. 27 коп. 

29 288 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 411 руб. 71 коп.

29 288 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 =832 руб. 23 коп.

29 288 руб. 00 коп. х85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 682 руб. 05 коп. коп.

29 288 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 281 руб. 65 коп.

29 288 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 356 руб. 27 коп.

29 288 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 281 руб. 65 коп. 

85 400 руб. 00 коп. х 21 (с 29.01.2016 по 18.02.2016) х 7,89%/366 = 386 руб. 61 коп.

85 400 руб. 00 коп. х27 (с 19.02.2016 по 16.03.2016) х 8,57%/366 = 539 руб. 91 коп.

85 400 руб. 00 коп. х 29 (с 17.03.2016 по 14.04.2016) х 8,44%/366 = 571 руб. 11 коп.

85 400 руб. 00 коп. х 34 (с 15.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 628 руб. 32 коп.

85 400 руб. 00 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 505 руб. 68 коп.

85 400 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 533 руб. 89 коп.

85 400 руб. 00 коп. х 17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366 = 283 руб. 62 коп. 

85 400 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 1 200 руб. 50 коп.

85 400 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 =2 426 руб. 67 коп.

85 400 руб. 00 коп. х85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 1 988 руб. 77коп. 

85 400 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 821 руб. 24 коп.

85 400 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 1 038 руб. 84 коп.

85 400 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 821 руб. 24 коп. 

50 288 руб. 00 коп. х 21 (с 28.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 228 руб. 52 коп.

50 288 руб. 00 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 297 руб. 77 коп.

50 288 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 314 руб. 38 коп.

50 288 руб. 00 коп. х 17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366 = 167 руб. 01 коп. 

50 288 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 706 руб. 92 коп. 

50 288 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 =1 428 руб. 95 коп. 

50 288 руб. 00 коп. х85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 1 171 руб. 09 коп. 

50 288 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 483 руб. 59 коп.

50 288 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 611 руб. 72 коп.

50 288 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 483 руб. 59 коп. 

9 300 руб. 00 коп. х 21 (с 28.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 42 руб. 26 коп.

9 300 руб. 00 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 55 руб. 07 коп.

9 300 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 58 руб. 14 коп.

9 300 руб. 00 коп. х 17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366 = 30 руб. 89 коп. 

9 300 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 130 руб. 73 коп. 

9 300 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 =264 руб. 26 коп. 

9 300 руб. 00 коп. х85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 216 руб. 58 коп. 

9 300 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 89 руб. 43 коп.

9 300 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 113 руб. 13 коп.

9 300 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 89 руб. 43 коп. 

64 200 руб. 00 коп. х 21 (с 28.04.2016 по 18.05.2016) х 7,92%/366 = 291 руб. 74 коп.

64 200 руб. 00 коп. х 28 (с 19.05.2016 по 15.06.2016) х 7,74%/366 = 380 руб. 15 коп.

64 200 руб. 00 коп. х 29 (с 16.06.2016 по 14.07.2016) х 7,89%/366 = 401 руб. 36 коп.

64 200 руб. 00 коп. х 17 (с 15.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15% /366 = 213 руб. 21 коп. 

64 200 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 902 руб. 48  коп. 

64 200 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 =1 824 руб. 26 коп. 

64 200 руб. 00 коп. х85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 1 495 руб. 07 коп. 

64 200 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365 = 617 руб. 38 коп.

64 200 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 780 руб. 95 коп.

64 200 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365 = 617 руб. 38 коп. 

146 00 руб. 00 коп. х 4 (с 28.07.2016 по 31.07.2016) х 7,15%/366= 114 руб. 09 коп.

146 000 руб. 00 коп. х 49 (с 01.08.2016 по 18.09.2016) х 10,50%/366 = 2 052 руб. 38 коп. 

146 000 руб. 00 коп. х 104 (с 19.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366= 4 148 руб. 63 коп.

146 000 руб. 00 коп. х 85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 3 400 руб. 22 коп.

146 000 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365= 1 404 руб. 24 коп.

146 000 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 1 776 руб. 21 коп.

146 000 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365= 1 404 руб. 00 коп. 

192 300 руб. 00 коп. х 96 (с 27.09.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 = 5 043 руб. 93 коп.

192 300 руб. 00 коп. х 85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 4 478 руб. 22 коп.

192 300 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365= 1 849 руб. 24 коп.

192 300 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 2 339 руб. 21 коп.

192 300 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365= 1 849 руб. 24 коп. 

100 600 руб. 00 коп. х 2 (с 30.12.2016 по 31.12.2016) х 10%/366 = 54 руб. 97 коп.

100 600 руб. 00 коп. х 85 (с 01.01.2017 по 26.03.2017) х 10%/365 = 2 342 руб. 74 коп.

100 600 руб. 00 коп. х 36 (с 27.03.2017 по 01.05.2017) х 9,75%/365= 967 руб. 41 коп.

100 600 руб. 00 коп. х 48 (с 02.05.2017 по 18.06.2017) х 9,25%/365 = 1 223 руб. 74 коп.

100 600 руб. 00 коп. х 39 (с 19.06.2017 по 27.07.2017) х 9%/365= 967 руб. 41 коп. 

Всего: 162 241 руб. 11 коп..

Таким образом, с ответчика подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами в общей сумме 162 241 руб. 11 коп..

Соответственно в остальной части требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами следует отказать.

В соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Исследовав представленные сторонами доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования истца подтверждаются материалами дела и подлежат частичному удовлетворению, а именно: задолженность в размере 944 908 руб. 42 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 162 241 руб. 11 коп..

Госпошлина по настоящему иску с учетом увеличения размера исковых требований составляет 31 147 руб. 00 коп.

Определением Арбитражного суда Челябинской области от 13.12.2016  истцу при принятии искового заявления была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины до рассмотрения спора по существу (т.1 л.д.1-3).

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине также подлежат распределению между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям. На ответчика относится госпошлина в сумме 19 002 руб. 52 коп. (пропорция: 1 107 149 руб. 53 коп. х 31 147 руб. 00 коп. : 1 814 727 руб. 26 коп.), на истца относится госпошлина в сумме 12 144 руб. 48 коп.. Поскольку при принятии иска истцу была предоставлена отсрочка уплаты госпошлины, последняя взыскивается с истца и с ответчика в доход бюджета Российской Федерации.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с акционерного общества «Уралэнергочермет», г. Екатеринбург, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Магнитогорский экспертный центр», г. Магнитогорск Челябинской области, задолженность в размере 944 908 руб. 42 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 162 241 руб. 11 коп..

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества «Уралэнергочермет», г. Екатеринбург, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 19 002 руб. 52 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Магнитогорский экспертный центр», г. Магнитогорск Челябинской области, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 144 руб. 48 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области. 

 Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 

 Судья                                                                        Т.Д. Пашкульская

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной  жалобы можно получить  соответственно  на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда httр://18aas.аrbitr.ru