АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-328074/19-15-2329

10 июня 2020 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 8 июня 2020 года.  Решение в полном объеме изготовлено 10 июня 2020 года.  

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПРОЦЕСС" (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ № 36" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании задолженности по договору подряда и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца – не явился, извещен от ответчика – ФИО2 По дов. № 04-01-2020 от 09.01.2020 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ТЕРМОПРОЦЕСС" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы  с иском к ООО "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 36" (далее – ответчик) о  взыскании основного долга по Договору № Т-003/17 от 05.04.2017 в размере 707 806,80 руб.,  неустойку за период с 01.05.2019 по 09.12.2019 в размере 15 784,09 руб.  

Истец, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства  в судебное заседание не явился.  

Ответчик возражал по доводам, изложенным в отзыве. 

Суд, с учетом мнения Ответчик, считает возможным рассмотреть спор в отсутствие  представителей Истца в порядке ст.ст. 123, 136, 156 АПК РФ по имеющимся в материалах дела  доказательствам.  

Изучив материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд  посчитал требование заявителя подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.  

Согласно материалам дела, 5 апреля 2017 года между ООО «Строительно-монтажное  управление № 36» (далее - Заказчик, Ответчик) и Обществом с ограниченной ответственностью  «Термопроцесс» (далее - истец, Подрядчик) заключен Договор № Т-003/17 подряда на  строительство. Предмет договора - выполнение работ по термической обработке сварных  стыков на объекте «Устройство дополнительных скважин Восточного участка ОГНКМ. Шестая  

очередь.» «Компрессорная установка на ТЛ-4 Восточного участка ОНГКМ».  

В соответствии с условиями договора, Подрядчик обязался выполнить соответствующие  работы, а Заказчик - принять и оплатить выполненные работы в порядке и размерах,  предусмотренных Договором.  

Согласно п. 1.3. договора (в редакции Протокола разногласий № 1) стоимость работ  определяется протоколом согласования договорных цен (Приложение № 1 к договору). В свою  очередь Приложение № 1 содержит Договорные расценки на термическую обработку сварных  соединений.  

Подрядчик выполнил работы в объеме, предусмотренном Договором подряда.  Выполнение работ подтверждается составленными Подрядчиком актами о приемке  выполненных работ (УФ КС-2) Акт № 1 от 20.10.2017 на сумму 613 941,50 руб.; Акт № 2 от  15.12.2017 на сумму 147 972,0 руб.; Акт № 3 от 23.12.2017 на сумму 275 300 руб.; Общая  стоимость выполненных работ составляет 971 525 руб.  

Указанные Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости работ и затрат  передавались на подпись Заказчику неоднократно, что подтверждается сопроводительными  письмами от 05.04.2018, от 01.02.2019, от 19.07.2019.  

Письмом от 01.02.2019 за исх. № 1 ООО «Термопроцесс» обратилось к ответчику с  Претензией об истребовании документов (подписанных заказчиком КС-2, КС-3) и оплате  задолженности. К письму в очередной раз были приложены Акты КС-2 и Справки КС-3, что  подтверждается Описью вложения в ценное письмо от 07.02.2019г.  

Условиями п.4.6.4. договора установлена обязанность Заказчика в течение 5  календарных дней со дня получения акта КС-2 направить Подрядчику подписанный акт или  мотивированный отказ от приемки работ. Исходя из условий договора подряда, Заказчик  должен был подписать Акты и иную исполнительную документацию не позднее 25 февраля  2019 года.  

Акты о приемке выполненных работ, Справки о стоимости работ, подписанные  Заказчиком, Подрядчику не возвращены, также не был получен отказ от приемки работ с  указанием на их недостатки.  

Таким образом, по мнению истца, Заказчик нарушил условия договора подряда по  приемке выполненных работ, и, соответственно уклоняется от оплаты работ по договору  подряда. В связи с этим, Подрядчик подписал Акты о приемке выполненных работ в  одностороннем порядке на основании п.4 ст.753 ГК РФ.  

В соответствии со ст.711, 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ  производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и порядки, которые  установлены законом или договором строительного подряда.  

Согласно п.5.1. договора расчеты за выполненные работы осуществляются Заказчиком  по форме КС-3 по фактически произведенным физическим объемам. По условиям пункта 5.2.  Договора, оплата выполненных работ производится в течение 60 календарных дней со дня  подписания акта выполненных работ и передачи Заказчику полного комплекта исполнительной  документации. Дата подписания актов КС-2, справок КС-3 (в одностороннем порядке) - 28  февраля 2019 года, соответственно, срок оплаты истек 30 апреля 2019 года.  

Заказчик оплатил работу частично, в сумме 263 718,20 рублей, окончательный расчет не  произведен.  

По состоянию на 09 декабря 2019 г. размер задолженности ответчика составляет 707 806  рублей 80 копеек.  

На основании вышеизложенного истец обратился в суд с настоящим иском. 

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее  результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или  

иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения  обязательства не допускается.  

Доводы ответчика, указанные в отзыве судом признаются не обоснованными, поскольку  опровергаются фактическими обстоятельствами дела.  

Согласно условиям Договора № Т-003/17, заключенным между сторонами 05.04.2017  (далее - Договор), «Подрядчик обязан предъявить Заказнику исполнительную документацию,  оформленную в соответствии со СНиП» -пункт 3.1.11. Договора в ред. Протокола разногласий.  

Между тем, Договор не содержит сведений о том, какую исполнительную  документацию, в виде каких документов и на каких носителях Подрядчик должен предъявить  (передать) Заказчику. Договор содержит отсылку к СНиП без указания номера и названия  нормативного документа.  

Состав исполнительной документации установлен Требованиями к составу и порядку  ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте объектов капитального строительства, утвержденными Приказом Ростехнадзора №  1128 от 26.12.2006. Данный документ не устанавливает требований к составу исполнительной  документации при производстве такого вида работ как «термическая обработка сварных  соединений».  

Исходя из условий Договора, Подрядчик должен вести журнал по термической  обработке, форма журнала должна соответствовать нормативной документации. Рекомендации  по ведению Журнала учета термической обработки сварных соединений, установлены РД  34.10.126-94 Инструкция по операционному контролю процессов сборки, сварки и  термообработки, утверждена Министерством топлива и энергетики РФ.  

После окончания работ по термической обработке сварных соединений Подрядчик  направил в адрес Заказчика все документы, связанные с выполнением работ, в том числе  Журнал учета термической обработки сварных соединений и термограммы.  

Согласно пояснений истца, документы были переданы Начальником участка  термообработки ООО «Термопроцесс» ФИО3 Заместителю  начальника обособленного подразделения ООО «СМУ № 36» в г.Оренбург - ФИО4 с отметкой, что объем выполненных работ подтверждается, и сданы в ПТО ООО  «СМУ № 36» для проверки и внесения в исполнительную документацию (ответственный  сотрудник ПТО Холодное Максим).  

Кроме того, как установлено судом в ходе судебного разбирательства по делу и указано  выше Истец неоднократно обращался к ответчику с претензией о необходимости подписать  документы и оплатить выполненные работы, а ответчик не обращался к истцу за  исполнительной документацией и не заявлял отказ от приемки выполненных работ по мотиву  отсутствия исполнительной документации.  

Кроме того, истец также пояснил, что результат работ был передан ответчиком  конечному заказчику и используется последним по назначению, что представителем ответчика  в ходе судебного разбирательства по делу не оспаривалось.  

Таким образом, доводы ответчика, изложенные в отзыве судом признаются не  обоснованными, поскольку опровергаются фактическими обстоятельствами дела и направлены  на неправомерное уклонение от выполнения обязательств по оплате выполненных работ.  

Учитывая изложенное, суд считает требования истца о взыскании суммы задолженности  в размере 707 806 рублей 80 копеек. правомерными и подлежащими удовлетворению.  

В рамках настоящего спора, истцом также заявлены требования о взыскании с ответчика  неустойки по Договору № Т-003/17 от 05.04.2017 за период с 09.08.2018 по 26.02.2020 в размере  3 374 582 руб., неустойку за период с 01.05.2019 по 09.12.2019 в размере 15 784,09 руб.  

Статьей 329 ГК РФ предусмотрены способы обеспечения исполнения обязательств, в  том числе такой способ, как неустойка.  

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная  законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.  

В соответствии с п.7.2. в редакции Протокола разногласий предусмотрена  имущественная ответственность Заказчика за просрочку оплаты выполненных работ в виде  пени в размере 0,01% от суммы, подлежащей оплате, за каждый календарный день просрочки,  но не более 5 % от суммы просроченного платежа.  

Суд считает, что поскольку ответчиком не исполнены обязательства по оплате  выполненных работ, у истца возникло право на взыскание с ответчика пени за период с  01.05.2019 по 09.12.2019 в размере 15 784,09 руб.  

Расчет истца суммы неустойки судом проверен и признан законным и обоснованным.  

Суд считает требования истца правомерными и подлежащими удовлетворению, а  неустойка (пеня) в сумме 15 784,09 руб. подлежит принудительному взысканию с ответчика в  пользу истца, так как от него не поступили документы в суд, подтверждающие ее оплату и так  как односторонний отказ от исполнения обязательств, в данном случае денежных,  противоречит ст. ст. 309, 310 ГК РФ.  

В силу п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.  

При таких обстоятельствах, суд считает требования истца правомерными и  подлежащими удовлетворению в полном объеме.  

В силу п. 1 ст. 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в  деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь ст. 8, 11, 12, 307-309, 329,330,702, 711, ГК РФ, ст.ст.4, 9, 64-66, 71, 75,  110, 156, 167-171 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 36" в пользу ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПРОЦЕСС" основной долг в размере  707 806,80 руб., неустойку в размере 15 784 руб.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 36" в федеральный бюджет РФ  государственную пошлину в размере 17 472 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном  апелляционном суде.  

СУДЬЯ: М.А. Ведерников