АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А74-13620/2021

08 августа 2022 года

г. Абакан

 

Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.Ю. Ишь при ведении протокола  судебного заседания секретарём судебного заседания Е.Н.Арнгольд рассмотрел в открытом  судебном заседании дело по исковому заявлению Управления образования администрации  Бейского района Республики Хакасия (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройсектор» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

об истребовании исполнительной документации. 

Руководствуясь статьями 49, 102, 110, 166 – 171, 174, 176, 319 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Удовлетворить иск: 

обязать общество с ограниченной ответственностью «Стройсектор» в срок - тридцать  календарных дней со дня вступления настоящего решения в законную силу передать  Управлению образования администрации Бейского района Республики Хакасия следующую  исполнительную документацию по муниципальному контракту на выполнение работ по  строительству № 0380300014419000003-01-01 от 18.11.2019:  

1. Первичная исполнительная документация: - общий журнал работ; 

- специальные журналы работ (на бетонные, сварочные работы);  

- журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов,  конструкций и оборудования;  

- акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального  строительства (в составе: акт освидетельствования, схема геодезической разбивочной основы  объекта).  

- акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности (в составе: акт  разбивки осей, исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на  местности).  

2. Акты освидетельствования скрытых работ: а) фундамент: 

- разработка котлована под фундаменты (в составе: акт освидетельствования работ по  разработке котлована, исполнительная схема разработки котлована);  

- устройство основания под фундаменты в составе: акт освидетельствования грунта  основания фундаментов);  

- устройство песчаной подготовки толщиной 50 мм под фундаменты (в составе: акт  освидетельствования скрытых работ по устройству песчаной подготовки под фундаменты,  исполнительная схема на устройство песчаной подготовки, паспорт качества на  примененный песок);  

- устройство фундаментных плит (в составе: акт освидетельствования скрытых работ  по устройству фундаментных плит, исполнительная схема на устройство фундаментных  плит, паспорта качества на фундаментные плиты);  

- гидроизоляция подошвы фундамента на отм. - 3,400 горячим битумом (в составе: акт  освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции подошвы фундамента на  отм. - 3,400, исполнительная схема на устройство гидроизоляцию подошвы фундамента на  отм. – 3,400, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных  гидроизоляционных материалов);  

- устройство арматурного шва на отм. -3,100 (из арматуры A-I д. 10 и 6 мм и  цементного раствора марки M 100 толщиной 40 мм) (в составе: акт освидетельствования  скрытых работ по устройству арматурного шва на отметке - 3,400, исполнительная схема на  устройство арматурного шва на отметке - 3.400, документы качества (паспорта, сертификаты  и т.п) примененных материалов (арматура A-I диаметром 10 и 6 мм. цементный раствор  марки M 100);  

- устройство фундаментов ленточных из сборных бетонных блоков (с заполнением  зазоров между блоками бетонной смесью) (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по устройству фундаментов ленточных из сборных бетонных блоков, исполнительная  схема на устройство фундаментов ленточных из сборных бетонных блоков, документы  качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных материалов (блоки ФБС, раствор  кладочный);  

- огрунтовка наружной поверхности фундаментов битумным праймером (в составе: акт  освидетельствования скрытых работ по огрунтовке наружной поверхности фундаментов на 2  раза, исполнительная схема на огрунтовку наружной поверхности фундаментов на 2 раза,  документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных материалов (праймер  битумный));  

- вертикальная обмазочная гидроизоляция фундаментов битумной мастикой за 2 paза (в  составе: акт освидетельствования скрытых работ по устройству обмазочной гидроизоляции  фундаментов битумной мастикой за 2 раза битумной мастикой за 2 раза, документы качества  (паспорта, сертификаты и т.п) примененных гидроизоляционных материалов (мастика  битумная));  

- армирование монолитных участков (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по армированию монолитных участков, исполнительная схема на армирование  монолитных участков, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных  материалов (арматура));  

- бетонирование монолитных участков (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по бетонированию монолитных участков, исполнительная схема на бетонирование  монолитных участков, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных  материалов (бетонная смесь));  

- армирование монолитного фундамента МФ-1 (в составе: акт освидетельствования  скрытых работ по армированию монолитного фундамента МФ-1. исполнительная схема на  армирование монолитного фундамента МФ-1. документы качества (паспорта, сертификаты и  т.п) примененных материалов (арматура));  

- бетонирование монолитного фундамента МФ-1 А (в составе: акт освидетельствования  скрытых работ по бетонированию монолитного фундамента МФ-1. исполнительная схема на  бетонирование монолитного фундамента МФ-1, документы качества (паспорта, сертификаты  и т.п) примененных материалов (бетонная смесь));  

- монтаж железобетонных перемычек в подвале (в составе: акт освидетельствования  скрытых работ по монтажу железобетонных перемычек в подвале, исполнительная схема на  монтаж железобетонных перемычек в подвале, документы качества (паспорта, сертификаты  и т.п) примененных материалов (перемычки железобетонные, раствор кладочный);  

- устройство внутренних кирпичных перегородок толщиной 120 мм (в составе: акт  освидетельствования скрытых работ по устройству внутренних кирпичных перегородок  толщиной 120 мм в подвале, исполнительная схема на устройство внутренних кирпичных  

перегородок толщиной 120 мм в подвале, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п)  примененных материалов (кирпич, раствор кладочный, сетка арматурная кладочная);  

- армирование антисейсмического пояса (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по армированию антисейсмического пояса, исполнительная схема на армирование  антисейсмического пояса, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных  материалов (арматура));  

- бетонирование антисейсмического пояса (в составе: акт освидетельствования  скрытых работ по бетонированию антисейсмического пояса, исполнительная схема на  бетонирование антисейсмического пояса, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п)  примененных материалов (бетонная смесь));  

б) перекрытие (подвал, 1 этаж, 2 этаж): 

- монтаж плит перекрытия из сборных железобетонных многопустотных панелей марки  ПК (в составе: акт освидетельствования скрытых работ по монтажу плит перекрытия  подвала, 1 и 2 этажей из сборных железобетонных многопустотных панелей марки ПК,  исполнительная схема на монтаж плит перекрытия подвала, 1 и 2 этажей из сборных  железобетонных многопустотных панелей марки ПК, документы качества (паспорта,  сертификаты и т.п) примененных материалов (железобетонные многопустотные панели  марки ПК, раствор кладочный);  

- армирование антисейсмического пояса в перекрытии 1 и 2 этажей (в составе: акт  освидетельствования скрытых работ по армированию антисейсмического пояса в  перекрытии 1 и 2 этажей, исполнительная схема на армирование антисейсмического пояса в  перекрытии 1 и 2 этажей, документы качества (паспорта, сертификаты ит.п) примененных  материалов (арматура));  

- бетонирование антисейсмического пояса (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по бетонированию антисейсмического пояса в перекрытии 1 и 2 этажей,  исполнительная схема на бетонирование антисейсмического пояса в перекрытии 1 и 2  этажей, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных материалов  (бетонная смесь));  

- армирование монолитных участков (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по армированию монолитных участков, исполнительная схема на армирование  монолитных участков, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных  материалов (арматура));  

- бетонирование монолитных участков (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по бетонированию монолитных участков, исполнительная схема на бетонирование  монолитных участков, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных  материалов (бетонная смесь));  

- армирование монолитных сердечников (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по армированию монолитных сердечников, исполнительная схема на армирование  монолитных сердечников, документы качества (паспорта, сертификаты ит.п) примененных  материалов (арматура));  

- бетонирование монолитных сердечников (в составе: акт освидетельствования  скрытых работ по бетонированию монолитных сердечников, исполнительная схема на  бетонирование монолитных сердечников, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п)  примененных материалов (бетонная смесь));  

- монтаж металлических косоуров (в составе: акт освидетельствования скрытых работ  по монтажу металлических косоуров, исполнительная схема на монтаж: металлических  косоуров, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных материалов  (металлопрокат));  

- антикоррозионная защита сварных соединений (лестничных маршей, площадок (в  составе: акт освидетельствования скрытых работ по антикоррозионной защите сварных  соединений (лестничных маршей, площадок), исполнительная схема на антикоррозионную  защиту сварных соединений (лестничных маршей, площадок), документы качества  (паспорта, сертификаты и т.п) примененных материалов (грунтовка, краска и т.п.));  

- армирование лестничных площадок (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по армированию лестничных площадок, исполнительная схема на армирование  лестничных площадок, документы качества (паспорта, сертификаты ит.п) примененных  материалов (арматура));  

- бетонирование лестничных площадок (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по бетонированию лестничных площадок, исполнительная схема на бетонирование  лестничных площадок, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных  материалов (бетонная смесь));  

- монтаж ограждения лестничных маршей (в составе: акт освидетельствования работ по  монтажу ограждения лестничных маршей, документы качества (паспорта, сертификаты и  т.п) примененных материалов (металлопрокат));  

в) кирпичная кладка: 

- наружных стен с армированием (в составе: акт освидетельствования скрытых работ по  кирпичной кладке наружных стен 1 и 2 этажа с армированием, исполнительная схема на  кирпичную кладку наружных стен 1 и 2 этажа с армированием, документы качества  (паспорта, сертификаты и т.п) примененных материалов (кирпич рядовой, кирпич лицевой,  раствор кладочный, сетка арматурная кладочная);  

- утепление наружных стен минераловатными плитами (в составе: акт  освидетельствования скрытых работ по утеплению наружных стен 1 и 2 этажа  минераловатными плитами, исполнительная схема на утепление наружных стен 1 и 2 этажа  минераловатными плитами, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных  материалов (минераловатный утеплитель);  

- монтаж железобетонных перемычек на 1 и 2 этажей (в составе: акт  освидетельствования скрытых работ по монтажу железобетонных перемычек на 1 и 2 этаже,  исполнительная схема на монтаж: железобетонных перемычек на 1 и 2 этаже, документы  качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных материалов (перемычки  железобетонные, раствор кладочный);  

- кирпичная кладка внутренних стен (в составе: акт освидетельствования скрытых  работ по кирпичной кладке внутренних стен 1 и 2 этажа с армированием, исполнительная  схема на кирпичную кладку внутренних стен 1 и 2 этажа с армированием, документы  качества (паспорта, сертификаты и т.п) примененных материалов (кирпич рядовой, раствор  кладочный, сетка арматурная кладочная);  

- кирпичная кладка перегородок (в составе: акт освидетельствования скрытых работ по  устройству внутренних кирпичных перегородок, исполнительная схема на устройство  внутренних кирпичных перегородок, документы качества (паспорта, сертификаты и т.п)  примененных материалов (кирпич, раствор кладочный, сетка арматурная кладочная)  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройсектор» в доход  федерального бюджета 6000 (шесть тысяч) руб. государственной пошлины.  

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Третий арбитражный  апелляционный суд в месячный срок с момента его принятия.  

Жалоба подаётся через Арбитражный суд Республики Хакасия. 

Судья Н.Ю.Ишь