78/2017-16766(3) 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А20-3561/2016

г. Нальчик

22 мая 2017 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 

в составе судьи А.Б. Бечелова, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску государственного унитарного  предприятия «Каббалкавтотранс-1438», г. Нальчик (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Рембыттехника», г. Нальчик (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 197 773 руб. 89 коп. неустойки и обязании исправить недостатки выполненных  работ,  

при участии в судебном заседании: 

от истца: Попета А.А. – по доверенности от 28.02.2017 № 137, 

от ответчика: ФИО2 – по доверенности от 15.05.2017,  

 Руководствуясь статьями 110, 169, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л :

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Рембыттехника», г. Нальчик  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу государственного унитарного  

предприятия «Каббалкавтотранс-1438», г. Нальчик (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств за период с 19.04.2016  

по 07.09.2016 в размере 92 469 руб. 54 коп., расходы по уплате госпошлины в размере  

3241 руб. 17 коп. В остальной части неустойки отказать.  

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью «Рембыттехника», г. Нальчик  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) исправить за свой счет недостатки  

ограждения территории Нальчикского автовокзала № 1 по ул. Т. Идарова, 124 (332,29 м): 1) укрепить пролеты по всему периметру ограждения; 

2) произвести работы по сварке стыков примыкания пролетов ограды к опорным  

столбам; 

3) произвести работы по окрашиванию сварных швов; 4) зачистить опорные стойки от остатков бетона; 

5) привести ограду в соответствие со СНиП 3.01.04.-87, СНиП III-10-75,  

ГОСТ23118-2012, ГОСТ 26633-91. 

3. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд  

через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в течение месяца со дня  

принятия. 

Судья А.Б. Бечелов