РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-298581/19-110-2268

03 ноября 2020 года

город Москва

Резолютивная часть решения объявлена 19 октября 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 03 ноября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества "ОЙКУМЕНА"  (125009, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК КИСЛОВСКИЙ Б., ДОМ 3/2, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" (129327, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЛЕНСКАЯ, ДОМ 2/21, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/III/16А, ОГРН: 

<

***>) о взыскании 20 771 968 рублей,

при участии:

от истца – не явился,

от ответчика- ФИО2 по дов.  от  14.05.2020,

УСТАНОВИЛ:

акционерное общество "ОЙКУМЕНА" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-МОНТАЖ 2002" о взыскании 20 771 968 руб. задолженности по договору от 02.04.2018 №СМ-ВТ-04/2018.

Истец, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Определением от 09.09.2020 была произведена замена истца в порядке ст.48 АПК с ООО «ВИВА ТРАНС» на АО "ОЙКУМЕНА"

Ответчик иск не признал.

Заслушав представителя ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между Обществом с ограниченной ответственностью «ВИВА ТРАНС» (далее - Истец, Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Строй-монтаж 2002» (далее - Заказчик, Ответчик) были заключен Договор от 02.04.2018 № СМ-ВТ-04/2018 на выполнение земляных работ на объекте.

В соответствии с п. 3.1 Договора оплата выполненных и принятых Заказчиком работ производится в течении 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.

Работы Подрядчиком выполнены в полном объеме, что подтверждается актами по форме КС-2 и КС-3 подписанными сторонами, а именно:

Справка КС-3 от 30.04.2018 на сумму 14 040 000,00 рублей;

Справка КС-3 от 31.05.2018 на сумму 12 294 415,00 рублей;

Справка КС-3 от 30.06.2018 на сумму 1 158 459,65 рублей;

Справка КС-3 от 31.07.2018 на сумму 15 003 393,35 рубля; 

Справка КС-3 от 31.08.2018 на сумму 5 554 156,60 рублей; 

Справка КС-3 от 30.09.2018 на сумму 11 720 516,50 рублей;

Справка КС-3 от 30.11.2018 на сумму 3 527 986,00 рублей;

Справка КС-3 от 31.12.2018 на сумму 390 672,00 рубля;

Справка КС-3 от 31.05.2019 на сумму 2 334 500,00 рублей.

Общая стоимость выполненных работ по Договору составила 66 024 100,00 рублей.

Однако, по состоянию на 12.09.2019 Заказчиком оплачена сумма в размере 45 252 132,00 рубля.

Общая задолженность ООО «СТРОЙ-МОНТАЖ 2002» перед ООО «ВИВА ТРАНС» по Договору составила 20 771 968,00 рублей.

Вместе с тем  06.12.2019  между сторонами заключено Соглашение о зачете,  согласно которому спорная задолженность  зачтена в счет однородного требования и прекращена надлежащим исполнением.

При указанных обстоятельствах иск удовлетворению не подлежит.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.110, 123, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко