Арбитражный суд Брянской области 

241050, 

<

...> сайт: www.bryansk.arbitr.ru  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ  

решения

 по делу 

№ А09-5669/2024

город Брянск

14 августа 2025 года

Руководствуясь ст.ст.167-170, ч.2 ст.176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Брянской области удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «СтройСитиГрупп» в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору от 03.07.2019 № 271.КР.2019 на объекте капитального ремонта, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно:  

- на крыше многоквартирного дома – устранить недостатки (деформацию, повреждения) комбинированного ограждения со снегодержателем вместе с креплением, протяженностью около 10м., расположенного над квартирой № 16 (балкон);  

-на крыше многоквартирного дома – устранить деформацию соседних опор ограждения (трубки и стойки) протяженностью 18 м.;  

- в чердачном помещении, расположенном на крыше многоквартирного дома под вырванными опорами, в 2 (двух) местах осуществить крепление (шурупами) сплошной обрешетки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СтройСитиГрупп» в пользу Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов по Брянской области 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня принятия и может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Тула.  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области. 

Судья Ивашина Я.В.