Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-62835/2018

26 декабря 2018 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью "ЭВЕРЕСТ" (адрес:  190000,   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 35/ЛИТ.А/УСЛ.МЕСТО №122-4;  191028, Санкт-Петербург, Литейный пр. 26, ОГРН:  

<

***>; 

<

***>);

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОАЛЬЯНССТРОЙ" (адрес:  197022, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. ПРОФЕССОРА ПОПОВА 23/В/230 (ОФ.303 ПОМ. 3Н), ОГРН:  

<

***>);

о взыскании

при участии

- от истца: ФИО1, по доверенности от 15.03.2018

- от ответчика: ФИО2, по доверенности от 12.01.2018 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (далее – ООО «ЭВЕРЕСТ») обратилось с иском в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области к обществу с ограниченной ответственностью «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» (далее - ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ») о взыскании 2 053 200 руб. задолженности и 102 660 руб. неустойки по договору  от 26.10.2016 № В7NА-5759/5768.

Определением от 07.09.2018 принят встречный иск ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» о взыскании с ООО «ЭВЕРЕСТ» 50 000 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, суд находит требование истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «ЭВЕРЕСТ» и общество с ограниченной ответственностью «БАЗИС» (правопредшественник ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ», заказчик) заключили договор от 26.10.2016 № В7NА-5759/5768, по условиям которого ЭВЕРЕСТ обязуется поставить оборудование, соответствующее техническим характеристикам и в количестве, указанном в Приложении №1 к договору, выполнить монтажные и пуско-наладочные работы, выполнить сопутствующие монтажу оборудования строительно-отделочные работы по шахтам лифтов, изготовление и монтаж обрамлений дверей шахты лифта, в объеме необходимом и достаточном для обеспечением готовности к приемке/вводу оборудования в эксплуатацию в соответствии с условиями настоящего договора.

В пункте 1.2 договора заказчик обязуется создать необходимые условия для поставки оборудования и выполнения ООО «ЭВЕРЕСТ» вышеуказанных работ, осуществить приемку и оплату оборудования и работ и принять участие в приемке/вводе оборудования в эксплуатацию в соответствии с Приложением №3.

В силу пункта 3.1 договора цена составляет 17 487 600 руб.

По пункту 4.5 договора заказчик оплачивает промежуточный платеж от цены монтажных и прочих работ на основании раздела 2 Сводной таблицы стоимости Договора (Приложение № 15), ежемесячно исходя из объемов работ, выполненных по состоянию на 25 число оплачиваемого месяца, на основании документов, подтверждающих приемку работ за оплачиваемый месяц, с пропорциональным зачетом аванса. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком форм КС-2. КС-3 за оплачиваемый месяц и предоставления счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями законодательства.

Заказчик оплачивает окончательный платеж, на основании раздела 3 Сводной таблицы стоимости договора (Приложение № 15), за пуско-наладочные и прочие работы - в течение семи (7) банковских дней по основаниям указанным в пункте 7.6 договора и получения копии Декларации соответствия лифта, при условии передачи ЗАКАЗЧИКУ полного пакета исполнительной документации, подписания акта приемки лифта в эксплуатацию, Приложение № 14 (пункт 4.6 договора).

Согласно пункту 7.2 договора после выполнения механо-монтажных работ представители сторон подписывают Акт готовности лифта к производству отделочных работ (Приложение № 9) по каждой единице Оборудования (или нескольких единиц Оборудования), в рублях, вместе с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. ООО «ЭВЕРЕСТ», в соответствии с пунктом 4.5 договора передает счет на промежуточную оплату выполненных работ по монтажу. Если в течение 10 (десяти) дней после получения от ООО «ЭВЕРЕСТ» соответствующих акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 заказчик не подпишет указанные акт и справку и не вручит ООО «ЭВЕРЕСТ» мотивированный отказ от их подписания, ЭВЕРЕСТ вправе в одностороннем порядке подписать указанные акт и справку по формам КС-2 и КС-3 и выставить заказчику счет-фактуру.

По завершении всех монтажных, пуско-наладочных и строительно-отделочных работ в соответствии с Приложением №3, осуществляется оценка соответствия лифтов требованиям Технического регламента в форме полного технического освидетельствования представителем испытательной лаборатории (центра) и, при её положительных результатах, оформляется «Акт полного технического освидетельствования» (Приложение № 12) и «Акт технической готовности лифта» (Приложение № 11), которые подтверждают завершение ЭВЕРЕСТ всего комплекса работ по договору (пункт 7.4 договора).

В силу пункта 11.1 договора за нарушение сроков платежей по договору ООО «ЭВЕРЕСТ» вправе взыскать с заказчика неустойку в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы платежа за каждую неделю просрочки в течение первых четырех (4) недель и в размере 1% (одного процента) от указанной суммы за каждую последующую неделю, но не более 5% (пяти процентов) от не оплаченной в срок суммы. Срок поставки и/или срок монтажных и пуско-наладочных работ, а также ввод оборудования в эксплуатацию по договору, продлеваются на период задержки платежей.

В пункте 12.4.3 договора в случае, если подписанные акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3 либо мотивированный отказ, составленный в строгом соответствии с пунктом 12.4.2 договора не будут вручены ООО «ЭВЕРЕСТ» в срок, указанный в пункте 12.4.2 договора, работы по акту по форме КС-2 и справке по форме КС-3 считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в объеме, указанном в акте и справке, без замечаний; ЭВЕРЕСТ выдает заказчику счет-фактуру на объем работ, указанный в акте и справке.

ООО «ЭВЕРЕСТ» выполнило работы по акту формы КС-2 от 12.07.2017 № 3 на сумму 708 000 руб., а по акту формы КС-2 от 25.10.2017 № 4 на сумму 2 100 000 руб.

ООО «ЭВЕРЕСТ» направило ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» претензию от 05.04.2018 с требованием об оплате задолженности в сумме 2 053 200 руб.

Отказ ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ»  удовлетворить названное требование послужило основанием для обращения ООО «ЭВЕРЕСТ» в арбитражный суд с настоящим иском.

В пункте 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ).

По пункту 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Факт выполнения ООО «ЭВЕРЕСТ» работ на сумму 2 808 100 руб. подтверждается представленными в материалы дела актами формы КС-2 от 12.07.2017 № 3 и 25.10.2017 № 4.

Кроме того, в материалы дела представлены акты технического освидетельствования лифтов, акты приемки лифтов в эксплуатацию.

ООО «ЭВЕРЕСТ» 12.10.2017 передало заказчику по акту исполнительную документацию по договору. 

В силу статьи 182 ГК РФ полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель.

Названные акты получены представителями заказчика: руководителем проекта ФИО3, инженером по качеству ФИО4 и экономистом ФИО5 

При этом в материалы дела представлены по спорному договору акты формы КС-2 от 31.03.2017 № 1 и от 17.04.2017 № 2, подписанные генеральным директором ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» и руководителем проекта ФИО3 и экономистом ФИО5

По полученным актам формы КС-2 № 3 и 4 заказчик не предъявил возражения по объему и качеству, в связи с чем задолженность в размере 2 053 200 руб. подлежит взысканию с ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ».

В силу пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) является определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения.

ООО «ЭВЕРЕСТ» начислило неустойку по спорному договору в сумме 102 660 руб. с учетом ограничения, установленного в пункте 11.2 договора не более 5% от не оплаченной в срок суммы. 

Расчет проверен судом и признан верным. С ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» подлежит взысканию 102 660 руб. пеней.

ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» предъявило встречный иск о взыскании с ООО «ЭВЕРЕСТ» неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 50 000 руб.

По расчету ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» за нарушение ООО «ЭВЕРЕСТ» срока монтажа лифтов на 10 недель неустойка составила 1 200 000 руб., а за нарушение сроков выполнения строительно-отделочных работ на 20 недель – 151 200 руб.

Вместе с тем, учитывая ограничение пеней, предусмотренное в пункте 11.1 договора не более 5% от не оплаченной в срок суммы, ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» предъявило к взысканию 50 000 руб.

Требование ООО «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» по встречному иску является правомерным и подлежит удовлетворению в полном объеме. Исходя из обстоятельств дела, суд удовлетворяет встречное требование ответчика к зачету первоначального требования истца.

Из содержания части 1 статьи 110 АПК РФ следует, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

р е ш и л :

по первоначальному иску взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» 2 053 200 руб. задолженности, 102 660 руб. неустойки и 33 779 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

По встречному иску взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» 50 000 руб. неустойки и 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Произвести зачет денежных сумм, подлежащих взысканию по первоначальному и встречному искам, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПРОАЛЬЯНССТРОЙ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» 2 137 639 руб. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

 

Судья                                                                            Косенко Т.А.