АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело № А14-17895/2016 «12» апреля 2018 г. 

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Семенова Г.В., при  

ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с  ограниченной ответственностью производственная компания «Ангстрем», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью «Алвикар-ММ», г. Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки по договору от  15.06.2012 № 2-cc/c и убытков  

встречному исковому заявлению о взыскании задолженности и неустойки 

Третьи лица: ООО «СтройТехИнвест», ООО «Воронежстройкомплекс», ООО  «СК Стройцех», ООО «Интер-Кров.В», ООО «СтройАльянс», ООО «РСО»,  ООО «ПромТехСтрой»  

при участии в судебном заседании: 

от заказчика: ФИО2, представитель, доверенность от 01.12.2017;  ФИО3, представитель по доверенности от 08.04.2016;  

от подрядчика: ФИО4, представитель, доверенность от 01.03.2016;  ФИО5, ФИО6 – представители, доверенность от 25.04.2016;  

от ООО «СтройТехИнвест», ООО «Воронежстройкомплекс», ООО «СК  Стройцех», ООО «Интер-Кров.В», ООО «СтройАльянс», ООО «РСО», ООО  «ПромТехСтрой»: не явились, извещены,  

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Алвикар-ММ», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в  

пользу общества с ограниченной ответственностью производственная  компания «Ангстрем», г. Воронеж (ОГРН 1073668007269, ИНН 3662128110)  6 463 680 руб. расходов на устранение выявленных недостатков, 6 000 000  руб. неустойки за просрочку выполнения работ, 162 206 руб. расходов по  государственной пошлине, 209 283 руб. расходов на оплату услуг  экспертов.(Всего 12 835 169 руб.)  

В остальной части в удовлетворении искового заявления общества с  ограниченной ответственностью производственная компания «Ангстрем», г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.  

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  производственная компания «Ангстрем», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью  «Алвикар-ММ», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  6 951 548, 46 руб. задолженности по договору 2-сс/с от 15.06.2012, 1 000 000  руб. неустойки за просрочку оплаты авансовых платежей, 2 651 780, 77 руб.  неустойки за просрочку оплаты выполненных работ, 1 089 998, 58 руб.  процентов за пользование чужими денежными средствами, 260 586 руб.  расходов на оплату услуг экспертов, 31 177 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.(всего 11 985 090, 81 руб.)  

В остальной части в удовлетворении искового заявления общества с  ограниченной ответственностью «Алвикар-ММ», г. Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) отказать.  

3. В соответствии с абзацем 2 части 5 статьи 170 АПК РФ произвести  зачет взысканных сумм в размере 11 985 090, 81 руб. задолженности по  договору 2-сс/с от 15.06.2012, неустойки за просрочку оплаты авансовых  платежей, неустойки за просрочку оплаты выполненных работ, процентов за  пользование чужими денежными средствами, расходов на оплату услуг  экспертов, расходов по оплате государственной пошлины по исковому  заявлению общества с ограниченной ответственностью «Алвикар-ММ», г.  Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к сумме неустойки,  расходов на оплату услуг экспертов, расходов по оплате государственной  пошлины, части расходов на устранение выявленных недостатков по иску  общества с ограниченной ответственностью производственная компания  «Ангстрем», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>).  

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Алвикар- ММ», г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества  с ограниченной ответственностью производственная компания «Ангстрем»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 850 078, 19 руб.  расходов на устранение выявленных недостатков.  

Для принудительного взыскания денежных средств, указанных в  пункте 4 резолютивной части решения, выдать исполнительный лист после  вступления решения в законную силу.  

5. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью  производственная компания «Ангстрем», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) с депозитного счета Арбитражного суда Воронежской  

области 430 000 руб. излишне перечисленных в обеспечение оплаты  услуг экспертов по платежному поручению № 768 от 06.02.2017.  

6. Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Воронежской  области Обществу с ограниченной ответственностью «Центр судебных и  негосударственных экспертиз «ИНДЕКС»(ОГРН 

<

***>) 250 000  руб., поступивших по платежному поручению № 768 от 06.02.2017 на общую  сумму 680 000 руб., в оплату стоимости дополнительной судебной  строительно-технической экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Арбитражного суда 

Воронежской области Г.В. Семенов