Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

13 марта 2023 года                                                         Дело № А50-22736/2022

 

                            Резолютивная часть решения изготовлена  06.03.2023 г.

                   Решение в полном объёме изготовлено       13.03.2023 г. 

 

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Е.Д. Антоновой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гашевой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРНИП: 16.06.2017)

к ответчику – УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ (617830, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ЧЕРНУШИНСКИЙ РАЙОН, ЧЕРНУШКА ГОРОД, ЮБИЛЕЙНАЯ УЛИЦА, ДОМ 21, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.01.2020, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 72 143 руб. 47 коп.

 

при участии:

от истца – ФИО2, дов-ть от 19.02.2021 г., пасп.;

от ответчика – ФИО3, дов-ть от 29.12.2021 г., пасп.; (участие представителя обеспечено путем проведения онлайн-заседания)

 

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1, истец) обратился в Арбитражный суд Пермского  края с иском к Управлению имущественных отношений администрации Чернушенского городского округа о взыскании пени за не оплату авансового платежа по муниципальному контракту № 0156600021720000225 от 19.01.2021  в сумме 19 349 руб. 13 коп.,  неоплаченной суммы по муниципальному контракту № 0156600021720000225 от 19.01.2021 в сумме 48 333 руб. 60 коп., пени за неоплаченную сумму по муниципальному контракту № 0156600021720000225 от 19.01.2021 г. за период с 31.05.2021 г по  05.09.2022 г. в сумме 5 582 руб. 53 коп., а также пени, исходя из одной трёхсотой де1йствующей в это время ключевой ставки ЦЦентрального банка Российской Федерации от суммы 48 333 руб. 60 коп за каждый день задержки, начиная с 06.09.2022 г. по день фактического погашения суммы долга, штрафа, предусмотренного п. 5.3. (б) муниципального контракта № 01566000021720000225 от 19.01.2021 за не направление ответа на письмо от 15.03.2021 г. с требованием по оплате аванса в сумме 5000 руб.

В судебном заседании 03.03.2023 г. истец на исковых требованиях настаивает.

Ответчик просит отказать в удовлетворении исковых требований.  Указал, что срок передачи помещений истцом был нарушен. Поэтапное исполнение обязательств (передача жилых помещений) поставщиком не предусмотрено.

В судебном заседании 02.03.2023 г. судом объявлялся перерыв до 06.03.2023 г. После перерыва судебное заседание продолжено 06.03.2023 г. Представитель ответчика участвует в судебном заседании   посредством онлайн. Истец в судебное заседание не явился, извещён надлежащим образом.

 

Исследовав материалы дела, доводы истца, ответчика, суд установил.      

       Между Управлением имущественных отношений администрации Чернушинского городского округа ((заказчик) и ИП ФИО1 (поставщик) заключен муниципальный контракт № 0156600021720000225 «Приобретение жилых помещений в многоквартирном доме для формирования специализированного жилищного фонда Чернушинского городского округа для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Чернушинского городского округа» от 19.01.2021, по условиям п.1.1 которого поставщик обязуется передать жилые помещения в порядке и на условиях контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить жилые помещения по цене и на условиях, определенных контрактом.

Источник финансирования: Бюджет Пермского края (пункт 1.4 муниципального контракта).

Цена контракта составляет 7 532 508 руб. (пункт 2.1 муниципального контракта).

Согласно пункту 2.6 муниципального контракта  аванс в размере 8,22 % выплачивается поставщику в сумме 645 197 руб. 34 коп. до 31 декабря 2020 года. Аванс не выплачивается в случаях, предусмотренных частью 1 или 2 ст. 37 закона о контрактной системе.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается  на то, что  в связи с уменьшением суммы контракта авансовый платеж согласно его расчёту должен был составить 619 172 руб. 15 коп. 

Поставщик до заключения муниципального контракта выполнил свои обязательства в полном объеме обозначенные в условиях аукционной документации на основании п.7.1 поставщик при заключении контракта должен  предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта в размере 8.22% начальной (максимальной) цены  контракта, что составляет: 619 172 руб. 15 коп. 

Однако заказчиком обязательство по оплате аванса - исполнено не было, аванс до момента исполнения контракта, так и не был оплачен.

В связи с чем, в соответствии с п. 5.2. муниципального контракта, в случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от неуплаченной в срок суммы.

Несмотря на то, что сам контракт был подписан более поздней датой, нежели определенный договором срок оплаты авансового платежа, как полагает  истец,  данное обязательство по оплате аванса  заказчиком  являлось  обязательным у словием контракта и должно было быть исполнено в сроки, предусмотренные ст. 314 ГКРФ.

В связи с чем, 19.01.2021 г. поставщиком в адрес заказчика был выставлен счет № 225 на сумму 619 172 руб.15 коп. на оплату аванса. Однако, в обозначенный срок, оплата заказчиком аванса произведена не была.

          Повторно 15.03.2021 г. в адрес заказчика при исполнении контракта и просьбе о приемке квартир было направлено письмо с просьбой также оплатить аванс, предусмотренный контрактом, либо обосновать отказ от его оплаты. Ответа от Заказчика не поступило.

Оплата по контракту произведена заказчиком 31.05.2021 г. в сумме 7484174 руб.40 руб., то есть  на 48 333 руб. 60 коп. меньше, чем предусмотрено условиями контракта.

31.05.2021 г. в адрес ответчика была направлена претензия об оплате неустойки в связи с неоплатой аванса по контракту и отсутствием полного исполнения обязательств со стороны заказчика.

07.06.2021 г. ответчиком направлен ответ о том, что в связи с тем, что контракт был заключен 19.01.2021 г. оплата аванса в срок указанный в контракте была невозможна.

         В исковом заявлении истец ссылается на то, что счет на оплату аванса был выставлен 19.01.2021 г. Срок на оплату 26.01.2021 г. (ст. 314 ГК РФ)

Расчёт начисленной пени за неоплату суммы аванса  произведён истцом за период с 27.01.2021 г. по 31.05.2021 г. (125 дней): 619 172 руб. х (1/300 х 7,5%) х 125= 19 349 руб. 13 коп.

          Фактически все помещения были переданы заказчику 11.05.2022 г.

           04.05.2022 г. в адрес поставщика заказчиком была направлена претензия о расчёте пени на 04.05.2022 г. на сумму 42 684 руб. 21 коп.

 

         В обоснование неправомерности начисления неустойки (48 333 руб. 60 коп.) за просрочку исполнения своих обязательств поставщиком по передаче жилых помещений в срок предусмотренный контрактом, истец ссылается на следующие обстоятельства: 

15.03.2021 г. заказчику было предложено три квартиры к приёмке;

         16.03.2021 г. к осмотру предложено 5 квартир для реализации контракта;

           22.03.2021 г. замечания по осмотру трёх квартир были устранены; 

           26.03.2021 г. заказчику к приёмке было предложено шесть квартир;

           01.04.2021 г. после устранения замечаний предложена повторная приёмка пяти квартир;

           Квартиру по адресу: Коммунистическая, 

<

...> заказчик отказался принимать;

          01.04.2021 г. заказчику предложено снижение цены контракта и изменение количества  поставки квартир на 5; заказчик от указанного предложения отказался.

          05.04.2021 г. от пяти квартир были переданы документы и ключи, 5 квартир обследовано и принято без замечаний;

          05.04.2021 г. было направлено письмо в адрес заказчика о необходимости в течении  пяти рабочих дней подписать акт приёма-передачи помещений.  Однако, заказчик отказался принимать 5 помещений, настаивая на предоставлении шестого;

         14.04.2021 г. было предложено для приёмки шестое помещение;

          23.04.2021 г. составлен акт обследования шестой квартиры;

          23.04.2021 г. шесть  жилых помещений переданы по акту приёма-передачи заказчику;

          23.04.2021 г. направлено письмо в адрес заказчика о необходимости подписания акта приёма-передачи;

         04.05.2021 г. в адрес поставщика заказчиком направлена претензия;

         06.05.2021 г. требования по претензии устранены;

         11.05.2021 г. квартиры приняты заказчиком. 

         Таким образом,  по мнению истца, при оплате муниципального контракта   заказчик   необоснованно   удержал сумму пени н в размере 48 333 руб. 60 коп. Всего оплачено по контракту 7 484 174 руб. 40 коп.

Кроме того,  как полагает истец, неустойка удержанная  заказчикам явно не соразмерна  нарушенному обязательству ст. 333 ГК РФ и влечет за собой неосновательное обогащение  заказчика, поскольку как указано выше, сроки исполнения контракта не нарушены.

В соответствии с п. 2.1 контракта  цена  контракта  составляет 7 532 508 руб.

     В соответствии с п. 2.7 контракта  заказчик производит оплату по контракту за вычетом аванса безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет поставщика в течении 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.

       В соответствии с п. 5.4 контракта  в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях не исполнения или не надлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.

       В порядке п.5.2 контракта поставщиком-истцом на неоплаченную сумму по контракту начислена неустойка на сумму  5 582 руб. 53 коп. за период с 31.05.2021 г. по 05.09.2022 г.    с  продолжением её начисления по день уплаты суммы основного долга.

Кроме того, в соответствии с п. 8.3. контракта, по мнению истца,   срок, регламентирующий ответное обращение 14 дней. Между тем, ответа со стороны заказчика на письмо от 15.03.2022 г. не поступило.

В соответствии с п 5.3.(б) за каждый факт не исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается штраф 5 000 руб.

 Таким образом, за не направление ответа на письмо от 15.03.2021 г. о необходимости  оплаты аванса  истцом начислен ответчику штраф  в размере 5000 руб.  Претензия по оплате штрафа была направлена ответчику 31.05.2021 г.

Как  полагает  истец, своим недобросовестным поведением, как в части не оплаты аванса, так и не предоставления ответа на запрос об оплате аванса, заказчик не дал возможности  поставщику запланировать реальные расходы и доходы для исполнения контракта, чем затянул исполнение контракта, поскольку поставщику пришлось искать дополнительные денежные средства.

По условиям п.1.1 контракта поставщик обязуется передать жилые помещения в порядке и на условиях контракта, а заказчик обязуется  принять и оплатить жилые помещения по цене и на условиях, определённых контрактом.

В соответствии с п.2 Технического задания к контракту  количество  поставляемых помещений - 6 жилых помещений.

Пунктом 1.2 контракта предусмотрено, что жилое помещение, приобретаемое в рамках ко6нракта,  соответствует качественным, функциональным   техническим требованиям, определённым в Техническом задании (Приложение № 1 к контракту) и не обременено проживанием в жилом помещении любых третьих лиц. 

Согласно разделу 2 Технического задания к контракту жилые помещения (Общие сведения о поставляемых жилых помещениях)  благоустроены применительно к условиям Чернушинского городского округа Пермского края, не требуют капитального ремонта и пригодны для проживания граждан… Имеется наличие: центральное отопление, центральное электроснабжение, центральное холодное водоснабжение, центральное водоотведение, центральное горячее водоснабжение.

Жилые помещения соответствуют санитарным и техническим требованиям (санитарные и технические требования к жилым помещениям установлены разделом II Положения «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47). (Соответствие действующим нормативно-правовым документам).

Документы на момент передачи жилого помещения: наличие выписки из ЕГРН об основных  характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, технических паспортов с указанием года постройки, справки государственных или муниципальных организаций технической инвентаризации о проценте физического износа здания многоквартирного дома, в котором расположены жилые помещения, кадастровых паспортов, заключения о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

Источник финансирования: Бюджет Пермского края (п.1.4 контракта).

Цена контракта составляет 7 532 508 руб. (п.2 контракта). 

Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законом о контрактной системе.  (п.2.4 контракта).

Цена контракта  включает все затраты поставщика, необходимые для выполнения Технического задания в полном объёме, в том числе затраты, на подготовку необходимой документации на жилое помещение, на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также непредвиденные расходы поставщика. (п.2.5 контракта).

  В соответствии с п.2.6 контракта аванс в размере 8,22 %% выплачивается поставщику в сумме 645 197 руб. 34 коп. до 31.12.2020 года, Аванс не выплачивается в случаях, предусмотренных частью 1 или 2 ст. 37 Закона о контрактной системе.

  Заказчик производит оплату по контракту  (этапу-при поэтапном исполнении контракта) за вычетом выплаченного аванса безналичным расчётом, путём перечисления денежных средств на счёт поставщика в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документы о приёмке. (п.2.7 контракта).

 При этом обязательство заказчика по оплате жилых помещений является встречным по отношению  к обязательству поставщика по передаче жилого помещения. В случае ненадлежащего исполнения поставщиком требования о передаче жилого помещения, которое привело к приостановлению или отказу в государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение Чернушинского городского округа, либо к задержке сроков для передачи необходимого пакета документов в регистрирующий орган, заказчик руководствуется положениями настоящего контракта. (п.2.9 контракта).

 В соответствии с п.3, подп.3.1 контракта срок передачи жилого помещения по акту приёма-передачи-не позднее 31.03.2021 г.

 В соответствии с п.3.2 контракта заказчик после получения уведомления поставщика о готовности к передаче жилого помещения в течение 10-ти рабочих дней в присутствии представителя поставщика осуществляет осмотр жилого помещения и проверку соответствия его качества требованиям, установленным контрактом и Техническим заданием. По итогам осмотра в тот же день подписывается акт осмотра жилого помещения.

В день осмотра жилого помещения поставщик передаёт заказчику документы, предусмотренные Техническим заданием. (п.3.3 контракта).

Согласно п.3.4 контракта в случае выявления недостатков при обследовании жилого помещения и проверке соответствия качества передаваемого помещения поставщик обязан устранить недостатки за свой счёт в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания акта осмотра жилого помещения. 

После  уведомления поставщиком заказчика об устранении недостатков, выявленных при обследовании жилого  помещения и проверке соответствия качества передаваемого жилого помещения, заказчик действует в соответствии с пунктом 3.2 контракта. (п.3.5 контракта).

Передача  жилого помещения осуществляется по акту приёма-передачи жилого помещения в течение 10-ти рабочих дней после подписания акта осмотра жилого помещения о соответствии качества жилого помещения требованиям, установленным контрактом и Техническим заданием, а также после предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств, в  соответствии с настоящим кодексом. В течение 5-ти рабочих дней акт приёма-передачи жилого помещения заполняется в соответствии с Формой акта приёма-передачи жилого помещения (Приложение 2 к контракту) и подписывается поставщиком, затем в течение последующих 5-ти рабочих дней после предоставления подписанного поставщиком акта приёма-передачи жилого помещения с сопроводительным письмом подписывается заказчиком. (п.3.6 контракта).

В акте приёма-передачи жилого помещения указывается его техническое состояние на момент подписания акта. (п.3.7 контракта).

В соответствии с п.3.8 контракта не позднее 10-ти рабочих дней после подписания акта приёма-передачи жилого помещения стороны передают в орган регистрации прав необходимые документы для  государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение. После  государственной регистрации перехода права собственности на жилое помещение в течение 1 дня сторонами подписывается документ о приёмке. 

Обязательства поставщика по контракту считаются исполненными после осуществления государственной регистрации права собственности на жилое помещение за муниципальным образованием Чернушинский городской округ. (п.3.9 контракта).

В силу п.4, п.п. 4.1.1 контракта заказчик вправе  требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту в соответствии с условиями контракта, требованиями действующего законодательства, а также своевременного устранения выявленных недостатков жилого помещения.

Возражая  против заявленных исковых требований ответчик ссылается на то, что  муниципальный контракт заключен 19 января 2021 г., оплата аванса в размере 645 197 руб. 34 коп. до 31 декабря 2020 года фактически была не возможна.

В подтверждение данного обстоятельства ответчиком представлено соглашение № 40/ДС/2021 от 13.01.2021 г. о предоставлении субвенций бюджетам  муниципальных  районов, городских   и муниципальных округов Пермского края из бюджета Пермского края для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в части строительства и приобретения жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда  между  Министерством строительства Пермского края (Министерство) и администрации Чернушинского городского округа. (с графиком перечисления субвенций); платёжное поручение № 114324 от 19.02.2021 г. о перечислении денежных средств Минфином Пермского края Министерством строительства Пермского края Управлению имущественных отношений администрации Чернушинского городского округа в сумме 8 172 937 руб. 08 коп.

Кроме того, в пункте 2.7  муниципального контракта установлено, что заказчик производит оплату по контракту (этапу – при  поэтапном исполнении контракта) за вычетом выплаченного аванса безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на счет поставщика в течении 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.».

Условия о наступлении срока оплаты аванса (п.2.6 контракта) в зависимости от факта поступления денежных средств бюджета Пермского края в муниципальном контракте  отсутствуют. (пункты 2.6, 2.7, 2.9 контракта).

В связи с чем, с учётом  прописанной в контракте в п.2.6 даты перечисления аванса – до 31.12.2020 г., суд полагает подлежащим удовлетворению   требование   истца  о взыскании пени  в заявленной истцом сумме в размере 19 349 руб. 13 коп. за период (с 27.01.2021 г.-31.05.2021 г.),  с  суммы  задолженности  (аванс)  619 172 руб. (125 дней)  (ст. ст. 314, 487 ГК РФ) (расчёт- л.д.81).

Срок передачи жилых помещений по акту приема-передачи  - не позднее 31.03.2021 г. (пункт 3.1 муниципального контракта).

Согласно   акту   приема-передачи   жилых   помещений   поставщик передал, а заказчик принял жилые помещения 11 мая 2021 г. Срок передачи жилых помещений нарушен.

Управлением имущественных отношений администрации Чернушинского городского округа оплата по Муниципальному контракту произведена 31 мая 2021 г. в сумме 7 484 174 руб.40 коп. включая (в том числе) сумму предусмотренную пунктом 2.6 муниципального контракта в сумме 645 197 руб. 34 коп. (аванс в размере 8,22 % ).

Оплата  по  муниципальному контракту в сумме 7 484 174 руб. 40 коп. произведена за вычетом неустойки в сумме 48 333 руб.60 коп., начисленной за несвоевременно, в нарушение пункта 3.1 муниципального контракта, переданные жилые помещения Управлению имущественных отношений администрации Чернушинского городского округа.

Так, согласно пункту 4.4.1 муниципального контракта заказчик обязан обеспечить соблюдение сроков исполнения контракта.  Поставщик также обязан в соответствии с условиями контракта, при соблюдении требований действующего законодательства передать жилые помещения заказчику (пункт 4.4.3 муниципального контракта). По условиям муниципального контракта срок передачи жилых помещений не позднее 31.03.2021 г.

Учитывая пункты 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.9, 5.4 контракта в виду несвоевременного исполнения обязательств в адрес ИП ФИО1 направлена претензия от 28.05.2022 № 01-08/417, согласно которой  ФИО1 уведомляется о возникшей неустойки в сумме 48 333 руб.60 коп. в соответствии с пунктом 5.4 муниципального контракта.

При этом условиями контракта не предусмотрена поэтапная сдача жилых помещений заказчику.

В соответствии со статьей 306 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии со статьей 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Учитывая пункт 5.4 Муниципального контракта, в соответствии с частью 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту начисляется пеня.

В исковом заявлении ИП ФИО1 не оспаривает  несвоевременное исполнение своих обязательств по муниципальному контракту,  указав на то, что жилые помещения представлял для приемки поэтапно, предлагая   уменьшить их количество и, соответственно, стоимость контракта. 

Так, в материалы  дела  представлен акт обследования жилых помещений от 23.04.2021 г., подписанный сторонами (п.3.1 контракта); акт приёма-передачи  документов на жилые помещения от 23.04.2021 г.  (п.3.3 контракта) и раздел 2 Технического задания). 

Между тем, акт  приёма-передачи жилых помещений подписан  11.05.2021 г. (пункты 3.2, 3.6, 3.7 контракта).

Следует также учитывать, что при осмотре жилых помещений были выявлены недостатки, ввиду чего (в том числе), сдача жилых помещений в установленный муниципальным контрактом срок, в полном объеме, истцом  не произведена. Как указывалось ранее, поэтапное исполнение обязательств (передача жилых помещений) поставщиком не предусмотрено.

Согласно разделу 2 Технического задания (Приложение № 1 к муниципальному контракту № 0156600021720000225 от 19.01.2021) количество поставляемых жилых помещений - 6 жилых помещений (строка

1). Срок исполнения контракта до 31.05.2021 (раздел 4 Технического задания).

Направленная претензия в адрес истца от 28.05.2022 г. заказчиком о возникшей неустойки, не была исполнена.

В данной связи, на момент получения претензии истец располагал информацией о притязаниях  ответчика.

       Таким образом, в связи с тем, что ИП ФИО1 нарушен срок передачи жилых помещений 11 мая 2021 г., вместо 31 марта 2021 г., при оплате заказчиком обязательств по муниципальному контракту, в соответствии с пунктом 5.4 муниципального контракта, а также частью 5 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  сумма неустойки в размере 48 333 руб.60 коп. удержана заказчиком законно и обоснованно, в соответствии с условиями контракта и с последствиями нарушения обязательств.

Оснований для применения статьи 333 ГК РФ и снижения начисленной  и удержанной ответчиком неустойки судом не установлено с учетом небольшой суммы  начисленной неустойки, социальной значимости  контракта (на приобретение жилых помещений для детей-сирот) и отсутствия доказательств несоразмерности заявленного размера неустойки последствиям нарушения обязательства.

Поскольку доказательств иного не представлено, исковые требования подлежат удовлетворению в части начисления неустойки истцом за нарушение сроков выплаты аванса.

Также суд не усматривает оснований для взыскания с ответчика штрафа за не направление ответа на письмо от 15.03.2021 г. с требованием по оплате аванса в размере 5000 руб.

При этом суд полагает, что данное требование истца фактически направлено на допущенную со стороны заказчика просрочку в выплате аванса  (за период с 27.01.2021 г. - 31.05.2021 г. (125 дней), согласно  п. 2.6 контракта, ст. 314 ГК РФ и расчёту истца.

Следует также отметить и то, что удовлетворение данного требования приведёт к двойной ответственности  ответчика за неисполнение обязательства, что противоречит нормам действующего гражданского законодательства.

В удовлетворении остальной части исковых требований следует отказать.

  Судебные расходы относятся на стороны пропорционально размеру удовлетворённых требований. (ст. 110 АПК РФ). 

 Руководствуясь ст. ст. 167 - 170, 171, 110  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично.

      Взыскать  с    УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 15 634 руб. 10 коп. и судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 619 руб. 97 коп.

      Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

      Взыскать с     Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  в  доход федерального бюджета госпошлину в сумме  244 руб. 87 коп.

      Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

       В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.         

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

 

Судья                                                                                            Е.Д. Антонова