АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 656015, 

<

...>, тел.: 

<

***> http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-21374/2024

г. Барнаул

16 октября 2025 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Кребеля Д.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём Щерба О.В. без использования средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью «Наш Барнаул», г. Барнаул Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Монтажная компания ПР-Холдинг», г. Барнаул Алтайского края (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 199 500,00 руб. в возмещение расходов на устранение недостатков в период гарантийного срока по многоквартирному дому: 

<

...>, а также об обязании ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»:  

1. Устранить по периметру всего дома (обоих корпусов) отслоение кирпичной кладки и как следствие его падение на тротуары и парковки путем проведения герметизации, примерно 50 кв.м, в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

3. Устранить провалы асфальтового покрытия на придомовой территории обоих корпусов, примерно 50 кв.м, в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

4. Устранить трещину между стеной дома и отмосткой по длине заднего фасада дома второго корпуса, примерно 70 п.м. в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

5. Устранить трещину около 10 мм. в 3-м подъезде справа от лифтов около дверей перехода в 4-й подъезд с увеличением в размере с 10-го этажа в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

6. Устранить дефекты системы отопления в виде некачественного материала (отводы на полотенцесушители) с образованием свищей и причинению ущерба собственникам в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу,  

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монтажная компания ПР- Холдинг» (ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Наш Барнаул» (ИНН 

<

***>) 199 500,00 руб. в возмещение расходов на устранение недостатков в период гарантийного срока по многоквартирному дому: 

<

...>., а также 10 325,00 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины, всего 204 825,00 руб.  

Обязать ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» (ИНН 

<

***>) устранить недостатки, выявленные в период гарантийного срока по многоквартирному дому: 

<

...>., а именно:  

1. Устранить по периметру всего дома (обоих корпусов) отслоение кирпичной кладки и как следствие его падение на тротуары и парковки путем проведения герметизации, примерно 50 кв.м, в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

3. Устранить провалы асфальтового покрытия на придомовой территории обоих корпусов, примерно 50 кв.м, в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

4. Устранить трещину между стеной дома и отмосткой по длине заднего фасада дома второго корпуса, примерно 70 п.м. в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

5. Устранить трещину около 10 мм. в 3-м подъезде справа от лифтов около дверей перехода в 4-й подъезд с увеличением в размере с 10-го этажа в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

6. Устранить дефекты системы отопления в виде некачественного материала (отводы на полотенцесушители) с образованием свищей и причинению ущерба собственникам в течении 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Монтажная компания ПР- Холдинг» (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ 54 650,00 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию - Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию - Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Д.А. Кребель