40_15013323  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-40616/22

25 декабря 2023 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе:  

председательствующий судья М.Ю. Бондарев, при ведении протокола  судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело  по заявлению ООО "БЛЕСК-СЕРВИС" к ООО "С- СТРОЙПЕРСПЕКТИВА" об обязании  

третье лицо: ООО «РСУ-Королев» 

При участии в судебном заседании- согласно протоколу  

Руководствуясь статьями ст. 110,167-170, 176, 211 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить . 

Обязать ООО "С-СТРОЙПЕРСПЕКТИВА" в течении 30 дней с даты  вступления решения суда в законную силу безвозмездно в рамках  выполнения гарантийных обязательств произвести работы по устранению  следующих строительных недостатков в многоквартирных жилых домах,  расположенных по адресу: 

<

...>:  

Обязать ООО «С-СТРОЙПЕРСПЕКТИВА»в течении 30 дней с даты  вступления решения суда в законную силу безвозмездно в рамках  выполнения гарантийных обязательств произвести работы по устранению  следующих строительных недостатков в многоквартирных жилых домах,  расположенных по адресу: 

<

...>:  

1.1. Демонтировать поврежденные элементы фасада –  фиброцементные плиты и произвести их замену на новые.  

В соответствии с локальным сметным расчетом, стоимость работ и  материалов для устранения недостатков (дефектов) фасада многоквартирного  

жилого дома № 8 по ул. Академика Легостаева г.Королёв Московской  области составляет 2 926 517, 00 (два миллиона девятьсот двадцать шесть  тысяч пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек. (лист № 63-67 «Заключение  эксперта № 7231» табл.6).  

1.2. Выполнить строительные работы по ремонту отмосток входных  групп и тротуаров многоквартирного жилого дома:  

- демонтаж бортового камня тротуарного (садового) 32,5 м; - демонтаж покрытия из тротуарной плитки 485,0 кв.м; 

- резка асфальтового покрытия прямолинейными участками  нарезчиком швов с алмазными дисками 9,8 м;  

- демонтаж покрытия из асфальта 24,0 кв.м; 

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из  песка 25,45 куб.м;  

- установка бортового камня тротуарного (садового) (без МР) (новая  плитка 10% - 3,25 м) 32,5 м;  

- укладка тротуарной плитки бетонной (без МР) (новая плитка 10%49,0 кв.м) 485,0 кв.м;  

- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных  смесей плотных мелкозернистых. Асфальтобетонная смесь мелкозернистая,  тип Б, марка II 24.0 кв.м.  

В случае в случае неисполнения ООО «С-СТРОЙПЕРСПЕКТИВА»  судебного акта в установленный срок, предоставить истцу – ООО «Блеск- Сервис» право осуществить соответствующие действия – устранить  строительные недостатки за счет ответчика со взысканием с него  необходимых расходов:  

 в размере 2 926 517, 00 (два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч  пятьсот семнадцать) рублей - на выполнение работ по устранению  недостатков (дефектов) фасада многоквартирного жилого дома;  

в размере 1 079 318,00 (один миллион семьдесят девять тысяч триста  восемнадцать) рублей - на выполнение работ по устранению недостатков  (дефектов) отмосток входных групп и тротуаров многоквартирного жилого  дома.  

Взыскать с ООО «С-СТРОЙПЕРСПЕКТИВА» в пользу ООО  «БЛЕСК-СЕРВИС» расходы по оплате государственной пошлины в размере  6 000 рублей.  

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в  Десятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья М.Ю. Бондарев