Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

дело № А73-23043/2019

г. Хабаровск

23 января 2020 года

Резолютивная часть судебного акта объявлена 16 января 2020 г.

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи О.П. Медведевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.А. Драпей,

рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Славна-Строй» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680023, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 680026, 

<

...>)

о взыскании 1 550 280 руб.

При участии в судебном заседании: – ФИО1 по доверенности от 04.12.2019 (диплом от 21.06.1999 №БВС 0242497).

Общество с ограниченной ответственностью «Славна-Строй» (далее - ООО «Славна-Строй», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» (далее – ООО «Феникс», ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда от 25.07.2019 г. в размере 1 550 280 руб.

Ответчик, признанный в порядке статьи 123 АПК РФ извещенным надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в предварительное судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил.

Зафиксированным в протоколе судебного заседания определением, при отсутствии возражений участвующих в деле лиц, на основании пункта 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса РФ и пункта 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 20.12.2006. № 65 суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание первой инстанции.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие ответчика.

Заслушав доводы представителя истца, исследовав материалы дела, арбитражный суд 

УСТАНОВИЛ:

25.07.2019 г. между ООО «Славна-Строй» (заказчик) и ООО «Феникс» (подрядчик) заключен договор подряда, по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить следующие работы: Устройство бетонной разгрузочной рампы и эстакады, примыкающей к помещению холодильника, по адресу: 

<

...> октября, дом 178А (далее – Объект) (п.1.1.).  

Пунктом 1 дополнительного соглашения №1 от 02.09.2019 к договору подряда от 25.07.2019 предусмотрено, что подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить дополнительные работы, согласно сметного расчета (Приложение №2), неучтенные основным договором подряда от 25.07.2019, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

В соответствии с п.1.2., 1.2.1., 1.2.2. подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. договора в соответствии с утвержденной и согласованной документацией в составе: локально-сметного расчета (Приложение № 1), протокола о соглашении договорной цены (Приложение № 2).

В пункте 2.1. договора стороны определили стоимость работ, которая составляет 2 700 000 руб.

В пункте 3.1 договора стороны согласовали окончание работ через 45 рабочих дней после начала работ – через три дня после подписания договора.

Согласно пункту 2 дополнительного соглашения №1 от 02.09.2019, стоимость дополнительных работ, согласно сметному расчету (Приложение №2) составляет: 169 680 руб., в том числе НДС (20%).

В пункте 3 дополнительного соглашения стороны согласовали сроки выполнения работ – с 03.09.2019 по 10.09.2019.

В соответствии с пунктом 2.2. договора в стоимость работ по устройству бетонной разгрузочной рампы и эстакады, примыкающей к помещению холодного склада, входит стоимость необходимых материалов, а также стоимость самих работ.

Авансовые платежи производятся в размере необходимом для выполнения работ, согласно Приложения № 1 и осуществляются Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами настоящего договора (пункт 2.3.).

Согласно пункту 2.4 договора, окончательный расчет за выполненные работы, производится по фактически выполненным объемам, после подписания Заказчиком полученных от Подрядчика следующих документов: актов скрытых работ, акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3, счета и счет-фактуры. Оплата производится в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта.

Оплата за выполненные работы производится по фактически выполненным работам. При выполнении работ возможно промежуточное закрытие объемов путем подписания промежуточных актов по форме КС-2 и актов на оплату КС-3 (пункт 2.4.).

Согласно представленным в материалы дела формам КС-2, КС-3 от 26.08.2019 №1, от 10.09.2019 №2, от 11.09.2019 №3 истцом работы выполнены, а ответчиком приняты на сумму 2 869 680 руб. 

Обязательства по оплате выполненных работ ответчиком исполнены частично, в результате чего образовалась задолженность в сумме 1 550 280 руб. 

В целях досудебного урегулирования спора ответчику 08.10.2019 вручена претензия от 08.10.2019  об оплате задолженности.

Претензия оставлена ответчиком без удовлетворения, что явилось истцу основанием для обращения с настоящим иском в суд.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

 

Статьей 740 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

 

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

 

Согласно статье 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу правила, установленного пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий  и требований - в соответствии с обычаями делового оборота и иными обычно предъявляемыми требованиями.

Материалами дела подтверждается факт выполнения истцом работ на сумму 2 869 680 руб. и  принятие их  ответчиком без замечаний.

Доказательств исполнения обязательства по оплате выполненных истцом работ в полном объеме ответчиком не представлено,  каких-либо возражений относительно исковых требований не заявлено.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании изложенного требование истца о взыскании с ответчика  долга в сумме 1 550 280 руб. подлежит удовлетворению.

Расходы по госпошлине относятся на ответчика в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Феникс» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Славна-Строй» долг в сумме 1 550 280 руб., расходы по госпошлине в сумме 28 503 руб.

 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объёме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

 

Судья                                                                        О.П. Медведева