РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-172077/22-110-1291

г. Москва

17 апреля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 марта 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 17 апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОГАЗСТРОЙ" (129345, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОСТАШКОВСКАЯ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 1,ЭТ 2 КОМ 19, ОГРН: 1137746369474) к обществу с ограниченной ответственностью "АТРИУМ-XXI ВЕК" (115142, ГОРОД МОСКВА, РЕЧНИКОВ УЛИЦА, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 4, ОГРН: 1147748148680) о взыскании 2 000 974,98 руб.,  а так же встречный иск,

при участии:

от истца – Исланкин И.А. ,гендиректор, Матревели  К.Б. по дов.  от  04.08.2022,

от ответчика- Раецкий  А.М. по дов.  от  12.03.2021 по дов.  от 12.03.2021,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОГАЗСТРОЙ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АТРИУМ-XXI ВЕК" о взыскании 1 859 950 руб. задолженности по договору №12 от 21.06.2021, 141 024,98 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. 

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве, предъявил встречный иск об обязании в течении 60 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу исполнить договор №12 от 21 июня 2021 г. путем устранения недостатков выполненных строительно-монтажных работ, проведения работ по метрологической экспертизе комплекса учета газа, завершения пуско-наладочных работ, сдачи объекта АО «МОСГАЗ», сдачи оборудования в промышленную эксплуатацию, а также путем передачи ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» (ОГРН 1147748148680, дата присвоения ОГРН: 24.12.2014, ИНН 7725258384, 115142, г. Москва, ул. Речников, д. 21, стр. 4) исполнительной документации, актов скрытых работ, результатов поэтапной приемки МТУ Ростехнадзором, Управлением МОСПРОМГАЗ АО МОСГАЗ и результатов метрологической экспертизы комплекса учета газа, о взыскании судебной неустойки в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч тысяч) рублей в день за уклонение от исполнения решения суда, исчисляемую со дня. следующего за днем истечения установленного судом срока на исполнение решения суда по день его фактического полного исполнения.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью "ТЕХНОГАЗСТРОЙ" и обществом с ограниченной ответственностью "АТРИУМ-XXI ВЕК" был заключен договор № 12 от 21.06.2021 г., по которому ООО «Техногазстрой», выступая «Исполнителем», обязалось оказать услуги по проведению строительно-монтажных работ по монтажу подводящего наружного газопровода к строениям №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, монтажу внутреннего газопровода в этих строениях, пуско-наладочных работ газопотребляющего оборудования в этих строениях и сдаче всех выполненных работ АО «МОСГАЗ», а ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК», выступая «Заказчиком», обязалось создать Истцу необходимые условия работы, принять и оплатить их.

В соответствии с главой 3 договора «Условия платежа» Заказчик обязывался оплатить 5 005 500,00 рублей, включающих в себя полную стоимость материалов и 50% стоимости работ по монтажу наружного и внутреннего газопровода и системы автоматизации газопотребляющего оборудования, авансом перед началом работ и 1 859 950,00 рублей, что составляет 50% стоимости работ по монтажу наружного и внутреннего газопровода и системы автоматизации газопотребляющего оборудования, после их окончания.

Истец все указанные работы по монтажу наружного и внутреннего газопровода и системы автоматизации газопотребляющего оборудования выполнил в полном объеме и в срок, что подтверждается подписанными сторонами Актами:

Акт о приемке выполненных работ № 20 от 30.09.2021 (форма КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 20 от 30.09.2021 (форма КС-3); Акт о приемке выполненных работ № 26 от 30.12.2021 (форма КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 26 от 31.12.2021 (форма КС-3); Всего на сумму 6 865 450,00 рублей.

Подрядчик оплатил материалы и выполненные работы на сумму 5 005 500,00 рублей. Задолженность Заказчика перед Исполнителем составляет 1 859 950,00 рублей, которые в соответствии с п. 3.2. Договора ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» обязано было оплатить после завершения   строительно-монтажных   работ,   перед   пуском   газа   к   системе   внутреннего газоснабжения, и началом работ по наладке газопотребляющего оборудования.

Претензий и замечаний по качеству уже выполненных работ от ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» не поступало.

Статья 395 ГК РФ предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства. В соответствии с этой статьей ООО «Техногазстрой» имеет право начислить проценты на сумму долга, которые взимаются по день уплаты суммы этих средств. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России. 

Таким образом, проценты   составляют 141 024,98 руб.

Вместе с тем, постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" постановлено:

1. Ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления не применяются в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев. 

Постановление вступило в силу с 01.04.2022

Согласно п.3 ч.3 ст. 9.1 Федерального закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона.

Согласно абзацу десятому пункта 1 статьи 63 указанного Федерального закона не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

В пунктах 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет. Мораторий вводится со дня вступления в силу соответствующего акта Правительства Российской Федерации, если Правительством Российской Федерации не установлено иное (пункт 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве, часть 7 статьи 5 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 года N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", часть 8 статьи 23 действовавшего ранее Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"). В случае принятия Правительством Российской Федерации в период действия моратория решения о расширении перечня лиц, на которых он распространяется, следует исходить из того, что в отношении таких лиц мораторий действует со дня изменения названного перечня, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.

В данном случае, Постановлением Правительства № 497 перечень лиц расширен, мораторий распространяется на всех лиц, за исключением указанных в п.2 постановления Правительства РФ №497.

Как указано в п. 7 названного постановления Пленума №44 в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Таким образом, поскольку требования возникли до 01.04.2022 (до расширения перечня лиц, на которых мораторий распространяется, т.е. до введения моратория и в отношении ответчика), то финансовые санкции не подлежат начислению с 01.04.2022 в течение действия моратория.

На основании изложенного, требования истца о взыскании процентов начисленных на общую сумму основного долга 1 859 950 руб., подлежат удовлетворению за период с 01.01.2022 по 31.03.2022 по указанным выше основаниям.

Сумма процентов за период с 01.01.2022 по 31.03.2022  составляет 58 448,29 руб.

При указанных обстоятельствах первоначальный иск подлежи частичному удовлетворению.

При этом встречный иск не подлежит удовлетворению в силу следующего.

21 июня 2021 г. между ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» к ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» был заключен договор №12 (далее - Договор), согласно п. 1.1 которого ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» принял на себя обязательства выполнить следующий комплекс работ по адресу - г. Москва, ул. Речников, д. 21, стр. №№ 2; 3; 4; 6; 7 и 8 (далее - Объект):

монтаж подводящего наружного газопровода к строениям №№ 2; 3; 4; 6; 7 и 8;

монтаж газоснабжения внутреннего в строениях №№ 2: 3; 4; 6: 7 и 8;

пуско-наладочные работы газопотребляющего оборудования в строениях №№ 2; 3; 4: 6; 7 и сдача результатов вышеуказанных работ АО «МОСГАЗ» и в промышленную эксплуатацию (далее - Работы).

В соответствии с п. 1.2 Договора Исполнитель обязан был выполнить Работы, установленные Договором собственными силами и силами привлеченных им субподрядных организаций, в соответствии с условиями Договора, утвержденной и согласованной в установленном порядке проектной документацией, СНиП, других нормативных документов и правил, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полной функциональности Объекта и нормальной его эксплуатации и сдачи в сроки и по цене, установленные Договором.

В соответствии с п. 3.1 Договора перед началом работ Заказчик оплачивает 100% стоимости материалов и оборудования для монтажа ГСП, ГСВ и системы автоматизации газопотребляющего оборудования и 50% стоимости работ по монтажу наружного и внутреннего газоснабжения и системы автоматизации газопотребляющего оборудования, что составляет 5 005 500 (Пять миллионов пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 834 250 (Восемьсот тридцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копейки Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора. Срок выполнения Работ по данному этапу Договора был установлен до 30 сентября 2021 г.

Второй платеж в сумме 1 859 950 (Один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 309 991 (Триста девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 66 копеек, что составляет 50 % стоимости работ по монтажу наружного и внутреннего газоснабжения и системы автоматизации газопотребляющего оборудования и 100% стоимости работ по метрологической экспертизе комплекса учета газа. Заказчик оплачивает после полного завершения строительно-монтажных работ, перед пуском газа к системе внутреннего газоснабжения, и началом работ по наладке газопотребляющего оборудования. Срок выполнения Работ по данному этапу Договора был установлен с 01 октября 2021 г. по 12 ноября 2021 г. (пункт 5.2 Договора).

Третий платеж в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 41 666 (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, Заказчик оплачивает после завершения пуско-наладочных работ, приемке объекта МТУ Ростехнадзора и Управлением МОСПРОМГАЗ АО МОСГАЗ, а также сдаче оборудования в промышленную эксплуатацию. Срок выполнения Работ по данному этапу не позднее 31 декабря 2021 г. (пункт 5.3 Договора).

12 ноября 2021 г. между ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» и ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» было подписано дополнительное соглашение №1, согласно условиям которого срок действия договора был продлен до 30 декабря 2022 г. При этом пункты 1.4, 3.2, 3.3 Договора были изложены в следующей редакции:

-«1.4. Окончание выполнения работ: до 30 декабря 2022 года.»

-«3.2. Второй платеж в сумме 1 859 950 (Один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 309 991 (Триста девять тысяч девятьсот девяносто один) рубль 66 копеек, что составляет 50 % стоимости работ по монтажу наружного и внутреннего газоснабжения и системы автоматизации газо потребляющего оборудования и 100% стоимости работ по метрологической экспертизе комплекса учета газа, Заказчик оплачивает после полного завершения строительно-монтажных работ, перед пуском газа к системе внутреннего газоснабжения, и началом работ по наладке газопотребляющего оборудования.

Срок выполнения Работ по данному этапу настоящего Договора устанавливается с 01 октября 2021 г. по 30 декабря 2021 г.»

- «3.3. Третий платеж в сумме 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 41 666 (Сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Заказчик оплачивает после завершения пуско-наладочных работ, приемке объекта МТУ Ростехнадзора и Управлением МОСПРОМГАЗ АО МОСГАЗ, а также сдаче оборудования в промышленную эксплуатацию.

Срок выполнения Работ по данному этапу не позднее 30 декабря 2022 года.» Остальные пункты Договора были оставлены без изменения.

В силу п. 4.22 Договора Исполнитель после завершения работ предоставляет Заказчику исполнительную документацию в строгом соответствии с согласованным проектом и действующими требованиями надзорных органов.

Исполнитель предоставляет необходимую документацию и участвует в вызове и приемке поэтапной работы комиссии МТУ Ростехнадзора (п. 4.23 Договора).

05 апреля 2022 г. от ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» в адрес ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» поступило письмо №22 с требованием в срок до 15 апреля 2022 г. выплатить сумму в размере 1 859 950 (Один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 309 991 рублей 66 копеек.

В ответ на вышеуказанное требование ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» было направлено письмо №19 от 08.04.2022 г., в котором было указано на то, что работы ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» были выполнены не в полном объеме, не представлена исполнительная документация, результаты метрологической экспертизы и акты скрытых работ, а также предложено устранить недостатки выполненных работ.

Между тем и до настоящего времени работы второму и третьему этапу ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» не завершены, а выполненные работы не соответствуют проектам, требованиям ФЗ №116 «О промышленной безопасности» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

В соответствии с п. 1 ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Заказчик сослался на то,  что ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» работы приостановил и до настоящего времени так и не выполнил.

В соответствии с ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано 

В соответствии с п. 1.2 Договора Исполнитель обязан был выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, утвержденной и согласованной в установленном порядке проектной документацией, СНиП, других нормативных документов и правил, включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для полной функциональности Объекта и нормальной его эксплуатации и сдачи в сроки и по цене, установленные Договором.

В силу п. 9.4 Договора он вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента выполнения обязательств по Договору или прекращение Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Согласно заключению АНО «Многопрофильное Судебно-Экспертное Бюро» №132СТ/22 от 31.08.2022 г., в соответствии с проектной документацией в рамках договора ООО «Техногазстрой» часть монтажных работ не выполнено. Требуется провести строительные монтажные работы в соответствии с проектом.

Как указали специалисты, газопровод и газовое оборудование всего объекта в целом эксплуатироваться не может. Объем выполненных ООО «Техногазстрой» работ в рамках договора №12 от 21.06.2021 г. не соответствует объему работ, отраженных в актах сдачи приемки выполненных работ от 30.09.2021 г. и от 30.12.2021 г. Кроме того, монтаж газопровода и внутренних устройств не соответствует проектам, ФЗ №116 «О промышленной безопасности» и СП 62.13330.2011 «Газорапределительные системы».

В соответствии с п. 5.2 Договора Исполнитель не освобождается от ответственности за ненадлежащее качество работ, даже в том случае, если Заказчик осуществил приемку законченного строительством Объекта, и подписал соответствующие акты. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по Договору. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование и материалы, передаваемые Заказчиком Исполнителю.

Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, при эксплуатации Объекта будут обнаружены какие-либо недостатки, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения обнаруженных недостатков в установленные Заказчиком разумные сроки. Если обнаруженные недостатки окажутся существенными или создающими невозможность использовать результаты работ в соответствии с их назначением, или делающие нецелесообразным их устранение Исполнителем, Заказчик вправе по своему усмотрению, вместо предъявления Исполнителю требования об устранении недостатков, потребовать от него повторного выполнения работ (п. 5.4 Договора).

Таким образом, по мнению Заказчика, ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» свои обязательства по договору в части качественного выполнения строительно-монтажных работ, проведения работ по метрологической экспертизе комплекса учета газа, завершения пуско-наладочных работ, сдаче объекта АО «МОСГАЗ», сдаче оборудования в промышленную эксплуатацию не исполнил. Работы по второму и третьему этапу не завершены, а выполненные работы не соответствуют проектам, требованиям ФЗ №116 «О промышленной безопасности» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Как указал ответчик, целью заключения Договора №12 от 21.06.2021 г. был комплекс работ, в том числе пуско-наладочные работы газопотребляющего оборудования и сдача результатов работ МТУ Ростехнадзору, Управлению МОСПРОМГАЗ АО МОСГАЗ и в промышленную эксплуатацию, а не только монтаж ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» наружного и внутреннего газопровода. Однако ввиду того, что работы ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» не закончены, пуско-наладочные работы не выполнены, результаты работы АО «МОСГАЗ» не сданы, возможности начать эксплуатацию газопровода не представляется возможным.

Более того, самостоятельно ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» не может провести работы по сдаче газопровода МТУ Ростехнадзору и Управлению МОСПРОМГАЗ АО «МОСГАЗ», т.к. ООО «ТЕХНОГАЗСТРОЙ» не выполнил метрологическую экспертизу, а также не передал ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» акты скрытых работ и результаты поэтапной приемки МТУ Ростехнадзор и Управлению МОСПРОМГАЗ АО «МОСГАЗ», без которых сдать газопровод в промышленную эксплуатацию невозможно.

Вместе с тем, 05 апреля 2022 г. ООО «Техногазстрой» направил в адрес ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» письмо с требованием оплатить задолженность. И 5 апреля 2022 г. было направлено письмо с просьбой дать разъяснения о проведении несанкционированных работ по переустройству помещения топочной в стр. № 3, выразившееся в следующем:

перенос наружной стены топочной на 0,5 м внутрь помещения, что привело к тому, что часть внутреннего газового оборудования оказалась снаружи помещения, сварочный стык входящего газопровода оказался в стене;

закрытие наглухо окна в топочной;

оббитие внутренних и наружных стен топочной гофрированными стальными листами.

Данные изменения не соответствуют:

П.2 ст. 8 ФЗ № 116 «О промышленной безопасности»: Отклонения от проектной документации опасного производственного объекта в процессе его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, реконструкцию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. Изменения, вносимые в документацию на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. Изменения, вносимые в документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности и согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальным органом, за исключением случая, если указанная документация входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

П. 4.13 СП   62.13330-2011   актуализ.   ред.   СНиП   42-01-2002   «Газораспределительные системы»: «Размещение соединений в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений не допускается»;

СП   42-101-2003   «Общие   положения   по   проектированию   и   строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»:

п. 6.7: «При прокладке газопроводов через конструкции зданий и сооружений газопроводы следует заключать в футляр. Пространство между газопроводом и футляром на всю его длину необходимо заделывать просмоленной паклей, резиновыми втулками или другими эластичными материалами. Пространство между стеной и футляром следует тщательно заделывать цементным или бетонным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции»;

ПП РФ от 29.10.2010 № 870 «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»:

«п. 56. При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте должно быть обеспечено соблюдение:

а)технических решений, предусмотренных проектной документацией;

б)требований эксплуатационной документации изготовителей газоиспользующего оборудования, технических и технологических устройств, труб, материалов и соединительных деталей;

в)технологии строительства, монтажа, капитального ремонта и реконструкции в соответствии с проектом производства работ или технологическими картами.

п. 57. В случае если выявлены отступления от требований, указанных в пункте 56 настоящего технического регламента, факты использования материалов, не предусмотренных проектной документацией, и нарушения порядка и некачественного выполнения работ, строительно-монтажные работы должны быть приостановлены, а обнаруженные дефекты устранены.

п. 59. Запрещается размещение сварных соединений труб газопроводов в стенах, перекрытиях и других конструкциях зданий и сооружений»;

Зарегистрированной в АО «Мосгаз» рабочей документацией № 02-06-2020-ГСВ.З:

п. 4 «наружные и внутренние стены выполнены из кладки кирпича на сложном растворе. Степень огнестойкости здания - СО; в качестве легкосбрасываемых конструкций в котельной используются окна котельной; Термозапорный клапан Ду50 с отв. фланцами устанавливается в помещении котельной»;

Все это делает невозможными дальнейшие работы по сдаче выполненных работ надзорным органам, что подтверждается и записью инспектора технического надзора АО «Мосгаз». Данные изменения в проекте обязаны проходить повторную экспертизу промышленной безопасности (приказ МТУ Ростехнадзора № 420 от 20.10.2020 г. «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности»), с внесением согласований изменений в проект № 02-06-2020-ГСВ.З

В соответствии с п. 4.16 договора, регистрация и согласование проектной документации является обязанностью Заказчика.

На основании этих заключений и в соответствии со ст. 716, 718, 719 ГК РФ и п.п 4.7, 4.8, 4.9 договора № 12 от 21.06.2021 г. ООО «Техногазстрой» приостановил подрядные работы.

Свои требования во встречном иске ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» основывает на заключении от 31 августа 2022 г.  .

Экспертным бюро для заключения были поставлены три вопроса:

1. Соответствуют ли  работы,  выполненные ООО «Техногазстрой» в  рамках договора № 12 от 21.06.21 г. проектной документации. Замечания экспертов по этому вопросу:

манометры на внутренних устройствах отсутствуют;

лакокрасочное покрытие на газопроводах отсутствует;

обвязка ГРИШ не выполнена;

не смонтированы крепежные элементы газопровода;

не полностью смонтирована система автоматики и сигнализаторы загазованности;

не установлен газовый счетчик на углу здания 8 по ул. Речников 21;

газопровод заглушён у здания 8 по ул. Речников д. 21;

не подключен газопровод у здания 6 по ул. Речников д. 21. 

Вывод экспертизы по этому вопросу:

Часть монтажных работ не выполнено.

Как пояснил исполнитель, манометры в процессе монтажных работ не устанавливают из-за возможности их поломки. Вся подводка к манометрам, включая краны, выполнена. Манометры переданы Заказчику (отражено в Актах № 1 от 30.09.2021 и № 2 от 30.12.2021).

Окраска внутренних газопроводов грунтовкой «Ржавостоп» в два слоя выполнена (отражено в Актах). Окончательная окраска производится непосредственно перед контрольной опрессовкой и началом пуско-наладочных работ. Именно поэтому покраска газопроводов в желтый цвет ни в одном акте выполненных работ не отражена.

Обвязка ГРПШ, крепежные элементы, система автоматики, сигнализаторы загазованности, газовые счетчики - все было смонтировано на газопроводе на момент подписания актов. Но с момента предъявления ООО «Техногазстрой» требования ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» о восстановлении здания топочной № 3 в соответствии с рабочей документацией, допуск сотрудников ООО «Техногазстрой» на территорию был закрыт с 05.04.2021 г.;

Заглушка газопроводов произведена была для проведения и сдачи опрессовки газопровода контролирующим органам до проведения врезки в действующий газопровод.

Акты проверки сварных стыков передаются Заказчику в комплекте исполнительно-технической документации после выполнения всех работ по договору и сдачи надзорным органам, в соответствии с п. 4.22 договора;

Манометры в процессе монтажных работ не устанавливают из-за возможности их поломки. Вся подводка к манометрам, включая краны, произведена. Манометры переданы Заказчику (отражено в Актах № 1 от 30.09.2021 и № 2 от 30.12.2021).

газовый счетчик был на газопроводе на момент подписания актов (отражено в акте № 1 от 31.09.2021). Но с момента предъявления ООО «Техногазстрой» требования ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК» о восстановлении здания топочной № 3 в соответствии с рабочей документацией, допуск сотрудников ООО «Техногазстрой» на территорию был закрыт с 05.04.2021 г.;

Все акты испытаний газопровода передаются Заказчику в комплекте исполнительно-технической документации после окончания строительных работ и сдачи надзорным органам, в соответствии с п. 4.22 договора.

 ппроектную документацию экспертам передал Заказчик. Исполнительно-техническая документация передается Заказчику в комплекте после окончания строительных работ и сдачи надзорным органам, в соответствии с п. 4.22 договора;

Документы, удостоверяющие качество строительных конструкций (паспорта, сертификаты и т.п.), акты проверки сварных стыков передаются Заказчику в комплекте исполнительно-технической документации после выполнения всех работ и сдачи надзорным органам, в соответствии с п. 4.22 договоравсе работы по этапам 1 и 2 в соответствии с договором № 12 от 21.06.2021 г. на момент подписания Актов были выполнены и приняты Заказчиком в полном объеме без замечаний.

На основании вышеизложенного, проведя анализ заключения специалистов, , суд пришел к выводу, что замечания и выводы   не согласовываются с условиями договора № 12 от 21.06.2021 г. между ООО «Техногазстрой» и ООО «АТРИУМ-XXI ВЕК», а заключение экспертизы № 132СТ/22, выполненное АНО «Многопрофильное Судебно-Экспертное бюро» не отражает, действующее на момент подписания актов выполненных работ, положение дел, и не может служить основанием для удовлетворения требований  встречного иска.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично. В удовлетворении встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "АТРИУМ-XXI ВЕК" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОГАЗСТРОЙ" (ОГРН: 1137746369474) 1 859 950 руб. задолженности, 58 448 руб. 29  коп. процентов, 30 296 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части  первоначального иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко