68_13366046 

Арбитражный суд М осковской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российс кой Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

 г. Москва Дело № А41-64210/22  «10» января 2023 года  

  Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО к ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" об обязании устранить недостатки  выполненных работ и взыскании 522252 руб. 83 коп.,  

при участии: 

от истца – ФИО2 по дов. № 1 исх. - 4 от 12.01.2022 г.,  от ответчика  

 Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Обязать ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" в месячный срок со дня вступления решения суда в  законную силу безвозмездно выполнить гарантийные обязательства по муниципальному  контракту № Ф.2019.39189 на выполнение строительно-монтажных работ по завершению  строительства объекта: «Строительство детской музыкальной школы по адресу: Московская  область, Орехово-Зуевский муниципальный район, сельское поселение Демиховское,  

<

...>» от 04.02.2019 г. по устранению недостатков, а именно:  устранить рядом с правым запасным выходом разрушения бетона на площадке и у основания  пожарной лестницы; устранить образование вертикальных и горизонтальных трещин 1-2 мм  в стенах и перегородках в кабинете директора, на стене левого коридора напротив каб. № 4,  на стене каб. № 8, на стене каб. № 23, в кабинетах художественных отделений; переложить  декоративную плитку на фасадной части здания; устранить протечку через перекрытие  (кровлю) над помещением светозвукоаппаратной и над главной лестницей (необходима  проверка герметичности заделки); устранить образование воды в приямке входной лестницы  в подвал и разрушение отделочных слоев ограждающих вход в подвал; закрепить мойки в  кабинетах художественных отделений.  

Взыскать с ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" в пользу АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО 261126 руб. 42 коп. неустойки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с ООО "СТРОЙАЛЬЯНС" в доход федерального бюджета государственную  пошлину по иску в сумме 19445 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья И. В. Быковских