АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-25993/2023

г. Нижний Новгород                                                                         04 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения от 01.12.2023. 

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Беловой К.В. (шифр дела 25-533)

при ведении протокола судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии представителей сторон:

от истца - ФИО2 по доверенности от 14.04.2023,

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 05.06.2023,

рассмотрел в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «ЕвроОйл» 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 

об обязании произвести технологическое присоединение к электрическим сетям,

и   у с т а н о в и л:

общество с ограниченной ответственностью «ЕвроОйл» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к публичному акционерному обществу «Россети Центр и Приволжье» об обязании ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 521065973 в течение десяти дней с момента вступления решения в законную силу (с учетом уточнений заявленных в порядке, предусмотренном статьей 49 АПК РФ). 

Требование основано на статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), пункте 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861) и мотивировано необоснованным уклонением ответчика от технологического присоединения объекта истца к электрическим сетям.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковое требование. 

Ответчик иск не признал по мотивам, изложенным в отзыве, сообщил о невозможности исполнения решения суда в заявленный истцом срок (десять дней с даты вступления решения в законную силу). 

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №521065973, по условиям которого сетевая организация (ответчик) принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (истца), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 65 кВт; категория надежности третья; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 25 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора (пункты 1,2 договора).

Технологическое присоединении необходимо для электроснабжения объекта: АЗС, расположенное по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в районе пересечения улицы Генерала Ивлиева и улицы Героя ФИО4, напротив дома № 33 по улице Генерала Ивлиева (пункт 3 договора).

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (пункт 6 договора).

Согласно пункту 12 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17.12.2020  № 53/1 и составляет 49 143 рубля 90 копеек, в том числе НДС 20 процентов  в размере 8190 рублей 65 копеек.

В соответствии с пунктом 13 договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем и следующем порядке: 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся  в течение 5-ти рабочих дней со дня выставления счета на оплату сетевой организацией; 90 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 3 лет со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения равными долями ежеквартально.

Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета (пункт 23 договора). 

Истец произвел оплату аванса по договору в размере 6464 рублей 39 копеек, что подтверждается платежными поручениями от 04.03.2021 № 208 и от 30.03.2021 № 214 (л.д.19-20).

Пунктами 10, 10.1-10.4 Технических условий к договору (л.д.17-18)  предусмотрены следующие обязательства сетевой организации: запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-4711 до ШРС (кабельная линия 0,4 кВ в транше, многожильным кабелем с бумажной изоляцией, сечением 70 мм2 протяженностью 0,23 км). Тип, протяженность и сечение уточнить при проектировании; запроектировать и установить ШРС не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы земельного участка; для расчетного учета электроэнергии установить в ШРС один трехфазный учет электроэнергии с применением электросчетчиков полукосвенного включения с трансформаторами тока соответствующими максимальной мощности энергопринимающих устройств. Тип и состав оборудования определить при проектировании; установить после прибора учета коммутационный аппарат, обеспечивающий самостоятельное выполнение заявителем фактического присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжье».

Истец 28.07.2023 направил в адрес ответчика претензию, которая оставлена без ответа.  

До настоящего момента ответчиком не осуществлено фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям, что явилось основанием для обращения с настоящим иском в арбитражный суд.

Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Правила № 861 в пункте 7 устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя;

д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»). 

В соответствии с пунктом 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил № 861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации (пункт 6 Правил № 861).

Судом установлено, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению установлен договором 6 месяцев со дня заключения. Плата за технологическое присоединение произведена истцом в порядке, предусмотренном пунктом 13 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 521065973.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта истца, ответчиком в установленный срок не осуществлено.

В силу статьи 12 ГК РФ присуждение к исполнению обязанности в натуре является одним из предусмотренных законом способов защиты нарушенного права.

При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности по выполнению обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта истца, АЗС, расположенной по адресу: город Нижний Новгород, Советский район, в районе пересечения улицы Генерала Ивлиева и улицы Героя ФИО4, напротив дома № 33 по улице Генерала Ивлиева. 

Согласно части 2 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего организацию совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения может указать руководителя или иное лицо, на которых возлагается исполнение решения, а также срок исполнения.

В силу пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Оценив и исследовав представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о наличии оснований для возложения на ответчика обязанности по выполнению обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта истца в течение десяти дней с момента вступления настоящего решения суда в законную силу. 

Расходы по уплате государственной пошлины в порядке статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

обязать публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в течение десяти дней с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу выполнить обязательства, предусмотренные по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 521065973. 

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЕвроОйл» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 6000 рублей расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по письменному ходатайству взыскателя.

Решение  может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского  округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу при условии, если оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока для подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                                  К.В. Белова