Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-10329/2022

20 мая 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" (ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: закрытое акционерное общество "ИНТЕХ" (ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

при участии

- от истца: не явился (извещен);

- от ответчика: не явился (извещен);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" (далее – ООО "ТЕХСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "ИНТЕХ" (далее – ЗАО "ИНТЕХ") о взыскании 3525804,90 руб. задолженности, 1209505,08 руб. неустойки за период с 15.12.2020 по 28.01.2022 по договору субподряда от 01.11.2020 № 20/49/СП  (далее – Договор).

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своих представителей не направили, что в силу части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) не является препятствием к рассмотрению дела в их отсутствие.

В материалы дела от истца поступило ходатайство о рассмотрении дела по существу в отсутствие истца.

Отзыв на иск не представлен.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО "ТЕХСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" (субподрядчиком) и ЗАО "ИНТЕХ" (подрядчиком) заключен Договор, по условиям которого Субподрядчик обязуется выполнить по заданию Подрядчика, работы (далее - «Работы») в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) на объекте Заказчика:

•Емкости с металлоконструкциями и лестницами корпуса БХТММ (по ген. плану корпус 402)

1. Башня хранения №1 поз. К32-05Т570

2. Башня храпения №2 поз. К32-05Т575

•Емкости с металлоконструкциями и лестницами корпуса КДМ (по ген. плану корпус 403.2)

1. Башня оборотной воды поз. К51-18Т001

2. Башня оборотной воды поз. К51-18Т006

3. Башня хранения БХТММ поз. К51-02Т102

4. Башня хранения мелованного брака поз. К51-14Т100

5. Башня хранения немелованного брака поз. К51-14Т113

по адресу: 

<

...>, (далее «Объект»).

По п. 2.1. Договора сроки выполнения работ: начало работ – 01.11.2020, окончание работ – 15.02.2021. 

Согласно п. 3.1. Договора цена и объем работ, подлежащих выполнению но настоящему Договору определяется сторонами в Сметном расчете (Приложение № 2 к настоящему Договору).

В силу п. 4.1. Договора оплата выполненных работ по настоящему Договору, производится Подрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты наступления одновременно всех нижеуказанных обстоятельств (последнего из них):

-подписания Сторонами соответствующих Актов, составляемых по форме № КС-2 (Приложение №3 к Договору) и Справки - по форме КС-3,

-получения счета;

-получения счета-фактуры.

В соответствии с п. 6.1. Договора сдача-приемка результатов выполненных Субподрядчиком работ производится ежемесячно в следующем порядке.

По п. 6.2. Договора Субподрядчик передает Подрядчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) за отчетный месяц в срок до 18-го числа отчетного месяца 

Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) оформляет Субподрядчик в двух экземплярах, подписывает их со своей стороны и передает Подрядчику.

Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справка о стоимости выполненных работ и Счет-фактура, предоставляемые Субподрядчиком, должны быть датированы последним числом отчетного месяца.

По п. 6.3. Договора Подрядчик производит приемку выполненных работ и рассмотрение представленных Субподрядчиком Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), в течение 5-ти рабочих дней с момента их получения.

В силу п. 7.2. Договора за нарушение Подрядчиком сроков оплаты работ, установленных в п. 4.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Субподрядчику пени в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за выполненные работы за каждый день просрочки, до момента фактического исполнения обязательства.

Дополнительным соглашением от 24.12.2020 № 1 (далее – ДС № 1) стороны согласовали увеличение объема работ по Договору. 

Согласно приложению № 1 к ДС № 1 стоимость работ составляет 5424000 руб. 

Стороны подписали акт о приемке выполненных работ от 30.11.2020 № 1 на сумму 1918560 руб., справку о стоимости выполненных работ и затрат от 30.11.2020, справку о стоимости выполненных работ и затрат от 15.06.2021 № 4 на сумму 243473,10 руб. 

ООО "ТЕХСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" направило подрядчику односторонние акты о приемке выполненных работ от 31.01.2021 № 2 на сумму 2508960 руб., от 31.01.2021 № 3 на сумму 232800 руб., от 29.11.2021 № 5 на сумму 520206,90 руб. 

В претензии от 15.12.2021 субподрядчик просил оплатить задолженность. 

Отказ ЗАО "ИНТЕХ" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "ТЕХСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" в суд с настоящим иском. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Факт сдачи-приемки работ подтверждаются указанными актами о приемке выполненных работ, справками о стоимости выполненных работ и затрат, доказательствами их направления в виде почтовых квитанций, описей вложения в ценные письма. 

В материалы дела от ответчика отзыв на исковое заявление не поступил. 

Поскольку ответчик не представил доказательств оплаты работ, суд удовлетворяет требование о взыскании 3525804,90 руб. задолженности.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Истец начислил 1209505,08 руб. неустойки за период с 15.12.2020 по 28.01.2022.

Суд проверил расчет и признает требование правомерным по праву и размеру, подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с закрытого акционерного общества "ИНТЕХ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТЕХСТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" 3525804,90 руб. задолженности, 1209505,08 руб. неустойки, 46677 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья Косенко Т.А.