Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-58476/2021

23 ноября 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: акционерное общество "ЦЕНТРГАЗ" (ИНН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ФАСТ КОНСТРАКШН" (ИНН: 

<

***>) 

при участии

- от истца: Гречко В.В. 

- от ответчика: ФИО2 

установил:

Акционерное общество "ЦЕНТРГАЗ" (далее – АО "ЦЕНТРГАЗ") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "ФАСТ КОНСТРАКШН" (далее – ООО "ФАСТ КОНСТРАКШН") о взыскании 21674581,48 руб. неосновательного обогащения, 250000 руб. штрафа, 11632025,39 руб. неустойки за период с 01.01.2021 по 25.04.2021, с начислением ее за период с 26.04.2021 до даты фактического исполнения денежного обязательства,

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, представитель ответчика возражал против удовлетворения иска.  

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства. 

Как следует из материалов дела, между АО "ЦЕНТРГАЗ" (Подрядчиком) и ООО "ФАСТ КОНСТРАКШН" (Субподрядчиком) заключен Договор, по условиям которого Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить Работы по строительству Объекта, а также любые иные Работы, необходимые для ввода Объекта и его последующей эксплуатации в соответствии с назначением, а Подрядчик обязуется оплатить эти Работы в предусмотренном Договором порядке и принять завершенный строительством Объект. Результатом выполненных Работ по Договору является законченный строительством Объект, в отношении которого утвержден Акт приемки законченного строительством Объекта Приемочной комиссией.

По п. 3.1. Договора сроки начала и окончания выполнения Работ по настоящему Договору, включая промежуточные сроки, будут определены Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. При этом срок полного завершения Работ не может быть позднее 01.09.2020.

В соответствии с п.п. 4.1. и 4.2. Договора цена Работ по строительству (СМР, ПНР, включая поставку материалов), а также стоимость Оборудования (при необходимости поставки), будет определена Сторонами путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. Цена Работ включает в себя стоимость Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, а также стоимость Материалов и Оборудования, и учитывает все возможные расходы Субподрядчика в соответствии с пунктом 4.3 Договора, а также сумму НДС.

Согласно п. 2.1. дополнительного соглашения от 07.04.2020 № 1 цена работ составляет 361 243 024,56 руб.  

В силу п.п. 5.1. и 5.1.1. Договора оплата Работ по строительству производится в следующем порядке: Оплата Работ по строительству за истекший Отчетный период производится в размере 95% (Девяносто пять процентов) от стоимости выполненных и принятых в Отчетном периоде Работ по строительству в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), Справки о стоимости выполненных раоот и затрат (Форма № КС-3) при условии предоставления Субподрядчиком оригиналов счета на оплату и счета-фактуры, оформленных надлежащим образом.

По пунктам 12.1. – 12.1.2. Договора при выполнении своих обязательств по настоящему Договору Субподрядчик на всем протяжении срока выполнения Работ по строительству с момента приемки строительной площадки и до даты полного завершения Работ в отношении объекта обязуется:

- выполнить все требования положений, действующих в Российской Федерации, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ПАО «Газпром», АО «Газстройпром» Нормативных документов, а также настоящего Договора, относящихся к охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, включая требования в отношении оценки воздействия на окружающую среду (п. 12.1.1 договора); 

-предпринимать все необходимые меры предосторожности для защиты здоровья и обеспечения безопасности всех людей, включая своих работников, работников Подрядчика и населения, которые могут подвергаться воздействию в ходе выполнения Субподрядчиком Работ по строительству (п. 12.1.2 договора). 

В соответствии с пп. «а» п. 18.2. Договора Субподрядчик уплачивает по письменному требованию Подрядчика штрафы и неустойки за следующие допущенные им нарушения своих обязательств: за нарушение начального и конечного сроков выполнения Работ, установленных Графиком производства Работ 1-го уровня, более чем на 25 (Двадцать пять) календарных дней - неустойку в размере 1/180 (одна сто восьмидесятая) ключевой ставки Банка России от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки до момента их надлежащего выполнения.

Согласно пункту 18.8. Договора за нарушение условий, указанных в Приложении № 25 к настоящему Договору - «Ответственность Субподрядчика за нарушение требований по безопасности строительства, культуре производства и охране труда» Подрядчик имеет право наложить штрафы на Субподрядчика, размер которых указан в Приложении № 25 к настоящему Договору.

В силу п. 24.3. Договора Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата всех уплаченных по Договору денежных средств, за вычетом стоимости Работ, фактически выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ, при наличии дополнительного соглашения на авансирование а также фактически понесенных затрат, связанных с исполнением Договора и документально подтвержденных, и компенсации убытков в случае неисполнения Субподрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, путем направления Субподрядчику письменного уведомления об отказе от исполнения договора, в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:

– внесения без предварительного письменного согласия Подрядчиком изменений в Рабочую, Проектную документацию, увеличивающих стоимость и/или сроки выполнения Работ (п. 24.3.1 договора); 

– неоднократной (не менее 2-х раз) задержки исполнения Субподрядчиком требования Подрядчика устранить недостатки выполненных Работ, выявленных Подрядчиком во время выполнения Работ более чем на 10 (Десять) календарных дней со дня указанного в требовании Подрядчика (п. 24.3.2 договора); 

– аннулирования или прекращения действия лицензий, свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, исключение Субподрядчика из членов саморегулируемой организации, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Субподрядчика на производство Работ (24.3.3 договора); 

– в случае если в отношении Субподрядчика начата процедура банкротства (п. 24.3.4 договора); 

– в случае принятия решения Субподрядчиком о ликвидации или реорганизации (п. 24.3.5. договора); 

Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае злостного уклонения Субподрядчика от исполнения обязанности, предусмотренной пунктом 6.1.4. настоящего Договора (п. 24.4. договора). 

В силу пункта 24.5. Договора Подрядчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предварительно уведомив Субподрядчика о своем намерении за 20 (Двадцать) дней, по любым иным причинам, не указанным в пунктах 24.3.1-24.3.5 настоящего Договора, оплатив Субподрядчику фактически выполненные Работы. Работы, выполненные с отклонением от требований настоящего Договора, технической документации, действующих нормативных документов, оплате не подлежат.

Согласно п. 1 Приложения № 25 к Договору, в случае обнаружения на территории объекта Подрядчика работников Исполнителя в состоянии алкогольного опьянения (за исключением случая выявления указанных фактов непосредственно работниками исполнителя с письменным уведомлением об этом подрядчика в течение 24 часов с момента выявления) сумма штрафа, взыскиваемая с подрядчика, составляет за каждое выявленное нарушение: 250000 руб. 

АО "ЦЕНТРГАЗ" перечислило ООО "ФАСТ КОНСТРАКШН" 21674581,48 руб. по платежному поручению от 20.05.2020 № 388470.

Подрядчик направил субподрядчику уведомление от 05.04.2021 № 190 о расторжении договора, ссылаясь на невыполнение работ, просило возвратить аванс и оплатить штраф. 

АО "ЦЕНТРГАЗ" направило ООО "ФАСТ КОНСТРАКШН" претензию от 20.11.2020 № 1020 с требованием оплаты неустойки за просрочку выполнения работ. 

Отказ субподрядчика удовлетворить названные требования послужил основанием для обращения подрядчика в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы

В силу пункта 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

В силу пунктов 1 и 2 статьи 450.1. ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Факт перечисления 21674581,48 руб. аванса подтверждается платежным поручением от 20.05.2020 № 388470.

Отказ подрядчика от Договора с уведомлением от 05.04.2021 № 190 направлен по Почте России согласно почтовой квитанции и описи вложения в ценное письмо с РПО № 19606654229699. По сведениям, размещенным на сайте Почты России, отправление с РПО № 19606654229699 возвращено 10.05.2021 отправителю из-за истечения срока хранения.

Ответчик заявил, что понес затраты на общую сумму 26038212,12 руб. (материальные затраты, мобилизация сотрудников, зарплата, частичное выполнение работ), в связи с чем истцу должно быть отказано полностью в удовлетворении заявленных требований в части возврата неотработанного аванса, а также неустойки за нарушение срока выполнения работ. 

Ответчик считает необоснованным начисление неустойки на общую стоимость Контракта, без учета частичного выполнения работ. 

По требованию о взыскании штрафа ответчик возражений не имеет.

Определением от 29.03.2022 по делу назначена экспертиза, производство которой поручено эксперту ООО «Петроэксперт» ФИО3

В заключении от 08.09.2022 № 22/31-А56-58476/2021 эксперт установил, что стоимость работ и материалов на март 2020 г. (дата заключения Договора) (без понижающего коэффициента) составляет 3596046 руб.; стоимость работ и материалов (с понижающим коэффициентом – 0,85) составляет 3056639,10 руб. 

Стоимость материалов, приобретенных и использованных при производстве работ силами субподрядчика в рамках Договора на март 2020 года составила 1212611 руб.; а с понижающим коэффициентом – 0,85 составила 1030719,35 руб. 

Суд приходит к выводу о том, что экспертное заключение от 08.09.2022 № 22/31-А56-58476/2021 позволяет с достоверностью установить стоимость выполненных субподрядчиком работ надлежащего объема и качества. Представленное в дело заключение эксперта соответствует требованиям статей 82, 83, 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ сведения, оно основано на материалах дела, является ясным, противоречия в выводах эксперта отсутствуют.

При указанных обстоятельствах следует исходить из того, что стоимость фактически выполненных субподрядчиком работ с учетом материалов по спорному договору составляет 3056639,10 руб. 

Таким образом, суд удовлетворяет требование о взыскании 21674581,48 руб. неосновательного обогащения, частично, в размере 18617942,38 руб. (21674581,48 - 3056639,10). 

Согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с абз. 2 п. 65 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Истец заявил требования о 11 632 025,39 руб. неустойки за период с 01.01.2021 по 25.04.2021, а также неустойки, начисленной за период с 26.04.2021 до даты фактического исполнения денежного обязательства. 

На основании п. 24.5. Договора Договор расторгнут с 31.05.2021.

Начисление неустойки за нарушение срока выполнения работ за период после расторжения Договора неправомерно.  

На основании изложенного, суд удовлетворяет требование о взыскании неустойки в размере 9899873,71 руб. за период с 01.01.2021 по 25.04.2021, начисленные на стоимость не выполненных в срок Работ в размере 358186385,46 руб. (361 243 024,56 - 3056639,10), а также удовлетворяет требование о взыскании неустойки, начисленной за период с 26.04.2021 по 31.05.2021 на сумму 358186385,46 руб., в удовлетворении остальной части требований отказывает.

Истец начислил 250000 руб. штрафа за следующее нарушение: 26.07.2020 на входе через КПП № 1 объекта работник ООО "ФАСТ КОНСТРАКШН" отделочник ФИО4 остановлен сотрудником КПП по подозрению алкогольного опьянения, что отражено в протоколе контроля трезвости от 26.07.2020, проведенном и составленном фельдшером ООО «Согаз-Медсервис». Ответчик требование признал, не оспорил.

При указанных обстоятельствах, суд удовлетворяет требование. 

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку ООО "ФАСТ КОНСТРАКШН" перечислило 300 000 руб. платежным поручением от 02.03.2022 № 15 за экспертизу по делу, в то время как стоимость экспертизы определена в размере 297 500 руб., излишне уплаченные 2500 руб. подлежат возврату ответчику с депозитного счета суда. В связи частичным удовлетворением исковых требований ответчику надлежит возмещению за счет истца 42453,25 руб. расходов по оплате судебной экспертизы (14.27%).

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФАСТ КОНСТРАКШН" (ИНН: 

<

***>)  в пользу акционерного общества "ЦЕНТРГАЗ" (ИНН: 

<

***>)  18617942,38 руб. неосновательного обогащения, 250000 руб. штрафа, 9899873,71 руб. неустойки, а также неустойку в размере 1/180 ключевой ставки Банка России от стоимости невыполненных работ (358186385,46 руб.) за каждый день просрочки за период с 26.04.2021 по 31.05.2021, 163557 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с акционерного общества "ЦЕНТРГАЗ" (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ФАСТ КОНСТРАКШН" (ИНН: 

<

***>) 42453,25 руб. расходов по оплате судебной экспертизы.

Произвести зачет денежных сумм, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ФАСТ КОНСТРАКШН" (ИНН: 

<

***>)  в пользу акционерного общества "ЦЕНТРГАЗ" (ИНН: 

<

***>)  18575489,13 руб. неосновательного обогащения, 250000 руб. штрафа, 9899873,71 руб. неустойки, а также неустойку в размере 1/180 ключевой ставки Банка России от стоимости невыполненных работ (358186385,46 руб.) за каждый день просрочки за период с 26.04.2021 по 31.05.2021, 163557 руб. руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Возвратить с депозитного счета Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области обществу с ограниченной ответственностью "ФАСТ КОНСТРАКШН" (ИНН: 

<

***>)  2500 руб., излишне уплаченных по платежному поручению от 02.03.2022 № 15.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья Косенко Т.А.