ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-238948/17-126-978

г. Москва

18 января 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена                      12 января 2018 года

Полный текст решения изготовлен                                18 января 2018 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Прудецкая Н.А., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Акционерного общества "Строймеханизация" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) к Закрытому акционерному обществу "Компания "ЕВРОСТРОЙ"  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) о взыскании 1 636 019 руб. 26 коп.

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся в заседание.

в судебное заседание явились:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

АО «Строймеханизация» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» о взыскании 1 636 019 руб. 26 коп. задолженности по договору строительного подряда № 1707-2013/С/Сол от 17.07.2013г.

Истец мотивирует исковые требования тем, что ответчик не оплатил в полном объеме работы предусмотренные договором № 1707-2013/С/Сол от 17.07.2013г.

Ответчик отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Учитывая надлежащее уведомление истца и ответчика о дате, времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства дела по существу определением о принятии дела к производству, отсутствие возражений сторон на переход к рассмотрению дела по существу в суде первой инстанции, суд в соответствии с п.4 ст.137 АПК РФ, п.27 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ №65 от 20.12.2006., завершил предварительное заседание и рассмотрел дело в судебном заседании в первой инстанции, в отсутствие сторон, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Как следует из материалов дела, 17.07.2013г. между АО «Строймеханизация» (Субподрядчик, истец) и ЗАО «Компания «ЕВРОСТРОЙ» (Генподрядчик, ответчик) заключен договор строительного подряда № 1707-2013/С/Сол в редакции дополнительных соглашений № 1 от 17.07.2013 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 19.08.2013), № 2 от 17.07.2013, № 3 от 14.08.2013, № 4 от 19.08.2013, № 5 от 19.08.2013, № 6 от 27.09.2013, № 7 от 27.09.2013, № 8 от 30.09.2013, № Ю от 31.10.2013, № 11 от 11.03.2014, №12 от 01.04.2014г., № 13 от 02.04.2014, № 14 от 15.05.2014, № 15 от 18.07.2014, согласно условиям которого Истец обязуется своими силами и/или с привлечением третьих лиц, своими инструментами, механизмами и из своих материалов на объекте: «Многофункциональный торговый комплекс с автопарковкой и сопутствующей инфраструктурой, общей площадью 235 881,66 кв. м», расположенном по адресу: 660015, 

<

...>, выполнить земляные работы, а Ответчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения работ в соответствии с условиями Договора, принять их результат в установленном Договором порядке и сроки, а также уплатить обусловленную Договором цену.

Пунктом 1 ст.702 ГК РФ установлено, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Конкретный перечень и объем поручаемых работ, а также требования к их выполнению уточняются проектной и рабочей документацией (п. 1.1 Договора).

Стоимость работ поручаемых Субподрядчику по настоящему Договору (цена договора) определяется на основании Протокола согласования договорной цены (пункт 2.1 Договора).

Пунктом 3.1 Договора предусмотрено, что выполнение Работ производится Субподрядчиком в соответствии с Графиком производства Работ, согласованным Сторонами.

В приложении №1 к Договору стороны согласовали договорную цену - 12 577 949,90 руб. с НДС. Приложением № 3 к Договору (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 17.07.2013 к Договору) согласован график производства работ (с 17.08.2013 по 15.09.2013).

Дополнительным соглашением № 1 от 17.07.2013 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ - работы в отвале объемом 27 200 м3 стоимостью 378 090,88 руб. с НДС (сроки выполнения с 07.08.2013 до 15.09.2013).

Дополнительным соглашением №1 от 19.08.2013 к Дополнительному соглашению № 1 от 17.07.2013 к Договору стороны увеличили объемы работ на отвале на 40 000 м3 стоимостью 556 016 руб. с НДС.

Дополнительным соглашением № 4 от 19.08.2013 к Договору стороны увеличили объемы земляных работ (выемка грунта с растительным слоем, разработка плодородного грунта (чернозема)) на 40 000 м3 стоимостью, согласовав стоимость работ в размере 5 680 048 руб. с НДС и график производства работ (с 01.08.2013 по 24.08.2013).

Дополнительным соглашением № 5 от 19.08.2013 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ:

- устройство временных дорог и площадок складирования (отсыпка скальником) стоимостью 64 003,86 руб. без учета НДС;

- забивка свай стоимостью 38 310,74 руб. без учета НДС. Сроки выполнения указанных работ - с 19.08.2013 по 23.08.2013.

Дополнительным соглашением № 6 от 27.09.2013 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительно к работам по основному Договору и дополнительным соглашениям к нему следующих земляных работ:

- выемка грунта с растительным слоем, разработка плодородного грунта (чернозема) стоимостью 1 588 488 руб. без учета НДС;

- уплотнение грунта стоимостью 86 400 руб. без учета НДС;

- работа в отвале стоимостью 155 496 руб. без учета НДС;

- отсыпка дна котлована пожарного резервуара ПГС стоимостью 86 400 руб. без учета НДС. 

Сроки выполнения указанных земляных работ: с 01.10.2013 по 20.10.2013. 

Дополнительным соглашением № 7 от 27.09.2013 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ по устройству временных дорог и площадок складирования из ПГС стоимостью 4 500 000 руб. с НДС (сроки выполнения работ - с 30.09.2013 по 30.11.2013).

Дополнительным соглашением № 8 от 30.09.2013 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ - разработка грунта экскаватором с погрузкой в а/с, транспортировкой, разравниванием, уплотнением (для устройства пожарного резервуара) общей стоимостью 2 202 408 руб. с НДС (сроки выполнения работ- с 01.10.2013 по 31.10.2013).

Дополнительным соглашением № 10 от 31.10.2013 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ общей стоимостью 1 458 645,84 руб. с НДС, в том числе:

- разработка грунта стоимостью 608 421,98 руб. без учета НДС (сроки выполнения - с 12.11.2013 по 11.12.2013);

- засыпка ПГС пазух котлованов под ростверки стоимостью 461 445,60 руб. без учета НДС (сроки выполнения - с 09.01.2014 по 23.01.2014);

- устройство основания из ПГС под плиту подпорной стены слоем 0,3 м - стоимостью 166 272,96 руб. без учета НДС (сроки выполнения работ-с 12.11.2013 по 11.12.2013).

Дополнительным соглашением № 11 от 11.03.2014 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ по устройству временных дорог и площадок складирования из ПГС стоимостью 372 903,60 руб. с НДС (сроки выполнения работ - с 12.03.2014 по 19.03.2014).

Дополнительным соглашением № 12 от 01.04.2014 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительных земляных работ в зоне Торговой галереи и зоне благоустройства общей стоимостью 6 368 578 руб. с НДС, в том числе:

- отсыпка ПГС в зоне Торговой галереи стоимостью 3 813 600 руб. без учета НДС (сроки выполнения - с 01.04.2014 по 30.05.2014);

- погрузка и транспортировка грунта в зоне Благоустройства стоимостью 1 015 200 руб. без учета НДС (сроки выполнения - с 01.04.2014 по 30.05.2014);

- разработка грунта в зоне Благоустройства - стоимостью 568 300 руб. без учета НДС (сроки выполнения работ - с 01.05.2014 по 15.06.2014).

Дополнительным соглашением № 13 от 02.04.2014 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ общей стоимостью 3 054 028,80 руб. с НДС, в том числе:

- устройство основания из ПГС в зоне Ашан стоимостью 1 906 800 руб. без учета НДС;

- разработка грунта под полку для бурения шпунтового ряда в зоне Благоустройства стоимостью 681 360 руб. без учета НДС (сроки выполнения - с 01.04.2014 по 30.05.2014);

Начало производства указанных работ - 02.04.2014; окончание производства работ -06.06.2014.

Дополнительным соглашением № 14 от 15.05.2014 к Договору стороны согласовали по  выполнение дополнительных работ по обратной  засыпке  пазух  подпорной  стены  в  зоне Благоустройства стоимостью 1 877 663,20 руб. с НДС (сроки выполнения работ с 15.05.2014 по 15.08.2014).

Дополнительным соглашением № 15 от 18.07.2014 к Договору стороны согласовали выполнение дополнительных работ по устройству основания под асфальтобетонное покрытие из ПГС в зоне Благоустройства стоимостью 361 803.86 руб. с НДС (сроки выполнения работ - с 29.07.2014 по 15.08.2014).

Пунктом 6.1 Договора установлено, что сдача-приемка выполненных Субподрядчиком работ осуществляется сторонами один раз в месяц до 25 числа текущего месяца.

Во исполнение условий Договора Истец выполнил, а Ответчик принял работы на общую сумму 34 704 385,46 руб., что подтверждается подписанными обеими сторонами без замечаний (возражений) актами о приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ унифицированной формы КС-3: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 от 31.08.2013, №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 от 30.11.2013; №№ 18, 19 от 31.12.2013; №20 от 31.01.2014; №№21, 22, 23 от 31.03.2014; №№ 24, 25, 26, 27, 28 от 30.04.2014; №№ 29, 30 от 31.05.2014; №№31, 32, 33 от 30.06.2014; №№34, 35, 36 от 31.07.2014.

Согласно п. 7.1 Договора (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 14.08.2013 к Договору), Генеральный подрядчик оставляет за собой право выплатить единовременно либо по частям, на свое усмотрение, аванс в размере до 5 000 000 рублей. Погашение авансовых платежей производится ежемесячно пропорционально выполненному объему работ и учитывается при оплате выполненных Субподрядчиком работ с учетом п. 7.4. настоящей статьи (пункт 7.2 Договора).

В соответствии с п. 7.3 Договора оплата выполненных работ осуществляется при выполнении п.6.4 настоящего договора в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами документов, указанных в п. 6.3 настоящего Договора.

Пунктом 2.5 Договора предусмотрено, что за расходы Генерального подрядчика по оказанию услуг генерального подряда Субподрядчик обязуется оплачивать 2% (в т.ч. НДС) от стоимости фактически выполненных и принятых объемов работ по договору. Основанием для предъявления Генеральным подрядчиком требования об оплате является оформленный Акт о приемке выполненных работ (УФ КС-2) (п.6.3), в соответствии с которым Субподрядчик сдал, а Генеральный подрядчик принял работы, выполненные Субподрядчиком по настоящему договору. Факт оказания услуг генерального подряда оформляется соответствующим Актом приемки оказанных услуг, подписываемым сторонами на дату оформления соответствующего Акта о приемке выполненных работ (УФ КС-2). Оплата стоимости услуг генерального подряда производится Субподрядчиком в течение пяти банковских дней с момента подписания Акта приемки оказанных услуг. Стороны пришли к соглашению, что обязательство Субподрядчика по оплате затрат Генерального подрядчика на оказание услуг генерального подряда, может быть прекращено путем зачета встречных требований по оплате работ на основании соответствующего уведомления Генерального подрядчика.

Согласно п. 7.4 Договора Генеральный подрядчик с каждого объема сданных Субподрядчиком работ удерживает сумму в размере 5 (пяти) процентов, с учетом НДС, в счет обеспечения качества выполненных работ. Выплата средств, резервируемых для обеспечения качества выполненных работ, осуществляется по истечении 24-х месяцев после сдачи Субподрядчиком результатов работ, выполненных в полном объеме в гарантийную эксплуатацию и подписания без оговорок Итогового акта приемки работ (п. 3.5), за исключением сумм, оплаченных Генеральным подрядчиком сторонним организациям за устранение недоделок в выполненных работах, если их устранение не было произведено Субподрядчиком в установленные Генеральным подрядчиком сроки.

В соответствии с п. 3.5 Договора подписание итого акта приемки работ производится путем направления Субподрядчиком оформленного итогового акта приемки работ по форме, определенной в приложении №5 к Договору, в адрес генерального подрядчика. В течении 10 рабочих дней с момента получения итогового акта генеральный подрядчик рассматривает и подписывает его при отсутствии замечаний. При наличии замечаний к объемам, качеству выполненных работ, объему и качеству оформленной исполнительной документации, а также в случае неисполнения субподрядчиком иных обязательств, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством и связанных с выполнением порученных работ, итоговый акт генеральным подрядчиком не подписывается до момента устранения имеющихся нарушений, либо подписывается с соответствующей оговоркой. По результатам рассмотрения итогового акта генеральный подрядчик направляет субподрядчику подписанный итоговый акт, либо соответствующий мотивированный отказ от его подписания.

Согласно ч.4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Истцом одностороннем порядке составлен и подписан итоговый акт, который 22.10.2015 года вручен ответчику для подписания с сопроводительным письмом №08-489 от 14.10.2015.

Принимая во внимания положения пунктов 3.5, 7.4 договора, итоговый акт должен был быть подписан генподрядчиком 06.11.2015. однако направленный ответчику для подписания итоговый акт приемки работ в адрес истца возвращен не был, мотивированного отказа от его подписания также не поступало, что свидетельствует о надлежащей передаче субподрядчиком и принятии генподрядчиком всех работ, выполненных по договору, на основании итогового акта.

Таким образом, срок удержания средств, резервируемых для обеспечения качества выполненных работ истек 06.11.2017.

В нарушение условий договора ответчик выполненные работы не оплатил, в связи с чем у ответчика образовался долг в сумме 1 636 019 руб. 26 коп., что является остатком задолженности по гарантийному удержанию, который истец просит взыскать с ответчика в судебном порядке, поскольку направленная в адрес ответчика претензия №08-275 от 14.09.2016г. и уведомление №08-316 от 10.08.2017г. остались без удовлетворения.

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Доказательств оплаты суммы долга, либо иных возражений по факту неисполнения договорных обязательств ответчиком не представлено, в связи с чем, суд пришел к выводу о том, что требование истца о взыскании долга в сумме 1 636 019 руб. 26 коп., следует признать обоснованным и подлежащим удовлетворению. 

В соответствии со ст.110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине в сумме 29 360 руб. 00 коп. 

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 702, ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 137, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Компания "ЕВРОСТРОЙ" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Строймеханизация" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) задолженность по договору строительного подряда № 1707-2013/С/Сол от 17.07.2013 года в размере 1 636 019 (один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч девятнадцать) руб. 26 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 29 360 (двадцать девять тысяч триста шестьдесят) руб. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков