19/2019-112511(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А70-12278/2019

г. Тюмень

17 октября 2019 года

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Трилем С.А., рассмотрев в судебном  заседании дело по иску  

Администрация Вагайского муниципального района (далее - истец) 

к ООО Инженерно-производственный центр «Альянс» (далее - ответчик)  

третьи лица - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Бегишевская  средняя общеобразовательная школа Вагайского района Тюменской области (далее –  третье лицо-1), временный управляющий ООО Инженерно-производственный центр  «Альянс» ФИО1 (далее – третье лицо-2)  

об обязании совершить определенные действия 

при участии:  

от истца: ФИО2, доверенность от 08.07.2019 № 30/19-Д  от ответчика: ФИО3, доверенность от 31.01.2019 № 1  

от третьего лица-1: не явилось, извещено  от третьего лица-2: не явилось, извещено  

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО Инженерно-производственный центр «Альянс» устранить в течении  одного месяца со дня вступления в законную силу настоящего решения недостатки  недвижимого имущества, переданного по муниципальному контракту купли-продажи от  09.09.2015 № 77/15-А, а именно:  

1. Общестроительные работы 1.1. внутренние помещения 

1.1.1. окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:  по сборным конструкциям потолков с выравниванием поверхностей – 248 кв.м.,  

1.1.2. замена облицовки стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных,  плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из  сухих смесей: по кирпичу и бетону, в том числе фартуки с ремонтом штукатурки – 222,82  кв.м.,  

1.1.3. окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по  штукатурке стен и откосов с выравниванием поверхностей – 599,71 кв.м.,  

1.1.4. окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: со  сборным конструкция стен, с подготовкой поверхностей – 147,98 кв.м.,  

1.1.5. замена плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих – 66,79  

м.п., 1.2. крыльца 1.2.1. разборка покрытий полов: из керамических плиток – 92,2 кв.м. 1.2.2. разборка бетонных оснований – 92,2 кв.м., 1.2.3. устройство бетонной подготовки с армированием – 92,2 кв.м., 1.2.4. устройство стяжек: цементных – 92,2 кв.м., 1.2.5. устройство покрытий из плит керамогранитных – 92,2 кв.м., 

1.2.6. демонтаж и устройство площадок из бетонных тротуарных плит (брусчатки)  

– 27,37 кв.м., 

1.2.7. демонтаж и монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,  

гнутосварных профилей-металлические конструкции козырь ков крылец – 3,8 т., 2. Сантехнические работы внутренних помещений 2.1. демонтаж и обратный монтаж умывальником – 25 шт., 2.2. демонтаж и обратный монтаж моек – 6 шт., 

2.3. демонтаж и монтаж внутренних трубопроводов водоснабжения из  

полипропиленновых труб: 20 мм – 102 п.м., 2.4. демонтаж и обратный монтаж полотенцесушителей – 2 шт., 3. Наружное освещение 3.1. демонтаж светильников ЖКУ 10-250 – 20шт., 3.2. демонтаж опоры освещения – 12 шт., 3.3. прокладка кабеля с алюминиевыми жилами АВБШВ 5х16 – 100 м., 

3.4. кабель с алюминиевыми жилами АВБ бШВ – 100 м.,  3.5. прокладка траншеи разработка грунта в ручную – 35 м3,  

3.6. засыпка траншеи – 180 м., 3.7. монтаж светильника ЖКУ 10-250 – 20 шт., 3.8. монтаж опоры освещения – 12 шт., 3.9. устройство фундамента опоры – 12 шт., 3.10 бетон – 3м3. 

Взыскать с ООО Инженерно-производственный центр «Альянс» в доход  

федерального бюджета 6000,00 рублей госпошлины. 

Выдать исполнительные листы в установленном порядке.  Решение может быть обжаловано в месячный срок в Восьмой арбитражный  

апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы в Арбитражный суд Тюменской  области.  

 Судья Маркова Н.Л.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 7:57:29

 Кому выдана Маркова Наталья Леонидовна