Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-80080/2018

16 мая 2019 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  25 апреля 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  16 мая 2019 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Сергеева О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СК "СЕВЕРО-ЗАПАД" (адрес:  Россия 236010, г КАЛИНИНГРАД, КАЛИНИНГРАДСКАЯ обл, пл ПОБЕДЫ 10/А/717; Россия 195027, Санкт-Петербург, а/я 115, ОГРН:  1077847437414; 1077847437414);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ГАСКОМ" (адрес:  Россия 192102, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул БУХАРЕСТСКАЯ 24/1 ЛИТ. А/514, ОГРН:  1167847292634);

о взыскании 2093597.94

при участии

-от истца: ФИО2 по доверенности от 05.12.18,

-от ответчика: не явился, о времени и месте извещен надлежащим образом,

установил:

ООО "СК "СЕВЕРО-ЗАПАД" предъявило иск о взыскании с ООО "ГАСКОМ" 2 000 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 87 5000 руб. 00 коп. неустойки на основании договора №2203-2018/Гдж от 22.03.18, 5 958 руб. 90 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 05.06.18 по 21.06.18, а с 22.06.18 проценты по день фактического исполнения обязательства, 139 руб. 04 коп. платы за пользование коммерческим кредитом.

Ответчик отзыв не представил.

Дело рассматривается без участия ответчика на основании ст. 156 АПК РФ.

Судом установлено:

Между ООО «СК «Северо-Запад» и ООО «ГАСКОМ» был заключен договор подряда № 2203-2018\Гдж от 22.03.2018 (далее - «Договор») на выполнение инженерного расчета внеплощадочных и внутриплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения объекта «Реконструкция специального сооружения №20/1 войсковой части 69273 г. Гаджиево-1 (шифр объекта С-20/1), расположенного по адресу: Мурманская область, г. Гаджиево-1, войсковая часть 69273 (ИГК 1719187375822554164000000).

Согласно п.3.1, п.3.3 Договора стоимость работ являлась твердой и составляла 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) руб., в том числе НДС 18% - 381 355,93 руб. Виды работ определялись условиями п.3.2.1-п.3.2.6 Договора.

ООО «СК «Северо-Запад» согласно п.4.2 Договора произвело авансирование работ в сумме 2 000 000,00 (два миллиона) руб., в том числе НДС 18% - 305 084,75 руб. (платежное поручение №1624 от 23.03.2018).

Согласно п.5.2 Договора дата окончания работ - не позднее 30.04.2018.

Ответчик – субподрядчик работы  не выполнил.

Истец уведомлением исх. 31/2/05 от 31.05.18 отказался от исполнения договора.

Ответчик до настоящего времени авансовый платеж не возвратил. 

В соответствии со ст. 395 ГК РФ на сумму неосновательного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами, которые по состоянию на 21.06.18 составляют 5 958 руб. 90 коп. и могут быть начислены по день фактического возврата авансового платежа.

В соответствии с п. 13.2 договора за нарушение срока выполненных работ ответчик обязан уплатить неустойку в размере 87 500 руб. 00 коп.

Плата за пользование коммерческим кредитом предусмотрена п. 4.15 договора и составляет 139 руб. 04 коп.

Учитывая изложенное, иск подлежит удовлетворению с отнесением расходов по государственной пошлине на ответчика.

Руководствуясь статьями 309, 310, 330, 395, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 110, 156, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ГАСКОМ"в пользу общества с ограниченной ответственностью "СК "СЕВЕРО-ЗАПАД" 2 093 597 руб. 94 коп., из них:    2 000 000 руб. 00 коп. неосновательного обогащения, 87 500 руб. 00 коп. неустойки, 139 руб. 04 коп. платы за пользование коммерческим кредитом, 5 958 руб. 90 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а с 22.06.18 проценты от суммы неосновательного обогащения по ключевой ставке Центрального Банка РФ по день фактического возврата денежных средств, а также 33 468 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине.

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Сергеева О.Н.