АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

г.Краснодар Дело № А32-37646/20 19.05.2021 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи  С.А. Баганиной, при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Л.В Поляшевой, рассмотрев в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью группа  компаний «ОСТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о  взыскании неустойки в размере 2 264 980 рублей 23 копейки, об обязании передать  проектно-сметную (рабочую) документацию следующих разделов проекта: 79566035.001- Р-500.095.010-АС-01, 79566035.001-Р-500.095.010-АС-01, 79566035.011-Р-500.095.010-АР- 01, 79566035Л00-Р-500.095.020/230-АС-01; по встречному иску о взыскании 579805,60  руб долга по оплате работ , выполненных по договору субподряда от 13.08.2019 № 02- 08/2019. при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований , ООО «РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод», руководствуясь  статьями 49, 150-151, 65, 70, 101, 106, 110, 156, 159, 167-171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,   

РЕШИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью группа компаний  «ОСТ» от иска в части требования о предоставлении проектно-сметной (рабочей)  документации разделов проекта: 79566035.001-Р-500.095.010-АС-01, 79566035.001-Р- 500.095.010-АС-01, 79566035.011-Р-500.095.010-АР-01, 79566035Л00-Р-500.095.020/230- АС-01. Производство по делу в указанной части прекратить.  

Отказать в удовлетворении ходатайства ООО ГК ОСТ об отложении судебного  заседания.  

Отказать в удовлетворении ходатайств ООО «Технострой» об истребовании  доказательств,  

По первоначальному иску: Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «ТЕХНОСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью группа компаний «ОСТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) 782 490,12 руб неустойки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 29715,07 руб  государственной пошлины.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью группа компаний «ОСТ»  

(ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 10609,93  государственной пошлины.  

По встречному иску: Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  группа компаний «ОСТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) 579805,60 руб долга , а также 14596 руб госпошлины.  

С учетом зачета выдать один исполнительный лист: Взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью группа компаний  «ОСТ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 202684,52 руб неустойки.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение.  

Судья С.А. Баганина