Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

20. 06. 2019 года.                                                Дело № А40-47974/19-43-432

Резолютивная часть решения объявлена 17. 06. 2019 года.

Решение изготовлено в полном объеме 20. 06. 2019 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного казённого учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Москвы " УКРИС " (ОГРН 

<

***>)

к ООО " Орион " (ОГРН 

<

***>)

об обязании выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков в объеме указанном в Рекламационной акте от 18.05.2018 г. и о взыскании 2 819 307 руб. 10 коп. - неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № У-09-200/8 от 19.09.2018 г., от ответчика – не явился.

Заслушав представителя, изучив имеющиеся в деле документы, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен об обязании выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков в объеме указанном в Рекламационной акте от 18.05.2018 г. и о взыскании 2 819 307 руб. 10 коп. - неустойки, на основании статей  11, 12, 309, 330, 721-724, 755 ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который поддержал заявленный иск, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении, представил истребованные судом документы, предъявил подлинники документов, имеющихся в материалах дела в виде копий; каких-либо ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, не представил отзыв на исковое заявление, истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил, расчет истца не оспорил; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом, в отсутствии отзыва и представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Между Государственным казенным учреждением г. Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Москвы «УКРиС» (Государственный заказчик, ГКУ «УКРиС») и ООО «ОРИОН» (Генподрядчик) заключен Государственный контракт от 05.10.2015г. № 14Р22/0173200001415000649 на завершение строительно-монтажных работ (без реставрационных) по объекту: «Реставрация нежилого здания с перепланировкой и приспособлением для размещения Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы на 650 мест» по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3/2.

На основании п. 1.9 Контракта - Гарантийный срок - Период времени, в течение которого Генподрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет в соответствии с условиями Контракта своими силами и за свой счет все выявленные Государственным заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество Работ, связанные с исполнением Генподрядчиком своих обязательств по Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Государственного заказчика и третьих лиц.

На основании п. 1.29 Контракта - Рекламационный акт - документ, составляемый Сторонами настоящего Контракта в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков (дефектов) на Объекте в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также указанием даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Генподрядчиком.

На основании п. 10.1 Контракта - Генподрядчик гарантирует по каждому из Объектов: наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с настоящим Контрактом Работ; выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта; соответствие качества всех выполненных Работ проектной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам; возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока; бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Генподрядчиком, при эксплуатации Объекта в Гарантийный срок; высокое качество всех работ, смонтированного Генподрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ; достижение Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период Гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них; своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

В соответствии с абз. 1 п. 10.3 Контракта - Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на Объекте(-ах) начинается с даты утверждения в установленном порядке Акта государственной комиссии по приемке работ, а в случае досрочного расторжения настоящего Контракта (на выполненные Генподрядчиком до даты расторжения Контракта и принятые Государственным заказчиком работы) - с даты расторжения настоящего Контракта, и составляет: на качество выполненных работ по настоящему Государственному контракту - 3 (Три) года.

Контракт расторгнут по Соглашению сторон №б/н от 31.12.2015г. В соответствии с п. 5 Соглашения о расторжении настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. Все обязательства Сторон прекращаются с момента вступления в силу настоящего Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных гл. 10 настоящего Контракта.

Как установлено п. 10.4 Контракта - Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его поставщиками и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Государственный заказчик и эксплуатирующая организация совместно с Генподрядчиком составляют Рекламационный акт, где подробно описываются выявленные Недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению Недостатков (дефектов). Рекламационный акт составляется Сторонами по форме, утвержденной Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 17.03.2010г. №07-14-64/0 «Об утверждении Порядка взаимодействия организаций при устранении недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока после проведения  капитального  ремонта  многоквартирных домов,  включенных в Городскую целевую программу по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014 г.г.». Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 30 (тридцати) дней со дня обнаружения Недостатков. Течение срока исковой давности начинается с даты составления Рекламационного акта.

На основании п. 10.5 Контракта - Для участия в составлении Рекламационного акта, фиксирующего выявленные недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан в срок, указанный в письменном извещении эксплуатирующей организации и/или Государственного заказчика о выявленных недостатках (дефектах) направить своего надлежащим образом уполномоченного представителя с предъявлением соответствующей доверенности.

В соответствии с п. 10.6 Контракта - Генподрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Рекламационного акта. В случае необходимости немедленного выхода Генподрядчика на Объект(-ы) для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в Рекламационном акте. Если Генподрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит недостатки (дефекты) и/или не заменит некачественные материалы, изделия, конструкции, системы и/или оборудование, то Государственный заказчик применяет к Генподрядчику штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом.

На основании п. 10.7 Контракта - При отказе Генподрядчика от составления или подписания Рекламационного акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается эксплуатирующей организацией и/или Государственным заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком принятых им на себя обязательств.

На основании п. 10.11 Контракта - Приемка работ по устранению Недостатков (дефектов) осуществляется на основании проверки Сторонами работ с оформлением Акта приемки работ по устранению недостатков (дефектов), выявленных в гарантийный срок после проведения капитального ремонта многоквартирного дома, по форме, утвержденной Распоряжением Департамента капитального ремонта жилищного фонда города Москвы от 17.03.2010г. №07-14-64/0 «Об утверждении Порядка взаимодействия организации при устранении недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока после проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в Городскую целевую программу по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008-2014г.г.»

Также, на основании п. 10.15 Контракта - Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

В соответствии с п.2 ст.755 Гражданского кодекса Российской Федерации - Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

ПСУ «УКРиС» 24.04.2018г. на имя Генерального директора ООО «ОРИОН» ФИО2 направлено извещение №у-18-1021/8 о вызове для составления Рекламационного акта на 18.05.2018г. в 09-00 по адресу: 

<

...> и Александра Космодемьянских, д. 3/2.

Вышеуказанное извещение направлено по адресу ООО «ОРИОН», указанному в п. 19.2 Контракта и гл. 20 Контракта «Реквизиты Сторон».

Согласно данным с сайта https://www.pochta.ru корреспонденция с номером почтового идентификатора 10914720299392 имеет статус «27.04.2018г. Неудачная попытка вручения».

18.05.2018г. комиссия в составе: представителя ПСУ «УКРиС», представителя ГАОУ ВПО МГУУ Правительства Москвы и в отсутствии надлежащим образом уведомленного представителя ООО «ОРИОН» составила Рекламационный акт, в котором описаны обнаруженные недостатки (дефекты), которые невозможно было выявить при приемке работ по Контракту.

Также в Рекламационном акте от 18.05.2018г. отмечены следующие выводы: Заменить неисправное оборудование, качественно выполнить строительно-монтажные работы.

Выполнение работ осуществить силами Подрядной организации ООО «ОРИОН».

В Рекламационном акте от 18.05.2018г. установлены сроки начала и окончания выполнения работ.

Срок начала выполнения работ - не позднее двух дней с момента получения настоящего Рекламационного акта.

Срок окончания выполнения работ - 09.07.2018г.

Оригинал Рекламационного акта от 18.05.2018г. направлен ООО «ОРИОН» уведомлением от 04.06.2018г. №у-18-2043/8 по адресу, указанному в п. 19.2 Контракта (121596, 

<

...> кв. №203А).

Одновременно, уведомлением от 04.06.2018г. №у-18-2043/8 ООО «ОРИОН» проинформировано о том, что 10.07.2018г. в 09-00 по адресу: по адресу: 

<

...> и Александра Космодемьянских, д. 3/2 состоится комиссия для фиксации устранения/неустранения недостатков (дефектов), зафиксированных в Рекламационном акте от 18.05.2018г.

Согласно данным с сайта https://www.pochta.ru корреспонденция с номером почтового идентификатора 10914720299965 имеет статус «17.06.2018г. Неудачная попытка вручения».

10.07.2018г. комиссия в составе: представителя ГКУ «УКРиС», представителя ГАОУ ВПО МГУУ Правительства Москвы и в отсутствии надлежащим образом уведомленного представителя ООО «ОРИОН» составила Акт фиксации устранения (неустранения) недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока после завершения строительно-монтажных работ (без реставрационных) по объекту: «Реставрация нежилого здания с перепланировкой и приспособлением для размещения Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы на 650 мест» по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3/2.

Согласно выводу Акта фиксации устранения (неустранения) недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока после завершения строительно-монтажных работ (без реставрационных) по объекту: «Реставрация нежилого здания с перепланировкой и приспособлением для размещения Государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы на 650 мест» по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3/2 от 10.07.2018г. ООО «ОРИОН» замечания, указанные в Рекламационном акте от 18.05.2018г. не устранило.

В связи с чем, ООО «ОРИОН» нарушено обязательство, предусмотренное абз.8 п.10.1 Контракта - своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

13.11.2018г. ПСУ «УКРиС» направило ООО «ОРИОН» Претензию №у-06-7392/8 от 12.11.2018г. с требованием выполнить гарантийные обязательства, устранив недостатки, указанные в Рекламационном акте от 27.11.2017г. и оплатить неустойку в размере 2 819 307,10 руб.

На основании п. 1. ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии со ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В силу абз. 1 п. 1 ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно с п. 3 ст. 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии с п. 1 ст. 755 ГК РФ подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Требование истца об обязании выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков в объеме указанном в Рекламационной акте от 18.05.2018 г., законное обоснованное, соответствует условиям договора и подлежит удовлетворению в полном объеме.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

На основании п. 12.1 Контракта - При нарушении условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Контрактом.

На основании п. 12.3 Контракта - За невыполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, Генподрядчик уплачивает Государственному заказчику неустойку (пени) в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц-В)хС,

где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: ОСцб*ДП, где: размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП/ДК*100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Указанная неустойка (пени) начисляется за следующие нарушения по настоящему Государственному контракту: за задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, против сроков, предусмотренных Актом об обнаружении дефектов и недоделок и/или предписанием Государственного заказчика, либо Рекламационным актом (12.3.4 Контракта).

Неустойка, подлежащая взысканию с ответчика за нарушение сроков устранения недостатков, составляет 2 819 307 руб. 10 коп.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 2 819 307 руб. 10 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, расчетом представленными истцом, не оспорено и не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика, в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720, 721-725, 740, 742, 746, 753 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 110, 112, 121-124, 155, 156, 162, 166-171, 174, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Иск Государственного казённого учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Москвы " УКРИС " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Орион " (ОГРН 

<

***>) об обязании выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков в объеме указанном в Рекламационной акте от 18.05.2018 г. и о взыскании 2 819 307 руб. 10 коп. - неустойки удовлетворить.

Обязать ООО " Орион " (ОГРН 

<

***>) в 30-тидневный срок с момента вступления решения в законную силу выполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков в объеме указанном в Рекламационной акте от 18.05.2018 г.

Взыскать с ООО " Орион " (ОГРН 

<

***>) в пользу Государственного казённого учреждения города Москвы по капитальному ремонту многоквартирных домов г. Москвы " УКРИС " (ОГРН 

<

***>) 2 819 307 руб. 10 коп. – неустойки и расходы по уплате госпошлины в сумме 43 097 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

 

Судья                                                           О.В. Романов