Арбитражный суд Республики Адыгея Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А01-2320/2022  

25 ноября 2022 года 

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

иск общества с ограниченной ответственностью «Автосервис Адыгея» к  муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Образовательный  центр № 3 Майкопского района» о внесении изменений в государственный контракт  

 № 03763000215210000060001 от 01.03.2021 в части установления стоимости работ в  размере 25 036 790 рублей и продления срока сдачи выполненных работ до трех месяцев с  даты вступления решения суда в законную силу оставить без удовлетворения.  

Встречное исковое заявление муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Образовательный центр № 3 Майкопского района» к обществу с  ограниченной ответственностью «Автосервис Адыгея» о расторжении государственного  контракта от 01.03.2021 № 03763000215210000060001, взыскании неосвоенных авансовых  платежей в размере 6 151 102 рублей 30 копеек и пени в размере 320 108 рублей 39 копеек  удовлетворить.  

Расторгнуть государственный контракт от 01.03.2021 № 03763000215210000060001,  заключенный между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  «Образовательный центр № 3 Майкопского района» и обществом с ограниченной  ответственностью «Автосервис Адыгея».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Автосервис Адыгея» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>, Республика Адыгея, г. Майкоп, хутор Косинов,  

ул. Гагарина, д. 13, кв. 2) в пользу муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Образовательный центр № 3 Майкопского района» (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>, Республика Адыгея, Майкопский район, станица Абадзехская,  

ул. Первомайская, 33) неосвоенные авансовые платежи по государственному контракту от  01.03.2021 № 03763000215210000060001, в размере 6 151 102 рублей 30 копеек, пени в  размере 320 108 рублей 39 копеек, возмещение расходов по уплате государственной  пошлины 6 000 рублей, а всего 6 477 210 рублей 69 копеек.  

Обеспечительные меры в виде запретов муниципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению «Образовательный центр № 3 Майкопского района»  заключать новый контракт на выполнение работ по строительству спортивного комплекса  по адресу: РА, 

<

...> и привлекать иного  подрядчика отменить.  

Решение по настоящему делу обратить к немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу, если это решение было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции. Жалоба подается  через суд, вынесший решение.  

Судья Н.Г. Мусифулина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 08.04.2022 3:37:00

Кому выдана Мусифулина Наталья Геннадьевна