2138/2024-20380(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-13468/2023

г. Казань

24 января 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи  секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО2, г. Казань  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "РОСТ", г. Казань  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 15 000 000 руб. договорной неустойки, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Альфа-Групп»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании 1 617 671, 92 руб. договорной неустойки, 

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Формула",  

 общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Альфа-Групп»,   общество с ограниченной ответственностью «СК С.Т.С.»¸  

 общество с ограниченной ответственностью «Окна Столицы»,  встречное исковое заявление о взыскании договорной неустойки в размере 4 495 328, 08 руб.  

при участии представителей сторон: от ФИО2, третьего лица ООО "Формула" – ФИО3, по доверенностям от 16.06.2023, 10.10.2023, 

от ФИО2 – ФИО4, по доверенности от 12.01.2024,  от ООО "СК "РОСТ", третьего лица ООО «Строительная компания «Альфа-Групп» -  

ФИО5, по доверенностям от 13.07.2023, 31.07.2021, от иных третьих лиц - не явились, извещены, 

Руководствуясь ст. 110, 112, 132, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "РОСТ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 1 853 694, 18 руб. договорной неустойки за период с 05.02.2021 по 25.10.2022,  а также 48 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего  1 901 694, 18 руб.  

В удовлетворении оставшейся части исковых требований отказать. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Альфа-Групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу ФИО2 225 355, 72 руб. договорной неустойки за период с 03.08.2020 по 18.11.2022,  а также 29 177 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего  254 532, 72 руб.  

В удовлетворении оставшейся части первоначальных исковых требований отказать. В удовлетворении встречных исковых требований отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по  отдельному заявлению взыскателя.  

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.С.Харин