Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, Смольного ул.,  дом 6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-63243/2023

29 июля 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2024 года. Полный текст решения изготовлен 29 июля 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Орловой Е.А.,

 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сидоровой А.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго",

(адрес:  197227 г.Санкт-Петербург, вн.тер.г, МО Озеро Долгое, ул.Гаккелевская, д. 21, литера А, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>);

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мир",

(адрес:  199004, город Санкт-Петербург, лн. 9-я В.О., д. 48 литер а, помещ. 7н ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>)

о взыскании 44.907 руб.05коп., 

при участии:

от истца:  представитель ФИО1 по дов. от 05.12.2023 г. №456-23, 

от ответчика: не явился, извещен, 

 

установил:

Истец – публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго», обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир», о расторжении Договора № ОД-СПб-6002-19/8500-Э-19 от 21.03.2019 в связи с его существенным нарушением со стороны Заявителя, взыскании неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению за период с 22.07.2019 по 20.06.2023 в размере 44 907 рублей 05 копеек.

Определением суда от 11.07.2023 г. дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). 

Определением суда от 07.09.2023 г. суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

Определением суда от 22.01.2024 иск оставлен без рассмотрения.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2024 г. определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.01.2024 по делу было отменено; дело направлено в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Истец поддержал заявленные исковые требования.

Надлежащим образом извещенный по всем представленным в арбитражный суд адресам ответчик в судебное заседание не явился, мотивированных возражений не представил, что не препятствует рассмотрению дела в его отсутствии по имеющимся в материалах дела доказательствам в соответствии со статьями 123, 156  АПК РФ. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, арбитражный суд установил, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Арбитражный суд установил:

Между ПАО «Россети Ленэнерго» (далее – Истец, Сетевая организация) и ООО «УК «Мир» (далее – Ответчик, Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-СПб-6002-19/8500-Э-19 от 21.03.2019, по условиям которого Сетевая организация обязалась осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающего устройства Заявителя, расположенного по адресу Санкт-Петербург, 11-я В.О. линия, д.46, лит. А, кв. 2, кадастровый номер: 78:06:0002044:3238, площадью 170,4 кв.м. (далее – Договор). 1) Нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению. 

Согласно пункту 8 Договора Заявитель обязался надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. 

Согласно п. 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения настоящего договора. 

Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 21.07.2019. Мероприятия, указанные в п. 11 Технических условий (приложение № 1 к Договору), Ответчиком по настоящее время не выполнены. 

Сетевой организацией были в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению объекта Заявителя, в связи с чем в адрес Ответчика направлено соответствующее уведомление от 21.03.2019 года исх. № ЭСКЛ/16-01/5130. 

Согласно пункту 18 Договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подпунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила ТП) и пунктом 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки за год просрочки (365 * 0,0025 * 49 213,20 = 44 907,05 рублей). 

Согласно пункту 16(6) Правил ТП срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств: а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий. б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий; в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий; г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение. 

Размер неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 22.07.2019 по 20.06.2023 (дата подготовки искового заявления) составляет: 365 (количество дней просрочки с учетом ограничения, установленного п. 16 Правил ТП) * 0,0025 * 49 213,20 (размер платы за технологическое присоединение) = 44 907,05 рублей. 

Относительно расторжения договора Согласно пункту 16 (5) Правил ТП, нарушение Заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств – мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек 21.07.2019. Таким образом, 21.07.2020 у Сетевой организации возникло право на расторжение договора.

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Расторгнуть договор от № ОД-СПб-6002-19/8500-Э-19 от 21.03.2019, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир» и публичным акционерным обществом «Россети Ленэнерго».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мир» в пользу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» 44.907 руб. 05 коп. неустойки и 8.000 руб. расходов по госпошлине.

 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                          Орлова Е.А.