126_37011798 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-118594/23-126-912

г. Москва

19 сентября 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел секретарь Куланова С.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело  

по иску ООО СК "СТОЛИЦА ПРИВОЛЖЬЯ" (ОГРН 

<

***>)  к ООО "ПРОМТОРГ" (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 32 036 587,80 руб. 

В судебное заседание явились:  

от истца: ФИО1, дов. от 14.08.2023 от ответчика: неявка, извещен 

РЕШИЛ:

Обязать ООО "ПРОМТОРГ" (ОГРН 

<

***>) в течение 10 рабочих дней с  даты вступления решения суда в законную силу передать ООО СК "СТОЛИЦА  ПРИВОЛЖЬЯ" (ОГРН 

<

***>) четыре экземпляра исполнительной  документации по договору подряда № 27-07/21-1 от 27.07.2021, подписанной всеми  заинтересованными лицами и подготовленной в соответствии с требованиями РД-11-2- 2006, в отношении фактически выполненных объемов работ в составе:  

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж кронштейнов навесного  вентилируемого фасада;  

- Исполнительную схему на монтаж скрытых на монтаж кронштейнов навесного  вентилируемого фасада;  

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж утеплителя навесного  вентилируемого фасада;  

- Исполнительную схему на монтаж утеплителя навесного вентилируемого  фасада;  

- Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж направляющих навесного  вентилируемого фасада;  

- Исполнительную схему на монтаж направляющих навесного вентилируемого  фасада;  

- Паспорта (сертификаты) на использованные материалы. 

Взыскать с ООО "ПРОМТОРГ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО СК  "СТОЛИЦА ПРИВОЛЖЬЯ" (ОГРН 

<

***>) 1 226 587 (один миллион двести  двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб. 80 коп. неустойки за нарушение  срока выполнения работ, 30 810 000 (тридцать миллионов восемьсот десять тысяч) руб.  неустойки за нарушение срока предоставления исполнительной документации за  период по 22.05.20233, неустойку в размере 30 000 руб. в день, начисленную за период  с 23.05.2023 по дату фактического предоставления исполнительной документации, а  также 183 183 (сто восемьдесят три тысячи сто восемьдесят три) руб. судебных  расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: М.С. Новиков