Арбитражный суд

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ул. Мира 27, 

<

...>, тел. 

<

***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А75-18295/2025

24 марта 2026 года

город Ханты-Мансийск

Резолютивная часть решения объявлена 16 марта 2026 года

В полном объеме решение изготовлено 24 марта 2026 года

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Янбаевой Г.Х., при ведении протокола секретарем судебного заседания Сургучевой Е.С., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 22.11.2002, адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) к акционерному обществу "Самотлорнефтегаз" (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.08.2002, ИНН: 

<

***>, КПП: 860301001) о понуждении произвести мероприятия, взыскании неустойки и обязании внести изменения в проект лесовосстановления, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «ОСИП»,

при участии представителей:

от истца - не явились, извещены;

от ответчика (онлайн) – ФИО1, доверенность № 612 от 16.10.2025,

от третьего лица – не явились,

УСТАНОВИЛ:

Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-мансийского автономного округа - Югры (далее – заявитель, административный орган, Депнедра и природных ресурсов Югры) обратился в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры с исковым заявлением к акционерному обществу «Самотлорнефтегаз» (далее – ответчик, АО «Самотлорнефтегаз», Общество) о понуждении произвести мероприятия.

Определением арбитражного суда от 26.08.2025 исковое заявление принято к производству. Дело назначено к разбирательству в предварительном судебном заседании на 24.09.2025 в 11 час. 00 мин., в судебном заседании на 24.09.2025 в 11 час. 05 мин.

В предварительное судебное заседание явка представителей сторон не обеспечена, до предварительного судебного заседания ответчик отзыв на заявление не представил, заявил возражение против рассмотрения дела непосредственно после окончания предварительного судебного заседания, судебное заседание по делу назначить на 02.12.2025 в 10 часов 00 минут.

Заявитель обратился с заявлением о принятии уточнения заявленных требований, просит:

1. Понудить акционерное общество «Самотлорнефтегаз» произвести мероприятия по агротехническому уходу путем дополнения участков компенсационного лесовосстановления до проектных показателей на участке Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, квартал 235 выдел 18 (фактическое выполнение работ) в срок до 01 июля 2026 года, приемка - в срок до 31.10.2026 года.

2. Понудить Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» произвести мероприятия по агротехническому уходу путем дополнения участков компенсационного лесовосстановления до проектных показателей на участке Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, урочище «Аганские озера» квартал 116 выделы 22, 27, 28, 34 (фактическое выполнение работ) в срок до 01 июля 2026 года, приемка работ - в срок до 31.10.2026 года.

3. Взыскать с Акционерного общества «Самотлорнефтегаз» неустойку судебную в соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Обязать Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» внести изменения в проект лесовосстановления в части продления обязательств по агротехническому уходу за 2025 год - в 2027 году, обязательств по агротехническому уходу за 2026 год - в 2028 году.

Уточнения исковых требований приняты арбитражным судом.

Определением суда от 02.12.2025 к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «ОСИП».

Определением арбитражного суда от 02.12.2025 судебное заседание отложено на 21.01.2026 на 09 час. 30 мин. Сторонам предложено принять меры к урегулированию спора.

Определением суда от 21.01.2026 судебное заседание отложено на 16.03.2026 на 10 часов.

От заявителя поступило ходатайство об уточнении заявленных требований, просит:

1.Понудить Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» произвести мероприятия по агротехническому уходу путем дополнения участков компенсационного лесовосстановления до проектных показателей на участке Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, квартал 235 выдел 18 (фактическое выполнение работ) в срок до 01 июля 2026 года, приемка работ - в срок до 31.10.2026 года;

2.Понудить Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» произвести мероприятия по агротехническому уходу путем дополнения участков компенсационного лесовосстановления до проектных показателей на участке Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, урочище «Аганские озера» квартал 116 выделы 22, 27, 28, 34 (фактическое выполнение работ) в срок до 01 июля 2026 года, приемка работ - в срок до 31.10.2026 года;

3.Обязать Акционерное общество «Самотлорнефтегаз» внести изменения в проект лесовосстановления в части продления обязательств по агротехническому уходу за 2025 год - в 2027 году, обязательств по агротехническому уходу за 2026 год - в 2028 году.

Уточнение исковых требований принято арбитражным судом.

Исследовав материалы дела, изучив доводы, изложенные в заявлении, представленных доказательствах, выслушав объяснения лица, явившегося в судебное заседание, суд установил следующие фактические обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Депнедра и природных ресурсов Югры и АО «Самотлорнефтегаз» заключены договоры аренды лесных участков: 0038/17-07-ДА от 05.07.2017; 0226/14-07-ДА от 22.01.2014; 0211/14-07-ДА от 01.12.2014; 0036/12-07-ДА от 12.03.2012; 0199/14- 07-ДА от 07.11.2014; 0164/19-05-ДА от 08.10.2019; 0079/17-05-ДА от 17.07.2017; 0128/19-05-ДА от 01.08.2019; 0174/19-05-ДА от 18.10.2019; 0003/19-07-ДА от 18.01.2019; 0029/19-07-ДА от 29.05.2019; 0010/18-07-ДА от 14.02.2018; 0090/19- 07-ДА от 27.09.2019; 0036/20-07-ДА от 21.02.2020; 0037/16-07-ДА от 18.05.2016; 0066/20-07-ДА от 06.04.2020; 0107/16-07-ДА от 19.10.2016; 0120/16-05-ДА от 03.10.2016; 150/11-05 от 24.11.2011; 157/11-07-ДА от 23.12.2011; 0079/20-07-ДА от 10.04.2020; 0317/14-05-ДА от 05.08.2014; 0132/21-07-ДА от 20.09.2021; 0005/17-05-ДА от 26.01.2017; 0317/14-05-ДА от 05.08.2014; 0075/19-05-ДА 08.05.2019; 0207/18-05-ДА от 02.11.2018; 0048/20-07-ДА от 06.03.2020; 0076/21- 07-ДА от 02.07.2021; 0025/20-01-ДА от 10.04.2020; 0022/17-07-ДА от 05.05.2017; 0170/20-07-ДА от 23.10.2020; 0092/19-07-ДА от 09.10.2019; 0154/20-07-ДА от 02.10.2020; 159/11-07-ДА от 26.12.2011; 0088/19-07-ДА от 19.09.2019; 0097/19-05- ДА от 18.06.2019; 0039/16-05-ДА от 29.04.2016; 0399/14-05-ДА от 28.11.2014; 0045/16-05-ДА от 13.05.2016; 0170/19-05-ДА от 15.10.2019; 0128/19-05-ДА от 01.08.2019; 0397/14-05-ДА от 26.11.2014; 0057/20-05-ДА от 23.04.2020; 0129/19- 05-ДА от 01.08.2019; 0417/14-05-ДА от 03.12.2014; 0154/17-05-ДА от 14.11.2017; 0031/21-07-ДА от 01.03.2021; 0085/20-07-ДА от 23.04.2020; 0107/20-07-ДА от 10.06.2020; 0363/13-07-ДА от 18.10.2013; 663/08-08-ДА от 08.12.2008; 0052/20-05- ДА от 17.04.2020; 0164/19-05-ДА от 08.10.2019.

Согласно условиям договоров Арендодатель обязан осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации и проектом освоения лесов.

Согласно заявлению № АБ-0046 от 20.01.2023 о намерении провести работы по лесовосстановлению АО «Самотлорнефтегаз» сообщало о намерении провести работы по лесовосстановлению на общей площади 52,6966 га на землях (местоположение лесного участка): Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, квартал 235 выдел 18.

Согласно проекту лесовосстановления № 9942-00107/2023 на площади 4,4834 га АО «Самотлорнефтегаз» необходимо было выполнить посадку саженцев с открытой корневой системой в квартале 235 выделе 18 территория Колек-Ёганского лесничества урочище «Аганские озера».

Согласно проекту лесовосстановления № 9942-00108/2023 на площади 4,8775 га АО «Самотлорнефтегаз» необходимо было выполнить посадку саженцев с открытой корневой системой в квартале 235 выделе 18 территория КолекЁганского лесничества урочище «Аганские озера».

Согласно проекту лесовосстановления № 9942-00109/2023 на площади 13,3357 га АО «Самотлорнефтегаз» необходимо было выполнить посадку саженцев с открытой корневой системой в квартале 235 выделе 18 территория Колек-Ёганского лесничества урочище «Аганские озера».

Согласно проекту лесовосстановления № 9942-00015/2023 на площади 30,0 га АО «Самотлорнефтегаз» необходимо было выполнить посадку саженцев с закрытой корневой системой в квартале 235 выделе 18 территория Колек-Ёганского лесничества урочище «Аганские озера».

Согласно письму № 0992-01 от 15.09.2023 АО «Самотлорнефтегаз» выполнило компенсационные мероприятия по лесовосстановлению на лесных участках, расположенных на территории Колек-Ёганского участкового лесничества квартал 235 выдел 18 на площади 22,6966 га, квартал 235 выдел 18 на площади 30,0 га, квартал 116 выдел 22, 27, 28, 34 на площади 97,3034 га.

Согласно акту осмотра участков лесных культур, высаженных в рамках компенсационного лесовосстановления, выполненных АО «Самотлорнефтегаз» в 2023 году от 15.08.2024:

1. по результатам осенней инвентаризации приживаемость на лесном участке в квартале 235 выдел 18 на площади 4,4834 га посадка саженцев с открытой корневой системой (ОКС) составляет 51,5% от предусмотренного проектом высаженного посадочного материала;

2. по результатам осенней инвентаризации приживаемость на лесном участке в квартале 235 выдел 18 на площади 4,8775 га посадка саженцев с открытой корневой системой (ОКС) составляет 41,0% от предусмотренного проектом высаженного посадочного материала;

3. по результатам осенней инвентаризации приживаемость на лесном участке в квартале 235 выдел 18 на площади 13,3357 га посадка саженцев с открытой корневой системой (ОКС) составляет 45,4% от предусмотренного проектом высаженного посадочного материала;

4. по результатам осенней инвентаризации приживаемость на лесном участке в квартале 235 выдел 18 на площади 30,0 га посадка саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС) составляет 98,0% от предусмотренного проектом высаженного посадочного материала.

В адрес АО «Самотлорнефтегаз» 21.08.2024 направлено письмо №358 о необходимости произвести мероприятия по агротехническому уходу путем дополнения участков компенсационного лесовосстановления до проектных показателей в оптимальные агротехнические сроки 2024 года. На данный момент мероприятия не выполнены.

Согласно заявлению № АБ-0761 от 25.07.2023 о намерении провести работы по лесовосстановлению АО «Самотлорнефтегаз» сообщало о намерении провести работы по лесовосстановлению на общей площади 105,1924 га на землях (местоположение лесного участка): Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, урочище «Аганские озера» квартал 116 выделы 22, 27, 28, 34.

Согласно проекту лесовосстановления № 20581-00024/2023 на площади 97,3034 га АО «Самотлорнефтегаз» необходимо было выполнить посадку саженцев с открытой корневой системой в квартале 116 выделе 22, 27, 28, 34 территория Колек-Ёганского участкового лесничества урочище «Аганские озера».

Согласно проекту лесовосстановления № 9942-00062/2023 на площади 6,3112 га АО «Самотлорнефтегаз» необходимо было выполнить посадку саженцев с открытой корневой системой в квартале 116 выделе 22, 27, 28 территория Колек-Ёганского участкового лесничества урочище «Аганские озера».

Согласно проекту лесовосстановления № 9942-00063/2023 на площади 1,5778 га АО «Самотлорнефтегаз» необходимо было выполнить посадку саженцев с закрытой корневой системой в квартале 116 выделе 22, 27 территория Колек-Ёганского участкового лесничества урочище «Аганские озера».

Согласно письму № 2243-01 от 15.09.2023 АО «Самотлорнефтегаз» выполнило компенсационные мероприятия по лесовосстановлению на лесных участках, расположенных на территории Колек-Ёганского участкового лесничества урочище «Аганские озера» квартал 116 выдел 22, 27 на площади 1,5778 га, квартал 116 выдел 22, 27, 28 на площади 6,3112 га.

Согласно письму № 0992-01 от 15.09.2023 АО «Самотлорнефтегаз» выполнило компенсационные мероприятия по лесовосстановлению на лесных участках, расположенных на территории Колек-Ёганского участкового лесничества квартал 116 выдел 22, 27, 28, 34 на площади 97,3034 га.

Согласно Акту осмотра участков лесных культур, высаженных в рамках компенсационного лесовосстановления, выполненных АО «Самотлорнефтегаз» в 2023 году от 28.08.2024:

1. по результатам осенней инвентаризации приживаемость на лесном участке в квартале 116 выдел 22, 27, 28, 34 на площади 97,3034 га посадка саженцев с открытой корневой системой (ОКС) составляет 35,4% от предусмотренного проектом высаженного посадочного материала;

2. по результатам осенней инвентаризации приживаемость на лесном участке в квартале 116 выдел 22, 27, 28 на площади 6,3112 га посадка саженцев с открытой корневой системой (ОКС) составляет 44,0% от предусмотренного проектом высаженного посадочного материала;

3. по результатам осенней инвентаризации приживаемость на лесном участке в квартале 116 выдел 22, 27 на площади 1,5778 га посадка саженцев с закрытой корневой системой (ЗКС) составляет 95,8% от предусмотренного проектом высаженного посадочного материала. 03 сентября 2024 года в АО «Самотлорнефтегаз» было направлено письмо № 375 о необходимости произвести мероприятия по агротехническому уходу путем дополнения участков компенсационного лесовосстановления до проектных показателей в оптимальные агротехнические сроки 2024 года. На данный момент мероприятия не выполнены.

В адрес АО «Самотлорнефтегаз» 21.10.2024 направлены претензионные письма

№ 18, № 19 с предложением провести мероприятия по агротехническому уходу путем дополнения участков компенсационного лесовосстановления до проектных показателей. На момент подачи настоящего искового заявления истец не получил ответ на претензионные письма, ответчик обязательства не исполнил.

Поскольку Обществом надлежащим образом не исполнены обязательства по агротехническому уходу в установленный лесным законодательством срок, истец обратился в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации

в гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу пункта 1 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации по договору аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, арендодатель предоставляет арендатору лесной участок для одной или нескольких целей, предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса.

Исходя из части 3 статьи 71 Лесного кодекса Российской Федерации, к договорам аренды лесного участка применяются положения об аренде, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если иное не установлено этим Кодексом.

Частью 1 статьи 19 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 Кодекса, или использующими леса в соответствии с настоящим Кодексом лицами.

Лица, которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 Лесного кодекса Российской Федерации (часть 1 статьи 88 Лесного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с частью 5 статьи 17 Лесного кодекса Российской Федерации осуществление сплошных рубок на лесных участках, предоставленных для заготовки древесины, допускается только при условии воспроизводства лесов на указанных лесных участках.

В силу статьи 12 Лесного кодекса Российской Федерации освоение лесов осуществляется в целях обеспечения их многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования, а также развития лесной промышленности.

Освоение лесов осуществляется с соблюдением их целевого назначения

и выполняемых ими полезных функций. При освоении лесов на основе комплексного подхода осуществляются: организация использования лесов; создание и эксплуатация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры; проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов; проведение мероприятий по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов.

В силу статьи 61 Лесного кодекса Российской Федерации вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству. Воспроизводство лесов включает в себя, в том числе лесовосстановление.

Частью 3 статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что искусственное лесовосстановление представляет собой деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений, в том числе посев, посадку саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород, агротехнический уход за лесными насаждениями (рыхление почвы, уничтожение или предупреждение появления нежелательной растительности и другие мероприятия, направленные на повышение приживаемости саженцев, сеянцев основных лесных древесных пород и улучшение условий их роста), а также иные мероприятия, предусмотренные правилами лесовосстановления, до момента отнесения земель, на которых осуществляется искусственное лесовосстановление, к землям, на которых расположены леса.

В силу части 6 статьи 62 Лесного кодекса Российской Федерации лесовосстановление проводится в соответствии с проектом лесовосстановления, который разрабатывается в соответствии со статьей 89.1 Лесного Кодекса Российской Федерации.

Статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено право кредитора в случае неисполнения должником обязательства требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - Постановление № 7), при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.

В целях исполнения обязательств по компенсационному лесовосстановлению, возникших по вышеуказанным договорам, между ответчиком и ООО «ОСИП» (подрядчик) заключены договоры на выполнение работ по лесовосстановлению в счет компенсации ущерба лесному хозяйству: -№ СНГ-2243/22/173922/02190Д от 11.10.2022 на площадь 7,889 га; № СНГ-0992/23/173923/01216Д от 25.05.2023 на площадь 150 га.

В рамках договоров подрядчиком разработаны проекты лесовосстановления: № 9942-00062/2023 площадью 6,3112 га; № 9942-00063/2023 площадью 1,5778 га; № 9942-00015/2023 площадью 30,0 га; № 9942-00107/2023 площадью 4,4834 га; № 9942-00108/2023 площадью 4,8775 га; № 9942-00109/2023 площадью 13,3357 га; № 20581-00024/2023 площадью 97,3034.

Проектами лесовосстановления предусмотрены мероприятия по агротехническому уходу путем дополнения лесных культур по результатам инвентаризации однократно.

Работы в рамах договоров в части выполнения работ по искусственному лесовосстановлению (посадке лесных культур) выполнены в полном объеме в 2023 году и приняты Аганским территориальным отделом – лесничеством Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что подтверждается актами выполненных работ от 17.10.2023 № 127-КЕ, от 01.11.2023 № 124-КЕ, от 28.10.2023 № 125-КЕ, от 28.10.2023 № 126-КЕ, от 18.10.2023

№ 130-КЕ, от 18.10.2023 № 129-КЕ, от 18.10.2023 № 128-КЕ.

Техническими заданиями к Договорам предусмотрено выполнение дополнения лесных культур (посадка взамен погибших растений) при условии приживаемости меньше установленных норм. Пунктом 9.1 Договоров стороны договорились, что подрядчик обязуется в течение гарантийного срока (36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ) устранить за свой счет проявившиеся за этот период дефекты в виде гибели объектов лесного хозяйства на всей или части площади каждого участка, или в случае предъявления претензий к качеству выполненных Работ со стороны контролирующих органов или собственника земель, за исключением случаев, когда дефекты возникли по вине Заказчика или третьих лиц.

Состав проектов и порядок их разработки утвержден приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» (далее – Правила № 1024).

В соответствии с пунктом 10 Правил № 1024 лесовосстановительные мероприятия на землях, предназначенных для лесовосстановления, осуществляемые лицами, указанными в подпунктах «в» и «г» пункта 6 Правил, в соответствии с проектом лесовосстановления, считаются выполненными в случае достижения проектных показателей в соответствии с проектом лесовосстановления в части достижения 6 количественных показателей жизнеспособных растений основных лесных древесных пород, указанных в проекте лесовосстановления.

В соответствие с пунктом 49 Приказа Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» (далее – приказ Минприроды) дополнение лесных культур осуществляется: - сеянцами с закрытой корневой системой весной, летом, за исключением засушливых периодов, и осенью не позднее чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы; - сеянцами с открытой корневой системой весной (до начала развертывания почек у сеянцев, саженцев) и осенью не позднее чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы. За исключением лесных участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми избыточно увлажненными почвами. Посадка в рамках договоров с подрядчиком выполнена на песчаных почвах.

Ответчиком не оспариваются результаты произведенной Департаментом инвентаризации выполненных мероприятий по лесовосстановлению, в соответствии с которыми приживаемость растений составила менее планируемых показателей, что свидетельствует о ненадлежащей реализации проектов лесовосстановления и является основанием для понуждения арендатора к проведению дополнительных работ.

Вопреки доводам ответчика и третьего лица, разработанными проектами лесовосстановления предусмотрен мероприятия по дополнению лесных культур в 2023, 2024, 2025 годах, следовательно, на ответчика возложено обязательство осуществить мероприятия, направленные на улучшение условий для приживаемости и роста культивируемых пород, однако такие мероприятия ответчиком не выполнялись, что следует из материалов дела и обществом не оспаривается.

В рассматриваемом случае Департамент обоснованно предъявил требования к арендатору лесных участков, поскольку именно у него возникло невыполненное обязательство по лесовосстановлению на участках Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, квартал 235 выдел 18, Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, урочище «Аганские озера» квартал 116 выделы 22, 27, 28, 34.

Претензии к качеству выполненных работ подрядчика ООО «ОСИП» не могут освобождать АО «Самотлорнефтегаз» от обязанности исполнить взятые на себя обязательства.

С учетом изложенного, заявленные требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению.

При этом, в соответствии с п. 49 Приказа Минприроды России от 29.12.2021 № 1024 «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» дополнение лесных культур осуществляется:

-сеянцами с закрытой корневой системой весной, летом, за исключением засушливых периодов, и осенью не позднее чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы;

- сеянцами с открытой корневой системой весной (до начала развертывания почек у сеянцев, саженцев) и осенью не позднее чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы.

Учитывая период, сроки выполнения работ по лесовосстановлению, суд полагает возможным и обоснованным возложить на ответчика обязанность по дополнению участков компенсационного лесовосстановления до проектных показателей на участках Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, квартал 235 выдел 18, Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, урочище «Аганские озера» квартал 116 выделы 22, 27, 28, 34 (фактическое выполнение работ) в срок до 21.10.2026, приемка работ - в срок до 31.10.2026.

Истец просит обязать ответчика выполнить работы в срок до 01.07.2026, что

не может быть признано судом разумным и исполнимым, принимая во внимание климатические условия, необходимые для выполнения работ по лесовосстановлению

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на момент принятия судом настоящего решения.

Суд признаёт разумным и исполнимым установление ответчику срока выполнения мероприятий до 21.10.2026.

В силу пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации истец освобожден от уплаты государственной пошлины. В связи с удовлетворением исковых требований и в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Российской Федерации государственная пошлина в размере

100 000 рублей подлежит взысканию в доход федерального бюджета с ответчика.

руководствуясь статьями 167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Принять уточнения исковых требований.

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать акционерное общество «Самотлорнефтегаз» произвести мероприятия по агротехническому уходу путем дополнения участков компенсационного лесовосстановления до проектных показателей на участках Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, квартал 235 выдел 18, Аганское лесничество, Колек-Еганское участковое лесничество, урочище «Аганские озера» квартал 116 выделы 22, 27, 28, 34 (фактическое выполнение работ) в срок до 21.10.2026, приемка работ - в срок до 31.10.2026.

Обязать акционерное общество «Самотлорнефтегаз» внести изменения в проект лесовосстановления в части продления обязательств по агротехническому уходу за 2025 год — в 2027 году, обязательств по агротехническому уходу за 2026 год - в 2028 году.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с акционерное общество «Самотлорнефтегаз» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 100 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента его принятия

в Восьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Судья Г.Х. Янбаева