1257/2017-51114(3) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 08 марта 2017 года 

по делу А33-962/2017 Красноярск 

01 марта 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Россий- ской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования  удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт № 542-010-16/Ф.2016.384013 от  14.12.2016 «На выполнение работ по сохранению (выполнению консервационных и противо- аварийных работ) объекта культурного наследия Здания, в котором размещалось издатель- ство «Приступ», находящегося в собственности 

<

...>- ра, 67», заключенный между краевым государственным казенным учреждением "Управле- ние капитального строительства" и обществом с ограниченной ответственностью "Пром- строй", изложив:  

пункт 2.2 в следующей редакции: «Срок выполнения работ: 

Дата начала выполнения работ - на следующий день с даты получения разрешения на про- ведение работ в установленном порядке;  

Дата окончания выполнения работ - «30» августа 2017 года»; пункт 13.4 в следующей редакции: 

«Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до  31.12.2017. Окончание срока действия контракте не освобождает стороны от исполнения  своих обязательств».  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.  

Судья О.С. Щёлокова