АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть принята 14.08.2017 г.)

Дело № А82-6748/2017

г. Ярославль

26 августа 2017 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Максимовой Д.М., помощником судьи Дыбцыной Е.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" (ИНН  7604091028, ОГРН 1067604078860) 

к  Открытому акционерному обществу "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   10022702.15  руб.

при участии:

от истца – ФИО2 – представитель по доверенности от 17.04.2017 г.

от ответчика – не явились

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" о взыскании 11 288 648 руб. 95 коп., в том числе 10 711 462 руб. 39 коп. задолженность за выполненные работы, 577 186 руб. 56 коп. проценты. 

Истец в ходе судебного рассмотрения спора в порядке ст. 49 АПК РФ уменьшил требования, просил взыскать сумму задолженности в размере 9 445 515 руб. 59 коп., сумму процентов в размере 577 186 руб. 56 коп. по состоянию на 10.04.2017 г.

Ответчик в ходе судебного рассмотрения спора заявлял о возможности заключения мирового соглашения.

Истец в судебном заседании иск в уточнено объеме поддержал, указал, что мировое соглашение сторонами не достигнуто. 

Ответчик в заседание не явился, извещен, возражений относительно исковых требований не заявил.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

12.01.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №1/15, согласно п.п. 2, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами установку железобетонных опор линии электропередач в связи с технологическим присоединением ФИО3 в д. Ноготино (дог. 704/э от 30.12.2013) и ФИО4 в д. Комарово. Ориентировочная стоимость работ составляет 97 633 руб. 20 коп.

01.04.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №10/15П, согласно п.п. 2, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами установку железобетонных опор линии электропередач в связи с технологическим присоединением в 

<

...> работ составляет 97 659 руб. 16 коп.

02.10.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №123/15-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами строительство участка ВЛ-0,4 кВ в д. Боровая в связи с технологическим присоединением земельного участка ФИО5 Ориентировочная стоимость работ составляет 45 116 руб. 12 коп.

24.11.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №145/15-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами капитальному ремонту ВЛ 0,4 КВ на ул. Заводская п. Кузнечиха ЯМР. Ориентировочная стоимость работ составляет 2 900 707 руб. 86 коп.

02.02.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №147, согласно п.п. 1.1, 3.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить составление технической документации на модернизацию воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ в д. Боровая Ярославского муниципального района. Стоимость работ составляет 99 120 руб. 

18.12.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №156/15-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами капитальный ремонт ВЛ 10 кВ в д. Белкино, капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ ул. Волжская, п. Красный Холм ЯМР. Стоимость работ составляет 455 716 руб. 

01.04.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №41/15П, согласно п.п. 1.1, 3.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство составить техническую документацию на модернизацию воздушной линии электроснабжения ВЛ-0,4 кВ по ул. Заводской 1-я линия, 2-я линия, 3-я линия, п. Речной Ярославского муниципального района. Стоимость работ составляет 99 120 руб. 

01.06.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №46/16-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами установку ж/б опор по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ в п. Туношна – 26 ЯМР. Стоимость работ составляет 25 960 руб. 

29.05.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №59/15П, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами установку опор СВ 95-3 (с установкой захвата укоса в случае сложных опор, захват укоса поставляет исполнитель), выезд на место с представителем заказчика для определения плана производства работ, составление плана-схемы производства работ с разбивкой линии для установки ж/б опор, согласование с Заказчиком, осуществление всех согласований, необходимых для установки опор (связь, газ, землеотвод, водоснабжение, канализация), в том числе с собственниками земельных участков, вблизи которых устанавливаются опоры. Стоимость работ составляет 630 000 руб. 

15.06.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Покупатель/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Поставщик/ заключен договор поставки №8, согласно п.п. 1.1, 2.1 которого Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию провод СИП в порядке, предусмотренном настоящим договором, в ассортименте, количестве и в сроки согласно спецификации, а Покупатель принять и оплатить данную продукцию. Общая стоимость продукции составляет 228 700 руб. 

11.09.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Покупатель/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Поставщик/ заключен договор поставки №95/15-3, согласно п.п. 1.1, 2.1 которого Поставщик обязуется поставить Покупателю железобетонные опоры СВ 95-3-2с в порядке, предусмотренном настоящим договором и в количестве и сроки согласно спецификации, а Покупатель принять и оплатить данную продукцию. Общая стоимость продукции составляет 390 000 руб. 

07.10.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №27 108/15Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ-0,4 КВ в п. Красное Кузнечихинского с/п. Стоимость работ составляет 1 200 000 руб. 

04.05.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №23/16-Р, согласно п.п. 1.1, 3.1 которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить составление технической документации на модернизацию воздушной линии электроснабжения 0,4 кВ от ТП «Спортзал» д. Карабиха ФИО6 Ярославского муниципального района. Стоимость работ составляет 98 000 руб. 

12.10.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №85/16-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами выполнение работ по модернизации кабельной линии КЛ-10 кВ Ф8 ПС «Леская Поляна» (п. Лесная Поляна ЯМР в соответствии с техническим заданием. Стоимость работ составляет 900 000 руб. 

20.09.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №79/16-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами выполнение работ по модернизации ВЛ-0,4 кВ д. Белкино ФИО6 ЯМР в соответствии с техническим заданием. Стоимость работ составляет 510 000 руб. 

25.10.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №88/16-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами выполнение работ по модернизации ВЛ-0,4 кВ 

<

...> в соответствии с техническим заданием. Стоимость работ составляет 1 495 000 руб. 

15.04.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №13/16Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами установку опор СВ 95-3, выезд на место с представителем заказчика для определения плана производства работ, составление плана-схемы производства работ с разбивкой линии для установки ж/б опор, согласование с Заказчиком, осуществление всех согласований, необходимых для установки опор (связь, газ, землеотвод, водоснабжение, канализация), в том числе с собственниками земельных участков, вблизи которых устанавливаются опоры. Стоимость работ составляет 1 416 000 руб. 

10.10.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №82/16-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами выполнение работ по модернизации ВЛ-0,4 кВ 

<

...> в соответствии с техническим заданием. Стоимость работ составляет 1 050 000 руб. 

12.10.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №84/16-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами выполнение работ по модернизации ВЛ-0,4 кВ п. Лесная поляна ЯМР в соответствии с техническим заданием. Стоимость работ составляет 1 296 000 руб. 

01.07.2016 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Подрядчик/ заключен договор подряда №54/16-Р, согласно п.п. 2.1, 4.1 которого Подрядчик, в счет оговоренной в разделе 4 настоящего договора стоимости, выполняет за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами выполнение работ по модернизации ВЛ-0,4 кВ от ТП «Спортзал» п. Карабиха ФИО6 ЯМР в соответствии с техническим заданием. Стоимость работ составляет 1 780 000 руб. 

16.03.2015 г. между открытым акционерным обществом "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье" /Покупатель/ и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" /Поставщик/ заключен договор поставки №8/15П, согласно п.п. 1.1, 2.1 которого Поставщик обязуется поставить Покупателю продукцию железобетонные опоры СВ 95-3-2с в порядке, предусмотренном настоящим договором, и в количестве и сроки согласно спецификации, а Покупатель принять и оплатить данную продукцию. Общая стоимость продукции составляет 692 000 руб., в том числе НДС 18%.

Во исполнение условий заключенных договоров истцом выполнены согласованные работы, результат работ сдан ответчику, согласованный товар был  поставлен ответчику, им принят, не оплачен. 

По данным истца за ответчиком числилась задолженность в размере 10 711 462 руб. 39 коп.

Отсутствие оплаты задолженности послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. 

Претензией от 20.04.2017 г. истец потребовал оплаты долга в полном объеме. Согласно проставленному штампу претензия получена 21.04.2017 г. за исходящим номером №917.

В ходе судебного рассмотрения спора ответчиком частично погашен основной долг, в связи с чем истец уменьшил исковые требования, просил взыскать сумму долга в размере 9 445 515 руб. 59 коп., в том числе 1 377 213 руб. 20 коп. задолженность по Договору №145/15-Р от 24.11.2015 г., 468 707 руб. 80 коп. задолженность по Договору №156/15-Р от 18.12.2015 г., 10 515 руб. 09 коп. задолженность по Договору №46/16-Р от 01.06.2016 г., 226 199 руб. 68 коп. задолженность по Договору №95/13-З от 11.09.2015 г., 446 689 руб. 66 коп. задолженность по Договору №108/15Р от 07.10.2015 г., 706 817 руб. 25 коп. задолженность по Договору 85/16-Р от 12.10.2016 г., 1 482 118 руб. 15 коп. задолженность по Договору №54/16-Р от 01.07.2016 г., 520 466 руб. 91 коп. задолженность по Договору №79/16-Р от 20.09.2016 г., 1 363 769 руб. 73 коп. задолженность по Договору №88/16-Р от 25.10.2016 г., 790 600 руб. задолженность по Договору 13/16Р от 15.04.2016 г., 774 776 руб. 68 коп. задолженность по Договору №82/16-Р от 10.10.2016 г., 1 277 641 руб. 48 коп. задолженность по Договору №84/16-Р от 12.10.2016 г.

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования в части основного долга подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В  силу ч.1 ст. 702 ГК РФ  по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В соответствии со статьями 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации продавец передал товар и исполнил свои обязательства перед покупателем. 

Согласно части 1 статьи 516 Гражданского кодекса Российской Федерации покупатель обязан оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Факт исполнения принятых на себя договорных обязательств со стороны истца и принятия результатов работы ответчиком подтверждается материалами дела, в том числе Актами о приемке выполненных работ, товарными накладными, подписанными без разногласий, ответчиком не оспаривается.

Возражения ответчиком не заявлены.

Задолженность подтверждена ответчиком путем подписания актов сверки. 

При имеющихся обстоятельствах требования истца о взыскании стоимости выполненных работ в сумме 9 445 515 руб. 59 коп. являются обоснованными,  подлежат удовлетворению.

В силу п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате, подлежат уплате проценты на сумму этих средств. 

Факт просрочки исполнения денежного обязательства подтверждается материалами дела, ответчиком не оспаривается. При указанных обстоятельствах требование о взыскании процентов являются обоснованными, соответствуют ст. 395 ГК РФ.

По расчету истца сумма процентов составляет 577 186 руб. 56 коп. по состоянию на 10.04.2017 г.

Расчет процентов не оспорен, контррасчет не представлен.

В указанном размере проценты подлежат взысканию с ответчика. 

В силу ст. 110 АПК РФ расходы по уплате госпошлины по делу относятся на ответчика. В излишне уплаченной части пошлина подлежит возврату из федерального бюджета. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  Открытого акционерного общества "Жилищно-коммунальное хозяйство "Заволжье"  (ИНН  7627032974, ОГРН  1087627001582) в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" (ИНН 7604091028, ОГРН 1067604078860) 9 445 515 руб. 59 коп. задолженность, 577 186 руб. 56 коп. проценты, 73 114 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" из федерального бюджета 6 329 руб. 24 коп. госпошлины, излишне уплаченной по платежному поручению № 107 от 02.05.2017г. на основании п/п 1 п. 1 ст. 333.40 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья

Бессонова И.Ю.