1000010_2492170  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-10864/2019

г. Белгород

29 января 2020 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Ю.Ю. Дробышева при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Крикуновой Л.Е. 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Администрации  Красногвардейского района (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "СК  Эталонстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) с привлечением к участию в деле  в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, ФОНД ЖКХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>), об обязании устранить дефекты по договору  

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, представитель по доверенности № 165-01-04/56 от 10.01.2020 г.  (после перерыва – не явился, извещен);  

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом; от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Администрации Красногвардейского района (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить полностью.  

Обязать ООО "СК Эталонстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в срок до  01.07.2020 г безвозмездно устранить дефекты по договору № 3 от 20.04.2015 г. на  выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по  адресу: ул. Транспортная, д. 10, с. Ливенка, Красногвардейский район Белгородская  область, а именно:  

- выполнить ремонт цокольной части, т. е. устранить отслоение окрашенного слоя  цокольной части по периметру МКД;  

- ликвидировать провисание желобов на стыке (водосточная система);  

- произвести опуск трех водосточных труб на установленную высоту от отмостки; 

- устранить недостаточный зазор между колпаками и вентиляционной шахтой (не  

менее 80 мм); 

- загерметизировать стыки между оконными блоками и проемом в местах общего  

пользования. 

Взыскать с ООО "СК Эталонстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  

доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения  

в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  

апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Ю.Ю. Дробышев